		2017 회계연도 특수공시 사업목록

연번	사업명	추진부서	담당자	전화번호	비고
1	화암면 목욕탕 신축사업	주민생활 지원과	안성환	560-2234
2	고한11리 재해위험지구 정비사업	안전 건설과	고승구	560-2496
3	소방취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	안전 건설과	윤정아	560-2489
4	정선읍 소재지 종합정비 사업	도시 건축과	유수근	560-2468
5	농업기계임대사업소 신동분소 신축	농업 기술센터	김병철	560-2554

1. 화암면 목욕탕 신축사업

	필요성
❍ 낙후지역의 복지인프라 확충 및 정주여건 개선 ❍ 지역주민의 보건위생환경 개선과 힐리 공간 제공

사업개요

위    치 : 정선군 화암면 화암리 390번지(화암면사무소 뒤)

사 업 량 : A=225㎡ (68평, 지상1층)

사 업 비 : 1,015백만원

주요시설 : 냉․온탕, 사우나실, 탈의실, 보일러실 등

사업기간 : 2015년 ~ 2017년(3년)

추진현황

목욕탕 신축에 따른 지역주민 건의서 제출 : 2014. 03. 16.

목욕탕 신축 방침결정 : 2014. 03. 30.

기본 및 실시설계용역 완료 : 2015. 12. 02.

2016년 제1회 추경예산 확보 (994,000천원) : 2016. 05. 20.

BF인증 설계용역 : 2016. 09. 09.

화암면 목욕탕 신축공사 착공 : 2016. 10. 31

화암면 목욕탕 신축공사 준공 : 2017. 06. 05.(준공검사 완료)

화암목욕탕 위탁 운영에 따른 인수․인계(정선군시설관리공단) : 2017. 06. 16

화암면 목욕탕 준공식 : 2017. 06. 21.

화암면 목욕탕 위탁 운영 개시 : 2017. 06. 27.(정선군시설관리공단)

화암면 목욕탕 BF 본인증 : 2017. 09. 19.(우수등급)

향후계획

이용객들이 불편 없이 이용할 수 있도록 관리 및 운영 추진

2. 고한11리 재해위험지구 정비사업

	필요성
❍ 고한11리(막골) 일원 주택밀집지역 경사지 지반약화 및 토석유출 등 붕괴위험 우려 ❍ 저감대책 및 정비사업 추진으로 붕괴위험해소를 통한 인명피해 예방

사업개요

위    치 : 고한읍 고한리 50-83번지 일원(막골)

사 업 량 : 지구면적 10,188㎡, 건물철거 21동, 세천정비 L=127m, 사방댐 1식, 낙차공 3개소, 사면보강 L=107m 등

총사 업 비 : 4,810백만원(국비 2,405, 도비 481, 군비 1,924)

1) 2017년도 : 1,135백만원

사업기간 : 2015년 ~ 2017년(3년)

추진실적

❍ 자연재해위험개선지구 지정     : 2012. 4. 13.(붕괴위험 “가”등급)

❍ 주민 설명회                  : 2015. 3. 31.

❍ 실시설계 사전심의(행정안전부) : 2015. 9. 23.

❍ 공사 착공                    : 2016. 4. 18.

❍ 공사 준공(토목공사)           : 2017. 9. 21.

향후 계획

❍ 잔여사업 마무리 : 2018. 12.

사진대장

정비 전

정비 후

3. 소방취약계층 주택용 소방시설 설치 지원

	필요성
❍ 소방취약계층 화재발생시 소방시철 미설치로 인한 재난사고 발생을 사전에 예방함으로써 군민 주거생활 안정에 기여

사업개요

지원근거 : 정선군 소방취약계층 주택용 소방시설 설치 지원에 관한 조례

지원시설 : 소화기 1, 화재감지기 2(가구별 최대 4개까지 지원)

지원대상 : 저소득층

- 수급자, 차상위계층, 장애인, 다문화가족, 한부모가족, 청소년가장

추진실적

❍ 조례 제정            :  2016. 6. 9.

❍ 지원대상 현황 조사   : 2016. 9. 8. ~ 2016. 9. 20.

❍ 사업기간             : 2017. 1. 5. ~ 4. 30.

❍ 지원결과             : 1,314가구, 94,990천원

- 소화기 1,219대, 경보감지기 4,301개 지원

향후 계획

❍ 홍보 강화 및 가입 독려를 통한 신청률 제고

❍ 소방시설 설치 후 지속적 사후 관리(정선소방서 협조)

4. 정선읍 소재지 종합정비 사업

	필요성
❍ 농촌지역의 거점공간인 읍소재지에 교통, 문화, 복지시설등의 주민 시설을 확충함으로써, 주민정주여건 개선 및 삶의 질 향상에 기여 ❍ 농촌의 쾌적한 환경 증진 및 도시민의 농촌유입과 지역별 특색있는 발전도모

사업개요

위    치 : 정선읍 봉양리, 북실리 일원

사 업 량 : 오반천 인도교 L=70m, 정선5일장 아케이드 L=150m

전선지중화 및 가로경관 조성 L=1,400m, 주차장조성 2,700㎡

사 업 비 : 9,000백만원(국비6,300, 도비540, 군비2,160)

사업기간 : 2014 ~ 2017년(4년간)

추진현황

읍소재지종합정비사업 선정            : 2013. 10월

기본계획승인(한국농어촌공사)          : 2015. 3월

시행계획승인                         : 2016. 1월

사업발주 및 착공                     : 2016. 6월

일부사업장(아케이트,인도교) 완료       : 2016. 12월

사업준공                             : 2017. 12월

향후계획

잔여사업 마무리 : 2018. 12.

5. 농업기계 임대사업소 신동분소 신축

	필요성
❍ 농업기계 원거리 배송 불편 해소 ❍ 농가 자가 구입비 경감으로 농업경영 안정화

사업개요

위    치 : 정선군 신동읍 예미리

사 업 량 : 655㎡(지상2층), 농업기계 29종 88대

사 업 비 : 1,636백만원(국비 600, 도비 120, 군비916)

사업기간 : 2017 ~ 2018년(2년간)

추진현황

농업기계 임대사업소 신동분소 부지매입  : 2017. 3월

농업기계 보관 창고 실시설계 용역       : 2017. 4월

농업기계 설치 행정절차 이행             : 2017. 6월

시설공사 착공                         : 2017. 9월

시설공사 착공                         : 2018. 3월

향후계획

임대 농업기계 구입 및 운영             : ~ 2018. 12월