투융자심사 사업 총괄

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
정선읍 소재지 종합정비사업	9,000	5,029	3,918	1,053	2018	2013	90
농어촌도로 208호 도로 확포장공사	3,500	800	150	2,550	2022	2014	26
도로와 지하시설물 (상·하수도)DB구축 사업	2,529	601	300	1,628	2019	2014	35.6
사계절 계곡 수 체험장 조성사업	2,550	704	1,846	0	2017	2014	100
야생화단지 쿠키체험관 조성	2,843	648	660	1,535	2019	2014	46
정선 군립병원 기능보강	28,966	7,482	871	20,613	2,018	2014	60
정선 아리랑시장 시설 현대화사업	3,756	1,240	2,517	0	2018	2014	100
지장천 하수처리시설 증설사업	16,855	1,550	8,852	6,453	2019	2014	85
동강 녹색 모험의 숲 조성	9,740	4,668	2,086	2,986	2018	2015	60%
국민여가캠핑장 교량 가설공사	2,500	51	2,449	-	2017	2016	100
정선 화암동굴 개선사업	3,900	0	0	3,900	2020	2016	3
화암 창조적마을 만들기 사업	3,380	507	300	2,573	2020	2016	20
청소년수련관 신축	7,659	781	600	6,278	2019	2016	35
급경사지 붕괴 위험지역 정비사업	24,030	5,139	5,231	13,660	2019	2016	66
올림픽 경관도로 개설사업	2,000	1,000	1,000	0	2017	2016	100
2017년 정선군 융복합지원사업	1,443	0	1,443	0	2018	2016	80
골지천 유역 침사지 비점오염저감사업	7,600	4,565	2,952	83	2019	2016	20%
환경친화적 6차산업 Village 조성	4,130	1,170	1,915	807	2018	2016	80
국가생태문화 탐방로 조성사업	6,000	500	800	4,700	2019	2016	20%
용탄천 생태하천 복원사업	19,000	-	2,500	16,500	2019	2016	20%
행복주택 건립사업	18,300	1,400	5,766	11,134	2019	2016	35%
전통김치 6차산업화 지원사업	6,100	2	4,398	3,000	2018	2016	95
활기찬 농촌프로젝트 시범사업	8,000	49	4,875	3,776	2018	2016	95
고한읍 소1-21호선(고토일) 도로 확포장공사	4,350	397	1,500	1,800	2018	2016	20
아우라지관광지 개발사업	7,000	0	1,400	5,600	2020	2017	20
군도4호(선평-가수) 도로개설공사	9,800	0	4,700	5,100	2019	2017	40
동계올림픽 G-day 기념행사 지원	150	88	35	0	2017	2017	100
제45회 KBS배 전국육상경기대회 겸 2017 국제오픈육상경기대회	200	-	200	-	2017	2017	100
야생화마을 추리극장	3,918	0	793	3,125	2019	2017	50%
제1회 전국5일장 박람회	1,600	0	400	1,200	2019	2017	67
군도7호(사북~직전) 도로개설공사	16,000	0	600	15,400	2021	2017	5
사과APC 보완사업	2,600	0	0	2,600	2018	2017	30
주례마을 어울연못 조성	6,000	0	0	6,000	2020	2017	5
원빈 소풍가던길 조성	2,400	0	0	2,400	2020	2017	8

사업명

정선읍 소재지 종합정비사업

담당자

도시건축과 유수근(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌지역의 거점인 읍소재지의 기초생활기반확충, 지역경관개선, 역량강화 등을 통하여 주민들의 정주서비스 기능의 충족과 농어촌 지역의 중심거점 공간으로 육성하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2018년

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 봉양리, 북실리, 애산리 일원

○ 규 모 : 오반천 인도교, 주차장 조성, 정선 5일장 아케이트

전기통신선로 지중화, 가로경관정비, 지역역량 강화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	10,000	5,029	3,918	1,053
국 비	6,300	3,518	2,745	37
시 도 비	540	262	275	3
시군구비	3,160	1,249	898	1,013

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 기본계획 승인   : 2015. 03. 04.

○ 시행계획 승인   : 2016. 01. 27.

○ 공사 착공       : 2016. 05. 01.

○ 1차 공사분 준공 : 2017. 12. 31.

□ 향후계획

○ 2차 지중화 및 가로경관 사업 추진 : 2018. 12. 30.

○ 사업 정산                        : 2019. 06. 30.

사업명

고한읍 중2-8호(고토일)도시계획도로 확포장

담당자

도시건축과 유수근(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소한 군계획시설 확장을 통한 보행자 교통사고 예방 및 원활한 교통 소통으로 주민불편 해소 및 정주여건 개선.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 강원도 정선군 고한읍 고토일길, 지장천로 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 L=1,330m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,491백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,491	4,491
국 비
시 도 비
탄광지역개발기금	4,491	4,491

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계         : 2013. 03. 20.

○ 사업발주 및 착공 : 2014. 09. 24.

○ 공사 준공        : 2016. 06. 30.

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

농어촌도로 208호 도로 확포장공사

담당자

안전건설과 김홍섭

(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌도로 확・포장사업 추진으로 도로망 확충 및 도로통행불편 해소

○ 농산물 유통물류비용 절감과 주민소득증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2022.

○ 위 치 : 정선군 신동읍 방제리

○ 규 모 : 도로확・포장 L= 2.06km B=6.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,500	800	150	30	2,520
국 비
시 도 비	200	200
시군구비	3,300	600	150	30	2,520
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)

○ 도로확・포장 L= 540.5m 완료

□ 향후계획

○ 2018. 10월 ~ 2019. 2월 : 측량 및 설계

○ 2019. 3월 ~ 2019. 12월 : 사업추진

사업명

도로와 지하시설물

(상·하수도)DB구축 사업

담당자

민원봉사과 이창남(☎560-2183)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로와 지하시설물(상·하수도) DB를 통합 구축하여 각종 재난사고의 사전예방과 군민 생활의 안전 도모, 효율적인 도로기반 시설물 유지관리

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년(5년)

○ 위 치 : 정선·고한·사북읍 일원

○ 규 모 : 404.888㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,529백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,529	601	300	216	1,412
국 비	1,517	360	180	130	847
시 도 비
시군구비	1,012	241	120	86	565
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35.6%)

○ 정선·고한·사북 도시계획지역 일대 172.8㎞ 구축 완료

- 도로 44.2㎞, 상수도 50.0㎞, 하수도 78.6㎞

□ 향후계획

○ 정선 도시계획지역 및 고한·사북읍 기 구축지역과 강원랜드 일대 연결 구축 조기 추진

○ 정선·고한·사북읍 일대의 계획된 물량에 대하여 사업기한 내 처리

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

- (당초) 2015년 ~ 2017년 ⇒ (현재) 2015년 ~ 2019년(5년)

사업명

사계절 계곡수 체험장 조성사업

담당자

문화관광과 이정혁(☎560-2362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북평면 북평리 일원의 청정계곡과 자연지형을 활용한 아이템을 발굴하여       다양한 체험활동이 가능한 관광시설을 도입

○ 관광자원시설 연계를 통하여 체류형 관광이 가능하도록 함으로써 지역

경기 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 정선군 북평면 북평리(나전역 주변) 237-12번지 일원

○ 규 모 : 계곡수 체험장 1개소, 바닥분수 1식, 조형물 설치 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,550백만원(국비 1,250, 도비 375, 군비 925)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,550	704	1,846
국 비	1,250	345	905
시 도 비	375	104	271
시군구비	925	255	670
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 착 공 : 2016. 12월

○ 준 공 : 2017. 11월

□ 향후계획

○ 사업장 관리

사업명

야생화단지 및 쿠키체험장 조성

담당자

문화관광과 이정혁(☎560-2362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐광지역 관광자원화 2차 사업으로 함백산 야생화, 삼탄아트마인 등 주변

관광지와 연계한 체험시설 도입 및 관광자원 개발로 관광객 유입 증대

및 지역경기 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 정선군 고한읍 고한리(삼탄아크마인 위) 산216-1번지 일원

○ 규 모 : 야생화단지 조성 24,000㎡, 조형물설치 1식, 야생화쿠키체험장 1개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,843백만원(국비 1,421.5, 도비 426.5, 군비 995)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,843	648	660	0	1,535
국 비	1,421.5	324	330	0	767.5
시 도 비	426.5	97.2	99	0	230.3
시군구비	995	226.8	231	0	537.2
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 46%)

○ 야생화단지 조성공사 착공 : 2016. 12월

○ 준공(1차분, 2차분) : 2018. 07월

□ 향후계획

○ 야생화단지 사업장관리 : 2018. 07월 ~

○ 야생화쿠키체험장 조성사업 기본 및 실시설계용역 : 2019.01월 ~

사업명

정선 군립병원 기능보강 사업

담당자

보건소 정의일(☎560-2060)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군립병원 시설 및 장비가 노후되어 시설·장비에 대한 보강을 통해 양질       의 의료환경을 구축하여 지역주민 건강증진에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018

○ 위 치 : 강원도 정선군 사북읍 지정천로 727

○ 규 모 : 병원 리모델링 2동, 장비보강, 부설주차장 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,966백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	28,966	7,482	871	20,613
시 도 비	2,000	1,000	419	581
시군구비	26,366	6,482	128	19,756
기 타	600		324	276

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%)

○ 군립병원 리모델링 및 장례식장 증축공사 착공 : ‘17. 6. 28.

○ 군립병원 부설주차장 신축공사 착공 : ‘18. 5. 15.

○ 군립병원 리모델링 및 장례식장 증축공사 일시중지 : ‘18. 7. 5. ~

□ 향후계획

○ 시설개선 및 장비보강 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비		비 고
	당 초	변 경
계	23,000	28,966
설계변경	23,000	26,066	설계변경에 따른 사업비 추가
부설주차장 설치	-	2,900	부설주차장 추가 설치

사업명

정선아리랑시장 시설현대화사업

담당자

지역경제과 이기영(☎560-2440)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국 명품 정선 5일장의 지속적 성장과 다양한 고객층에게 서비스 제공을 위한 고객지원센터 신축 필요

○ 고객지원센터 신축을 통한 관광객 쉼터, 전시회 공간 등 새로운 볼거리 장소 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘15. ~ ’17

○ 위 치 : 정선읍 봉양리 360-5번지 외 3필지

○ 내 용 : 지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,756백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후(매년)
계	3,756	1,240	2,516	0	0
국 비	2,010	500	1,510
시 도 비	201	50	151
시군구비	1,545	690	855
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 11월 : 발주의뢰

○ 2016. 12월 : 업체선정

○ 2016. 12월 : 착공

○ 2017. 12월 : 준공

□ 향후계획

○ 고객지원센터 운영

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증액(3,000백만원 → 3,756백만원, 증 756백만원)

- 설계변경에 따른 사업비 증가

사업명

지장천 하수처리시설 증설사업

담당자

수질환경사업소 조윤희(☎560-2524)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 지장천 하수처리시설 처리구역내 개발여건 변경 및 유동인구 증가에 따른 하수 발생량 증가로 기존 하수처리시설 용량 부족

◦ 시설용량 증설을 통한 발생 하수의 전량 차집과 안정적인 처리로 지방하천 수질오염 방지 및 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년(5년)

○ 위 치 : 남면 무릉리 425번지 일원

○ 규 모 : 처리용량 증설 Q=3,500톤/일(기존용량 Q=6,000톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,855백만원(국 11,799, 기금 3,034, 군 2,022)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	16,855	1,550	6,027	9,278
국 비	11,799	1,381	4,633	5,785
시 도 비
시군구비	2,022	69	342	1,611
지 방 채
민간자본
기 타	3,034	100	1,052	1,882

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95)

가. 1차분 착공 : 2015. 10월 / 준공 2017. 09월

나. 2차분 착공 : 2016. 06월 / 공정률 99%

다. 3차분 착공 : 2017. 11월 / 공정률 82%

□ 향후계획

가. 2차분 준공           : 2018. 09월

나. 3차분 및 전체분 준공 : 2018. 12월

사업명

동강 녹색 모험의 숲 조성사업

담당자

환경산림과 전인수(☎560-2330)

□ 사업목적 및 필요성

○ 병방산 군립공원 일원의 수려한 산림 및 수변자원을 활용하여 관광트렌드       변화에 대응하는 종합녹색 휴양 레포츠 단지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2018년(5년간)

○ 위 치 : 병방산 군립공원 및 동강생태체험학습장 일원

○ 규 모 : 35,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,740	4,668	2,086	2,986
국 비	4,870	2,334	1,043	1,493
시 도 비	1,461	700.2	312.9	447.9
시군구비	3,409	1,633.8	730.1	1,045.1
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 기본 및 실시설계 용역 : ’14. 3 ~ 11월

○ 친수공간 및 야영장 조성 : ’14. 12 ~ ’16. 10월

○ 솔치유 공간 및 에코어드벤처코스 공사 착공 : ‘17. 6월

□ 향후계획

○ 숲속야영장, 주차장 공사 완료 : ‘18. 11월

○ 동강문화센터 등 전체공사 준공 : ’18. 12월

사업명

국민여가 캠핑장 교량가설 공사

담당자

안전건설과 김홍섭

(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여가 캠핑장 진입교량 노후 및 협소로 인한 안전사고 발생 우려

○ 열악한 도로환경을 개선하여 지역주민 생활불편 해소와 기반시설 확충으로

관광객 편의 제공 및 주민 소득증대 기여

□ 사업개요

○ 기간 : 2015. ∼ 2017.

○ 위치 : 정선읍 회동리

○ 규모 : 교량  L=61m, 진입도로 L=340m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,500	51	2,449	0	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,500	51	2,449
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업완료(2017. 11. 6.)

□ 향후계획

○ 유지관리

사업명

정선 화암동굴 개선사업

담당자

문화관광과 이정혁(☎560-2362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화암동굴내 노후 시설물 개선을 통한 쾌적하고 안전한 관람환경을 구축,       첨단 전시기법을 활용한 새로운 전시물을 설치하여

○ 관광객 요구에 능동적 대처로 관광객 유입 증대 등 지역경기 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 정선군 화암면 화암리(화암동굴) 541번지 일원

○ 규 모 : 화암동굴 재 정비(전시물 교체 및 추가) L=1.8km, A=2,800㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원(국비 1,950, 도비 585, 군비 1,365)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,900			200	3,700
국 비	1,950			100	1,850
시 도 비	585			30	555
시군구비	1,365			70	1,295
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본계획 및 타당성용역 : 2016. 02월 ~ 06월(지방재정투자심사 2016. 03월)

○ 디자인 및 실시설계용역 착수 : 2018. 02월

○ 동굴 개선사업 TF구성 : 2018. 03월

□ 향후계획

○ 디자인 및 실시설계용역 완료 : 2018. 11월

○ 단계별 사업추진 : 2019. 01월 ~

사업명

화암창조적 마을 만들기사업

담당자

문화관광과 전찬복(☎560-2363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화암면 화암리 지역공동체 활성화를 통한 지속 가능한 정주여건 조성

○ 문화관광 자원개발로 지역주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 정선군 화암면 화암 1리, 2리 일원

○ 규 모 : 기초생활기반확충사업(3개), 지역경관개선사업(4개),

지역역량강화사업(4개)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,380	507	300	1,114	1459
국 비	2,366	355	210	780	1,021
시 도 비	0
시군구비	1,014	152	90	334	438
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 기본계획수립 착수(한국농어촌공사) : 2016. 2.

○ 지역역량강화사업 추진: 2017. 3월

□ 향후계획

○ 실시설계 용역 완료 : 2018. 10.

○ 공사 착공 : 2018. 10.

사업명

청소년 수련관 건립

담당자

여성청소년과 배세환(☎560-2360)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년 활동 공간 확충을 통한 건전육성 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 정선군 정선읍 북실리 764-14

○ 규 모 : 청소년수련관 건립 1식

- 지하 1층, 지상 3층(부지 2,644.6㎡, 건물 2,810.22㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,659백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,659	781	600	2,500	3,778
국 비	5,685		223	2,000	3,462
시 도 비	387		17	150	220
시군구비	1,587	781	360	350	96
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 지하층 기초 및 전기, 기계실 완료(8월말)

□ 향후계획

○ 지하 및 3층까지 골조작업 완료(12월말)

○ 2019년 10월 준공

사업명

급경사지 붕괴 위험지역 정비사업

담당자

안전건설과 고승구

(☎560-2496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사면불량에 따른 산사태 및 낙석발생 등 붕괴위험으로부터 사면보강 및

정비를 통한 안정화 도모로 주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2019.

○ 위 치 : 강원도 정선군 남면 낙동리 산298번지 외 8개소

○ 규 모 : 사면정비 L=2,293m(피암터널 1개소, 교량 2개소, 사면보강 1식) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,030백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	24,030	5,139	5,231	5,750	7,910
국 비	12,015	2,570	2,615	2,875	3,955
시 도 비	2,403	514	523	575	791
시군구비	9,612	2,055	2,093	2,300	3,164
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ 급경사지 총 9개소 중 7개소 완료(L=1,151m)

○ 급경사지 2개소 추진 중(L=1,142m)

□ 향후계획

○ 급경사지 2개소(낙동2, 세대2 지구) 공사추진

○ 공사준공(전체) : 2019. 12월

□ 사업변경 내역

○ (사업기간 변경) 당초 2015. 8월 ~ 2018. 12월 / 변경 2015. 8월 ~ 2019. 12월

○ (변경사유) 예산배정 지연에 따른 사업기간 연장.

사업명

올림픽 경관도로 개설사업

담당자

도시건축과 유수근(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 올림픽 개최 도시로서의 주민 정주여건 개선 및 교통 불편 해소를 위해 군계획시설의 개설 및 정비 필요.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2017년

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 북실리 718-19(조양강변) 일원

○ 규 모 : 도로확포장(B=8.0m) L=513m, 캔틸레버 확장인도교(B=2.0m) L=498m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000		2,000
국 비
시 도 비
탄광지역개발기금	2,000		2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계         : 2016. 10. 27.

○ 사업발주 및 착공 : 2017. 05. 30.

○ 공사 준공        : 2017. 12. 14.

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

2017년 정선군 융복합 지원사업

담당자

지역경제과 경순현(☎560-2434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 융복합지원사업을 통하여 신재생에너지 보급에 따른 환경개선 및 탄소

배출량 감축 목표(30%) 달성에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘17. ~ ’18.

○ 위    치 : 정선군 일원

○ 대상시설 : 고한사북 보건지소외 88개소(공공시설 및 개인주택)

○ 사 업 량 : 태양광 89, 태양열 17, 지열 4, 소형풍력 2, 모니터링 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,443백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,443		1,409
국 비	757		705
시 도 비
시군구비	686		704
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2017.   1월 : 시설공사 착공

○ 2018.  10월 : 시설준공 예정

□ 향후계획

○ 2018. 12월 : 보조금 정산

사업명

골지천 유역 침사지 비점오염저감사업

담당자

환경산림과 박순희(☎560-2348)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고랭지밭 등 비점오염원 저감을 통한 수생태계 건강성 회복 및 수질개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년~2019년(4년)

○ 위 치 : 임계면 임계리 48-76번지 일원

○ 규 모 : 침사지 9,140㎥, 발생원저감사업 1식(개비온 9,543m, 우회수로 5,737m, 사면 보호 1,052㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,600	4,565	2,952	29	54
국 비	5,320	3,196	2,066	20	38
시 도 비	342	205	134	2	1
시군구비	342	205	133	2	2
기 타 (기금)	1,596	959	619	5	13

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 한국환경공단 위수탁 협약체결 : ‘16. 2. 5.

○ 유량 및 수질조사 (1차조사 ‘16.7.7~7.8, 2차조사 ’16.8.28) 완료

○ 공공측량성과 심사 (현장측량 시행 ‘16.7.24) 완료

○ 토질조사 (현장시추조사 시행 ‘16.11.19) 완료

○ 토지보상 및 토지사용승낙 완료 : ‘18. 6월

○ 침사지,발생원저감사업 기본 및 실시설계 추진중

사업명

환경친화적 6차산업 Village조성

담당자

농업기술센터 권우진(☎560-2989)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한강수계 상류지역 오염원 절감농법 추진으로 화학비료, 농약 등의 사용

량을 줄이고 6차산업과 연계하여 농가 소득 향상 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2017년(2018년 이월)

○ 위 치 : 북평면 남평리 일대

○ 규 모 : 90ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,130백만원

※ 2017년까지 사업비 불용액 : 238백만원(기금 39, 군비 199)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년(이월)	2019년 이후
계		1,170	1,915	807	-
국 비
시 도 비
시군구비	1,498	366	636	496	-
지 방 채
민간자본
기타(기금)	2,394	804	1,279	311	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 74.7%)

○ 2017년까지 총예산대비 74.7%를 집행

○ 2017년도 종료사업이나 친환경미생물배양센터 확장(배양기 증설)공사의       지연에 따른 2018년으로 이월되어 2018년 연말 모든사업 종료 계획

□ 향후계획

○ 친환경미생물배양센터 확장(배양기 증설) 공사 추진 : 현재(2018년 8월)

○ 친환경미생물배양센처 확장(배양기 증설) 공사 완료 : 2018년 11월

사업명

국가생태문화탐방로 조성사업

담당자

환경산림과 전인수(☎560-2330)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동강유역 생태․경관보전지역인 평창군, 영월군과 연계한 자연친화적 생태       문화탐방로 조성으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019년(4년간)

○ 위 치 : 정선군 정선읍 광하리 ~ 신동읍 덕천리

○ 규 모 : 탐방로 조성 전체 34㎞(정선군 25km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원(정선군 3,000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,000	500	800	800	3,900
국 비	3,000	250	400	400	1,950
시 도 비	600	50	80	80	390
시군구비	2,400	200	320	320	1,560
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 타당성검토 및 실시설계 추진 : ‘16. 11월

○ 생태경관보전지역내 행위허가 완료 : ‘17. 12월

○ 귤암쉼터 조성공사 추진 : ’17. 12 ~ ’18. 6월

□ 향후계획

○ 나리소 구간 탐방로 조성사업 발주 : ‘18. 8월

○ 나리소 구간 탐방로 조성사업 발주 : ‘18. 12월

사업명

용탄천 생태하천 복원사업

담당자

환경산림과 전문표(☎560-2332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용탄천은 동강 본류와 합류되지 못하고 물길이 단절되어 하천생태계 훼손 심각

○ 물길 연결을 위한 하천생태계복원 및 생태관광자원 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년(3년)

○ 위 치 : 정선읍 회동리 가리왕산휴양림 매표소~용탄리 한강합류점

○ 규 모 : 생태하천복원 5.0km, 퇴적물준설 및 생태하안조성 L=1km, 준설 60,000㎥여울, 소 및 생물서식처 조성 12개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	19,000		2,500	4,000	12,500
국 비	9,500		1,000	2,000	6,500
시 도 비	6,650		700	1,400	4,550
시군구비	2,850		800	600	1,450

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 생태하천복원 계획 심의완료(환경부) 및 한국환경공단 위·수탁협약 체결 : ‘16. 4월

○ 용탄천 생태하천복원 중앙투자심사(적정) 완료 : ‘16. 6월

○ 기본계획(안) 보고 및 저수로 선형 계획 검토 : ‘18. 4월

○ 강원도 과업구간 변경 협의 : ‘18. 5월

□ 향후계획

○ 과업구간 변경에 따른 환경부 협의 : ‘18. 7월

○ 기본 및 실시설계 완료 : ‘18. 9월

○ 시설공사 착공 : ‘19. 9월

□ 사업변경 내역

○ 설계중 전구간 암반의 층리·절리발달로 전구간 차수로 인해 사업변경 협의(2018년 예산확보는 가능)

사업명

행복주택 건립사업

담당자

도시건축과 신상진(☎560-2472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐광지역 내 신혼부부, 젊은 계층 및 취약 계층의 주거안정 도모

○ 젊은 계층의 유입으로 인한 도시 활력 증진 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 3월 ~ 2019년 6월

○ 위 치 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 63-57외 7필지

○ 규 모 : 임대아파트 150호(36㎡ 30호, 45㎡ 120호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,500	2,293	4,620	6,555	7,032
국 비	4,469	893	1,117	1,117	1,342
시 도 비	4,677	1,400	983	1,311	983
탄광지역개발기금	11,354		2,520	4,127	4,707

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ (국토부)공모 확정             : 2016. 03. 02.

○ 대행(위탁)업체 선정           : 2016. 04. 25.(대행사 : 강원도 개발공사)

○ 설계공모 심사 확정           : 2016. 08. 19.

○ (강원도)공공주택사업계획 승인 : 2016. 12. 16.

○ 본 공사 착공                 : 2017. 06. 07.

□ 향후계획

○ 준공 / 입주자 모집 : 2019. 6월

사업명

전통김치 6차산업화 지원사업

담당자

지역경제과 이종선(☎560-2352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역농산물 활용한 공장설립과 체험관 운영으로 6차산업 모델 구현

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘16. ~ ’18.

○ 위 치 : 신동읍 예미농공단지 일원

○ 규 모 : 부지면적 15,329.7㎡ / 건물 3동 6,917.24㎡(공장, 체험관, 저온창고)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,400	2	4,398	3,000
국 비	2,000		300	1,700
시 도 비
시군구비	5,400	2	4,098	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2017.  9월 : 시설공사 착공

○ 2018.  9월 : 시설준공 및 시범운영

□ 향후계획

○ 2018. 10월 : 시설운영

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증액(6,100백만원 → 7,400백만원, 증 1,300백만원)

- 실시설계완료에 따른 건축공사비 증액

사업명

활기찬 농촌프로젝트 시범사업

담당자

지역경제과 이종선(☎560-2352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 예미농공단지 중심의 기업유치와 정주여건 개선을 통한 농촌주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘16. ~ ’18.

○ 위 치 : 신동읍 예미농공단지 및 조동리 151-21번지 일원

○ 규 모 : 건물 3동 4,286.03㎡(근로자기숙사, 근로자복지관, 공동물류창고),

통근버스 1대, 정자 2개소, 주민역량강화교육 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,700	49	4,875	3,776
국 비	5,600	34	3,413	2,153
시 도 비
시군구비	3,100	15	1,462	1,623
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2017.  7월 : 시설공사 착공

○ 2018.  9월 : 시설준공

□ 향후계획

○ 2018. 10월 : 시설운영

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증액(8,000백만원 → 8,700백만원, 증 700백만원)

- 실시설계완료에 따른 건축공사비 증액

사업명

고한읍 소1-21호(고토일) 도로확포장

담당자

도시건축과 유수근(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소한 군계획시설 확장을 통한 보행자 교통사고 예방 및 원활한 교통 소통으로 주민불편 해소 및 정주여건 개선.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위 치 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 151-25번지 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 L=757m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,697백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,697	397	1,500	1,800
국 비
시 도 비
탄광지역개발기금	3,697	397	1,500	1,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계, 보상, 지장물철거 : 2016. 12. 31.

○ 잔여지 보상               : 2017. 12. 31.

○ 공사 착공                 : 2018. 05. 25.

□ 향후계획

○ 공사 준공 및 개통 : 2018. 11. 30.

사업명

아우라지 관광지 개발사업

담당자

문화관광과 박병태(☎560-2399)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아우라지 관광지내 장기 미활용 녹지에 대한 관광지 개발을 통하여 관광객의      유입 증대로 지역경제 활성화 및 관광명승지로 발전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2021년

○ 위 치 : 정선군 여량면 여량리 243-1 일원

○ 규 모 : 테마형 캠핑시설, 진입도로(300m), 광장(3,470㎡),주차장(4,480㎡),            다목적운동장, 문화휴양공간, 향토복합전시체험관, 역사공원, 조경식재 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,000	0	1,400	1,000	4,600
국 비	2,800			500	2,300
시 도 비	840			150	690
시군구비	3,360	0	1,400	350	1,610
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 및 실시설계용역 : 2018. 5월

○ 기반시설 사업 추진 : 2018. 6월

□ 향후계획

○ 단계별 관광지 조성사업 추진 : 2019. ~ 2020년

□ 사업변경 내역

○ 투자심사 사업비: 7,900백만원 ⇨ 총사업비: 7,000백만원(변경)

사업명

군도4호(선평∼가수)도로개설공사

담당자

안전건설과 김홍섭

(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도4호선 미개설 구간으로 도로개설로 인한 원활한 통행 및 불편해소

○ 농산물의 원활한 반출과 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 기간 : 2017. ∼ 2019.

○ 위치 : 정선읍 가수리

○ 규모 : 도로개설 L= 1,438m(교량 2개소 L=238m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,800	0	4,700	3,000	2,100
국 비
시 도 비
시군구비	9,800		4,700	3,000	2,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)

○ 사업 착공 및 추진 : 2017. 11. 8.

□ 향후계획

○ 사업추진 및 준공 : 2019. 10월

사업명

동계올림픽 G-day 기념행사 지원

담당자

동계올림픽지원단

이재현(☎560-2085)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018평창동계올림픽의 성공적인 개최와 붐업 조성을 하고자 G-1년,

G-500일 등 행사를 추진하여 국민적 호응을 얻고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 :  2016년 ~ 2017년

○ 위 치 :  정선군 청사 앞 및 종합경기장 실내체육관

○ 규 모 :  참여인원 연 2만명, 전국노래자랑 유치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 123백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	123	88	35	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	123	88	35	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ G-500일 행사 완료

○ G-1년 행사 완료(KBS 전국노래자랑 유치)

□ 향후계획

○ 사업완료로 인한 평가 및 정산

사업명

제45회 KBS배 전국육상대회 겸

국제오픈육상경기 대회

담당자

동계올림픽지원단

전영걸(☎560-2950)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 제45회 KBS배 전국육상경기대회 겸 2017 국제오픈육상경기대회 를

통해 전국구 선수들이 정선에 모여 ‘육상 스포츠 대표 도시’라는

정선군 체육 브랜드 이미지 제고와 정선 홍보 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.06.24.~06.28

○ 위 치 : 정선 종합경기장(정선읍 애산로60)

○ 규 모 : 참가인원 2,300명(임원 200명, 국내선수 2,000명, 외국선수 100명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	200	-	200	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	200	-	200	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회개최 : 2017. 06. 24. ~ 06 .28.

○ 대회장소 : 정선종합경기장

□ 향후계획

○ 2019년 대회유치 계획 없음

사업명

야생화마을 추리극장

담당자

지역경제과 이상만(☎560-2006)

□ 사업목적 및 필요성

○ “전 세계 어디에도 없는 정통 추리체험마을”을 조성하여 마을을 찾은 고객(수학여행단, 진료체험 학생 등)에게 신선한 충격과 줄거움을 주는 한편, 폐광지역의 모범적인 대체산업으로 성장하여 지역경기 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘17. ~ ’19

○ 위 치 : 정선군 고한읍 일원

○ 내 용 : 추진단 구성, 추리체험시설 구축, 추리골목 디자인, 추리본부 신축

추리체험 프로그램 개발 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,918백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후(매년)
계	3,918	0	793	3,114	11
국 비	0
시 도 비	2,255		135	2,120	0
시군구비	1,663		658	994	11
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2017. 11월 : 야생화마을 추리극장 추진단 구성 운영

○ 2017. 12월 : 추리본부 신축에 따른 부지매입

○ 2018. 05월 ~ 09월 : 체험시설 및 추리본부 신축 실시설계 용역

□ 향후계획

○ 2018. 10월 ~ 2019. 10월 : 시설공사 추진

○ 2019. 05월 ~ : 위탁 운영업체 선정 및 추리체험시설 운영

○ 2019. 10월 : 시설준공

사업명

제1회 전국5일장 박람회

담당자

지역경제과 이기영(☎560-2440)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국 명품 정선 5일장의 새로운 비전을 제시하고 국내외적인 문화관광 상품화로 재도약의 토대마련

○ 지역 중심의 장터를 벗어나 대한민국만의 맛, 멋, 흥에 취할 수 있는 차별화된 새로운 고객 참여형 장터를 조성, 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘17. ~

○ 위 치 : 정선읍 아라리공원 일원

○ 내 용 : 전국 5일장 대표 먹거리, 볼거리, 즐길거리 체험 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후(매년)
계	1,600	0	400	600	600
국 비	0
시 도 비	700		100	300	300
시군구비	900		300	300	300
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   )

○ 2017.  6.22~6.25 : 제1회 전국 5일장 박람회 개최

○ 2018.  6.22~6.24 : 제2회 전국 5일장 박람회 개최

□ 향후계획

○ 2019. 4월 : 제3회 전국 5일장 박람회 개최

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증액(400백만원 → 600백만원, 증 300백만원)

- 도비 보조금이 증액하여 2018년 전체 사업비 증가

사업명

군도7호(사북~직전) 도로개설공사

담당자

안전건설과 김홍섭

(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도 확・포장사업 추진으로 도로망 확충 및 도로통행 불편 해소

○ 안전하고 편리한 교통인프라 구축에 따른 지구단위 계획 활성화 및 강원랜드 배후도시로서 인구증가에 기여

□ 사업개요

○ 기간 : 2017. ∼ 2021.

○ 위치 : 사북읍 사북리 ∼ 직전리

○ 규모 : 도로개설 L= 1.73km(터널 L=299m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	16,000	0	600	3,000	12,400
국 비
시 도 비
시군구비	16,000	0	600	3,000	12,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

○ 기본 및 실시설계 : 2017. 5월 ∼ 2018. 7월

○ 문화재, 교통안전진단, 소규모환경영향평가 완료 : 2018. 7월

○ 설계경제성(VE) 착수 및 과업수행 : 2018. 8월 ∼ 9월

□ 향후계획

○ 강원도건설기술심의 : 2018. 10월

○ 사업발주 : 2018. 11월

○ 사업완료 : 2021. 10월

사업명

주례마을 어울연못 조성

담당자

총무팀   김제일 (☎ 2666)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여량지역 시가지 주례마을 일원의 다양한 자연환경 및 문화자원을 이용

지역 브랜드 가치 향상과 자연친화적인 생태체험 관광지를 구현, 남녀

노소 모두를 위한 힐링관광지를 조성하므로써 시가지 경제활성화를 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 정선군 여량면 여량리 278-12외

○ 규 모 : 어울연목조성 5,273㎡

주례마을 ~ 시가지 연계 경관조성 L=200m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,000			900	5,100
국 비
시 도 비
시군구비	6,000			900	5,100
지 방 채
민간자본
기타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본계획 수립 및 방침결정(2017.10.)

○ 지방재정투융심사(2017.11.)

○ 실시설계 용역 발주(2018.03.)

- 용역기간: 2018.03.30. ~ 09.25.

□ 향후계획

○ 토지 및 지장물 보상

- 대    상: 여량리 372-27외 33필지, 지장물

- 보상금액: 2,800백만원

○ 공유재산 관리계획(변경)

- 당초: 주례마을 확장 6필지, 984㎡

- 변경: 주례마을 3필지 304.5㎡, 어울연못 12필지 5,021㎡

사업명

원빈 소풍가던길 조성

담당자

총무팀   김제일 (☎ 2666)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한류스타 원빈의 어린시절 소풍가던길을 정비하고 출렁다리, 청보리밭 등을

조성하여 레일바이크, 주례마을 등 관광시설과 연계함으로써 지역 상권

활성화 및 관광상품 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 정선군 여량면 여량리  690-1외 일원(당너머 포함)

○ 규 모 : 공동묘지 이설 및 공원조성(17,200㎡)

출렁다리 조성(L=234m), 전망대 등 연계관광시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,400			200	2,200
국 비
시 도 비
시군구비	2,400			200	2,200
지 방 채
민간자본
기타(폐기금)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

○ 기본계획 수립 및 방침결정(2017.10.)

○ 지방재정투융심사(2017.11.)

○ 실시설계 용역 발주(2018.03.)

- 용역기간: 2018.03.30. ~ 10.14.

○ 현황측량 및 분묘개장공고(1,2차) 완료

- 개장신고 46건, 유연분묘 개장 및 보상 39기

□ 향후계획

○ 무연분묘 일제 개장(9월~10월), 유연분묘 개장독려(“아라리사람들” 홍보)

○ 지방도 421호선(아우라지교 ~ 노추산로 방향) 인도교 설치공사: L=260m