예미농공단지 조성사업 폐수처리시설 기본계획용역

과  업  지  시  서

	정 선 군

목       차

Ⅰ. 총           칙

1. 과업명

2. 과업목적

3. 과업의 범위

4. 용역기간

Ⅱ. 과업의 세부내용

1. 일반사항

2. 기본조사

3. 기본설계

4. 과업의 수행

5. 보안대책

6. 성과품의 제출

Ⅰ. 총 칙

1. 과업명

■ 정선 예미농공단지 폐수처리시설공사 기본계획용역

2. 과업목적

본 과업은 중소기업체 공업입지 공급 및 농촌지역 균형발전도모, 현지 취업인원 확대로 농가소득 증대와 지역경제 활성화를 위하여 계획 중인 예미 농공단지에서 발생하는 각종 폐수를 적정기준에 부합하도록 처리하여, 공공수역의 수질개선과 지역주민의 공중위생향상에 기여하고자 경제적이고 합리적인 폐수처리시설 설치를 위한 기본계획를 수행하는데 그 목적이 있다.

3. 과업의 범위

본 과업은 정선군하수도정비기본계획에 의거 추진하며 계획설계에 필요한 기초자료의 수집 및 분석, 관련계획 조사, 수질분석 및 유량측정, 조사측량 및 지질조사를 실시와 최종 계획하수량을 산정하여 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제49조(종말처리시설 기본계획) 규정에 의거 기본계획를 완료하여 납품하는 것으로 다음사항을 모두 포함한다.

3-1 기본조사

1) 기초자료 수집 및 분석(하수발생량, 계획처리인구 등)

2) 관련계획조사(장기발전계획 및 상위관련계획, 처리장설치 관련법)

3) 현지조사

3-2 기본계획 및 설계

o 기본계획 및 설계 1식

3-3 사업의 위치

강원도 정선군 신동읍 예미리 872번지 일원

4. 용역기간

과업착수일로부터 60일간으로 한다

Ⅱ. 과업의 세부내용

1 일반사항

1) 하수도정비기본계획, 국토의계획 및 이용에관한법률, 농지법, 문화재관리법, 도로법, 하천법 및 기타 개발계획 등 본 설계와 관련되는 각종 법률과 상위계획을 종합적으로 검토 분석하여 설계에 반영한다.

2) 계획하수량, 계획인구, 상수도 급수량, 지하수량, 분뇨 및 축산폐수량 등 하수도정비기본계획 내용을 종합적으로 검토 후 하수발생량에 대해서 단계별 용량을 산정하여 기본계획 및 설계를 수립한다.

3) 현장조사 : 최적설계를 성취하기 위하여 아래와 같이 현장조사업무를 세밀하게 실시한다.

o 도로 및 가구현황조사, 하수발생량 조사(음식점, 숙박시설, 공공기관, 자연마을 등)

o 수리⋅수문 및 지형, 지질조사 등

4) 수급인은 본계획 수립과 관련한 각종 인허가를 완료할 수 있도록 제반조치를 취하여야 하고 감독원 요구하는 각종 인허가 신청자료와 승인과정에 필요한 관계기관 협의자료를 제출하여야 하며 인허가 관련한 업무협의에 만전을 기하여야 한다.

2. 기본조사

자료수집은 우리군의 협조 하에 다음과 같은 관련자료를 수집⋅분석한다.

2-1 기초자료 수집 및 분석

1) 자연적 조건에 관한 조사

- 하천 등에 관한 자료조사

- 기상조건에 관한 조사

2) 부하량에 관한조사

하수관거설치를 위한 조사지역에 있어서 발생부하량과 방류예정수역의 허용부하량에 대하여 다음사항을 조사한다.

- 상수도 급수량의 현황 및 계획

- 지하수 사용현황

- 종업원수, 공장출하액, 농림 및 축산에 관한 자료

- 주요공장,상가,숙박업소,자연마을 및 사업장의 배출량 및 수질자료

- 분뇨정화조, 오수정화조 시설 보급현황, 축산폐수 처리현황 및 계획

3) 수질분석 및 유량조사

- 하수처리구역의 유입수질(가정오수 등)등 분석

- 인근하천 유입수 유량조사⋅분석

2-2 관련계획조사

1) 각종 장기계획 및 상위관련계획 등 조사

2) 국토의계획 및 이용에관한법률(구 도시계획법등), 농지법, 문화재관리법, 도로법, 하천법 및 기타 개발계획 등 본 설계와 관련되는 각종 법률 검토

3) 개발촉진지구 개발계획(도로개설 등), 비지정관광계획 검토

4) 장래개발 계획자료 및 하수발생량 자료 및 하수처리시설 관련법

5) 정선군하수도정비기본계획 및 정선군수도정비기본계획

6) 기타 관련계획 : 지하매설물 자료, 재정계획, 도로정비계획, 하천정비계획

2-3 현지조사

1) 조사측량

o 본 조사측량은 측량법 제29조의 공공측량 작업규정 및 측량표준품셈에 의하여 실시하여야 한다.

o 수준점과 삼각점은 국립지리원에서 설치한 것을 사용하여야 실시한다.

o 관로노선측량은 차집관거(간선 및 지선관거) 예정노선에 대하여 기준점측량을 포함하여 축척 1/1,000~1/1,200으로 폭 30m를 기준으로 시행하며, 시가지 도로의 경우에는 양측 첫가옥이 표시되도록 한다.

o 관로 노선측량은 예정노선에 대하여 기준점측량을 포함하여 각 지하매설물(상⋅하수도관, 송유관, 가스관, 전화 및 통신케이블 등)에 대하여 관계기관과 협의하여 위치 및 심도를 정확히 조사한다.

o 측량시행은 세부수행계획서를 작성하여 감독관과 협의 후 시행하고 측량성과는 야장과 함께 정리하여 제출한다.

o 하수관거의 TBM점 설치는 훼손되지 않는 장소에 식별이 가능하도록 설치하도록 하고 편입부지에 대하여 용지도 및 용지조서를 작성하고 지장물 및 보상물조사를 동시에 시행한다.

3. 기본계획 및 설계

1)  관련계획검토

관련 상위계획을 검토하여 기술적, 경제적으로 최적의 하수처리체계가 되도록 설계에 반영하여야 한다.

－ 관련상위계획 검토 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(구 도시계획법 등), 농지법  문화재관리법, 도로법, 하천법 및 기타 관련계획 등

2) 처리분구 설정 및 하수도 인구설정

처리구역의 검토 및 산정은 하수도정비기본계획 내용을 충분히 숙지하여 지형 및 시가지 형태, 하수도사업의 효과 등을 감안하여 여러개의 적정 처리분구를 분할하여 용도 지역별 면적을 산출하고 본 설계 시 채택할 적정처리구역 및 목표년도를 제시하며, 목표년도의 하수도 인구를 처리분구별로 배분하고, 인근 지역의 처리구역 포함여부를 결정하며 하수처리구역은 집중, 분산 등 효율성을 정밀 검토하고 기존 하수관거 매설 현황을 검토하여 적정처리구역 설정.

3) 하수량 추정 및 하수수질

생활하수(연계처리시 분뇨 및 위생처리장 포함) 지하수 유입량 등을 고려하여 목표년도의 하수량을 추정하고, 수질현황 자료를 이용하여 하수 수질을 추정한다. 특히, 위생처리장 및 분뇨 수질은 수질현황조사 및 국내외 자료를 활용한다.

4) 방류수역의(방류하천) 오염도

o 유량측정과 시료채취를 통하여 방류수역의 수질현황을 조사하여 도상에 표시한다.

o 주거,숙박업소,상가,상업,자연마을 및 공업지역, 분뇨 및 축산폐수 등 처리구역내의 오염원 현황을 조사한다.

o 처리장 방류수가 방류수역에 미치는 영향을 조사하여 도상에 표시한다.

5) 하수발생량 및 오염부하량 산정

o 생활하수, 관광오수, 분뇨 및 축산폐수, 지하수 유입 등을 고려하여 목표년도의 하수량 및 오염부하량을 산정하되 필요시 국내⋅외 자료를 활용한다.

o 공장, 숙박업소, 상가, 분뇨 및 축산폐수 배출량과 수질은 환경부 또는 기타기관에서 조사하고 있는 폐수 배출량 및 배출수질 등의 자료와 관련문헌 등을 활용하고, 수질 및 하수량 측정시 계절, 시간 및 가동상황을 고려하여 측정시기 및 횟수를 조절, 실제상황이 최대한 반영할 수 있도록 한다.

o 특히, 지하수 유입량 추정은 처리구역내 각 주요 토구별 위치와 실제 유량을 측정하여 표시하고, 토구 배수구역내 생활하수 및 기타 폐수배출량과 수질을 비교 분석한 결과내용을 반영한다.

6) 하수관거(간선 및 지선관거) 및 중계펌프장

가) 하수관거 계획을 주변지형여건 및 도시계획재정비 등을 감안하여 하수관거(간선및 지선) 통수능력을 재검토하여 반영한다.

나) 지천을 하수관거로 사용하는 것은 가능한 피하고 장래 시가화에 대비한 관로 방안을 검토 제시한다.

다) 처리구역 발생하수는 전량 차집이 될 수 있도록 계획하며, 기존 매설하수 관거를 충분히 검토 후 관거의 개보수 및 신설계획에 따라 하수관거 노선계획을 수립하고, 지선관로 연결계획이 용이하게 될 수 있도록 설계한다.

라) 가능한한 자연유하가 되도록 하고 관거연장을 최소화 하도록 계획하며 하수관거는 단계별 관거용량 계획을 검토하여 시설규모를 결정한다.

마) 처리구역에서 배출되는 하수를 효율적으로 차집, 처리할 수 있도록 하수관거 노선을 면밀히 검토하여 결정하고 계획하수량 및 지하수 유입량을 결정하여 관종, 관경, 구배 등을 설계한다.

바) 자연유하에 의한 하수차집이 곤란한 지역에 대해 필요시 중계펌프장 설치를 검토하여야 한다.

7) 기  타

가) 환경보전 장기종합계획을 비롯한 관련 중앙 및 지방계획을 연계 검토하여 문제점이 발생되지 않도록 계획한다.

나) 사례 분석 등을 통하여 비선호 시설의 입지에 따른 예상 민원에 대한 대안을 구상하고 효율적인 수용 방법을 모색하여 설계에 반영토록 한다.

8) 설계참고자료

- 정선군 하수도정비기본계획

- 하수종말처리시설 기계설비공사 설계지침(환경부 하수도과 2001. 7)

- 하수종말처리시설 전기,계측제어 설비공사 설계지침(환경부 하수도과 2001. 7)

- 하수종말처리시설사업 촉진에 관한 규정(국무총리 훈령 제358호)

- 하수도 업무편람(1998. 4 환경부 하수도과) 및 하수도통합지침(2002.12.21)

- 하수도시설설치사업 업무처리 일반지침(재개정)--- 환경부 2002. 12. 20

- 하수종말처리시설 용량산정을 위한 업무처리용령 및 용량산정방법- 환경부 2003. 02. 06

4. 과업의 수행

4-1 과업수행기간

1) 착공일로부터 60일간으로 한다.

2) 다음 사유가 발생하였을 경우 우리군와 협의하여 용역기간을 조정할 수 있다.

◦ 과업수행 중 정책적인 변화가 있을 때

◦ 불가항력적인 사유가 발생하였을 경우

◦ 발주처의 사정에 의한 행정절차상 용역기간이 추가 소요될 경우

4-2 설계도서 작성

1) 하수도정비기본변경계획을 검토하여 기본계획 및 설계를 수행하며, 과업내용에 따른 기본계획 및 설계보고서, 세부도면 등을 포함한다.

2) 기본계획 및 설계는 기능별로 설계를 하며 최종보고서로 종합 작성한다.

4-3 감독 및 보고

1) 본 과업은 우리군 지시, 감독하에 수행한다.

2) 계약체결 후 10일 이내에 계약상대자는 다음 사항이 포함된 과업수행계획서를 제출, 감독관의 승인을 받는다.

o 과업수행방향과 방법

o 세부 과업수행 예정공정표

o 과업참여기술자 조직 및 이력사항

3) 일일 추진업무를 근무일지에 작성하고 주간업무보고는 서면으로, 월간 추진 업무는 매월 말일을 기준으로 작성하여 계획공정대비분석표가 포함된 월간 보고서를 익월 5일까지 반드시 제출하고 감독관의 요구가 있을 경우에는 수시로 과업내용에 대한 설명을 한다.

4) 외국자료를 이용한 설계관련자료 및 성과품(설계도서, 도면 등)은 국문으로 번역하여 제출함을 원칙으로 한다.

4-4 기타 및 행정사항

1) 본 용역중의 중요 결정사항에 대하여는 여러가지의 대안을 우리군에 사전에 수시로 보고한다.

2) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행상 당연히 필요한 사항이고 인정되는 경미한 사항 및 부대업무는 추가비용 없이 과업지시를 할수 있고 도급자는 이에 응해야 한다.

3) 본 과업수행중 사고(인명, 재산 등)가 발생 시 계약상대자는 즉시 우리군에 보고하고 지시에 따라 계약상대자 부담으로 보상 또는 원상복구 등 제반 조치를 취한다.

4) 본 과업수행 시에는 안전관리 등을 철저히 하고 본 과업수행 시 계약상대자 귀책사유로 발생된 모든 문제는 계약상대자가 책임진다.

5) 본 과업수행 중 중요한 부분과 필요한 부분은 반드시 사진촬영하여 준공 시 우리군에 제출한다.

6) 계약상대자는 도의 마을하수도 설치협의가 완료되면 즉시 보완하여 실시설계에 반영한 설계도서를 작성하여 설치허가를 도에 받는다.

7) 본 용역과업이 완료된 후라도 각종 성과품의 미비사항 발생 시는 즉시 보완한다.

8) 본 과업수행 중 책임기술자 및 각 분야의 기술자 교체 시는 반드시 사전에 감독관의 협의를 받는다.

9) 본 과업을 수행함에 있어서는 항상 국가의 이익을 보호하는 입장에서 과업을 수행하여 경제적이고, 효율적인 설계를 통해 경비를 최소한으로 절감한다.

10) 과업수행계획서에 제시한 각종 수행계획 및 방법에 대해서는 계약상대자의 부담으로 시행한다.

11) 도급자(용역업자)는 건설기술관리법 시행령 제37조의3의 규정에 의거 용역을 완료하기 전에 공제보험증서 또는 공제증서를 실시설계 완료 하기전에  발주청에 제출 한다.

12) 도급자는 본 설계용역과 관련 행정청의 감사관련하여 감사지적된 사항이나 설계용역 공정 등의 변경요인이 발생될 경우에는 정산처리한다.

17) 기타 과업수행과정에서 기본설계에서 공종별로 계획된 예산액을 국고에 반영하기 위하여 지방재정투융자심사 및 중기지방재정수립에 필요한 서류을 우리군에 제출한다.

5. 보안대책

1) 계약체결 후 7일 이내에 용역업체의 대표자 및 용역과업 종사자의 보안각서를 제    출한다.

2) 용역과업수행 과정상 다음과 같은 보안대책을 강구하여 감독관의 승인을 받는다.

o 자료보관함 설치 및 관리자 지정, 용역과업 자료의 분실, 도난, 누설을 방지하고, 자료의 철저한 보안을 위하여 보관함을 비치하여 관리책임자(정, 부)를 지정한다.

o 필요시 용역업체의 보관, 관리상태를 점검한다.

3) 보안사항은 감독관과 협의하여 보안상 결함이 없어야 하며, 이의 불이행으로 인한 책임을 계약상대자가 진다.

4) 본 과업수행 종사자의 변동이 있을 시는 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지하고 이의 불이행으로 인한 책임은 계약상대자가 진다.

5) 대외비 및 비밀로 분류되는 보고서 발간시는 감독관과 협의하여 지정하는 발간업체에서 발간하되 원지 및 폐지 등을 회수, 소각토록 한다.

6) 대표자 및 본 용역 과업종사자는 용역수행 중 취득한 기밀사항이 있는 경우에는 누설하여서는 안되며 누설시에는 모든 책임을 도급자가 져야 한다.

7) 본 과업수행종사자의 변동이 있을시는 인수인계를 철저히하여 자료의 외부 유출을 방지하고 이의 불이행으로 인한 책임은 도급자가 져야 한다.

6. 성과품의 제출

모든 성과품의 작성은 인쇄전에 미리 제출하여 감독관과 협의하고 검토 후 제출한다.

품 명	부 수	비 고
1) 기본계획보고서	각 5 부	환경부 승인신청
2) 기본설계보고서	각 5 부
3) 기본설계보고서 부록	각 5 부
4) 기본설계 도면(CD-ROM포함)	각 원도 1부, 청사진 5부(A1), 축소도집 5부(A3)
5) 조사측량 성과	각 1식
6) 기타관련자료	각 1식