북평테니스장 시설확장공사

실시설계용역 과업지시서

북  평  면

목      차

제1장 과업설명서

제1절 과업의 명칭

제2절 과업의 목적

제3절 과업의 범위

제4절 과업기간

제5절 설계기준

제6절 과업의 세부사항

제2장 과업지시서

제1절 일반사항

제2절 조    사

제3절 측    량

제4절 설    계

제5절 설계도서작성 및 공사비산출

제6절 제출도서의 작성

제7절 성과품 인쇄 및 납품

제1장  과 업 설 명 서

제1절 과 업 명

북평테니스장 시설확장공사 실시설계용역

제2절 과업의 목적

본 과업은 생활체육시설인 테니스장의 시설확장(개선)을 통하여 주민들의 여가선용 및 체력증진을 도모함에 그 목적이 있다.

제3절 과업의 범위

가. 과업의 개요

o 과업위치 : 정선군 북평면 북평리 63-2번지(A=2,848㎡) 일원

o 과업내용

- 인조잔디코트 조성 : 총3면(신설 1면, 기존코트 2면 보수)

- 조명시설설치 : 이전 및 신설 1식

- 조명시설. 우레탄 포장, 부대시설 등 기타 발주자의 요청에 의한 사항

나. 과업의 범위

1) 현지현황 조사

가) 지장물 조사

나) 하천 현황조사 및 관련 계획검토

다) 측량 및 용지도 작성

2) 실시설계

가) 토공 설계

나) 배수시설 설계

다) 체육시설물(테니스장) 설계

라) 구조물 설계

마) 부대시설 설계

바) 설계도서 작성(예산서 포함)

사) 기타 관(발주처 및 관계기관)이 필요하여 요구하는 사항

3) 공사중 사용할 각종 자재에 대한 규격, 재질시험 및 검사방법 등을 특별시방서에 명기하여야 한다.

4) 설계도서 작성시 기능공들이 쉽게 이해할 수 있는 설계상세도(Shop Drawing)를 작성하여야 한다.

제4절 과업기간

본 실시설계 용역기간은 착수일로부터 15일로하며 다음 사항에 대하여 발주처의 승인을 득한 후 기간을 변경할 수 있다.

가. 용역기간중 기상불량(강우, 강설, 기온급강하)일수가 평균일수(10개년)보다 많아 과업수행에 현저한 차질이 발생될 때

나. 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

다. 발주처의 방침변경 또는 지시에 의하여 과업을 중단하였을 때

라. 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때(과업량 증가등)

제5절 설계기준

가. 본 용역설계는 본 과업지시서 및 아래에 제시한 각종시방서를 기준 및 참고하여 발주처와 협의           하여 적용한다.

1) 체육시설의설치․이용에관한법률 제5조, 제6조 동법시행령 제3조, 제4조, 시행규칙 제2조(전문           체육시설설치기준)

2) 토목공사 일반표준시방서(건설부 제정, 1991년 12월)

3) 콘크리트공사 표준시방서(건설부 제정, 1991년 11월)

4) 가로등설계 : 도로조명기준 KSA3701(공업진흥청ＫＳ규정집)

5) 건설기술관리법 품질시험 규정 : 적용

6) 한국공업규격(ＫＳ관련사항)

나. 노임단가 : 대한건설협회에서 조사 공포한 납품당시 시중노임단가(이월시는 성과품 납품 당해연도분 반영)

다. 환    율 : 납품당시 기준 전산환매도율 적용 (이월시는 성과품 납품 당해연도분 반영)

라. 중기사용료 : 납품당시 기준 조달청 중기사용료

마. 자재단가 : 최근 물가정보지(조달청발행)를 적용하고 내용이 없는 자재는 가격 정보지(대한건설협회 발행)를 참고(단, 조달청 가격정보에 미수록된 자재 및 품목은 2개이상의 견적서 또는

원가계산서에 의한 실거래가격으로 한다)

제6절 과업의 세부사항

가. 일반사항

1) 도급자는 설계과정에서 발주처의 지휘감독을 받아 본 용역을 성실히 수행하여야 한다.

2) 도급자는 본 과업의 지시서와 관계 법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 정확도에 대한 전적인 책임을 진다.

3) 도급자는 계약일로부터 7일이내에 보안각서가 첨부된 착공계와 예정공정표 및 용역수행자 명단을 분야별로 작성 제출하여야 한다.

4) 본 과업은 계약기간내에 예정공정표대로 차질없이 수행하여야 하며 제4절에 규정된 사유에 해당되는 경우에는 발주청의 승인을 얻어 기간을 연장할 수 있다.

5) 도급자는 본 과업 수행중 관계법규에 따른 인·허가 또는 협의가 필요할 시에는 발주청과 협의하여 제반절차를 이행하여야 한다.

6) 과업수행중 내용의 변경, 정책변경 등 불가피한 경우에는 본 용역의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업지시를 변경할 수 있다.

7) 과업수행중 이견이 있을 시에는 상호협의에 의하여 해결한다. 그러나 이에 대한 결정권은

발주청이 갖는다.

8) 본 과업에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주청과 협의하여 처리하되 협의가 되지 않을 경우에는 발주청의 지시에 따르도록 한다.

9) 설계도서 작성은 한글사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며 단위는 C.G.S 단위를 사용한다.

10) 본 과업수행에 따른 용역비의 변동요인이 발생할 경우 예산범위내에서 정산처리 할 수 있다.

나. 보안사항

1) 도급자는 과업수행 기간중 모든 용역사항에 대한 보안 책임이 있으며 보안규정을 준수하여야 한다.

2) 도급자는 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착공과 동시 제출한다.

3) 모든 관계서류 자료들을 본 사업 이외의 여타목적을 위해 사용해서는 안되며, 발주청의 승인없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출할 수 없다.

4) 용역참가자가 교체될 시는 인수인계를 철저히 하고 발주청의 확인을 받아야 한다.

5) 과업수행 폐기물은 소각처리하여야 하며 작업용 보안 사진은 감독관의 입회하에 폐기 처리하여야 한다.

6) 기타 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행상 보안관리를 요하는 사항은 발주청에서

보완지시할 수 있으며 보안규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은 도급자가 진다.

다. 설계변경 및 조정

1) 발주청의 방침에 따라 과업수행이 중단되었을 때

2) 발주청의 계획변경으로 과업내용변경 또는 과업내용이 증감될 경우 예산범위내에서 조정

3) 본 용역대상은 개략공사비를 적용하여 산출하였던 바 실제 공사비가 증감될 경우 발주처의

방침에 따라 정산할 수 있다.

4) 기타 부득이한 사정으로 과업내용이 변경되었을 때

5) 도급자는 발주처가 필요하다고 인정하여 설계변경을 요구하는 때에는 정당한 이유없이 이를 거부할 수 없으며 지체없이 이를 이행하여야 한다.

라. 설계하자 책임한계

도급자가 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 예산손실 또는 인명피해 기타 공사진행상 지장을 초래하였을 때에는 재설계 하여야 하며, 발주처가 결정하는 책임범위에 대하여 손해배상을

하여야 한다.(용역준공 후에도 공사시행중 현행법규나 행정관청의 보안 및 각종변경 등에 필요한 경우 설계자는 발주처의 요청에 따라 필요한 업무를 수행하여야 한다)

마. 해약조건

발주청은 다음과 같은 조건이 발생할 때 일방적으로 계약을 해약할 수 있다.

1) 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

2) 발주청의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3) 기타 계약조건을 위반할 때

제 2 장  과 업 지 시 서

제1절 일반사항

가. 과업수행상 유의하여야 할 사항

1) 본 과업의 시설계획의 결정시에는 2～3개안을 비교하여 발주처와 협의하여야 한다.

2) 본 과업은 관련 행정기관과 협조하여 도시계획등 제반 인·허가에 문제점이 없도록 사전조사에 철저를 기하고 본 용역과업 완료후에도 각종 인·허가 및 제반여건에 따라 시공상 문제점 등 보완사항이 발생할 시는 발주처의 지시에 따라 언제든지 보완하여야 한다.

나. 성과품 작성 및 검사

1) 모든 설계도서는 제 기준에 맞게 작성되어야 한다.

2) 모든 설계도서 작성을 위해 발주처와 사전 협의하여야 하고, 보고서 양식, 규격 보고서 종류등도 발주처의 기준을 우선으로 하되 타 설계시 사용한 것을 비교 검토하여 설계하는 과정에서 최종 결정하는 것으로 한다.

4) 모든 설계도서의 작성작업은 발주처와 협의하여 변경 조정할 수 있다.

제2절 조  사

가. 현황조사

1) 현 장 조 사  : 현장의 지형, 지물

2) 기존자료조사 : 설계도면, 현황도, 준공도면 및 기존자료 등

3) 기존 구조물 변형상태 조사 : 기존 구조물의 변형 상태를 조사하여 철거공법 및 보강대책수립

나. 지장물 조사

지상 및 지하에 설치, 매설되어 있는 각종시설물을 조사하여 시공시 저촉여부를 판단하고 저촉되는 지장물은 이설 여부를 판단 설계에 반영한다.

다. 측량 및 용지도 작성

측량작업은 측량법 및 동법시행령, 시행규칙, 공공측량의 작업규정에 관한 기준에 의거 정밀하게 시행하여야 하고 각종 기준점이나 중요 측점은 도면 및 보고서에 표시하여야 한다.

라. 보상대상 조사

편입용지 및 각종 지장물 등 보상대상을 정밀조사하여 붙임서식에 의거 조서를 작성 제출하여야 한다.

바. 공사용 재료

본 공사 시행시 필요한 토취장, 석산, 선택층, 보조기층, 조·세골재의 골재원에 대하여는 다음사항을 조사하여야 한다.

1) 골재원 위치는 공사구간 인근지역 중 가장 경제적인 위치를 선정하여야 한다.

2) 허가가능 여부를 관계인 및 관계기관에 확인후 결정(관련근거 첨부)

3) 채취 가능량 및 매장량 조사

4) 사토가 발생시는 사전협의후 사용가능한 적정한 사토장을 선정하고 그 평면 및 종·횡단면도 첨부

5) 운반거리 조사는 운반속도에 대한 적정을 검토할 수 있도록 도로의 상태, 노폭, 진입로 등을 면밀히 조사

6) 각종 재료의 시험은 강원도 도로관리사업소 또는 공인기관에 의뢰하여 그 시험성과를 첨부하여야 한다.

사. 배수구조물 조사

1) 사업부지와 연접하여 기 시공되어있는 배수시설물 및 하천현황을 정확히 파악하여 사업부지내 배수시설물의 크기를 결정하고 홍수시 우수의 흐름을 원활하게 하여야 한다.

2) 현지조사 항목 : - 연접 하천 및 구거의 현황

- 부근 기존 배수구조물 규격 및 형태

3) 자료수집 항목 : - 강우강도

- 강우시간(지속시간)

- 강우빈도

5) 배수관공 시공단면 결정시에는 사업부지내 유역면적을 조사 선정하여 통수 단면을 결정하고 유입·유출구의 방향, 구배 등을 측량하여 별도 구조물 횡단도를 작성 수량산출토록 하여야 하며 현지여건을 충분히 조사, 배수도가 중간에서 중단되는 일이 없도록 하여야 한다.

6) 배수관공의 규격 및 시공위치 조사시는 감독관, 용역회사책임자, 관계기관 및 주민대표 등과 합동으로 조사하여 누락됨이 없도록 하여야 한다.

7) 기존구조물 또는 배수시설의 구조, 형식, 연장, 구조물 상태 등을 세밀히 조사하여 이용가능 또는 철거여부를 결정

아. 구조물의 조사

1) 구조물 조사는 계획노선에 관련되는 기존 구조물조사와 아울러 당해 지역의 자연조건 및 관련시설물 등을 고려한 구조물의 설치여부 및 위치를 조사한다.

2) 구조물 설치위치에 대한 지질조사 및 배수상태 유량 등을 세밀히 조사하여 구조 형식, 규격 및 연장, 기초공법 등을 결정한다.

3) 구조물의 위치와 규격결정은 관계기관, 주민 및 발주처와 협의후 결정하여야 한다.

4) 기존 구조물을 철거해야 될 경우에는 일반도를 작성하여 철거단면을 산출하여야 한다.

제3절 측   량

가. 일반사항

1) 측량작업은 측량법 및 같은법 시행령, 시행규칙, 공공측량의 작업규정에 관한 기준에 의거 정밀하게 시행하여야 하고, 각종 기준점이나 중요 측점은 도면 및 보고서에 표시하여야 한다.

2) 교통량이 많을 경우 정확성 및 교통소통의 원활을 기하기 위하여 가장 적합한 시간대에 측량을 실시한다.

3) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 여유있게 측량하여야 한다.

4) 측량기준점은 지적도근점과 일치하는 좌표를 사용하여야 한다.

나. 기준점 측량

1) 기준점 측량은 국립지리원에 기록 비치된 기준점을 사용하여 시행하여야 한다.

2) 지형도상에서 가급적 정삼각형에 가깝도록 삼각망을 구상하고 현장을 답사하여 합리적인 지점을 산정한다.｣

3) 미지점 1점을 구할때는 기지점 3～5점을 사용하며, 기지점에서 미지점까지 거리는 가능한 6.0km이하로 한다.

4) 삼각망의 교각은 30～120° 이내로 하나 그 방향으로 결정할 때에는 90°에 가깝도록 한다.

5) 배점밀도는 기지점과 미지점을 합하여 2㎢에 1점으로 한다.

6) 수평각 관측은 20초독 이상의 정밀도를 가진 트랜싯을 사용하고 망원경의 정반의 위치로 관측하는 1조를 1대회로 하며, 관측대회수는 2～3대회로 한다.

다. 다각측량

1) 다각점의 배치는 현황측량 및 중심선측량에 편리하도록 배치하여야 한다.

2) 점간거리는 10m이상 120m이하로 한다.

3) 거리측정은 스틸테이프 또는 광파측거기에 의한다.(가급적 병행측정 한다.)

4) C.P점에 대한 표석매설 위치는 도로구역(계획횡단면)밖에 견고하게 설치하여 훼손 또는 망실되지 않도록 하여야 한다.

라. 수준측량

1) T.B.M의 설치는 반영구적인 고정물체에 설정하고 도로구역(시·종점구간) 인접에서는 표석을 매설 훼손 또는 망실되지 않도록 안전한 곳에 설치하여야 한다.

2) 지구내 T.B.M의 설치는 1km 마다 1점씩 설치하는 것으로 한다.

3) 레벨의 성능은 수준기감도 20"/2mm 이상으로 하고 표척의 최소눈금 5mm 이상을 사용한다.

4) 표척과 레벨의 거리는 70m이내이어야 하며, 전시와 후시관측 거리는 대략 같게 하여야 한다.

마. 평판측량

1) 평면선형을 확정후 현황측량을 실시하여야 한다.

2) 도로 중심선에서 좌우 60m이상, 교량설치지점은 상하류 100m이상 지형(산악지, 하천, 목표물등)을 정밀히 측량하여 표시하고 하천을 연하여 선형계획이 이어지면 제방선 및 하천정비 기본계획에 의한 장래 제방계획선도 포함하여야 하며, 산지부등 평면선형이 불량하여 선형변경이 예상되는 구간에 대해서는 좌우 200m 이상을 측량하여야 한다.

3) 도근점, T.B.M 및 IP, CP 등의 위치 혹은 표고 등을 명시하고 행정구역의 시군, 읍면등, 리 등의 경계를 표시한다.

4) 축척은 1:1,200으로 하고 기존구조물은 시공년도, 구조제원, 사용가능여부와 개수연장 및 신설연장 등을 표시한다.

5) 평면도에는 건축물 및 기타 축조물 등에 대하여 그 정확한 형태를 표시하되 교차도로, 전, 답, 하천, 수목, 전주, 묘지, 관개배수시설, 구조물, 옹벽 등 도로설계에 관계되는 모든자료가 표시되어야 한다.

바. 종단측량

1) 조사설계 및 공사시공에 필요한 T.B.M 은 종단측량 이전에 500m 마다 변동되지 않는 암반, 구조물 등에 설치하고 횡단도에 표시하여야 하며, 기준점은 2등 수준점이상을 사용하여야 한다.

2) 종단측량은 2회이상 왕복측량을 실시하여 평균치가 오차허용치 내에 들도록 하여야 한다.

3) 종단면도 작성원도는 1mm 방안지를 사용하고 축척은 횡 1:1,200, 종 1:100～1:200으로 하며, 곡선의 방향에 곡선반경, 곡선장, 시·종점을 명확히 기입하고 구조물의 위치, 현황, 규격 등을 기입한다.

4) 시공계획고는 절성토에 대한 경제성을 검토, 조정하여야 하며 발주청과 협의한 후 결정하여야 한다.

5) 종단구배가 변하는 곳에는 종단곡선을 삽입한다.

사. 횡단측량

1) 횡단측량은 예상되는 도로경계선보다 충분히 넓게 상세히 측량하고, 구조물은 별도로 상세히 조사하되, 도로 횡단 구조물은 유입, 유출구의 표고를 기입하고 소요연장을 기입한다.

2) 원도는 1mm 방안지를 사용하고 축척은 1/100으로 한다.

3) 단면기입순서는 하에서 상방향으로 하고, 단면이 2열 이상일때는 좌측을 선열로 한다.

4) 각 측점의 단면마다 지반고, 계획고, 절·성토고 및 발주처에서 지시하는 공종의 물량 등을 산출 기입한다.

제4절 설  계

가. 본 용역설계의 설계기준은 다음과 같다.

1) 체육시설물은「체육시설의설치및이용에관한법률 시행규칙」제2조(전문체육시설 설치기준)에

준하도록 설계

2) 설계기준 : 관련시방서 참조

3) 세부구분

가) 토공설계

나) 배수시설물 설계, 상수도설계

다) 구조물설계

라) 조명시설 설계

마) 부대시설 설계

바) 가시설물의 설계

사) 체육시설물 설계(테니스장(인조잔디))

아) 유지관리를 위한 설계

자) 기  타

나. 토공설계

1) 횡단구성요소인 절토법면 경사는 토질조사 결과에 따라 구간별 비탈면 처리계획을 협의하여 결정하여야 한다.

2) 토공은 제조사에 의한 자료나 토공계획에서 확정된 평면 및 종단선형과 횡단도를 기초로하여 순성토 및 사토가 적어지도록 최상의 설계가 되도록 하여야 한다.

3) 토적은 각 측점의 횡단도에서 토질조사 성과에 따라 토사, 리핑암, 발파암으로 구분하여 산출해야 한다.

4) 절토부 노상의 지지력이 부족하다고 판단될 경우 양질의 환토등 지지력 보강공법 및 대책을 강구하여야 하며, 성토부의 시공재료가 불량한 경우에도 노상안정처리 공법등 대책을 강구하여야 한다.

5) 선형 변경시 지하매설물에 대한 시공시 확인조사 및 제거 비용을 설계에 반영하여야 한다.

6) 일상적인 사면구배 기준치 적용이 곤란한 대사면 구간이나 기반암과 붕적토와의 경계선 및 용출수 위치, 기반암의 층리 및 절리의 경사방향과 균열상태 등의 절취비탈면 붕괴 예상 구간에는 실측지 및 토성 시험 결과치를 활용하여 적정구배가 되도록 설계하여야 한다.

다. 횡단구조물 및 배수시설물의 설계

1) 배수시설물의 설계는 계획시설물의 토공 및 구조물과 연관하여 필요한 개소에는 배수시설을 설치하도록 설계한다.

2) 여기서 배수시설물이라 함은 계획시설물의 표면배수, 지하배수를 연한 측구등 일체의 배수

시설을 말한다.

라. 구조물 설계

1) 각종 구조물의 설계는 건설부제정「각종시방서」,「도로의 구조·시설기준에 관한 규정」및 본 과업지시서에 의하여야 하며, 과업지시서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 발주처의 지시를 받아야 한다.

2) 중점사항

∙전산화에 의한 최적 설계를 실시하여 경제적인 단면을 설계하여야 한다.

3) 설계방법

합리적인 설계가 가능한 강도설계법과 현실성을 고려한 허용응력설계법을 비교 검토하여 가장 경제적이고 합리적인 방법으로 구조물을 설계할 것이며, 도면상에 강도설계법과 허용응력설계법 적용여부를 표시하여야 한다.

또한 도면 작성은 AUTO CAD를 이용하여 작성한다.

마. 조명시설

1) 조명 설계는 관람자 및 이용자의 피로감과 눈부심이 없도록 하고 관련 시설기준에 의하여야            한다.

2) 조명등(가로등) 배선은 지중케이블 및 BOX내부배선으로 하고 격․점등이 가능하도록 하며 구조            물에 신축이음부가 있을 경우에는 신축 작용에 영향이 없도록 하여야 한다.

3) 수전은 한국전력측과 협의하여 경제적이고 효율적인 방법으로 설계한다.

4) 조명등의 설치는 관련규정에 의한 설치기준에 따른다.

5) 점멸방식은 무선 원격조정 방식으로 한다. 단, 조명등(또는 가로등)에 대한 배선도 및 배치도,            수전반 결선도, 상세도 및 기타 상세도, 조도계산서, 부하용량계산서 및 전압강하 계산서는              별도 제출하여야 한다.

바. 부대시설 설계

1) 일반사항 : 부대시설의 설계서는 발주청이 제시하는 표준도를 우선적으로 적용하여야 한다.

2) 사토장은 비상주차장이나 적사장등 도로 부속시설로 활용할 수 있도록 설계하고 도면에 표기한다.

3) 안전시설물 설치에 대하여도 시방규정 및 세부적인 도면(크기, 간격등)을 작성한다.

4) 기타 부대시설의 설계는 발주청과 협의하여 시행한다.

사. 기존구조물 철거시 철거방법 및 필요시 낙하물방지 설계

아. 시공순서, 시공방법 및 안전관리에 대한 전반적인 설계

자. 체육시설물 설계

1) 공통사항

(1) 사용상 적정규모의 실소요 판단

(가) 수용인원 판단

(나) 수용 내부시설 및 기자재의 크기, 용량 판단

(2) 이용에 합리적인 시설배치

(가) 사용자가 편리한 동선계획

(나) 요구기능에 따른 동선분리

(3) 주요 도입시설물의 종류, 규모, 시설배치 등은 실시설계전 발주처와 협의후 결정된 안으                 로 설계되어야 한다.

2) 테니스장

(1) 부지는 인조잔디 구장 조성

(2) 구장의 우수처리 및 살수를 위한 급수처리 시설

(3) 부지는 테니스장 3면을 조성하는 것을 기본으로 한다.

(4) 이용자 편의 및 휴식을 취할 수 있는 시설물을 배치한다.

3) 체육시설물 설계시 주요기자재는 반드시 2～3개의 대안에 의거 발주처와 협의 결정후 설계에

반영한다.

4) 기타 발주자의 요청에 의한 사항

제5절 설계도서 작성 및 공사비 산출

가. 일반사항

1) 설계도서의 규격은 건설부제정 토목설계제도 규정에 의한 표준규격으로 한다.

2) 구조물 상세도는 구조물의 시공에 필요한 사항이 명시되어야 하며, 도면으로 표시하지 않은 사항은 도면상에 문자로 표시한다.

3) 콘크리트 구조물은 규격 및 설계기준강도를 도면에 표시하여야 하고 타설방법은 현장여건에 부합되도록 하여야 한다.

4) 설계도는 양질의 ｢트레이싱｣지에 제도하므로써 선명한 복사가 가능함은 물론 수정하여도 인쇄가 선명하게 나올 수 있도록 한다.

5) 도면상에 기호로 표시하기 곤란한 사항은 문자로 표시하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.

나. 평면도 작성

1) 축척은 1:1,200으로하여 평면도를 작성한다.

2) 중심선상에 중심선 측점, 중간점, 곡선 시·종점 등을 표시하며, 도근점의 좌표 및 표고를 표시한다.

3) 교각점과 접선을 표시하고 교각, 접선장, 곡선장 및 편구배 등을 명기한다.

4) 제반 도로시설물(기존, 신설, 개량)을 표시하고 구조물의 규격, 형식 등을 기입하고 배수시설에 있어서 유출방향을 표시한다.

5) 모든 도근점 및 T.B.M을 표시하고 그의 좌표 및 표고를 기입한다.

마. 구조물도 작성

1) 구조물도는 일반도 및 상세도 순으로 작성한다.

2) 콘크리트구조물 상세도에는 소요 28일강도, 콘크리트 타설순서 등을 명기한다.

3) 철근배근에는 정·부철근 등의 유효간격 유지용 및 철근 피복유지용 Spacer 및 Chair Bar의 위치, 설치방법 및 가공을 위한 상세도면을 작성한다.

4) Spacer 또는 Chair Bar 등은 콘크리트 타설시의 하중에도 각종 철근간격이 충분히 유지될 수 있도록 그 위치를 도면상에 명기하여야 한다.

5) Spacer 또는 Chair Bar 등은 철근가공 및 설치상세도에는 주철근등 각 철근간의 순간격, 거푸집과 순간격 등을 고려하여 그 수치를 표시하여

야 한다.

6) 철근의 이음부는 구조상 약점이 되는 곳이므로 최대인장응력이 작용하는 곳에서는 이음이 생기지 않도록 하여야 한다.

7) 철근의 겹이음 길이는 철근콘크리트 시방규정에 따라 충분한 이음길이를 두어야 하고 동일단면에 집중되지 않도록하여야 한다.

8) 철근 배근도, 철근 수량표 작성 특히 단부 등에 대한 상세 배근도와 철근 피복두께 확보 및 정·부철근 등의 간격 유지를 위한 받침(CJATR) 및 간격유지재(SPACER)의 재료, 설치 위치도 및 상세도를 작성하여야 한다.

9) 옹벽 및 각종 날개벽에 대한 전개도를 작성하여야 한다.

10) 날개벽 및 옹벽 등에 설치될 각종 배수공의 위치 및 설치 상세도를 작성하여야 한다.

11) 상세도로 표시할 수 없는 주의 사항(시공시 유의사항등)에 대해서는 필히 도면에 명기하여야 한다.

바. 설계서 및 예산서 작성

1) 일반사항

가) 예산서항목은 총공사비, 도급예정액, 관급자재대 등으로 구분 작성한다.

나) 설계서 및 예산서 서식 규격은 발주처와 협의하여 결정한다.

다) 적용품셈은 건설공사 표준품셈을 적용한다.

라) 노임단가는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조의 규정에 의하여 적용한다.

마) 산재보험료 및 안전관리비는 노동부에서 고시하는 기준에 따른다.

2) 재료 및 단가산출

가) 수량 및 단가산출은 각각 별책으로 작성하되 참조하기 편하도록 편집한다.

나) 중기사용료 및 자재단가표를 별도로 작성하여 검토할 수 있도록 한다.

3) 예산서 작성

가) 각 공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서에 의거하여 산출 명시하여야 한다.

나) 각 공종별 수량은 도면 및 산출서상 명시하되 반드시 집계표를 작성하여야 한다.

다) 공사원가계산은 재경원 회계예규 “원가계산에 의한 예정가격 작성준칙”에 의한다.

라) 각 공종별 소요인원 산출은 상세히 하고 산출서를 작성하여 별책으로 편집한다.

마) 품질관리 및 안전관리시방규정을 상세히 작성 별책으로 편집하고 비용도 적정하게 반영한다.

제6절 제출도서의 작성

1) 시방서에는 일반시방서와 특별시방서를 구분작성한다.

2) 공사에 사용되는 각 공종별 시공방법, 자재에 대한 시방을 상세하게 수록하여야 한다.

3) 시공순서 표기등 그림 또는 도면이 필요할 시에는 그림 또는 도면을 삽입한다.

4) 특별시방서 작성시 본 공사에 특별히 적용되는 규정으로 시공과 관련된 특별히 유의할 사항, 발주자가 수급자에게 최적의 품질과 규격이 확보되도록 하는 상세한 조건 및 요구사항을 명기하여야 한다.

5) 신공법과 관련하여 시공시 특별히 유의하여야 할 사항을 명기하여야 한다.

6) 수급자가 제공하여 시공하는 건설 자재중 기준 및 재질과 시험방법 등을 특별히 명시하여야 한다.

7) 공사시공과 관련한 시험방법 등을 특별히 명시하여야 한다.

8) 레미콘, 아스콘의 경우 배합설계 승인사항, 타설 또는 포장방법 등을 특별히 명시하여야 한다.

제7절 성과품 인쇄 및 납품

가. 검토용 성과품 제출

계약자는 본 용역의 납품예정 성과품을 과업종료 전에 감독관에게 제출하여 사전검토를 받아야 한다.

1) 시설물의 비교검토, 공법결정 검토 등에 관한 사항을 발주처와 협의하여야 한다.

2) 계약자는 설계도서 및 단가산출서, 재료산출서, 예산서등 각종 성과품을 감독관 경유 발주처의 검토를 득한 후 인쇄를 준비하여야 한다.

3) 발주처에서 공사 발주에 필요한 설계도서 등을 납품 요구시에는 기일을 엄수하여 제출하여야 한다.

나. 성과품 인쇄

계약자는 용역 성과품을 수정하여 감독관의 확인을 받은후 최종 성과품을 인쇄한다.

다. 납품목록

계약자는 과업수행기간 종료일 이내에 아래 성과품을 납품한다.

1) 설계도면(청사진 : 원판포함)	3부(8절소도면 5부)

2) 설계서(설계설명, 시방서, 공내역서 포함)	3부

3) 설계예산서	3부

4) 단가산출서	3부

5) 수량산출서	3부

6) 구조 및 수리계산서(필요시)	3부

7) 편입용지조서 및 지장물조서(용지도면 포함)	3부

8) 측량관계야장 및 성과표(원본)	일 체

9) 인·허가 서류(필요시)	일 체

10) 설계도서 전산자료 일체