농어촌도로 정선102호(덕산기)도로확포장공사 실시설계용역

과 업 지 시 서

2007. 10

	정 선 군

목       차

제1장 과업설명서

제1절 과업의 명칭

제2절 과업의 목적

제3절 과업의 범위

제4절 과업기간

제5절 설계기준

제6절 과업의 세부사항

제2장 과업지시서

제1절 일반사항

제2절 조    사

제3절 측    량

제4절 설    계

제5절 사전환경성검토

제6절 설계도서작성 및 공사비산출

제7절 제출도서의 작성

제8절 성과품 인쇄 및 납품

제 1 장  과 업 설 명 서

제 1 장 과업설명서

제1절 과업의 명칭

농어촌도로 정선102호(덕산기)도로확포장공사 실시설계 용역

제2절 과업의 목적

본 과업은 기존도로 노폭이 협소하고 굴곡이 심하여 차량통행불편과 보행자 안전사고 위험이 상존하고 있는 구간에 대하여, 원활한 교통소통과 지역주민 생활 불편을 해소하고 농산물 반출의 원활로 농가 소득증대 기여 등 도로기반시설을 개선하는데 그 목적이 있다.

제3절 과업의 범위

가. 과업의 개요

- 조사측량 L=0.3㎞,  실시설계용역 1식, 재해사전영향성검토 1식.

나. 과업의 범위

1) 현지현황 조사

가) 지장물 조사

나) 하천 현황조사 및 관련 계획검토

다) 관련사업계획 조사, 검토

라) 측량 및 용지도 작성

2) 실시설계

가) 선형 설계

나) 토공 설계

다) 배수시설 설계

라) 포장 설계

마) 구조물 설계

바) 부대시설 설계

사) 공사중 홍수 및 위급사항 발생시 처리에 대한 계획 및 대책

아) 설계도서 작성(예산서 포함)

자) 지하 매설물조서 작성(각종 통신시설, 상하수도시설 및 기타시설물)

차) 기타 관(우리군 및 관계기관)이 필요하여 요구하는 사항

3) 사전환경성검토

가) 공사개요 검토

나) 환경현황의 조사 및 분석

다) 사업시행으로 인한 환경에의 영향예측 및 평가

라) 환경에 미칠 악영향의 저감방안 수립 및 불가피한 환경에의 악영향 분석 및 평가

마) 종합평가 및 결론

바) 보고서 작성(환경성검토서)

사) 기타

4) 사전환경성검토

가) 작업계획수립

나) 대상지역 유역 및 재해현황조사

다) 재해영향예측

라) 재해영향저감대책수립

마) 검토항목작성

바) 결론 및 검토서 작성

5) 공사 중 사용할 각종 자재에 대한 규격, 재질시험 및 검사방법 등을 특별시방서에 명기하여야 한다.

6) 설계도서 작성 시 기능공들이 쉽게 이해할 수 있는 설계상세도(Shop Drawing)를 작성하여야 한다.

제4절 과업기간

본 실시설계 용역기간은 착수일로부터  30일로 하며 다음 사항에 대하여 우리군의 승인을 득한 후 기간을 변경할 수 있다.

가. 용역기간 중 기상불량(강우, 강설, 기온급강하)일수가 평균일수(10개년)보다 많아 과업수행에 현저한 차질이 발생될 때

나. 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

다. 우리군의 방침변경 또는 지시에 의하여 과업을 중단하였을 때

라. 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때(과업량 증가 등)

제5절 설계기준

가. 설계적용시방서 및 기준

본 용역설계는 본 과업지시서 및 제시한 각종시방서를 기준 및 참고하여 우리군과 협의하여 적용한다.

1) 도로의 구조⋅시설기준에 관한 규정

2) 토목공사 일반표준시방서(건교부 제정)

3) 콘크리트구조 설계기준(건교부 제정)

4) 콘크리트공사 표준시방서(건교부 제정)

5) 하천시설 기준(건교부 제정)

6) 하천공사 표준시방서(건교부 제정)

7) 건설기술관리법 품질시험 규정 : 적용

8) 시선유도시설 및 관리지침(건교부 제정)

9) 환경친화적인 도로건설 지침(건설교통부 제정)

10) 일반도로 구조물 표준도(구조 및 수리계산에 의하되 참고사항 필요시)

11) 한국공업규격(KS관련사항)

12) 『강원도형』자연순응ㆍ산간계곡형 수해복구지침 및 기타 필요한 관련자료

나. 노임단가 : 대한건설협회에서 조사 공포한 납품당시 시중노임단가 (이월 시는 성과품 납품 당해연도분 반영)

다. 환    율 : 납품당시 기준 전산환매도율 적용 (이월 시는 성과품 납품 당해 연도분 반영)

라. 중기사용료 : 납품당시 기준 조달청 중기사용료

마. 자재단가 : 최근 물가정보지(조달청발행)를 적용하고 내용이 없는 자재는 가격 정보지(대한건설협회 발행)를 참고

제6절 과업의 세부사항

가. 일반사항

1) 도급자는 설계과정에서 우리군의 지휘감독을 받아 본 용역을 성실히 수행하여야 한다.

2) 도급자는 본 과업의 지시서와 관계 법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 정확도에 대한 전적인 책임을 진다.

3) 도급자는 계약일로부터 7일 이내에 보안각서가 첨부된 착공계와 예정공정표 및 용역수행자 명단을 분야별로 작성 제출하여야 한다.

4) 본 과업은 계약기간 내에 예정공정표대로 차질 없이 수행하여야 하며 제4절에 규정된 사유에 해당되는 경우에는 우리군의 승인을 얻어 기간을 연장할 수 있다.

5) 도급자는 본 과업 수행중 관계법규에 따른 인·허가 또는 협의가 필요할 시에는 우리군과 협의하여 제반절차를 이행하여야 한다.

6) 과업수행 중 내용의 변경, 정책변경 등 불가피한 경우에는 본 용역의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업지시서를 변경할 수 있다.

7) 과업수행중 이견이 있을 시에는 상호협의에 의하여 해결한다.  그러나 이에 대한 결정권은 우리군이 갖는다.

8) 본 과업에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 우리군과 협의하여 처리하되 협의가 되지 않을 경우에는 우리군의 지시에 따르도록 한다.

9) 설계도서 작성은 한글사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며 단위는 C.G.S 단위를 사용한다.

10) 본 과업수행에 따른 용역비의 변동요인이 발생할 경우 예산범위 내에서 정산처리 할 수 있다.

11) 설계도서에는 매 도면마다 과업책임기술자 및 분야별 책임기술자의 확인 서명날인 하여야 한다.

나. 보안사항

1) 도급자는 과업수행 기간 중 모든 용역사항에 대한 보안책임이 있으며 보안규정을 준수하여야 한다.

2) 도급자는 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착공과 동시 제출한다.

3) 모든 관계서류 자료들을 본 사업 이외의 여타목적을 위해 사용해서는 안되며, 우리군의 승인 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출할 수 없다.

4) 용역참가자가 교체될 시는 인수인계를 철저히 하고 우리군의 확인을 받아야 한다.

5) 과업수행 폐기물은 소각처리 하여야 하며 작업용 보안 사진은 감독관의 입회하에 폐기 처리하여야 한다.

6) 기타 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행 상 보안관리를 요하는 사항은 우리군에서 보완지시할 수 있으며 보안규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은 도급자가 진다.

다. 설계변경 및 조정

1) 우리군의 방침에 따라 과업수행이 중단되었을 때

2) 우리군의 계획변경으로 과업내용변경 또는 과업내용이 증감될 경우 예산범위 내에서 조정

3) 본 용역대상은 개략공사비를 적용하여 산출하였던바 실제 공사비가 증감될 경우 우리군의 방침에 따라 정산할 수 있다.

4) 기타 부득이한 사정으로 과업내용이 변경되었을 때

5) 도급자는 우리군이 필요하다고 인정하여 설계변경을 요구하는 때에는 정당한 이유 없이 이를 거부할 수 없으며 지체 없이 이를 이행하여야 한다.

라. 설계하자 책임한계

도급자가 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 예산손실 또는 인명피해 기타 공사진행 상 지장을 초래하였을 때에는 재설계 하여야 하며, 우리군이 결정하는 책임범위에 대하여 손해배상을 하여야 한다.

마. 해약조건

우리군은 다음과 같은 조건이 발생할 때 일방적으로 계약을 해약할 수 있다.

1) 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

2) 우리군의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3) 기타 계약조건을 위반할 때

제 2 장  과 업 지 시 서

제 2 장 과업지시서

제1절 일반사항

가. 과업수행 상 유의하여야 할 사항

1) 본 과업의 선형, 계획고 및 횡단면 결정시에는 2∼3개안을 비교하여  우리군과 협의하여야 한다.

2) 본 과업수행 시 당해지역 및 인근지역의 개발계획과 인접지역의 연결관계 등을 참고하여야 한다.

3) 노선 선형이 하천에 연하여 검토 결정될 때 도로계획고는 하천홍수위를 감안하여 결정하고 횡단면도상에 홍수위를 표시하여야하며, 하천 홍수위에 영향을 미칠 때는 관리청과 협의하고 협의내용을 보고서에 수록하여야 한다.

4) 본 과업은 관련 행정기관과 협조하여 도시계획 등 제반 인⋅허가에 문제점이 없도록 사전조사에 철저를 기하고 본 용역과업 완료 후에도 각종 인⋅허가 및 제반여건에 따라 시공 상 문제점 등 보완사항이 발생할 시는 우리군의 지시에 따라 언제든지 보완하여야 한다.

나. 성과품 작성 및 검사

1) 모든 보고서는 제 기준에 맞게 작성되어야 한다.

2) 입찰도서와 공사에 참고가 될 보고서를 작성하며 보고서에는 종합적인 내용으로 지형, 기후, 골재원, 포장설계, 공사개요 등 도로설계의 전반적인 사항을 수록한다.

3) 모든 보고서 작성을 위해 우리군과 사전 협의하여야 하고, 보고서 양식, 규격 보고서 종류 등도 우리군의 기준을 우선으로 하되 타 도로 설계 시 사용한 것을 비교 검토하여 설계하는 과정에서 최종 결정하는 것으로 한다.

4) 모든 보고서의 작성작업은 우리군과 협의하여 변경조정할 수 있다.

제2절 조  사

가. 현황조사 흐름도

	계 획 수 립		도상예비 조사		노 선 답 사		현장 세부조사
	⋅조사지역 및 범위 ⋅조사항목 및 사항 ⋅조사기간 및 방법 ⋅조사양식 및 인원편성	➡	⋅1/25,000, 1/5,000 지형도	➡	⋅지형 및 지세 ⋅현장시행 가능 토질조사 ⋅골재원 조사 ⋅강우 및 홍수조사 ⋅지장물 조사	➡	⋅측량 ⋅토지이용현황조사 ⋅민원 및 지장물 조사

나. 현황조사

1) 현 장 조 사  : 현장의 지형, 지물

2) 기존자료조사 : 설계도면, 현황도, 준공도면 및 기존자료 등

3) 기존 구조물 변형상태 조사 : 기존 구조물의 변형 상태를 조사하여 철거공법 및 보강대책수립

다. 지장물 조사

지상 및 지하에 설치, 매설되어 있는 각종시설물을 조사하여 시공 시 저촉여부를 판단하고 저촉되는 지장물은 이설 여부를 판단 설계에 반영한다.

라. 측량 및 용지도 작성

측량작업은 측량법 및 동법시행령, 시행규칙, 공공측량의 작업규정에 관한 기준에 의거 정밀하게 시행하여야 하고 각종 기준점이나 중요 측점은 도면 및 보고서에 표시하여야 한다.

마. 보상대상 조사

편입용지 및 각종 지장물 등 보상대상을 정밀 조사하여 붙임 서식에 의거 조서를 작성 제출하여야 한다.

바. 공사용 재료

본 공사 시행 시 필요한 토취장, 석산, 선택층, 보조기층, 조·세골재의 골재원에 대하여는 다음사항을 조사하여야 한다.

1) 골재원 위치는 공사구간 인근지역 중 가장 경제적인 위치를 선정하여야 한다.

2) 허가가능 여부를 관계인 및 관계기관에 확인 후 결정(관련근거 첨부)

3) 채취 가능량 및 매장량 조사

4) 사토가 발생 시는 사전협의 후 사용 가능한 적정한 사토장을 선정하고 그 평면 및 종·횡단면도 첨부

5) 운반거리 조사는 운반속도에 대한 적정을 검토할 수 있도록 도로의 상태, 노폭, 진입로 등을 면밀히 조사

6) 각종 재료의 시험은 강원도 도로관리사업소 또는 공인기관에 의뢰하여 그 시험성과를 첨부하여야 한다.

7) 현장 발생암은 최대한 유용할 수 있도록 하여야 한다.

사. 용·배수구조물 조사

1) 교량, 암거 및 배수구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고, 구조물의 규격을 결정하며, 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.

2) 현지조사 항목 : - 과거 최고 홍수위

- 부근 기존 구조물 규격

- 부근 수리시설 용량

- 하천의 현황(침식, 하상 등)

3) 자료수집 항목 : - 강우강도

- 강우시간(지속시간)

- 강우빈도

4) 용수로 및 배수로 편입구간에 대하여는 수로의 단면 연장 등을 면밀히 조사하고 현지 지형을 감안하여 이설계획을 수립하여야 한다.

5) 배수관공 시공단면 결정시에는 배수구조물별로 유역면적을 조사 선정하여 통수 단면을 결정하고(구조 및 수리계산서 제출) 유입·유출구의 방향, 구배 등을 측량하여 별도 구조물 횡단도를 작성 수량산출토록 하여야 하며 현지여건을 충분히 조사, 배수도가 중간에서 중단되는 일이 없도록 하여야 한다.

6) 용·배수관공의 규격 및 시공위치 조사시는 감독관, 용역회사책임자, 관계기관 및 주민대표 등과 합동으로 조사하여 누락됨이 없도록 하여야 한다.

7) 기존구조물 또는 배수시설의 구조, 형식, 연장, 구조물 상태 등을 세밀히 조사하여 이용가능 또는 철거여부를 결정

8) 성토구간등 법면 보호에 필요한 도수로지점과 단면 등을 조사하여 위치별 연장을 도면에 표시하여야 한다.

9) 횡배수관 최소규격은 통수단면 검토에 관계없이 1,000m/m를 원칙으로 한다.

아. 구조물의 조사

1) 구조물 조사는 계획노선에 관련되는 기존 구조물조사와 아울러 당해 지역의 자연조건 및 관련시설물 등을 고려한 구조물의 설치여부 및 위치를 조사한다.

2) 구조물 설치위치에 대한 지질조사 및 배수상태 유량 등을 세밀히 조사하여 구조 형식, 규격 및 연장, 기초공법 등을 결정한다.

3) 구조물의 위치와 규격결정은 관계기관, 주민 및 우리군과 협의 후 결정하여야 한다.

4) 기존 구조물을 철거해야 될 경우에는 일반도를 작성하여 철거단면을 산출하여야 한다.

자. 교량가설지점의 조사

1) 기존하천의 저수위, 갈수위, 평수위, 홍수위, 유속, 유량, 유역면적 등 제반조사를 실시하여 교량 및 단면 계산 등의 기초로 하여야 한다.

2) 하부기초에 대하여는 지질조사 결과 및 현지 여건을 비교 검토하여 기초공법을 결정하여야 한다.

3) 기타 시험기준은 건설공사품질시험 규정에 따른다.

4) 교량의 상·하부 구조 및 공법 등을 지형조건, 지반조사결과, 계획홍수위, 홍수단면 등을 감안하여 경제성, 시공성 및 조형미를 고려하여 2개안 이상 기본 계획안을 제출, 우리군에 협의하여 결정한다.

5) 장대교(L=100m이상)는 주위환경에 맞추어 미관을 충분히 고려하여 설계하여야 한다.

6) 하천교량설계(연장, 높이)는 하천정비기본계획을 고려하여 계획하여야 한다.

제3절 측   량

가. 일반사항

1) 측량작업은 측량법 및 같은법 시행령, 시행규칙, 공공측량의 작업규정에 관한 기준에 의거 정밀하게 시행하여야 하고, 각종 기준점이나 중요 측점은 도면 및 보고서에 표시하여야 한다.

2) 교통량이 많을 경우 정확성 및 교통소통의 원활을 기하기 위하여 가장 적합한 시간대에 측량을 실시한다.

3) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 여유 있게 측량하여야 한다.

4) 측량기준점은 지적도근점과 일치하는 좌표를 사용하여야 한다.

나. 기준점 측량

1) 기준점 측량은 국립지리원에 기록 비치된 기준점을 사용하여 시행하여야 한다.

2) 지형도상에서 가급적 정삼각형에 가깝도록 삼각망을 구상하고 현장을 답사하여 합리적인 지점을 산정한다.｣

3) 미지점 1점을 구할 때는 기지점 3∼5점을 사용하며, 기지점에서 미지점까지 거리는 가능한 6.0km이하로 한다.

4) 삼각망의 교각은 30∼120° 이내로 하나 그 방향으로 결정할 때에는 90°에 가깝도록 한다.

5) 배점밀도는 기지점과 미지점을 합하여 2㎢에 1점으로 한다.

6) 수평각 관측은 20초독 이상의 정밀도를 가진 트랜싯을 사용하고 망원경의 정반의 위치로 관측하는 1조를 1대회로 하며, 관측대회수는 2∼3대회로 한다.

다. 다각측량

1) 다각점의 배치는 현황측량 및 중심선측량에 편리하도록 배치하여야 한다.

2) 점간거리는 10m이상 120m이하로 한다.

3) 거리측정은 스틸테이프 또는 광파측거기에 의한다.(가급적 병행측정 한다.)

4) C.P점에 대한 표석매설 위치는 도로구역(계획횡단면)밖에 견고하게 설치하여 훼손 또는 유실되지 않도록 하여야 한다.

라. 수준측량

1) T.B.M의 설치는 반영구적인 고정물체에 설정하고 도로구역(시⋅종점구간) 인접에서는 표석을 매설 훼손 또는 망실되지 않도록 안전한 곳에 설치하여야 한다.

2) 지구내 T.B.M의 설치는 1km 마다 1점씩 설치하는 것으로 한다.

3) 레벨의 성능은 수준기감도 20"/2mm 이상으로 하고 표척의 최소눈금 5mm 이상을 사용한다.

4) 표척과 레벨의 거리는 70m이내이어야 하며, 전시와 후시관측 거리는 대략 같게 하여야 한다.

마. 평판측량

1) 평면선형을 확정 후 현황측량을 실시하여야 한다.

2) 도로 중심선에서 좌우 60m이상, 교량설치지점은 상하류 100m이상 지형(산악지, 하천, 목표물등)을 정밀히 측량하여 표시하고 하천을 연하여 선형계획이 이어지면 제방선 및 하천정비 기본계획에 의한 장래 제방계획선도 포함하여야 하며, 산지부등 평면선형이 불량하여 선형변경이 예상되는 구간에 대해서는 좌우 200m 이상을 측량하여야 한다.

3) 도근점, T.B.M 및 IP, CP 등의 위치 혹은 표고 등을 명시하고 행정구역의 시군, 읍면동, 리 등의 경계를 표시한다.

4) 축척은 1:1,200으로 하고 기존구조물은 시공년도, 구조제원, 사용가능여부와 개수연장 및 신설연장 등을 표시한다.

5) 평면도에는 건축물 및 기타 축조물 등에 대하여 그 정확한 형태를 표시하되 교차도로, 전, 답, 하천, 수목, 전주, 묘지, 관개배수시설, 구조물, 옹벽 등 도로설계에 관계되는 모든자료가 표시되어야 한다.

바. 중심선 측량

1) 중심선측량에 필요한 도근점은 본 설계도서 인근구간의 기존 삼각점으로부터 삼각측량을 실시하여 골조를 확정하여야 한다.

2) 중심측점 간격은 20m로 하고 지형상 종횡단의 변화지점이나 암선의 시·종점 및 구조물설치지점(교량, 암거등) 곡선부분 등 필요한 지점에는 중간측점을 실시하여야 한다.

3) 측량에 사용할 말목의 규격은 다음과 같다.

가) 측점 및 중간측점 : 유색천이 묶인 못

나) I.P, C.P, B.C, E.C, T.B.M등 : 5cm × 5cm × 50cm

사. 종단측량

1) 조사설계 및 공사시공에 필요한 T.B.M 은 종단측량 이전에 500m 마다 변동되지 않는 암반, 구조물 등에 설치하고 횡단도에 표시하여야 하며, 기준점은 2등 수준점이상을 사용하여야 한다.

2) 종단측량은 2회 이상 왕복측량을 실시하여 평균치가 오차허용치 내에 들도록 하여야 한다.

3) 종단면도 작성원도는 1mm 방안지를 사용하고 축척은 횡 1:1,200, 종 1:100∼1:200으로 하며, 곡선의 방향에 곡선반경, 곡선장, 시⋅종점을 명확히 기입하고 구조물의 위치, 현황, 규격 등을 기입한다.

4) 시공계획고는 절성토에 대한 경제성을 검토, 조정하여야 하며 우리군과 협의한 후 결정하여야 한다.

5) 종단구배가 변하는 곳에는 종단곡선을 삽입한다.

아. 횡단측량

1) 횡단측량은 예상되는 도로경계선보다 충분히 넓게 상세히 측량하고, 구조물은 별도로 상세히 조사하되, 도로 횡단 구조물은 유입, 유출구의 표고를 기입하고 소요연장을 기입한다.

2) 원도는 1mm 방안지를 사용하고 축척은 1/100으로 한다.

3) 단면기입순서는 하에서 상방향으로 하고, 단면이 2열 이상일 때는 좌측을 선열로 한다.

4) 각 측점의 단면마다 지반고, 계획고, 절·성토고 및 우리군에서 지시하는 공종의 물량 등을 산출 기입한다.

자. 기타측량

1) 중심선이 산악부를 통과할 때는 중심선 좌,우 150m씩 평면측량 및 지형을 판단할 수 있도록 편입용지폭 이상으로 횡단측량을 실시하고 1m 등고선을 평면도에 표시한다.

2) 용·배수로 및 하천의 유로 방향을 표시하고, 용·배수구조물의 유입·유출구를 표시하여야 한다.

3) 평면도와 종단면도의 중심선 측점은 도면상에서 가급적 수직선상에 일치시켜야 한다.

4) 옹벽, 석축 등에 대하여는 별도의 구조물전개도를 적정한 축척으로 작도하여 계획고 및 표고를 표시하여 첨부한다.

제4절 설  계

가. 설계기준

1) 본 용역설계의 선형설계기준은 다음과 같다.

2) 비교노선 검토 시에 도시계획구간은 도시계획을 검토하여 노선을 선정하여야 한다.

3) 선형은 도로의 구조⋅시설기준에 관한 규정에 정하는 기준에 따라 실시함을 원칙으로 한다.

4) 설계노선은 선형조건이나 시공조건 등이 불량한 특정구간에 대하여는 비교 노선을 선정 기술적, 경제적인 관점에서 평가하여야 하며, 또한 새로운 노선의 신설에 대한 비교 평가도 포함하여 최적대안을 사전에 협의하여야 한다.

5) 선형은 평면도, 종⋅횡단면도를 이용하여 안전하고 경제적인 최적의 선형이 되도록 설계하되 교차로, 버스정류장, 통로암거 및 기타 부대시설을 고려하여야 한다.

6) 도로선형 설계시에는 가능하면 기존도로의 선형과 높이 등을 최대한 살릴 수 있도록 하되 장래 주민들의 질적요구에 부합될 수 있도록 선형을 결정하여야 한다.

나. 토공설계

1) 횡단구성요소인 절토법면 경사는 토질조사 결과에 따라 구간별 비탈면 처리계획을 협의하여 결정하여야 한다.

2) 토공은 제조사에 의한 자료나 토공계획에서 확정된 평면 및 종단선형과 횡단도를 기초로 하여 순성토 및 사토가 적어지도록 최상의 설계가 되도록 하여야 한다.

3) 토적은 각 측점의 횡단도에서 토질조사 성과에 따라 토사, 리핑암, 발파암으로 구분하여 산출해야 한다.

4) 절토부 노상의 지지력이 부족하다고 판단될 경우 양질의 환토 등 지지력 보강공법 및 대책을 강구하여야 하며, 성토부의 시공재료가 불량한 경우에도 노상안정처리 공법 등 대책을 강구하여야 한다.

5) 선형 변경시 지하매설물에 대한 시공 시 확인조사 및 제거 비용을 설계에 반영하여야 한다.

6) 일상적인 사면구배 기준치 적용이 곤란한 대사면 구간이나 기반암과 붕적토와의 경계선 및 용출수 위치, 기반암의 층리 및 절리의 경사방향과 균열상태 등의 절취비탈면 붕괴 예상 구간에는 실측지 및 토성 시험 결과치를 활용하여 적정구배가 되도록 설계하여야 한다.

다. 횡단구조물 및 배수시설물의 설계

1) 본 설계에서는 축척 1/25,000 지형도상의 계획노선에 대하여 유역면적과 구조물 설치위치별 유량을 배수구조물 설계법에 의거 계산 후 현지조사를 실시하여 과거의 최고홍수위, 기존구조물의 규격 및 기타 필요한 자료를 수집한다.

2) 횡단구조물 및 배수시설물의 설계는 계획도로의 토공 및 구조물과 연관하여 필요한 개소에는 배수시설을 설치하도록 설계한다.

3) 여기서 배수시설물이라 함은 계획도로의 노면배수, 지하배수, 계획도로를 횡단하는 배수관, 암거, 계획도로를 연한 측구 등 일체의 배수시설을 말한다.

4) 암거 및 배수관의 통수단면 결정은 25년 강우강도를 기준으로 수리계산하여 결정한다.

5) 횡단구조 시설은 건설부제정 설계기준 및 시방서에 준하여 설계하되 외국의 설계기준 및 시방서를 참고할 수 있으며, 외국의 설계기준 또는 시방서를 준용하였을 경우에는 그 참고자료를 명시하여야 한다.

6) 중요한 도로 및 도로횡단 암거는 관계기관의 사업계획과 관련시켜 설계한다.

7) 배수관 유출구는 침식방지를 위하여 관경의 3배 이상으로 함을 원칙으로 한다.

라. 교량 및 구조물 설계

1) 각종 구조물의 설계는 건설부제정 각종시방서 및 도로의 구조·시설기준에 관한 규정 및 본 과업지시서에 의하여야 하며, 과업지시서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 우리군의 지시를 받아야 한다.

2) 중점사항

⋅콘크리트교의 캔틸레버부는 미관을 고려 곡선처리 하여야 한다.

⋅단순 빔 연속교의 사하중 및 활하중에 의한 부철근 보강을 하여야 한다.

⋅P.S.C BEAM의 정착부 파손방지를 위한 보강방안을 검토하여야 한다.

⋅최소 받침의 지지거리를 확보하여야 한다.

⋅전산화에 의한 최적 설계를 실시하여 경제적인 단면을 설계하여야 한다.

⋅낙교방지 시설을 설치하여야 한다.

⋅모든 교량에 대해 좌표 및 E.L을 충분히 기입 시공 시 착오 없도록 설계하여야 한다.(특별시방서 및 시공상세도 작성)

⋅현지 여건에 맞는 가도 및 축도, 가교 등을 설계에 반영하여야 한다.

⋅내진 및 피로도를 검토하여야 한다.

3) 설계방법

합리적인 설계가 가능한 강도설계법과 현실성을 고려한 허용응력설계법을 비교 검토하여 가장 경제적이고 합리적인 방법으로 구조물을 설계할 것이며, 도면상에 강도설계법과 허용응력설계법 적용여부를 표시하여야 한다.

또한 도면 작성은 AUTO CAD를 이용토록 하여 추후 도로대장 작성 시 유용토록 한다.

4) 내진설계

도로교 표준시방서 개정 핵심내용에 의거 본 과업수행 시 시방규정에 따라 변위 및 부재력을 산정하여 내진 안전성을 검토하여야 한다.

5) 교량은 교량위치, 지질, 하천 등의 제조사 결과를 기초로 하여 수개안의 비교안을 검토하여 결정하여야 한다.

6) 교량의 구조는 가급적 연속구조로 하여 이음개소를 줄이고 승차감을 높이도록 하며, 미적 고려를 하여야 한다.

7) 교량형식은 수개의 비교검토안을 작성 우리시와 협의 후 최적안을 결정해야 한다.

8) 교량은 횡단하천에 대하여 유역면적이 40㎢ 이상의 하천 및 강우 유출량 산정 자료를 통계적으로 분석하여 유역면적과 유출량과의 관계 곡선을 작성하여 적용하되 소교량은 50년을 기준하고 장대교는 100년을 기준하여 기상청 수문관측자료를 근거로 하여 설계한다.

9) 하천정비 기본계획이 수립되어 있는 하천의 경우에는 기본계획 자료를 토대로 수문분석을 시행하여야 한다.

10) PIER에 의한 수위상승을 검토하고 이로 인한 배수의 영향이 상류측 수위상승에 미치는 범위를 결정하여야 하며 또한 교량 하부기초세굴에 대해서도 세굴량과 세굴심도를 결정하여 대책을 설계에 반영하여야 한다.

11) 교량의 교명주는 교량난간 높이보다 높지 않아야 하며, 교량의 양단에는 어프로치슬래브를 설치하도록 설계한다.

12) 가설에 주의를 요하는 교량에 대하여는 가설공법에 대한 설계를 시행하여야 한다.

13) 교량 구조계산은 도로교시방서에 의한 정밀계산으로 하고 하부구조계산은 온도 변화에 의한 수평력을 고려하여 설계한다.

14) 교량점검 및 유지보수사양서와 유의사항 등을 별도로 작성하여 납품하여야 하며, 점검통로 및 출입구 설치를 설계에 반영하여야 한다.

15) P.S.C BOX 또는 STEEL BOX로 설계할 경우 내부유지관리에 필요한 점검통로, 출입구, 조명시설, 내부환풍장치 등을 설계에 반영하여야 한다.

16) 교량 하부구조의 교좌받침부는 상부하중의 집중으로 인한 응력을 검토하여야 하며, 우수 및 흙과 겨울철 염화칼슘 등이 교좌장치에 유입되지 않도록 설계 시 충분히 고려하여야 한다.

마. 교량포장설계

1) 교면포장은 원칙적으로 도로 포장설계 시공지침에 준하고, 아스팔트 포장으로 할 경우 필요에 따라 방수층을 설치하도록 한다.

2) 교면포장은 교통하중에 의한 충격, 빗물 기타의 기상조건으로부터 교량 슬래브를 보호하고 동시에 차량이 쾌적하게 주행할 수 있도록 해야 한다.

3) 포장재는 교량슬래브와 부착성이 좋고 반복 휨응력의 작용에도 충분히 견디어야 한다.

4) 교량슬래브 이음부의 평탄성이 나쁘면 교통하중에 의하여 큰 충격을 받고 조기에 균열이 생기는 수가 있으므로 주의하여야 한다.

5) RC 슬래브 등의 표면이 요철이나 강슬래브의 리벳머리등으로 포장두께가 불균일하게 될 수 있으므로 이점을 충분히 고려 설계하여야 한다.

6) 두께가 얇은 포장을 할 경우에는 특히 마모에 대하여 충분히 고려하여야 한다.

7) 강슬래브와 PC슬래브 등은 빗물 등의 침투로 교량자체의 내구성이 현저하게 약화되므로 불투수성이어야 한다.

바. 난간, 신축장치 및 기타

1) 교면상 보도와 차도의 구별이 있는 경우에는 난간을, 구별이 없는 경우에는 자동차용 방호책을 각각 연석에 설치하도록 한다.

2) 교량의 양측에는 연석을 설치한다.

3) 교면에는 배수를 원활히 하기 위한 횡단구배를 두고 노견에는 필요한 간격으로 충분한 크기의 배수구를 설치한다.

4) 신축이음 장치는 도로의 성격, 교량의 형식, 필요 신축량을 기본으로하여 전체적인 내구성, 평탄성, 배수성과 수밀성, 시공성, 보수성, 경제성 등을 고려하여 정한다.

사. 부대시설 설계

1) 일반사항

부대시설의 설계서는 우리시가 제시하는 표준도를 우선적으로 적용하여야 한다.

2) 표지판(Road Sign)

각종 도로표지판(Road Sign)은 이용자의 편의 및 안전을 최대한 고려하여 설계하여야 하며, 표지판의 재질에 대하여는 내구성 및 경제성을 비교·검토하여 우리군과 협의 결정하며, 도로안내표지판 및 교통표지판 설치 위치 등을 조사하고 도면에 표시하여야 한다.

3) 급커브지점이나 위험개소를 조사하여 차량의 안전의 안전운행에 필요한 제반 위험표지 및 시선유도설치 등의 위치를 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

4) 가드레일 등 설치구간을 조사하여 통행에 안전을 기할 수 있도록 하여야 한다.

5) 버스정차대 시설이 필요한 구간은 위치를 조사 후 우리군과 협의하여 설치여부를 결정한다.

6) 본 도로와 접속되는 타 도로와의 접속부의 가각처리는 도로의 구조시설 기준에 관한 규정에 의거 처리하여야 한다.

7) 사토장은 비상주차장이나 적사장등 도로 부속시설로 활용할 수 있도록 설계하고 도면에 표기한다.

8) 도로 선형변경으로 발생되는 폐도로의 활용방안을 제시

9) 낙석 위험구간에 대한 방지대책 검토 후 설계에 반영

10) 안전시설물 설치에 대하여도 시방규정 및 세부적인 도면(크기, 간격 등)을 작성한다.

11) 기타 부대시설의 설계는 우리군과 협의하여 시행한다.

아. 기존구조물 철거 시 철거방법 및 필요시 낙하물방지 설계

자. 시공순서, 시공방법 및 안전관리에 대한 전반적인 설계

제5절 사전환경성검토

가. 사전환경성검토

1) 기본계획검토

가) 사업개요 검토

사업의 배경, 목적, 추진경위 및 내용 등을 검토한다.

나) 환경영향 요인 파악

공사 시 및 운영 시 등의 각 단계에서 환경에 미치는 영향을 파악한다.

다) 대상 환경항목 설정

자연환경, 생활환경, 사회⋅경제환경에 있어서의 환경영향 요인 및 지역적 특성을 감안, 세분하여 환경항목을 설정한다.

라) 환경영향 요소 및 환경인자 행렬식 대조표 작성

환경영향 요소와 환경인자와의 상관관계를 모든 환경요소와 환경인자간의 관계가 총괄적으로 포함되도록 영향의 크기 및 중요도 등을 숫자, 부호등을 사용하여 행렬식 대조표를 작성한다.

마) 조사 및 측정계획 수립

사업 실시에 따른 영향을 예측하고 평가하는 데에 필요한 자료로서 적절한 범위에 걸친 적합하고 객관성 있는 자료를 얻을 수 있도록 계획을 수립한다.

2) 환경영향의 조사 및 분석

가) 자료수집 및 현황조사

계획노선 지역과 사업시행에 따라 영향을 받을 지역의 자연환경, 생활환경 및 사회⋅경제환경을 조사 분석하여 지도, 사진 및 도표 등을 사용하여 적절히 기술하고, 사업시행에 따라 현저하게 영향을 받을 분야에 중점을 두고 기술하며 긴요하지 아니한 자료의 나열은 피한다.

나) 조사항목

(1) 자연환경

① 기  상

최근 10년간의 기상자료를 수집하여 기온, 풍향, 습도, 강수량 등을 분석 기술한다.

② 식물상

조사지역의 종별분포상황, 녹지자연도, 현존량, 순생산량 및 식생과 관련된 토양조사 결과를 기술하고 현재 법적 보호를 받고 있는 종이나 특산종, 희귀종, 특정군락에 대하여는 별도로 기술한다.

③ 동물상

조사지역의 종별분포상황을 기술하고 현재 법적 보호를 받고 있는 종이나 특산종, 희귀종, 희소종, 특정개체군에 대하여는 별도로 기술한다.

④ 지형, 지질

사업지역의 토질구성, 지질 안정성, 물리화학적 특성을 조사 분석한다.

(2) 생활환경

① 토지이용

사업지역을 포한한 행정구역단위의 토지이용 현황을 조사.기술하고 사업시행으로 인하여 철거 혹은 이전되는 지장물과 토지이용계획 등을 제시한다.

② 대기질 (오염원 및 오염물질)

사업지역 주변의 주오염원을 조사, 이들에 의해 발생되는 오염물질을 산정하여, 기존 자료에 의한 사업지역 주변의 대기 오염도 파악, 사업지역을 대표할 수 있는 지역을 선정하여 대기질을 실측한다.

③ 수질 (오염원 및 오염물질)

사업지역 인근 지역의 수계 (하천, 지류) 및 지하수질 등을 조사 분석한다.

또한 오염원 현황을 파악하고,수질오염 현황을 파악하고 상수이용 현황을 조사.분석한다.

④ 폐  기  물

폐기물의 발생원별로 조사한다.

폐기물의 발생현황, 수거현황 및 처리현황 등을 조사 분석한다.

⑤ 소음, 진동

계획노선 주변의 소음, 진동을 실측하여 발생원에 대한 조사 분석을 한다.

⑥ 경관

계획노선으로 인한 경관의 변화에 대하여 조사 분석을 한다.

(3) 사회⋅경제환경

① 인구, 주거

사업의 시행으로 인한 인구 및 주거에 대해 미치는 영향을 조사 분석한다.

② 산  업

사업의 시행으로 산업에 미치는 영향을 조사 분석한다.

③ 교  통

사업지역 주변의 현황교통량을 토대로 향후 운영 시 교통서비스분석을 실시하여 이에 따른 저감대책을 수립한다.

④ 문화재

사업의 시행으로 문화재 관리법에 의한 유적지, 유물, 문화재, 분포 또는 존 재 가능성 및 기존 문화재에 미치는 영향을 조사 분석한다.

3) 사업시행으로 인한 환경에의 영향예측 및 평가

가) 환경에 미칠 모든 영향(직접․간접적 영향, 단기⋅장기적 영향, 긍⋅부정적인 영향)  요인 및 제반 문제점을 항목별로 세밀히 검토하고, 현재 및 당해 사업이 시행되지 않은 경우의 미래환경도 예측하여 비교 검토한다.

나) 검토내용의 표현방법은 가능한 한 정량적이며 기술적으로 표현하여야 하며, 환경 항목별 환경영향의 예측 및 평가에 필요한 사항은 환경보존 및 관계규정에 따르며 이에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 환경성검토 주관부처의 해석에 따른다.

다) 환경성 검토 결과 예측된 환경상의 영향에 대하여 환경 영향요소와 환경인자와의 상관관계를 영향의 크기 및 중요도 등 숫자 또는 부호등을 사용하여 적절히 표시한다.

4) 환경에 미칠 악영향의 저감방안 수립, 불가피한 환경에의 악영향 분석 및 검토

가) 상기 항에서 예측된 영향중 악영향을 도출하고 저감시키기 위한 적절한 저감방안을 강구하여야 하며, 장기적인 환경보전대책을 수립하여 제시하여야 한다.

나) 환경보전대책 수립 시 본 사업계획과 병행된 환경보전시설이 요구될 경우 이에 대한경제적, 기술적인 타당성을 검토하 하여야 한다.

다) 저감시킬 수 없는 불가피한 환경에의 영향 정도, 중요성 등을 분석, 검토하여 대안을 제시한다.

5) 종합평가 및 결론

가) 상기 항에서 조사, 평가된 결과를 종합 정리하여 평가 및 결론을 내린다.

나) 종합평가를 하고 그 결과에 대해 기재해야 할 사항은 다음과 같다.

(1) 환경 영향의 추이에 대해서는 제안된 행위가 실시되지 않았을 경우에 환경변화의  장래예측과 검토를 기술한다.

(2) 환경변화와 장래예측에 대해서는 제안된 행위가 실시되었을 경우에 환경변화의  장래예측과 검토를 기술한다.

(3) 환경 영향 저감을 위한 조치(환경변화의 방지대책)에 대해서는 기대되는 영향  저감을 위한 조치를 기술한다.

6) 보고서 작성(사전환경성검토 보고서)

가) 보고서는 상기 항에서 조사⋅평가된 내용과 결과를 종합 정리, 작성하여 제출하되 관계자료 및 산출근거 등은 부록에 수록하여야 한다.

나) 본 보고서를 원주지방환경관리청에 제출하여 사전환경성검토를 받아야 한다.

다) 납품전에 우리군과 협의하여 원주지방환경관리청의 의견에 따라 보완 후(사전환경환경성검토 완료) 최종성과품으로 납품하여야 한다.

나. 환경영향저감방안

1) 주요 검토내용

가) 절․성토 공사 시 토량이동에 따른 환경상 영향의 예측 및 저감대책의 수립

나) 절․성토에 따라 발생되는 사면의 안정 및 사면녹화대책의 수립

다) 특정야생동⋅식물, 천연기념물 등의 분포현황 및 보호대책 수립

라) 공사시 비산먼지 발생에 따른 영향예측 및 저감대책 수립

마) 하천변 및 절․성토 공사시 토사유출에 따른 영향예측 및 토사유출 방지대책 수립

바) 도로변 주거지역 및 정온을 요하는 시설(학교, 병원 등)에 대한 소음․진동 영향예측 및 저감대책 수립

사) 지역간 차단, 분리되는 지역에 대한 적정대책 수립

2) 환경영향 저감방안

가) 지형⋅지질

(1) 절⋅성토에 따른 사면발생지역의 위치 및 사면보호대책의 수립, 검토

(2) 공사구간별 절․성토(절․성토고 포함)시 부족 및 남는 토량의 처리계획에 따른 영향예측 및 저감대책 수립

나) 동⋅식물상

(1) 계획노선 주변지역에 특정야생 동⋅식물, 천연기념물 등의 서식․분포현황 및 공사로 인하여 환경에 미치는 영향에 따른 보호대책 수립

(2) 육상동물의 이동로 및 서식지가 차단․분리되는 지역의 조사 및 이동통로설치 등 적정 보호대책 수립여부 검토

(3) 공사 시 불가피하게 훼손되는 지역의 임상이 양호한 수목중 이식가치가 있는 수목은 도로변 및 주변지역 등에 이식방안 수립

(4) 절⋅성토구간의 사면녹화계획의 수립

다) 대 기 질

(1) 공사 시 대기오염물질 발생에 따른 영향예측 및 저감대책 수립

(2) 세륜⋅세차시설, 이동식 방진망 등 환경저감시설의 설치 검토

(3) 비산먼지 발생억제시설의 설치 검토

(4) 주거밀집지역 및 정온을 요하는 시설(학교, 병원 등) 지역을 통과하는 토사운반차량에 대한 비산먼지 피해방지대책의 수립

(5) 운영 시 교통량 증가에 따른 대기오염물질 발생량 예측 및 그 저감대책의 수립

라) 수 질

(1) 절⋅성토 공사 시 토사유출에 따른 하천, 농경지 등에 미치는 영향예측과 현지에 적용가능 한 토사유출방지대책

(2) 계획노선 주변에 상수원보호구역 및 취수장이 위치하고 있을 경우에는 동 수역에 미치는 영향과 적정한 대책을 수립

마) 폐 기 물

(1) 공사 시 발생되는 사업장 일반 및 지정폐기물 발생량 예측 및 처리대책의 수립

(2) 공사 시 건설폐기물 및 지장물에 의해 발생되는 폐기물 발생량 및 처리대책 수립

바) 소음⋅진동

(1) 공사 시 투입되는 장비에 의한 소음⋅진동 영향예측 및 저감대책 수립

(2) 운영 시 교통량에 의한 주변지역 소음⋅진동 영향예측 및 저감대책 수립

(3) 이동식 가설판넬 및 방음벽의 설치가 필요한 경우 제원 제시

제6절 설계도서 작성 및 공사비 산출

가. 일반사항

1) 설계도서의 규격은 건설부제정 토목설계제도 규정에 의한 표준규격으로 한다.

2) 구조물 상세도는 구조물의 시공에 필요한 사항이 명시되어야 하며, 도면으로 표시하지 않은 사항은 도면상에 문자로 표시한다.

3) 콘크리트 구조물은 규격 및 설계기준강도를 도면에 표시하여야 하고 타설방법은 현장여건에 부합되도록 하여야 한다.

4) 설계도는 양질의 ｢트레이싱｣지에 제도하므로써 선명한 복사가 가능함은 물론 수정하여도 인쇄가 선명하게 나올 수 있도록 한다.

5) 도면상에 기호로 표시하기 곤란한 사항은 문자로 표시하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.

나. 평면도 작성

1) 축척은 1:1,200으로 하여 평면도를 작성한다.

2) 중심선상에 중심선 측점, 중간점, 곡선 시·종점 등을 표시하며, 도근점의 좌표 및 표고를 표시한다.

3) 교각점과 접선을 표시하고 교각, 접선장, 곡선장 및 편구배 등을 명기한다.

4) 제반 도로시설물(기존, 신설, 개량)을 표시하고 구조물의 규격, 형식 등을 기입하고 배수시설에 있어서 유출방향을 표시한다.

5) 모든 도근점 및 T.B.M을 표시하고 그의 좌표 및 표고를 기입한다.

다. 종단면도 작성

1) 종단곡선 부분에는 곡선설치에 필요한 제원을 상세히 기입한다.

2) 제반도로시설물(기존, 신설, 개량)의 위치, 규격 및 형식, 유입구와 유출구의 표고를 기입한다.

3) 종단부 하부에 측점, 지반고, 계획고, 종단구배 등을 기입한다.

라. 횡단면도 작성

1) 각 단면마다 측점번호, 지반고, 계획고, 성토량, 절토량, 표토제거, 벌개제근, 법면보호공, 암면고르기, 절토부 및 기존도로 노반정리 등 수량에 필요한 제반사항을 기입한다.

2) 암거 및 배수관의 횡단면도 작성 시 위치, 규격, 계획고, SKEW, 유입구와 유출구의 표고를 기입한다.

3) 횡단면도에는 도로부지 경계선(RIGHT OF WAY)을 표시하여야 한다.

마. 구조물도 작성

1) 구조물도는 일반도 및 상세도 순으로 작성한다.

2) 콘크리트구조물 상세도에는 소요 28일강도, 콘크리트 타설순서 등을 명기한다.

3) 철근배근에는 정⋅부철근 등의 유효간격 유지용 및 철근 피복유지용 Spacer 및 Chair Bar의 위치, 설치방법 및 가공을 위한 상세도면을 작성한다.

4) Spacer 또는 Chair Bar 등은 콘크리트 타설시의 하중에도 각종 철근간격이 충분히 유지될 수 있도록 그 위치를 도면상에 명기하여야 한다.

5) Spacer 또는 Chair Bar 등은 철근가공 및 설치상세도에는 주철근 등 각 철근간의 순간격, 거푸집과 순간격 등을 고려하여 그 수치를 표시하여야 한다.

6) 철근의 이음부는 구조상 약점이 되는 곳이므로 최대인장응력이 작용하는 곳에서는 이음이 생기지 않도록 하여야 한다.

7) 철근의 겹이음 길이는 철근콘크리트 시방규정에 따라 충분한 이음길이를 두어야 하고 동일단면에 집중되지 않도록 하여야 한다.

8) 철근 배근도, 철근 수량표 작성 특히 단부 등에 대한 상세 배근도와 철근 피복두께 확보 및 정⋅부철근 등의 간격 유지를 위한 받침(CJATR) 및 간격유지재(SPACER)의 재료, 설치 위치도 및 상세도를 작성하여야 한다.

9) 옹벽 및 각종 날개벽에 대한 전개도를 작성하여야 한다.

10) 날개벽 및 옹벽 등에 설치될 각종 배수공의 위치 및 설치 상세도를 작성하여야 한다.

11) 상세도로 표시할 수 없는 주의 사항(시공 시 유의사항 등)에 대해서는 필히 도면에 명기하여야 한다.

바. 설계서 및 예산서 작성

1) 일반사항

가) 예산서항목은 총공사비, 도급예정액, 관급자재대 등으로 구분 작성한다.

나) 설계서 및 예산서 서식 규격은 우리군과 협의하여 결정한다.

다) 적용품셈은 건설공사 표준품셈을 적용한다.

라) 노임단가는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조의 규정에 의하여 적용한다.

마) 산재보험료 및 안전관리비는 노동부에서 고시하는 기준에 따른다.

2) 재료 및 단가산출

가) 수량 및 단가산출은 각각 별책으로 작성하되 참조하기 편하도록 편집한다.

나) 중기사용료 및 자재단가표를 별도로 작성하여 검토할 수 있도록 한다.

3) 예산서 작성

가) 각 공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서에 의거하여 산출 명시하여야 한다.

나) 각 공종별 수량은 도면 및 산출서상 명시하되 반드시 집계표를 작성하여야 한다.

다) 공사원가계산은 재경원 회계예규 “원가계산에 의한 예정가격 작성준칙”에 의한다.

라) 각 공종별 소요인원 산출은 상세히 하고 산출서를 작성하여 별책으로 편집한다.

마) 품질관리 및 안전관리시방규정을 상세히 작성 별책으로 편집하고 비용도 적정하게 반영한다.

제7절 제출도서의 작성

가. 보고서 작성

보고서의 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서이어야 하며, 다음 사항을 상세히 수록하여야 한다.

1) 과업의 목적, 내용, 기간, 과업 수행지침

2) 사전 조사사항

3) 설계기준 및 지침

4) 실시설계 내용요약

5) 토질조사 내용

6) 관련사업 검토사항

7) 세부공정 계획

8) 기타 필요한 세부사항

9) 기타 우리시의 요구사항 및 참고사항

10) 분야별 참여기술자명단

11) 민원 및 관계기관 협의내용

12) 시공 시 주의를 요하는 사항

나. 시방서 작성

1) 시방서에는 일반시방서와 특별시방서를 구분작성한다.

2) 공사에 사용되는 각 공종별 시공방법, 자재에 대한 시방을 상세하게 수록하여야 한다.

3) 시공순서 표기 등 그림 또는 도면이 필요할 시에는 그림 또는 도면을 삽입한다.

4) 특별시방서 작성 시 본 공사에 특별히 적용되는 규정으로 시공과 관련된 특별히 유의할 사항, 발주자가 수급자에게 최적의 품질과 규격이 확보되도록 하는 상세한 조건 및 요구사항을 명기하여야 한다.

5) 신공법과 관련하여 시공 시 특별히 유의하여야 할 사항을 명기하여야 한다.

6) 수급자가 제공하여 시공하는 건설 자재 중 기준 및 재질과 시험방법 등을 특별히 명시하여야 한다.

7) 공사시공과 관련한 시험방법 등을 특별히 명시하여야 한다.

8) 레미콘, 아스콘의 경우 배합설계 승인사항, 타설 또는 포장방법 등을 특별히 명시하여야 한다.

제8절 성과품 인쇄 및 납품

가. 검토용 성과품 제출

계약자는 본 용역의 납품예정 성과품을 과업종료 전에 감독관에게 제출하여 사전 검토를 받아야 한다.

1) 노선비교검토, 포장공법 및 단면결정 검토 등에 관한 사항을 우리군과 협의하여야 한다.

2) 계약자는 설계도서 및 단가산출서, 재료산출서, 예산서등 각종 성과품을 감독관 경유 우리군의 검토를 득한 후 인쇄를 준비하여야 한다.

3) 우리군에서 공사 발주에 필요한 설계도서 등을 납품 요구 시에는 기일을 엄수하여 제출하여야 한다.

4) 본 공사에 편입되는 토지경계말뚝 설치는 도급자 부담으로하고 경계말뚝설치 측점별 사진은 촬영 제출하여야 한다.

나. 성과품 인쇄

계약자는 용역 성과품을 수정하여 감독관의 확인을 받은 후 최종 성과품을 인쇄한다.

다. 납품목록

계약자는 과업수행기간 종료일 이내에 아래 성과품을 납품한다.

1) 실시설계보고서	5부

2) 설계도면(청사진 : 원판포함)	5부(A3 소도면 5부)

3) 설계서(설계설명, 시방서, 공내역서 포함)	5부

4) 설계예산서	5부

5) 단가산출서	5부

6) 수량산출서	5부

7) 구조 및 수리계산서(필요시)	5부

8) 편입용지조서 및 지장물조서(용지도면 포함)	5부

9) 측량관계야장 및 성과표(원본)	일 체

10) 인⋅허가 서류(필요시)	일 체

11) 환경성검토서	5부

12) 환경성검토서 부록	5부

13) 환경질 조사 및 분석자료	1식

14) 환경질 측정 및 생태조사 사진첩	1부

15) 구간별 현황사진첩	1부

※ 설계서,설계예산서,수량산출서,단가산출서 및 일위대가는 한권으로 합철하여 제출할 것.

※ 설계서 및 설계도면 2부는 별도로 접어서 편철하여 제출하여야함.

※ 설계도서 및 각종자료 일체를 CD로 제작하여 제출.