정 선 군  사 용 종 료  비 위 생 매 립 지

실    시    설    계    용    역

과 업 지 시 서

2008.  3.

정 선 군

목      차

1. 과업 개요	1

2. 과업의 주요 범위	2

3. 과업의 기본 방향	2

4. 과업수행 세부지침	3

5. 일반 사항	8

6. 성과품 제출	10

1. 과업 개요

가. 과 업 명

사용종료 비위생매립지 실시설계용역

나. 과업 목적

본 비위생매립지는 과거 약 10년간 관내에서 발생하는 폐기물을 위생적인 기반시설 없이 비위생적인 방법으로 매립함으로써, 주변지역 환경오염 뿐만 아니라 주변지역 토지활용에 영향을 미쳐, 쾌적한 도시환경 조성에 저해요인으로 작용하고 있다. 따라서, 우리군에서는 본 비위생매립지에 대하여 2006년도에 수립된 사용종료 비위생 매립지 정밀조사보고서를 근거한 침출수, 매립가스, 악취 등의 누출방지시설 등을 포함한 정비사업을 시행함으로써, 주변지역 환경피해 방지 및 조속한 매립지 정비사업으로 인한 환경친화적이고 경제적인 토지활용방안을 수립하고자 함.

다. 과업 규모 및 위치

본 과업대상은 정선군내 비위생매립장으로 한다.

구 분	신동읍	임계면
위치	신동읍 천포리 431-1	임계면 낙천리 732-1
매립면적(㎡)	3,500	3,000
매립량 (㎥)	19,000	8,000
매립기간	′91년 ~′97년	′90년 ~′97년
매립폐기물	생활폐기물	생활폐기물

라. 과업기간

본 과업 수행기간은 착수일로부터 120일로 한다.

마. 과업의 범위

1) 현장 조사

◦현황 측량 : 신동읍 3,500㎡, 임계면 3,000㎡

◦토질 조사

- 보오링 : 2공(NX SIZE)

2) 실시설계

2. 과업의 주요 범위

가. 현황 조사

본 정비사업의 신뢰성 있는 설계 및 공사시행을 위한 기초자료 습득을 위해 다음의 조사를 시행한다.

1) 관련분야 조사

◦각종 관련법규(환경관련법규, 도시계획관련법규, 건설기술관련 법규 등)의 내용 조사 및 분석

◦주변지역 도시계획사업 등 상위 관련계획 내용조사 및 분석

2) 현장 조사

◦대상 매립지 지적, 지형 현황측량(소유자 및 지장물조서 작성 : 설계한정)

◦대상 매립지 토질조사

나. 실시 설계

1) 대상 매립지의 적정 정비방안 검토 및 선정

2) 오염 물질별(침출수, 매립가스 및 악취 등) 오염방지 형식 및 규모 검토

3) 사후관리 및 토지활용계획 수립

4) 공사 중 주변 환경 저감 및 안전관리 방안 수립

5) 침출수 누출 방지시설 및 집․배수시설 설계

6) 최종복토 설계

7) 매립가스 포집 및 처리시설 설계

8) 도로, 우수배제, 계측시설 등 부대시설 설계

9) 토지이용계획 수립

10) 공사 및 사후 유지관리비용 산정

3. 과업의 기본 방향

가. 모든 계획은 상위계획과 우리 군의 각종 지표에 부합되어야 하며 주변상황을 고려하여야 한다.

나. 모든 계획은 공종별 시행계획을 수립하고 변화를 예측하여 시행하되 우선순위가 제시되어야 한다.

다. 제시된 모든 계획은 기술적으로 시행 가능하고 경제적이며 효율적이어야 한다.

라. 주요 정비사업의 적용형식, 규모, 정비수준 결정 등 주요 사안에 대해서는 사전에 우리 군과 충분히 협의하여 결정한다.

마. 모든 계획은 환경관련법규, 도시계획 관련법규, 건설기술 관련법규, 기타 관련법규 등의 기준에 적합하여야 하며, 장래의 가변성을 예측하여야 한다.

바. 본 과업의 목적을 충족시킬 수 있는 가장 합리적이고 경제적인 비위생매립장 정비사업 및 사후관리가 될 수 있도록 제반사항이 포함되어야 한다.

사. 각 공종별 설계내용은 상호 연관성을 가지고 합리적이어야 한다.

아. 본 설계에 인용되는 자료는 최근의 자료이어야 하며, 본 과업에 적합한 것이어야 한다.

4. 과업수행 세부지침

가. 현장 조사

1) 지적․지형 현황측량

◦현황측량은 건설교통부 제정 공공측량 작업규정에 의거 시행한다.

◦사업부지내 모든 지장물 및 지형지물을 상세히 측량하여 공사에 지장이 없도록 하여야 한다.

◦측량성과품의 축적은 1:600을 기준하며, 등고선의 간격은 1.0m로 한다.

◦T.B.M 설치는 훼손되지 않는 장소에 식별이 가능하도록 설치한다.

◦측량은 부지의 경계 구분이 가능하도록 하고, 또한 토지의 소유자 조서 및 지장물 조서를 작성하여야 한다.

2) 토질조사

◦본 토질조사의 결과는 오염방지시설 설치의 형식, 규모, 공사비 등 선정시 중요   한 기초자료로 활용되므로 대상 매립지별로 사전에 조사위치가 포함된 조사계획서를 작성, 우리 군과 협의한 후 다음과 같은 사항을 시행하여야 한다.

◦금회 조사분 이외의 사항은 사용종료 비위생매립지 정밀조사 보고서를 참고한다.

• 시추 조사 (NX 규격)

- 시추는 대상 매립장별로 매립장 및 주변지역의 지형 및 지질특성을 현지 육안 조사하여, 조사지점을 선정한다.

- 모든 조사는 연암 1m 깊이까지 굴착을 원칙으로 하나, 토층여건에 따라 현장 감독원의 승인을 득하여 증감할 수 있다.

- 케이싱은 발주처의 지시가 있을 때까지 빼어서는 안 되며, 지하수의 측정은 24시간 경과 후 측정하고 지하수 측정에 필요한 시추공에 대해서는 지속적 측정이 용이하도록 보호시설을 설치하여야 한다.

- 조사 위치는 수준측량에 의거 표고를 산출하여야 한다.

나. 실시 설계

본 비위생매립지 정비사업의 목적을 달성하기 위하여 정선군 사용종료 비위생 매립지 정밀 조사보고서(2006.12.수립)를 참조 활용하여 대상 매립장의 매립특성과 구조적 안정성 등 기본적인 현재 매립지 상태에 근거하여 적용가능한 각 공종별 정비방안을 조사하고 현장여건 및 생활폐기물 처리계획 등을 고려한 각 공종별 적정 정비방안을 비교․검토한 후 최적안을 선정하고 검토․선정된 각 공종별 최적의 정비방안에 대해 시행하며 다음의 설계기준을 포함하여 설계하여야 한다.

1) 비위생매립지 정비방안 검토

◦국내․외에서 시행되고 있는 비위생매립지 정비사업 시행현황 및 사업배경을 조사․분석하여 본 정비사업의 참고자료로 활용한다.

◦정선군내 폐기물매립시설 등 환경기초시설 설치 및 운영현황을 조사하여 비위생 매립지 정비방안별 실시 가능성 및 경제성 등을 비교․검토한다.

◦정비방안별 주변지역 환경오염 저감효과를 비교․검토한다.

◦상기 비교․분석내용을 종합하여, 대상 비위생매립지의 적정 정비방안 및 형식을 선정한다.

2) 오염방지시설 설치형식 및 규모 검토

◦비위생매립지에서 누출되는 침출수 등 오염물질별 주변지역 오염가능성을 정량적으로 분석하고, 국내․외 적용중인 오염물질별 방지 및 처리형식을 현장여건을 고려 비교․검토한다.

◦오염방지 및 처리시설의 설치형식 선정에는 현장조사 결과를 최대한 활용하여 선정의 타당성을 제시하여야 한다.

◦최종복토 형식은 구역별로 형식을 검토하여야 하며, 매립지의 안정성 측면과 향후 침하특성 등을 고려하여 선정하여야 한다.

◦오염방지 및 처리시설의 규모는 토질조사 등 현장조사 결과를 활용하고, 본 정  비사업의 목적 및 한계성 등을 고려하여 경제성 측면과 환경오염저감효과 측면을 고려하여 시설의 규모를 검토하여야 한다.

3) 공사 중 주변 환경영향 저감대책

정비사업 시행으로 발생 예상되는 환경오염 잠재력(악취, 먼지의 날림, 가스의 발생 및 폭발가능성, 침출수의 누출 등)을 적정 예측하여 작업 중 상기 사항에 의한 안전사고, 주변지역의 환경피해 및 작업의 지연 등이 발생하지 않도록 충분한 대책시설 및 환경영향 저감방안을 구체적으로 제시하여야 한다.

5) 경제성 검토

각 공종별 정비사업 형식 및 규모에 따른 사업비용을 현실적으로 검토․분석하여 본 비위생매립지에 정비사업으로 가장 적합한 각 공종별 정비방안조합을 선정하여야 한다.

6) 침출수 누출 방지시설 및 집․배수시설

정밀조사 보고서 및 적정 정비방안에서 검토․제시된 공법을 현장에 적용 가능하도록 다음 사항이 포함된 설계를 시행하여야 한다.

◦침출수 누출방지시설에 대한 구역별 설치 심도, 재료원, 시공장비, 시공순서 등 현장시공의 기준이 될 수 있도록 설계하여야 한다.

◦설치 심도는 현장조사 결과를 기초로 하여 합리적으로 산정되어야 한다.

◦침출수 누출방지시설의 설치효과를 주기적으로 조사할 수 있는 관측시설 및 조사계획을 제시하여야 한다.

◦매립지 내부의 침출수 집수 및 배제형식을 유지관리 및 경제성 측면 등을 고려하여 선정하여야 하며, 현장여건을 감안한 설계가 되어야 한다.

◦적용되는 재료원은 침출수 특성과 시설의 장기간 사용 등을 고려하여 결정하여야 한다.

7) 최종복토

◦최종복토는 잠재적인 환경오염영향정도와 복토효과 등을 정량적으로 분석하여 최종복토층의 형식을 결정하며, 적용 재료원은 시공성, 재료 취득성, 경제성 뿐만 아니라 장기간 기능 유지측면 등을 고려하여 선정하여야 한다.

◦최종 복토층은 매립지 구역별(상부, 사면, 경계부 등)로 효과 및 안정성, 현 상태, 시공성 등을 고려하여 형식 및 재료원을 선정하여야 하며, 매립장의 침하특성 고려 및 구조적 안정성검토 등을 시행하여야 한다.

◦최종 복토층은 부지정지,수목식재,계측시설,가스포집시설,우수배제시설 등과의 연관성을 고려하여 각 시설물과의 접합부 형식, 유지관리계획 등이 제시되어야 한다.

◦매립지 사면부 최종복토 형식선정에는 시공성,유지관리성,복토효과 및 전반적인 매립지 구조적 안정성을 검토하여 안정한 사면경사가 유지될 수 있도록 하여야 한다.

8) 매립가스 포집 및 처리시설

◦매립가스의 발생량을 현장조사 결과를 기초하여 경과연도별로 예측한다.

◦효율적인 매립가스의 포집을 위한 적정한 포집형식을 선정하여야 하며, 영향반경 등을 검토 배치간격을 결정하여야 한다.

◦매립가스 포집시설은 복토층 및 타시설과의 연관성을 고려하여야 한다.

◦포집된 매립가스의 처리방법을 주변지역 여건 및 환경영향, 경제성 측면에서 다각도(자원화, 소각, 대기배출 등)로 검토․선정하여야 한다.

◦매립가스 포집 및 처리시설의 설치규모, 접합형식, 재료원 등은 매립지 침하특성, 매립가스 특성 등을 고려 선정하여야 한다.

9) 도로, 우수배제, 계측시설 등 부대시설

◦매립지 유지관리 및 상부토지의 이용을 위한 필요한 시설물을 도입하여야 한다.

◦시설물의 규모는 각 공종별 제계산을 시행하여 결정하며, 설치형식 및 재료원 등은 매립지 침하특성에 따른 유지관리 측면과 경제성 측면을 검토하여 결정한다.

◦매립지의 침하양상을 구역별, 경과기간별로 계측하기위한 계측시설 설치 및 관리계획을 수립하고, 계측결과에 따른 매립장 부지 및 각 시설물별 유지관리지침을 수립하여야 한다.

10) 환경영향 저감공사

비위생매립지 정비공사중 발생이 예상되는 환경오염 요소에 대해 다음 사항이 포함된 각 공종별 저감대책을 수립하여야 한다.

◦폐기물의 날림, 먼지 발생, 공사중 발생 침출수 집수 및 처리, 장비의 운행 소음

◦작업차량 바퀴내 폐기물, 운행중 폐기물 날림 등

11) 사후관리 및 토지활용계획

◦정비사업 시행 후 오염방지 및 처리시설의 유지관리, 침하판 등 계측시설의 관리에 대한 기준, 지침 등 구체적인 사후관리 계획을 수립하고 체육공원, 화훼공원 등의 방안을 제시한다.

12) 공사 및 사후관리비용 산정

◦본 비위생매립장 정비사업과 상부토지이용에 소요되는 사업비를 산정․제시한다.

◦정비사업비는 공종별로 구분 가능하도록 산정하며, 이에 따른 연차별 재정계획을 수립한다.

◦사업비 산정에 필요한 원가계산 및 제반요율은 『건설산업기본법 개정에 따른 조달청 원가계산기준』을 기준으로 한다.

◦정비사업 후 시설물 유지․보수관리, 계측관리, 사후환경조사 등에 소요되는 비용을 연차별로 개략 산정하고 소요재원 확보방안을 수립한다.

다. 실시설계 보고서 작성

실시설계 항목에는 현황 조사, 해당 공종별 공법 비교․검토 내용 및 경제성, 환경적 측면이 반영된 설계 적용 제반기준을 간결․명료하게 수록하여야 하며 선정된 각 공종별 공법에 대한 현장적용 상세내용 및 이에 따른 주요 설계도면(평면 및 대표단면 등), 수량, 공사기간, 공정관리, 유지관리, 공사 중 환경저감계획 및 재정계획 등이 포함되도록 한다.

설계보고서는 국내에서 통용되는 워드프로세서로 작성하여 인쇄하되, 워드프로세서 작성파일을 별도 납품한다.

라. 설계도면 작성

◦설계 도면은 전산작업을 기준(AUTO-CAD)으로 하며, 납품시에 도면별 전산작업 파일을 포함해야 한다.

◦설계 도면상에 기호로 표시하기 곤란한 사항은 문자로 표시하며, 문자는 가능한한 한글사용을 원칙으로 한다.

◦각종 상세 도면을 충분히 작성하여 현장 시공이 용이하도록 하여야 한다.

◦설계도면에는 해당 분야 참여기술자, 책임기술자 및 사업 책임기술자가 서명․날인하여야 한다.

마. 공사수량 산출

◦공사수량 산출은 각 공종별로 구분하여 작성하되 수량산출 양식은 가능한 통일하여야 한다.

◦공사수량은 연차별 투자계획에 의거 시행될 수 있도록 단계별 공종을 분리․작성하여야 한다.

◦자재의 사급 및 관급부분에 대해서는 우리 군과 사전 협의하여 결정해야 한다.

바. 공사 시방서 작성

◦공사 시방서는 각 공종별(환경영향 저감공등)로 구분하여 공종별 시방서를 작성하되 공종별 시방서 내에 일반사항, 특기사항으로 구성하고, 계약관련 부분과 각 공종별 시방서를 총괄하는 총괄 시방서를 별도로 작성해야 한다.

◦공종별 시방서 중 일반사항은 건교부 표준시방서 이상으로 하되, 일반사항 내에는 설계 개요, 인․허가사항, 시공방법 등에 관하여 기술하여야 하며, 특기사항 내에는 일반사항에 포함되지 않은 다음사항을 포함하여 작성한다.

◦각종 장비의 설치 및 운영관리 방법에 관한 사항

◦각종 사용자재의 품질기준

◦공사 시방서는 국내에 통용되는 워드프로세서를 이용 작성하되, 원칙적으로 설계보고서와 동종의 워드프로세서를 이용해야 하며 납품시 전산파일을 포함하도록 한다.

5. 일반 사항

가. 과업 수행 지침

1) 착수보고서 제출

계약자는 계약체결 후 10일 이내에 작업을 착수하여야 하며, 착수 시에 착공계, 공정계획표, 대리인계, 용역수행자 명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 포함한 착수 보고서를 제출하여 우리 군의 승인을 받아야 한다.

2) 과업수행 계획서 제출

계약자는 계약일로부터 10일 이내에 다음사항이 포함된 과업수행 계획서를 제출하여야 한다.

◦과업수행 방향과 추진방법

◦세부실시 공정계획표

◦각 분야별 과업수행 인원 편성표

3) 보안 대책

계약자는 보안대책을 수립하여야 하며, 대표자 및 용역수행자의 보안각서를 제출하여야 하며, 모든 성과품에 대해서는 계약자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

4) 과업진도 및 과업내용 보고

과업진도 보고는 매월 우리 군에서 지정한 감독을 경유 서면으로 보고해야 하며, 발주자의 요구시 별도보고를 해야 한다. 중간보고는 정비방안에 대한 각 공종별 적용공법 선정 검토(안)내용이 포함된 과업수행 내용을 보고하고, 과업완료 이전에 과업 전체내용을 포함한 종합보고를 하여야 하며, 필요시 관계전문가의 자문을 받아 설계에 반영하여야 한다.

5) 과업 지시서에 포함되지 않은 내용 및 변경에 대한 수행

본 과업지시서에 규정되지 않은 사항이라도 본 과업수행에 필요한 사항에 대해서는 우리 군의 관련규정 및 정부관련 법령과 건교부 제정 각종 시방서에 의거 감독원과 협의 수행하되, 본 과업수행 중 우리 군의 사정에 의하여 계획변경이 있는 경우 과업수행자는 우리 군의 방침을 가능한 수용해야 한다. 과업수행 중 해결하여야 할 중요한 문제가 발생 할 때는 그 내용을 우리 군에 보고하고 협의한 후 결정하여야 한다.

6) 각종 자료의 제공 요청

사용종료 비위생 매립지 정밀조사보고서등과 같은 과업수행자의 과업수행에 필요한 자료를 우리 군에 요청하는 경우 우리 군에서 보유한 자료는 최대한 협조 제공하도록 한다. 단, 우리 군에 필요한 자료는 반드시 서면으로 요청해야 하며, 각 자료별 보안관계는 우리 군의 방침을 받아야 한다.

7) 투입기술자의 교체 의무

과업수행 중 사업책임 기술자를 포함한 참여기술자가 본 과업수행에 부적당하다고 인정되어 우리 군에서 교체를 요청할 경우, 과업수행자는 따라야 한다.

나. 계약 일반 사항

1) 계약의 해지 또는 중지 명령

다음과 같은 사항이 발생할 경우 우리 군은 일방적으로 과업 수행자와 계약의 해약 또는 중지를 명할 수 있으며, 과업수행자는 특별한 사유 발생시 계약의 일시중지를 요청할 수 있다.

◦계약자가 용역수행이 불가능하다고 충분히 인정될 때

◦우리 군의 정당한 지시에 불응하여 용역업무를 진행할 때

2) 과업내용의 소유

본 과업내용(설계도서와 자료일체, 저작권 및 기타 법률적인 행위)은 우리 군의 소유로 하며, 과업수행자가 타 목적으로 활용할 경우에는 우리 군의 사전승인을 받아야 한다.

3) 과업지시서 내용에 대한 이의 발생시 처리

본 과업수행에 있어 과업지시서 문맥해석 등에 대하여 의견이 상이할 때에는 계약 당사자간에 협의 조정하는 것을 원칙으로 하나, 협의가 되지 않는 경우에는 제반 관련 법규에 따른다.

6. 성과품 제출

1) 기본 및 실시설계 보고서	20부

2) 설계도면 청사진(A1)	5부

3) 설계도면 축도집(A3)	10부

4) 설계서(내역서, 일위대가, 단가산출서, 단가조사서)	5부

5) 수량 산출서	5부

6) 공사 시방서	5부

7) 각종 계산서	5부

8) 현황측량 성과품(지적 지형 현황도 1/500)	1식

9) 토질조사(지질조사보고서, 시료상자)	1식

10) 전산 File(보고서, 시방서, 설계도면, 내역서), CD-ROM	1식

11) 기타 필요한 자료	1식

* 설계서, 도면, 수량산출서는 현장별로 별도 작성한다.