[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전건설과	②담당자 (연락처)	시설7급 고승구 (560-2496) 안전건설과장 최종수 (560-2160)
③정책사업명	세대2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
④선정기준	군이 발주하는 10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤사업기간	2016년 ~ 2019년
⑥주요내용	❍ 추진배경 - 사면불량에 따른 붕괴위험으로부터 주민의 생명과 재산의 보호 ❍ 사업개요 - 사 업 명 : 세대2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 - 위 치 : 정선군 정선읍 봉양리 861번지 일원 - 사 업 비 : 금12,900백만원 ※ '16년 200백만원, '17년 2,000백만원, '18년 이후 10,700백만원 - 사업량 ․ 실시설계 1식(붕괴위험지역 L=420m) ․ 피암터널 L=250m, 사면보강 2,032㎡, 도로확장 L=170m ․ 부대공사 1식 - 사업기간 : 2016년 ~ 2019년 ❍ 추진상황 - 자연재해위험개선지구 지정(붕괴위험) : 2015. 3. 18. - 지방재정 투자심사(중앙심사) : 2016. 1월 ~ 3월 - 실시설계 추진 : 2016. 2월 ~ 10월 - 설계 경제성검토(VE) : 2016. 9월 ~ 12월 - 설계 사전검토(국민안전처) : 2016. 11. 15. - 강원도 건설기술심의위원회 심의 : 2017. 1월 ~ 3월 - 계약심사 및 일상감사 : 2017. 3월 ~ 4월 - 공사 입찰 및 업체선정 : 2017. 4월 ~ 5월 - 공사 착공 및 추진 : 2017. 5월 ~ 2019. 12월 - 공사 준공 : 2019. 12월