정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	환경산림과	②담당자 (연락처)	환경산림과장 홍규학(560-2340) 전인수(560-2330)
③정책사업명	민둥산 군립공원 지정 및 공원계획 수립용역
④선정기준	50백만원 이상의 연구․용역사업	⑤사업기간	2017년 ~ 2018년
⑥주요내용	1. 사업개요(현황) 가. 위 치 : 정선군 남면 민둥산 억새군락지 일원 나. 지정면적 : A=3,089,950㎡(안) 다. 사업내용 : 공원계획 및 보전관리계획 수립, 전략환경영향성 검토, 사전재해영향성검토, 지형도면고시 등 라. 사 업 비 : 217백만원(군비) ※ 전략환경영향평가 용역 분리발주(36백만원) 마. 사업기간 :‘17. 2월 ~‘18. 2월 2. 추진계획 가. 공원지정 및 전략환경영향평가용역 발주 :‘17. 2월 나. 착공 및 현장조사, 기본계획 수립 등 :‘17. 3월 ~ 5월 다. 지역주민 간담회 및 공청회 개최 :‘17. 6월 라. 관계기관 협의 :‘17. 10월 마. 군립공원 위원회 심의 등 :‘17. 12월 바. 군립공원 지정고시 :‘17. 2월 3. 기대효과 가. 민둥산의 자연환경 보전과 체계적인 관광자원 개발 도모 나. 체계적인 자연공원 관리에 따른 지역경제 활성화 기여