과  업  지  시  서

수해복구(잿마을 마을상수도외 6개소)공사 실시설계용역

2007.  08.

남         면

□ 과 업 설 명 서

제 1 절  과업의 명칭

수해복구(잿마을 마을상수도 6개소)공사 실시설계용역

제 2 절  과업의 목적

본 과업은 장마철 집중호우로 인해 피해를 입은 시설에 대하여 실시설계를 완료하고 수해복구를 .실시하여 피해를 입은 주민에 불편을 해소하고자 함.

제 3 절  과업의 범위

가. 과업의 개요

1. 위   치 :  강원도 정선군 남면 일원(유평리 문곡.3리 등)

2. 규    모 :  마을상수도 정비 (관정개발 1개소등), 1식 외 6개소, (교량가설 1식.. 소하천 정비 1식)

※ 구간내 구조물,  폐기물처리, 부대시설 포함

나. 과업의 범위

1. 현지현황 조사

가) 지장물조사

나) 교통량조사 및 장래교통량 추정

다) 하천 현황조사 및 관련 계획검토

※ 하천현황은 도로선형이 하천을 연하여 계획될 때에 한함

라) 구조계산 및 수리계산

라) 구조계산 및 수리계산

마) 도시계획현황 조사

바) 관련사업계획 조사, 검토

사) 측량 및 용지도 작성

아) 유지관리를 고려한 취약부분 시설방안 검토

자) 보상 및 이설에 따른 대상조사 및 방안강구

차) 토질조사 및 기존구조물(하부기초, 교각, COPING)조사 및 안전도 평가

카) 경제성 분석

2. 실시설계

가) 도로설계 및 도,송,배수관로망 이전설계 [별도작성제출]

나) 교량(BOX) 및 구조물 설계

다) 도로 및 교량(BOX)포장설계

라) 진․출입 시설 설계

라) 도로 및 교량(BOX) 조명시설 설계(필요시)

마) 난간, 신축장치 및 기타설계

바) 부대시설 설계

사) 교량(BOX) 유지관리를 위한 점검시설(점검통로) 및 계측시설설치(과적차량)에 따른 설계

아) 공정표작성 및 교통처리대책 수립

자) 공사중 홍수 및 위급사항 발생시 처리에 대한 계획 및 대책

차) 설계도서작성(예산서 포함)

카) 수량산출

타) 공사비 산출

파) 편입용지 및 지장물조서 작성(용지도 포함)

하) 지하 매설물조서 작성(각종 통신시설, 상하수도시설 및 기타시설물)

거) 편입 및 이전대상물 작성

너) 제 시방서(일반, 특별) 및 각종보고서(종합보고서 포함) 작성

더) 구조 및 수리계산서 작성

머) 인․허가 및 심의 서류작성

버) 기타 관(우리군 및 관계기관)이 필요하여 요구하는 사항

3. 공사발주를 위하여 공구의 세분이 필요한 때에는 이를 조정 세분하여 설계도서를 작성, 제출하여야 한다.

4. 시공중 각종사고 및 재해를 미연에 방지하기 위한 체계적이고 계획적인 안전관리 계획을 수립 제시하여야 한다.

5. 공사중 사용할 각종 자재에 대한 규격, 재질시험 및 검사방법등을 특별 시방서에 명기하여야 한다.

6. 교량 경간별 신축량 제시와 교각, 교대별 교좌장치 및 신축이음장치 상세도면과 제작시방서를 명기하여야 한다.

7. 교량등 구조물은 교좌장치 교체 및 보수등 향후 유지관리를 감안한 구조물을 설계하여야 한다.

8. 교량등 주요구조물은 설계하중 이상의 과적차량 진입을 차단할 수 있는 시설을 검토 반영하여야 한다.

9. 신축이음장치 부분의 방수처리에 대한 대책수립 및 신축이음장치 하단의 물받이 설치를 검토 반영하여야 한다.

10. 토질시험, 재료시험등 결과치를 설계에 반영 조치하여야 한다.

11. 기존교량 철거시 철거방법, 현장작업 방안, 잔재처리등으로 인한 환경오염방지 대책을 수립 제시하여야 한다.

12. 신․구 구조물 접속부분에 대한 상세도면 및 특기사항을 특별시방서에 명기하여야 한다.

13. 설계도서 작성시 기능공들이 쉽게 이해할 수 있는 설계상세도(Shop Drawing)를 작성하여야 한다.

14. 기  타

가) 본 과업지시서에 규정된 내용에 대하여 우리군과 의견을 달리하는 경우 협의에 의해 결정하되, 협의 불가시에는

우리군의 의견을 따른다.

나) 본 과업지시서에 규정하지 않은 사항에 대하여는 일반 관례에 따른다.

제 4 절  과 업 기 간

본 실시설계 용역기간은 착수 일로부터 30일로 하며 다음 사항에 대하여 우리군의 승인을 득한후 기간을 변경할 수 있다.

가. 용역기간중 기상불량(강우, 강설, 기온급강하)일수가 평균일수 보다 많아 과업수행에 현저한 차질이 발생될 때

나. 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

다. 우리군의 방침변경 또는 지시에 의하여 과업을 중단하였을 때

라. 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때(과업량 증가등)

제 6 절  과업의 세부사항

가. 일반 사항

1. 도급자는 설계과정에서 우리군의 지휘감독을 받아 본 용역을 성실히 수행하여야 한다.

2. 도급자는 본 과업의 지시서와 관계 법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 정확도에

대한 전적인 책임을 책임을 진다.

3. 도급자는 계약일로부터 ７일 이내에 보안각서가 첨부된 착공계와 예정공정표 및 용역수행자 명단을 분야별로 작성 제출하여야 한다.

4. 예정공정표 작성 및 보고

가) 예정공정표는 작업우선순위에 따라 작성한다.

나) 수시보고 : 우리군이 요구하는 경우나 설계자가 주요 결정 사항이 있어 필요할 시에는 수시 보고를 한다.

5. 본 과업은 계약기간내에 예정공정표대로 차질없이 수행하여야 하며 제4절에 규정된 사유에 해당되는 경우에는 우리군의 승인을

얻어 기간을 연장할 수 있다.

6. 도급자는 본 과업 수행중 관계법규에 따른 인․허가 또는 협의가 필요할 시에는 우리군과 협의하여 제반절차를 이행하여야 한다.

7. 본 과업 수행과정에서 작성되는 각종도서는 우리군의 승인을 받아야 하고, 승인을 받아 작성된 도서라 할지라도 그 내용이 미비,

과오, 기술상 오류등의 결함에 대한 도급자의 책임이 면제될 수 없으며 본 계약 당사자 이외의 제３자에 의해 작성된 각종 도서가

용역성과의 첨부자료로 된 경우도 도급자의 책임한계는 동일하다.

8. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 우리군이 과업수행상 필요하다고 인정되는 추가 과업에 대하여는 도급자 책임하에

성실히 수행하여야 한다.

9. 과업 수행중 내용의 변경(관련 기본계획 검토에따른 용역 수행이 어렵다고 판단될때) 정책변경등 불가피한 경우에는 본 용역의 일부                  또는 전부를 타절하거나 과업지시를 변경할 수 있다.

10. 도급자는 설계 준공 전에 납품목록 및 주요 성과품 각 １부씩을 제출 사전검토를 받도록 하여야하며 수정을 요하는 부분은 즉시

수정하여야 한다.

11. 과업수행중 이견이 있을 시에는 상호협의에 의하여 해결한다. 그러나 이에 대한 결정권은 우리군이 갖는다.

12. 본 과업에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 우리군과 협의하여 처리하되 협의가 되지 않을 경우에는 우리군의 지시에 따르도록

한다.

13. 과업수행에 사용한 공식자료 및 통계는 그 근거와 발행년도를 제시하여야 한다.

14. 설계도서 작성은 한글 사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며 단위는 Ｃ.Ｇ.Ｓ 단위를 사용한다.

15. 본 과업수행에 따른 용역비의 변동요인이 발생할 경우 예산범위내에서 정산처리 할 수 있다.

16. 지진의 영향에 대해서는 도로교 표준시방서 내진 설계편이 정하는 기준에 의한다.

⇒ 필요시 별도지시 예정임.

17. 설계도서에는 매 도면마다 과업책임기술자 및 분야별 책임기술자의 확인 서명 날인하여야 한다.

18. 건설기술 관리법등 관계규정에 따른 건설기술심의를 득하여야 할 경우 심의 지적사항은 준공 후라도 도급자 책임하에 보완조치

하여야 한다.

나. 보 안 사 항

1. 도급자는 과업수행 기간중 모든 용역사항에 대한 보안 책임이 있으며 보안규정을 준수하여야 한다.

2. 도급자는 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착공과 동시 제출한다.

(붙임서식에 의거 작성 : 대표자는 ＃1번, 참여기술자는 ＃2번)

3. 본 용역에 대하여는 작업장소를 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 하며, 출입자명부를 비치 관리하여야한다.

4. 자료 보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 장부책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

단, 비밀이 아닌 용역의 경우 비밀 보관함을 비치하지 아니할 수 있다.

5. 중간 및 최종 보고서등 용역 성과품(확정안 포함)은 우리군과 협의하여 내용의 중요도에 따라 분류 관리하여야 하며 최종보고서 및

설계도면은 사본번호를 부여하여 제출하여야 한다.

6. 모든 관계서류 자료들을 본 사업 이외의 여타목적을 위해 사용해서는 안되며, 우리군의 승인없이 임의로 소유하거나 복사 또는

외부로 유출할 수 없다.

7. 용역참가자가 교체될 시는 인수인계를 철저히 하고 우리군의 확인을 받아야 한다.

8. 과업수행 폐기물은 소각처리하여야 하며 작업용 보안 사진은 감독관의 입회하에 폐기 처리하여야 한다.

9. 기타 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행상 보안관리를 요하는 사항은 우리군에서 보완지시할 수 있으며, 보안규정 불이행

으로 발생되는 모든 책임은 도급자가 진다.

다. 설계변경 및 조정

1. 우리군의 방침에 따라 과업수행이 중단되었을 때

2. 우리군의 계획변경으로 과업내용변경 또는 과업내용이 증감될 경우 예산범위내에서 조정

3. 토질시험에 있어 보링결과 토질주상이 변경되었거나 개소수가 증감될 경우

4. 본 용역대상은 개략공사비를 적용하여 산출하였던 바 실제 공사비가 증감될 경우 우리군의 방침에 따라 정산할 수 있다.

5. 기타 부득이한 사정으로 과업내용이 변경되었을 때

6. 도급자는 우리군이 필요하다고 인정하여 설계변경을 요구하는 때에는 정당한 이유없이 이를 거부할 수 없으며 지체없이 이를

이행하여야 한다.

라. 설계하자 책임한계

1. 도급자가 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 예산손실 또는 인명피해 기타 공사진행상 지장을 초래하였을 때에는 재설계 하여야

하며, 우리군이 결정하는 책임범위에 대하여 손해배상을 하여야 한다.

마. 해 약 조 건

우리군은 다음과 같은 조건이 발생할 때 일방적으로 계약을 해약할 수 있다.

1. 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

2. 우리군의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3. 기타 계약조건을 위반할 때