2007.  03.

2007년도 2차 통합숲가꾸기사업 실시설계

과 업 지 시 서

정    선    군

과   업   지   시   서

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명 : 2007년도 2차 통합숲가꾸기사업 실시설계 용역

2. 과업목적

2007년도 숲가꾸기사업 대상지의 세부적인 숲가꾸기작업 지침을 작성하고 작업강도와 난이도에 따른 설계로 숲가꾸기사업 성과를 제고함에 있다.

3. 과업대상

◦ 위  치 : 정선군 고한읍 고한리 산55-1번지 외 73필지

◦ 면  적 : 480.64 ha(산주실행 306.40 ha, 위탁․계약 174.24 ha)

사업종별 : 덩굴제거 11.48ha, 어린나무 가꾸기 54.50ha,

솎아베기 121.26ha, 천연림보육 293.40ha 등(산물수집                    145ha 포함)

4. 과업의 내용

◦ 사전검토 및 협의

- 지역산림계획, 산림경영계획, 기본설계 등 상위계획의 검토 후 설계

- 발주자와 설계목적, 경영목표, 작업방법 등의 협의

- 산주 요구사항, 사업시행자 요구사항을 가능한 반영.

◦실시설계도․서 작성시 유의사항

- 선목설계도․서와 사업시행설계도․서를 구분하여 작성하고 각5          부를 납품하여야 한다.

- 산주직접실행 필지와 위탁․계약 실행지를 구분 설계 하여야

한다.

- 산주직접실행필지는 선목 직접실행지와 선목 분리발주지를 구분

할 수 있도록 설계 하여야 한다.

- 산주 직접실행지는 산주별로 임․소반을 구획하여 실시설계

도․서를 작성 하여야 한다.

◦ 설계설명서

- 설계목적, 표준지 선정 및 조사 내용, 적용기준 등

◦ 예정공정표

- 1개월에 100ha이상 기준, 공사기간은 최대5개월로 제한

◦ 제시방서 및 GPS를 이용한 좌표기록

- 일반, 특별, 전문시방서, 소반별 임황과 지황, 경영목표, 작업방법 제시

◦ 표준지 조사는 2인 1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)기준

5. 과업기간 : 계약 후 착수일로부터 60일간

Ⅱ. 과업수행 준수사항

1. 본 설계의 과업기간은 계약 후 착수일로부터 60일간으로 하고, 다음사항에 대하여는 발주자의 승인을 받아 기간을 변경할 수 있다.

◦ 과업기간 중 강우일수가 최근 5년간 연평균강우일수보다 많아

과업수행 상 차질이 있을 때

◦ 천재지변으로 인하여 과업수행이 불가능 할 때

◦ 발주자 지시에 의하여 과업수행이 중단되었을 때

◦ 기타 부득이한 사유가 발생하였을 때

2. 실시설계자는 계약체결 후 7일 이내에 작업을 착수하여야 하며   착수계, 과업수행계획표, 책임기술자 자격증 사본 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 제출하여야 한다.

3. 책임기술자는 실시설계 계약에서 규정된 업무를 관련 법규에 따라        총괄․수행하여야 한다.

4. 책임기술자는 감독자와 협의하여 숲가꾸기 사업시행에 이상이 없도        록 적절한 방안을 마련하여 실시설계도․서에 반영하여야 한다.

5. 실시설계자는 작업착수 후 10일 이내에 기본설계도․서를 검토하고 개략적인 현지조사를 실시하여 그 결과를  기초로 사업대상지와 설계방향 등을 발주자와 협의하여 확정한 후 표준지조사 및 세부설계를 하여야 한다.

6. 아래의 각종 자료를 참고로 하여 과업을 수행하여야 하며 과업     수행 상 필요한 자료는 발주자에게 요청하여 과업을 수행하여야 한다.

◦ 발주자가 제공한 기본설계도․서

◦ 숲가꾸기사업 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침

◦ 지역산림계획, 산림경영계획 등 상위계획

◦ 지속가능한 산림자원 관리지침

7. 실시설계자는 계약체결 후 발주자가 제시하는 과업수행 준수사항과

기본적인 과업지침 등을 숙지한 후 충분한 사례 및 자료를 수집 하여

본 과업의 성과가 수준급이 되도록 최선을 다하여야 한다.

8. 실시설계자는 발주자가 요청할 경우 사업시행자와 감리자를 대상으        로 실시설계의 방향, 작업요령, 작업시 주의사항 등에 관한 교육과        현장 설명을 하여야 한다.

9. 발주자가 실시설계자에게 제시하는 기본요소의 제원은 다음과 같다.

◦ 과업수행 준수사항 및 과업지침

◦ 설계 단위별 사업비내역 및 위치도

◦ 기본설계도․서

◦ 설계와 관련한 각종 자료의 제공 등

10. 실시설계자는 사업계획, 계약사항에 의거 선목량 등을 결정하여

실시설계에 반영하여야 한다.

11. 실시설계자는 과업진행 중 발주자가 필요하다고 요구하는 사항에 대하여 보고할 책임을 진다.

12. 실시설계자는 감리자의 실시설계 사전검토를 위하여 계약기간의 9할 이전까지 설계를 완료하고 문서로 감리자와 감독자에게 사전검토을 요청하여야 한다.

13. 실시설계자는 과업수행 완료전 이라도 발주자의 요구가 있을 경우에         는 부분적으로 정리하여 기성과를 제출하여야 한다.

14. 본 과업의 적용 노임단가는 숲가꾸기사업 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침의 숲가꾸기 품셈 적용기준의 노임 단가를 참고하여 적용한다.

15. 사업비 산출을 위한 작업공정 및 적용단가는 숲가꾸기사업 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침의 숲가꾸기 품셈 적용기준에 의한다.

16. 본 과업지시는 과업수행에 필요한 사항을 규정하였는바, 이에 규정

되지 아니한 사항은 정부 관련법령과 자료를 수집, 발주자와 협의하여 수행하여야 한다.

17. 본 과업지시에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는    중요사항은 발주자와 협의 결정하고 기타 경미한 사항이 발생하여 추가 과업이 필요하다고 인정될 시 실시설계자는 이에 따라야 하며 소요되는 경미한 비용은 실시설계자가 부담한다.

18. 실시설계자는 다음과 같은 보안 대책을 준수하여야 한다.

◦ 실시설계자는 보안 대책을 수립하여야 한다.

◦ 모든 성과품은 실시설계자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로

유출 시켜서는 아니 된다.

◦ 과업 폐기물은 소각 처리하여야 한다.

◦ 기타 과업 수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안 사항

불이행으로 발견되는 모든 책임은 실시설계자가 진다.

19. 본 과업의 진행 중 안전사고 발생에 따른 모든 책임은 실시설계자가 진다.

20. 본 과업 수행 상 다음과 같은 조건 발생시 발주자의 방침에 의거설계변경을 할 수 있다.

◦ 계획변경으로 인하여 과업의 범위가 변경될 때

◦ 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때

◦ 위 각호의 사유로 과업 변경 요인이 발생될 시 또는 계약 체결 후 예정가격 및 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견 되거나 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때

21. 발주자는 다음과 같은 조건이 발생되면 용역계약을 해약할 수 있다.

◦ 설계 이행이 불가능하다고 인정될 때

◦ 발주자의 지시에 불응하고 설계를 진행할 때

◦ 기타 계약조건에 위배할 때

22. 실시설계도․서에는 책임기술자가 서명 날인하여야한다.

Ⅲ. 설계과업지침

1. 일반사항

◦ 과업 대상지는 발주자가 선정한 지역에 조사, 설계함을 원칙으로 하되 사업시행에 장애요인 발생시에는 발주자와 협의하여 과업 대상지를 변경조정 할 수 있다.

◦ 설계사업비 예산은 『숲가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침』에 의거 설계하여야 하며 설계조사 결과 현지 여건, 공사의 난이도에 따른 사업비 조정은 발주자의 승인에 의거 조정할 수 있다.

◦ 실시설계도․서 작성 시 작성내용에 관한 이의가 있을 경우와 기타 과업수행과 관련하여 실시설계도․서 작성자가 단독 결정이 곤란한 사항에 대하여는 발주자와 협의하여 결정한다.

◦ 사업비가 최대한 절감되도록 설계하되 현지 여건에 부합한 완벽한 설계를 하여야 한다.

◦ 작성된 각종 실시설계도․서는 상호 그 내용이 합치되어야 하며 해독이 용이하도록 작성하여야 한다.

◦ 성과품 납품 전에 발주자의 사전 검토를 받은 후 납품하여야 하며 납품 후 설계 심사과정에서 수정 및 보완을 요하는 사항이 발견되어 발주자의 지시가 있을 경우 즉시 이에 응하여야 하며 수정 및 보완에 소요되는 기간은 과업수행 기간에 제외한다.

2. 표준지조사

◦ 표준지 조사비율을 사업대상지 면적의 1% 이상으로 하여야 한다.

◦ 표준지 크기를 개소당 100㎡～400㎡ (10m×10m, 10m×20m,

20m×20m사각형 또는 반지름 5.67m, 8.0m, 11.3m 원형 표준지)로 하여야 한다.

◦ 사업대상지를 표시한 지형도상에서 최대 200m×200m 격자상의 교차점에 400㎡의 표준지를 일정 간격으로 교차점에 배치하여야 한다. 다만, 일정 격자의 교차점에 표준지 배치가 불가능할 경우 상하좌우 50m범위 내에서 표준지 위치를 조정 할 수 있다.

◦ 사업대상지가 소면적으로 분산되거나 임상이 다를 경우에는 그 임분의 표준이 되는 곳에 표준지를 배치하고 GPS를 이용하여 좌표를 기록하여야 한다.

◦ 공정하고 정확한 표식과 사업비산출을 위하여 표준지내에서는 다음과 같은 측정 또는 표식을 한다.

- 가슴높이 지름은 표준지 내에 6cm 이상 교목을 대상으로 2cm 괄약으로 측정한다.

- 표준지경계는 친환경성 백색수성페인트로 표시한다.

- 제거대상목은 친환경성 적색수성페인트로 표시한다.

- 도태간벌의 미래목 또는 정량간벌의 형질우세목 및 가지치기

대상목은 친환경성 황색수성페인트로 표시한다.

◦ 입목의 수고는 설계대상임분에서 경급별 3본 이상을 m 단위로 측정한다.

◦ 작업조건별 난이도를 적용하기 위하여 대상 사업지의 접근성, 경사도, 하층식생 등을 조사한다.

◦ 표준지 배치는 임도변, 도로변 등 접근이 용이한 지역으로만 배치하지 않도록 하여야 한다.

◦ 표준지에 대해서는 사업 전후 대비, 사후 점검이 용이하도록 숲가꾸기 사업을 실행하지 않고 보존하므로 설계서에 반영하지 않는다. 다만, 도로변 등 경관적으로 중요한 지역일 경우 발주자와 협의하여 설계서에 반영하고, 사업 실행 사유를 실시설계도․서에 기록 하여야 한다.

3. 설계시 유의사항

◦ 간벌율은 사업종에 따라 달라지나 산주와의 불필요한 민원을 피하기 위하여 본수 기준하여 최대 40% 이하로 한다.

◦ 설계범위는 벌목에서부터 수집까지로 하며, 수집은 도로, 임도나 운재로 등 접근로가 있는 지역에 한하여 30m 까지만 수집하는 것을 원칙으로 하되 작업의 용이성 및 재해위험 정도를 고려하여 가․감할 수 있다.

◦ 설계시 솎아베기와 천연림보육 사업면적의 35%이상 산물수집에 반영 되도록 하여야 한다.

◦ ha당 가지치기 본수는 침엽수림의 경우 300본 이하로 하고 활엽수림의 경우 200본 이하로 한다. 다만, 임분의 조건상 추가적인 가지치기를 하여야 할 경우에는 발주자와 협의하여 조정할 수 있다.

◦ 사업비산출을 위한 작업단계별 공정은 『숲가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침』을 기준으로 한다.

◦ 적용단비는 숲가꾸기사업 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침의 숲가꾸기 품셈 적용기준을 적용 한다.

◦ 사업비는 부가세를 포함한 총액으로 산출하여야 한다.

4. 설계도․서의 작성

가. 조사결과

◦ 조사결과서에는 다음의 내역이 기입되어야 한다.

- 표준지 번호, 표준지 면적, 조사자, 조사일자

- 수종, 흉고직경, 수고, 재적

- 가지치기본수, 제거목 본수

- 차도로부터의 거리, 경사도, 하층의 장애물 등

나. 설계서 작성

◦ 표지, 목차, 위치도, 현황사진, 설계 설명서, 설계적용기준, 시방서(일반, 특별, 전문), 소반별 임황과 지황, 경영목표, 작업방법, 지적조서, 공사원가 계산서, 설계 내역서, 단가산출서, 설계도면 순으로 작성ㆍ편철하여야 한다.

◦ 설계서의 규격은 A4용지 규격으로 한다.

◦ 설계서 서식은 발주자가 제공하는 서식을 사용하고 설계서 작성시

문제가 되는 사항은 발주자와 협의하여 결정한다.

다. 시방서 작성

◦ 시방서는 사업종별로 구분하여 작성하되 발주자가 제공하는 기본설계도서를 준용한다. 단, 추가되는 항목이 있는 경우에는 별도로 작성하여 본 시방서에 첨부하여야 한다.

◦ 개소별(소방별) 전문 시방서를 첨부하여야 한다.

라. 설계도면 작성

◦ 위치도는 축적 1/25,000지형도를 사용한다.

◦ 작업지시도는 우리군의 지적도(임야도)와 축적 1/5,000지형도를 활용하여 작성한다.

5. 성과품 납품

가. 선목 실시설계도․서 -------------------------- 각5부

※ 직접실행지와 선목 분리발주지를 구분 할 수 있도록 설계

나. 사업시행 실시설계도․서 ----------------------- 각5부

※ 산주직접실행지와 위탁․계약 실행지를 구분 설계

다. 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행 지침 제13조 제2항에 따른

실시설계도․서와 이를 포함한 전자기록매체(CD)

다. 기타 발주자가 요구하는 각종 설계자료.

붙임  1. 사업비 원가계산서 서식

2. 설계내역서 서식

3. 설계설명서 서식

4. 소반별 시방서 서식

5. 작업지시도 서식

6. 실시설계 표준지배치도 서식

7. 사업시행 예정공정표 서식

8. 소반별(ha당) 숲가꾸기 단가산출서 서식

9. 소나무재선충병 미감염 확인서 서식

사업비 원가계산서
구분 비목			금액	구성비	비 고
순공사원가	재료비	직 접 재 료 비
		직 접 재 료 비
		소 계
	노무비	직 접 노 무 비
		간 접 노 무 비
		소 계
	경비	기 계 경 비
		산 업 재 해 보 상 보 험
		고 용 보 험 료
		국 민 건 강 보 험 료
		국 민 연 금 보 험 료
		산 업 안 전 보 건 관 리 비
		기 타 법 정 경 비
		소 계
일 반 관 리 비
이 윤
총 원 가
부 가 가 치 세
합 계

설 계 내 역 서
(단위 :원)
임반 명칭	소반 명칭	단위	면적	계		노무비		재료비		경비
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
총 계

설 계 설 명 서

1. 사업명 :

2. 소재지 :

3. 면  적 :

4. 작업기간 :

5. 현장설명

1) 입 지

2) 지 황

3) 임 황

6. 설계목적

7. 숲의 기능

8. 관리목표

9. 대상지의 특성

10. 작업목표 및 방법

11. 임소반 구획

12. 실시설계 표준지 선정 및 조사

13. 사업비 산출 기준

14. 설계기준 및 변경조건

소반별 시방서(예시)

임반 : OO리

소반 : 1-1-1

1. 지 황

가. 지형

o 산성을 기점으로 부채꼴 모양으로 비교적 평탄하며 전체적인 향은 남서향, 해발고는 300m 이상

나. 면적

o 대상지의 지적은 oo리 산1-1, 산1-5, 산1-6, 산1-7, 산1-8, 산 1-9, 산1-10, 산1-11, 산2-1, 산3-1, 산4, 산4-1, 산4-2, 산5번지 14필지, 32.55ha

o 농경지 인근, 묘지, 계곡, 임도 등 무입목지와 숲가꾸기가 완료된 지역을 제외한 숲가꾸기의 대상지는 27.80ha

다. 지위

o 임령 대비 우세목의 수고를 판단할 경우 지위는 중에 해당

라. 접근성

o 임도 및 등산로가 대상지 내에 관통하여 산물수집 등에 기계화가 용이함

마. 기타사항

o 소반 하단부에 폐경된 농경지가 있으며, 버드나무 등 임목들로 가득 차 있음

2. 임  황

가. 임황 개요

면적 (ha)	임 상	수 종	혼효율 (%)	임 령	경급 (㎝)	수고 (m)	ha당		총 축적 (㎥)
							본수 (본)	재적 (㎥)
27.80	혼효림	상수리 소나무 신 갈 잣나무 기 타	36 27 17 2 18	[eqn: { 32 } over { 6-50 }]	[eqn: { 18 } over { 6-40 }]	[eqn: { 11 } over { 5-17 }]	1,328	95	2,644

※ 신갈에는 떡갈나무가 포함되었으며 상수리에는 굴참, 졸참나무를 포함

나. 수종 분포

o 전체적으로 주 수종은 참나무류와 소나무이며 잣나무가 소군상 또는 임도변 참나무류 밑에 수하 식재되어 있음

o 계곡부와 평탄지의 습한 곳에는 아까시나무가 군상으로 분포되어 있음

o 능선부는 주로 소나무림이 분포하고 있으며 생육상태는 불량함

다. 임분 활력 및 수형

o 참나무류 중 상수리나무 소경목과 떡갈나무는 수형이 곧고 형질 또한 우수하나 상수리나무와 신갈나무 대경재는 대부분 폭목으로 수형이 불량함.

o 임도변이나 등산로변 참나무류 하단에 수하식재 된 잣나무는 대부분 임관밀폐로 인하여 생장이 정지된 상태임

o 아까시나무는 지하고가 매우 높고 수형 또한 우수하나 풍해를 입을 가능성이 높음

o 많은 사람들이 찾고 있는 지역임에도 불구하고 소반 전체적으로 풍도목 또는 고사목이 발생하여 경관을 저해하고 있음

3. 경영목표의 설정

o 참나무류 (특히, 떡갈나무, 상수리나무) 대경재 생산

o 많은 산행객의 왕래가 많은 점을 고려하여 부수적으로 임도변 가시권은 경관림 조성을 병행하도록 경영목표를 설정하였음

4. 작업방법

가. 작업방법 요약

사업종 (간벌방식)	단위작업
	선 목	솎아베기 (본수대비)	가지치기	산물수집 (대상구역)	기타
솎아베기 (도태간벌)	161본/ha	20%	161본/ha 5.5m	20㎥/ha	-

나. 사업종 및 단위작업

o 평균 32년생 임지로서 사업종은 성림가꾸기로 함

o 간벌양식은 임목의 형질이 고르지 않으나 지위가 중으로 도태간벌을 적용

o 단위작업은 솎아베기, 가지치기, 재해발생 우려구간에 대한 산물수집으로 함

다. 미래목 선목

o 참나무는 흉고 직경의 대․소보다는 통직하고 형질이 우수한 개체를 선발

o 산복부 이하의 활엽수와 혼효되어 있는 소나무는 소군상으로 생육할 수 있도록 선목하고 활엽수를 위주로 제거 대상목으로 선정

o 능선부의 소나무림은 미래목을 따로 선발하지 않고 형질불량목을 중심으로 제거하여 적정밀도를 유지시킴으로서 활력을 제고

라. 제거 대상목 선정

o 미래목과 수관이 닿은 방해목을 우선 제거하고 피해목, 폭목, 기운나무를 제거

o 아까시나무는 풍도 될 가능성이 높으므로 기운나무는 모두 제거

o 임도변과 등산로 주변에는 고사목도 제거하여 주변경관이 어울리도록 함

마. 보호 대상목

o 등산로와 쉼터 주변 등 산행객의 주요 동선은 적정한 피음을 제공할 수 있도록 과도한 솎아베기가 되지 않도록 하여 제거 대상목을 선정

o 산벚나무 등 화목류와 물봉선 등 초본류, 기타 미래목의 생육에 지장을 주지 않는 하층의 관목은 제거하지 않음

바. 가지치기

o 가지치기는 모든 미래목에 대하여 5.5m의 높이로 실시

사. 산물수집 및 정리

o 임도변 좌․우 50m구간, 농경지․계곡 주위 30m 이내 지역에서 발생하는 간벌재는 전량 수집하여 임도변에 집재

o 기타지역에서 발생하는 간벌재는 따로 정리하지 않고 지면에 최대한 많은 면적이 닿아 빠른 시일 내에 부식이 될 수 있도록 단목 처리

아. 제거량 및 작업난이도

ha당 제거량			작업장난이도
본수 (본)	재적 (㎥)	제거율 (%)	산지경사	하층식생	접근성
266	20	21	0	+5	-5

o 1-1-1소반의 제거량은 266본으로 본수대비 20%, 재적대비 21%임

o 1-1-1소반의 작업난이도는 보통에 해당

자. 기타사항

o 임도변, 하단부의 농경지에서 수목을 감고 올라가는 칡 등 덩굴류는 제거

작 업 지 시 도 (예시)

실시설계 표준지배치도(예시)

사업시행 예정공정표(예시)

기 간 사 업 종	1개월			2개월			3개월			비 고
	10일	20일	30일	10일	20일	30일	10일	20일	30일
설계서검토 및 경계표시
선 목 (○인 × ○일)
미래목 가지치기 (○인 × ○일)
작업실행 (○인 × ○일)
하산집재
작업장 정리ㆍ보완

※ ( ) 괄호 내는 작업 투입인원과 투입된 인원이 작업에 소요되는 일수임.

소반별(ha당) 숲가꾸기 단가산출서
위치 및 면적
구분		작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인․ 증률	계
	단위작업		단위		단위			종류
단위작업별	o 작업로선정(소작업로)
	- 직접노무비
	- 재료비(테이프)
	o 작업로설치(소작업로)
	- 직접노무비
	- 재료비(체인톱)
	․연료
	․잡품
	- 기계경비(체인톱)
	o 솎아베기(벌목+조재)
	- 직접노무비
	14cm 이하
	18cm 이하
	22cm 이하
	26cm 이하
	28cm 이상
	- 재료비
	․체인톱사용
	연료
	잡품
	․경계표시 페인트
	- 기계경비(체인톱)
	o 가지치기(소나무0～4)
	- 직접노무비
	o 인력집재(25m,16cm)
	- 직접노무비
합계	순원가
	o 노무비
	- 직접노무비
	- 간접노무비
	o 재료비
	o 경비(기계경비)
□ 참고사항

※ 수량의 계산시 소수 3째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 표시, 금액의 단위는 1원 미만은 버림

소나무재선충병 미감염 확인서
사 업 명		면 적	㏊
위 치
감염여부	감 염 □ 미 감 염 □
확인자 의 견
OOO 사업대상지에 대한 소나무재선충병 미감염 여부를 위와 같이 확인합니다. 0000년 00월 00일 확인자 ○ ○ ○ □