2006하천(구절1리외 2개소)수해복구공사 실시설계용역

과   업   지   시   서

2007. 8

정      선      군

목        차

Ⅰ. 하천정비공사 실시설계	1

1.0 설계설명서	1

2.0 일반과업지시	4

3.0 특별과업지시	5

Ⅱ. 보  안  대  책	18

Ⅲ. 기  타  사  항	19

Ⅰ. 수해복구공사 실시설계

1.0 설계설명서

1.1 과업의 목적

본 과업은 정선군 관내 하천의 수해지구에 대한 항구적인 복구대책으로써 실시설계를 통하여 하천개수를 실시함에 따라 하천의 안정적인 관리 및 홍수로부터 인명, 재산을 보호하여 주민의 삶을 윤택하도록 하는데 그 목적이 있음.

1.2 과업의 범위

하천명	사업내용	위 치	과업물량 (m)	비 고
송 천	전석쌓기	강원도 정선군 북면	300
오대천	“	강원도 정선군 북평면	200
골지천	“	강원도 정선군 임계면	2,800㎡
	계

1.3 과업의 내용

가. 현지조사

1) 지형현황측량  : 1,000 ㎡

2) 하천종횡단측량 : 1.0 Km

나. 기본조사

1) 내수조사

2) 골재원조사

3) 하천시설물(기존교량포함) 조사

다.  실시설계

1) 기본계획 조사 및 자료분석

2) 구조물 헐기공법 결정

3) 하도준설 공법 결정

4) 시방서 작성

라. 실시설계도서 작성

1.4 과업수행기간

본 과업수행기간은 착수일로부터 20일로 하며 다음 사항에 대하여 우리군의 승인을 득한 후 기간을 변경할 수 있다.

가. 천재지변으로 작업이 불가능하였을 때

나. 용역기간중 강우일수가 평균강우일보다 많아 과업수행에 차질이 있을 때

다. 기타 불가피한 상황이 발생하였을 때

1.5 설계변경 조건

가. 본 과업은 실시설계를 개략공사비 비율에 의한 기술용역 대가기준 (요율)을 적용 설계하였는바, 실시설계 결과 공사비 및 조사연장의 증․감에     따라 예산범위 내에서 설계변경을 할 수 있다.

나. 발주관서가 필요하다고 인정하거나 관계기관의 협의에 따라 변경이 불가피한 경우

1.6 공사금액 산정시 적용기준

가. 노임단가 : 대한건설협회에서 조사공표한 최근 시중노임단가

나. 중기사용료 : '2007. 1. 1 조달청 중기사용료

다. 자재단가 : 최근조달청 가격정보지 및 물가정보지 적용 ('2007. 7월 기준)

다. 수량 및 단가산출은 정부제정 건설공사 표준품셈에 의하여 산출하고 이에 의할 수 있는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정 단가를 감독관    과 협의하여 산출하여야 한다.

2.0 일반과업지시

2.1 설계기준

본 용역 설계는 과업지시서와 아래 시방서 및 규정을 준수하여 수행하여야 한다.

- 토목공사 일반표준 시방서

- 하천공사 표준시방서

- 하천설계 기준

- 콘크리트 표준시방서

- 구조물 기초 설계 기준

- 한국산업규격

2.2 세부추진 계획서 제출

본 용역수행자는 착수후 7일 이내에 과업별로 구체적인 세부실시 계획서를 우리군에 제출하여 사전 협의후 과업을 수행하여야 한다.

2.3 기 타

가. 과업내용중 일부 지구에 대한 중간성과품 납품이 필요할 때는 발주처의 요구에 따라 필요한 성과품을 제출하여야 한다.

나. 각 공종마다 공법 및 세부방침에 대하여는 우리시와 협의하여 결정하여야 한다.

다. 본 과업을 수행함에 있어 과업지구와 관련하여 유관기관과의 협의가 필요한 경우에는 해당기관과 사전에 충분한 협의를 하여 공사 시행시 문     제점이 발생치 않도록 제반 사항에 대하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

3.0 특별과업지시

3.1 측량사항

가. 지형측량

1) 평면도의 축척은 실시설계 도면은 1 : 1,200으로 한다.

2) 기성제 및 기존하천 시설물 등 하천연안 부근지역의 모든 지형지물의 위치와 표고 등을 상세히 조사 측량하고 표준단면 규격 등을 조사하여     표기한다.

3) 제방의 계획법선 및 계획된 하천시설물의 위치 및 규격 등을 표기한다.

4) 지형측량은 계획법선으로부터 제내지 20 m, 제외지는 수면까지 상세히 조사 측량하여야 한다.

5) 본류에서 분기 및 합류되는 지류의 현황을 상세히 조사측량하며, 측량범위는 우리시와 협의한다.

6) 기성제 및 기설치된 배수시설 (수문, 흄관, 암거)을 홍수위 계산에 의한 배수처리 계획에 의하여 상세히 조사표기하여야 한다.

7) 거리측량은 스틸테이프 이상의 방법을 사용하여야 한다.

나. 종단측량

1) 종단측량은 국립지리원 매설수준점 (B․M)인 1등 또는 2등 수준점을 이용하되 허용오차 범위 내에 들어야 한다.

2) 측점 간격은 40 m로 하되 지형이 변하는 개소에는 중간측점을 설치, 측량하여야 한다.

3) 신설제방 부근의 변동이 없는 장소에 영구표석의 수준점을 설치하고 위치와 표고를 평면도에 표기한다.

4) 곡선부 시종점 및 교점 (I.P) 등 중요한 측점은 장시일 보존될 수 있도록 견고한 말뚝으로 견고히 박아야 한다.

5) 축척은 횡 1 : 100~200, 종 1 : 1,000~1 : 1,200으로 작성한다.

다. 횡단측량

1) 종단측량을 중심으로 하천유심의 직각방향으로 측량을 실시하되 지형이 변하는 지점에 대하여는 추가로 측량을 실시한다.

2) 측량범위는 중심계획선에서 제내지측은 20 m까지 측량한다.

라. 기성제 등 하천시설물 (부속물 포함) 및 매설물 조사

1) 기성제 및 주요 하천시설물이 있을시는 조사측량시 위치 및 표고 등을 조사함과 동시에 표준단면 및 규격 등을 조사하여야 한다.

2) 배수암거 등 지하매설물을 철저히 조사하여 지형측량도에 표시하고 종류, 규격, 소관청 등에 대하여는 현황평면도와 같이 별도로 조서를 작성    하여 제출하여야 한다.

3) 조사측량시 기왕의 홍수에 대한 추정조사를 실시하여야 하며, 동 조사성과를 토대로 주요구간에 대한 홍수구배 및 홍수위분석 등을 실시한 후 지형도 (1 : 2,500～1 : 5,000)에 홍수피해 구역을 표시한다.

3.2 기본조사

가. 내수조사

내수처리 계획검토를 위하여 지형조사, 배수계통조사, 배수시설조사, 기왕자료조사, 수리․수문 관측자료의 추가조사, 도시 및 지역 계획 등을 조사하여야 한다.

나. 골재원조사

축조재료 선정을 위한 예비조사 및 현지조사는 다음사항을 중점적으로 조사한다.

1) 토취장 예정지의 지형, 지질 및 토질에 관한 자료의 수집

2) 운반경로 및 운반거리를 위한 현지조사

3) 공사용 도로의 적정판정을 위한 현지조사

다. 하천시설물 조사

기존의 돌망태, 수문, 통관, 배수장, 교량, 기타의 구조물이 있을 때에는 그 구조 및 규모, 현재상태, 개수 계획의 수위, 시공계획고 등의 관련 등을 조사하여야 한다.

3.3 실시설계

가. 기본계획 조사 및 자료분석

골재원 조사 및 토질시험 성과를 토대로 토취장을 선정한다.

나. 구조물 헐기 공법 결정

기존 구조물 헐기 공법은 경제성 및 효율성 등을 충분히 고려하여 결정하여야  한다.

다. 하도 준설 공법 결정

하도준설은 수질오염등 민원발생 소지가 많으므로 면밀히 검토하여 경제적이고 현지에 적합한 공법으로 결정하여야 한다.

내수처리 계획은 계획홍수의 선정과 그 확률평가, 실행 가능한 복수의 처리 방식의 선정 각 방식에 대한 시설 규모별 비용편익을 산정하고 최적처리 방식 및 시설규모를 결정하여야 한다.

3.4 실시설계도서 작성

가. 위치도

1 / 25,000 지형도에 위치를 표시한다.

나. 평면도

1) 실시설계 도면은 1 / 1,200으로한다.

2) 중심선 및 계획선을 표시하고 중심선에 40 m 간격의 측점을 표시한다.

3) 곡선부에는 곡선 계산치를 표시하고 중심선에는 B.C 및 E.C 측점을 표시한다.

4) 토지의 하천구역을 알기 쉬운선으로 표시한다.

5) 가는 실선으로 지적도를 표시한다.

6) 본류에서 분기되는 지류의 현황 및 제내지측의 지천 및 파천현황을 표기한다.

7) 기성제방 및 기설치된 배수시설 (수문, 흄관, 암거 등)을 표시한다.

다. 종단면도

축척은 횡 1 / 100~200, 종 1 / 1,000~1 / 1,200으로 한다.

라. 횡단면도

1) 축척은 종․횡 동일하게 1 / 100~200 으로 한다.

2) 계획홍수위, 축제고, 호안고, 지반고 등을 표시하고 단면마다 물량을 표시한다.

3.5 보고서 작성 및 인쇄

가. 용역성과는 육하원칙에 의거 명확하게 작성하되 보고서 규격은 A4, 백상지 양면 마스터인쇄로 한다.

나. 각종 조사 및 수집자료, 계산서, 활용자료 등은 부록에 정리 수록하되 백상지 마스터 인쇄로 한다.

3.6 일반사항

가. 본 과업 수행중 아래 공종이 완료되었을 때는 우리군과 협의한다.

1) 조사측량 완료후

2) 각종 공법 채택시

3) 도면작성 및 수량산출시

나. 기타사항

1) 본 과업에 명시되지 않은 사소한 사항 및 당연히 시행 하여야 될 객관성 있는 사항을 우리시의 지시에 따라 용역자 부담으로 실시하여야 한다.

2) 과업성과는 납품기일 1주일 전에 우리시에 제출하여 승인을 받은 후 인쇄하여야 한다.

3) 수급자는 본 과업 완료 이후에 보완사항이 발생될 때에는 본 과업지시서에 명시되지 않았더라도 수급자 부담으로 보완하여야 한다.

4) 수량산출서 및 단가산출서는 각각 별책으로 작성하여야 한다.

5) 단가산출은 건설부 제정 표준품셈 및 설계납품시 노임단가(한국엔지니어링협회 발표) 에 따른다.

3.7 준공성과품 제출

가. 보고서

- 실시설계 보고서 5부

- 기존구조물 안전진단 결과(육안검사)

나. 설계도면(트레싱원도, 원고별도)

- 설계도면 5부 (축소도 2부포함)

다. 설계서 및 계산서

- 설 계 서 5부

- 설계예산서 5부

- 수량산출서(원고별도) 5부

- 단가산출서 5부

라. 기타서류

- 구조 및 수리계산서 5부

- 측량관계 야장(점의조서 포함) 1식

- 측량관계 자료 1식

- 기타 관계서류 및 물품 1식

Ⅱ. 보  안  대  책

가. 도급회사의 대표자는 과업착수시 보안각서를 제출하고 보안관리 책임자가 관리하여 보안에 철저를 기한다.

나. 용역 업무수행 작업실에는 종사자이외의 타인출입을 통제한다.

다. 본 용역사업 자료는 견고한 용기에 별도로 보관하고, 보안관리 책임자가 관리하여 보안에 철저를 기한다.

라. 본 과업수행상의 폐기물은 일괄 수거하여 완전 소각한다.

마. 용역성과 발간시에는 반드시 보안 관리책임자 입회하에 필요한 보안조치를 취한 후 발간하여야 한다.

바. 본 과업수행 전후를 막론하고 자료 및 성과물의 타용도 사용을 엄금한다.

사. 기타 보안과 관련되는 사항을 발주청에서 요구할 시는 이에 따라야 한다.

Ⅲ. 기  타  사  항

가. 용역계약후 7일이내에 용역과업을 착수하여야 하며, 현장대리인계, 착공계, 작업시행계획등 행정상에 필요한 서류를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 작업에 종사하는 기술자는 작업 착수전에 명단(이력서 첨부)과 기술자별 과업수행내용을 제출하여야 한다.

다. 과업수행추진상황은 매월말로 종합하여 감독 경유 지정양식에 의거 보고하여야 한다.

라. 과업진행기간중 기록이 될 수 있는 중요한 부분이나 표석매설지점은 사진촬영하여 제출하여야 한다.

마. 과업지시서의 내용 및 수량에 차이가 있을 경우에는 실제에 맞추어 설계변경할 수 있다.

바. 과업수행기간중 1회 이상 중간보고를 하여야 하며 완료되기 1개월전에 기입요령을 작성하여 감독관과 사전협의 조정하여야 한다.

사. 본 과업 수행내용에 필요한 과업의 경미한 추가조사사항이 있을 때와 명시되어 있지 않은 기타사항에 대하여는 감독관 지시에 따라 도급자 부담으로 실시하여야 한다.

아. 본 과업수행내용에 있어서 장래계획에 대한 추정치는 현재 정부 및 지방자치단체에서 추진중인 장기 전망지표에 따라야 한다.

자. 본 과업수행시 각종 위험이 예측되는바 도급자의 책임하에 사전에 충분히 검토예방 대책을 수립하여 과업을 수행하여야 한다.

차. 본 과업 준공검사 또는 검사시 지적된 사항에 대하여는 처분지시에 즉시 응하여야 한다.