정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	정선군 공공하수도(14개처리구역) 관로 기술진단
② 추진배경	하수도법 제20조, 같은법 시행령 제16조, 같은법 시행규칙 제14조 규정에 의거 5년마다 소관 공공하수도에 대한 기술진단 실시
③ 사업개요	2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역 - 공공하수관로 기술진단 용역(1권역) : L=51Km(정선읍, 북평면) - 공공하수관로 기술진단 용역(2권역) : L=51Km(지장천, 신동읍) - 공공하수관로 기술진단 용역(3권역) : L=27Km(여량면, 임계면, 화암면, 남면)
④ 사업부서	상하수도사업소		⑤ 담당자	소 장 박명호 공업7급 윤정열
⑥ 선정기준	50백만원 이상의 연구·용역사업		⑦ 사업기간	2022. 4. ~ 2022. 10.
<그간 주요 추진내용>
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 추진계획		‘22.02.15.	김병렬 부군수 박명호 상하수도사업소장 전훈표 회계과장 조형식 계약관리팀장 이진호 관리팀장 문제천 시설운영팀장 윤정열 주무관
○ 일상감사 의뢰(2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역)		‘22.02.15.	박명호 상하수도사업소장 문제천 시설운영팀장 윤정열 주무관
○ 일상감사 의견통보[2022년 정선군 하수관로 기술진단 용역(3개 권역)]		‘22.02.18.	기획관-2272(2022.2.18.)
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역 시행결의(1권역,2권역,3권역)		‘22.02.23.	박명호 상하수도사업소장 조형식 계약관리팀장 이진호 관리팀장 문제천 시설운영팀장 윤정열 주무관
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역 계약의뢰(1권역)		‘22.02.24.	박명호 상하수도사업소장 문제천 시설운영팀장 윤정열 주무관
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역 계약의뢰(2권역)		‘22.03.10.	박명호 상하수도사업소장 문제천 시설운영팀장 윤정열 주무관
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역 계약의뢰(3권역)		‘22.03.23.	박명호 상하수도사업소장 문제천 시설운영팀장 윤정열 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역 계약(1권역)	22.04.04.	㈜일신이앤씨
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역 계약(2권역)	22. 03.30.	㈜삼주이앤텍
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역 계약(3권역)	22. 03.31.	㈜동남엔지니어링
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역(2권역) 착수	22. 04.05.	㈜삼주이앤텍
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역(3권역) 착수	22. 04.06.	㈜동남엔지니어링
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역(1권역) 착수	22. 04.11.	㈜일신이앤씨
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역(1권역) 준공	22. 10.07.	㈜일신이앤씨
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역(2권역) 일시정지	22. 09.05.	박명호 상하수도사업소장 고해숙 시설운영팀장 윤정열 주무관
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역(3권역) 일시정지	22. 09.07.	박명호 상하수도사업소장 고해숙 시설운영팀장 윤정열 주무관
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역(3권역) 일시정지 해제	22. 11.23	박명호 상하수도사업소장 고해숙 시설운영팀장 윤정열 주무관
○ 2022년 정선군 공공하수관로 기술진단 용역(2권역) 일시정지 해제	22. 11.29.	박명호 상하수도사업소장 고해숙 시설운영팀장 윤정열 주무관