2008년 어린이보호구역 개선사업 측량용역

과 업 지 시 서

2008.   04.

정 선 군

과 업 지 시 서

1. 과업의 명칭

2008년 어린이보호구역 개선사업 측량용역

2. 과업목적

본 과업은 2008년 어린이보호구역(남선초등학교, 사북초등학교, 임계초등학교, 정선초등학교) 개선사업으로 어린이의 안전한 통학로 확보에 기여하고자 사업에 기초적으로 필요한 자료인 측량성과도를 작성하는데 목적이 있음.

3. 과업의 설명 및 범위

가. 사업개요

- 용역명 : 2008년 어린이보호구역 개선사업 측량용역

- 위  치 : 남선초등학교, 사북초등학교, 임계초등학교, 정선초등학교

- 측량연장 : L=0.6Km

나. 과업의 범위

- 현황조사 : 1/5,000 지형도와 현장조사를 토대로 과업구간의 현황을 조사한다.(조사의 목적은 과업구간의 현황을 파악하여 설계기준 및 설치구조물의 검토, 교통안전대책 및 작업계획을 수립하기 위함)

- 조사측량

1) 종단측량 : 중심선을 따라 매측점의 지반고를 측정하여야 한다.

2) 횡단측량 : 횡단측량은 각 측점 및 중간점에서 좌,우지형을 정확히 실측할 것이며, 구조물은 별도로 작성하되 소요연장 현황을 상세히 기입한다.

3) 평판측량 : 도로중심선에서 좌,우 5m이상의 지형을 측량 표시하되 지형지물을 상세히 표시 하여야 한다.

- 기타과업에 명기되지 아니한 발주청의 지시사항.

다. 성과물 제출

- 용역업체는 용역과업 수행계획서를 작성하여 발주청의 승인을 받아 과업수행하여야 한다.

- 측량용역 완료시 다음사항을 용역기간내 제출하여야 한다.

1) 측량원도 -----------------------------------------------------------------  일체

2) 측량야장 -----------------------------------------------------------------  일체

3) 설계도면(대, 소) ------------------------------------------------------------  4부

4) 설계예산서 ----------------------------------------------------------------  4부

5) 수량산출서 ----------------------------------------------------------------  4부

6) 단가산출서 ----------------------------------------------------------------  4부

7) 상기사항 전산화 디스크 및 CD -------------------------------------------------  2부

4. 기타사항

본 과업의 과업기간은 착수일로부터 30일간으로 하고, 다음의 경우 관의 승인을 득한 후 기간을 연장할 수 있다.

가. 천재지변 등 불가항력으로 작업이 불가능할 때

나. 발주기관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 경우

다. 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때(과업량 증가 등)

5. 예정공정표

구 분	보 할(%)	예 정 공 정					비 고
		착수 10일		착수 20일	착수 30일
현장조사	10	10
평판,종단,중심선,횡단측량	70		15	40	15
도면작성 및 수량산출	20				20
일 계		25		40	35
누 계	100	25		65	100