과 업 지 시 서

1. 과업개요

가. 사업명 : 2008년도 조림사업 감리용역

나. 과업목적

조림사업의 품질향상

다. 과업대상 위치 및 사업량

1) 위치 : 정선군 관내 2008년도 조림지 및 2007년도 추기조림지

2) 사업량 : 130ha (2008년도 조림110ha. 2007년 추기조림지 20ha)

※ 필지별내역 붙임 참조

라. 과업의 범위

1) 조림예정지 정리작업 지도

2) 2008년도 조림사업 식재지도

3) 예비준공검사

4) 조림지 활착율조사 (2008년도 조림지 및 2007년도 추기 소나무용기묘

조림지)

마. 설계적용 기준

1) 본 조림지 감리설계는 산림청 [조림설계.감리 시행지침]에 의함.

2) 노임단가 : 2008년도 엔지니어링사업 노임단가 기준건설 및 기타부문

적용

2. 과업지시서

가. 일반사항

1) 감리자는 산림자원의조성 및 관리에 관한 법률 및 동 법의 규정에 의한

명령이나 그 밖의 관계법령의 규정에 적합하게 감리하여야 한다.

2) 과업지시서에 명시된 사항이나 감독관청(정선군) 자체의 정책변화 등에

의하여 사업변경이 불가피한 경우 과업지시 내용을 변경할 수 있다.

3) 용역추진내용에 관한 해석에 이의가 있을 경우와 기타 과업수행과 관련

하여 과업수행자가 단독 결정이 곤란한 사항에 대하여는 감독(정선군)의

지시에 따른다.

4) 본과업 지시서에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 감독관청(정선군)과

협의 및 지시에 따른다.

5) 묘목수급 계획 등 사유로 조림계획 변경시 별도의 감리계약 변경 없이

변경된 내용에 따라 감리사업을 수행한다.

나. 과업수행시 유의사항

1) 감리용역 수행자는 과업 착수 전에 기술1급 이상인 산림경영기술자 1인

또는 기술2급 산림경영 기술자로서 조림실무 경력이 2년 이상인자와

산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령 제31조 제3항 제1호의

규정에 의한 산림지도자를 조림사업 현장대리인으로 배치하여 관리.

감독하여야 한다.

2) 감리용역 수행자는 감리원의 업무를 수행할 수 있는 자격을 갖춘 자를

선정하여 발주자에게 승인을 받아야 한다.

3) 감리용역 수행자는 과업 착수전에 착공계, 과업수행 내역서, 예정공정표

등 제반 서류를 제출하여야 하며 과업수행 세부 공정표를 별도로 작성

하여 감독관의 승인을 얻어야 한다.

4) 정리작업시 유용한 수목은 잘 가꾸어 보존하도록 한다.

5) 묘목대운반이 완료되면 조림예정지와 가까운 지역 그늘진 곳에 즉시

가식하도록 지도하여야 한다.

6) 가식은 묶음을 풀어서 가식하되 묘목의 끝부분이 북쪽을 향하게 가식

하도록 지도한다.

7) 조림은 사업종별 식재기준 본수에 맞게 묘간거리 유지하여 식재하도록

지도한다.

8) 식재는 너무 깊거나 얕게 식재하지 않고 비스듬히 식재하지 않도록

한다.

9) 묘목 구덩이에 돌이나 나무뿌리, 낙엽, 잡풀 등 불순물이 들어가지 않도

록 한다.

10) 식재는 정조식으로 줄을 맞추어 식재한다.

11) 묘목이 다른 곳으로 유출되거나 산원에 방치되는 일이 없도록 하고

남은 묘목이 발생되지 않도록 하여야 한다.

12) 묘목을 심지 않고 불법으로 매립하지 않도록 한다.

13) 묘목은 수급되는 즉시 조림하도록 하고 잘 밟아 바람에 쓰러지거나

뽑히는 일이 없도록 한다.

14) 묘목망태기에 물쑤세미를 넣고 다니며 시재하여 뿌리건조를 막도록

한다.

다. 서류제출

감리수행자는 사업시행 중 해당하는 시점에서 다음 각호에 해당하는

보고서를 작성하여 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.

1) 중간감리 보고서

2) 예비사업 완료검사 결과보고서

3) 필지별 실행내역

4) 감리완료 보고서

5) 감리일지

라. 감리 용역의 준공

감리가 완료되었을 경우 중간감리보고서를 제외한 예비사업 완료검사

결과보고서, 필지별 실행내역, 감리완료보고서, 감리일지, 기타 정선군

에서 요구하는 서류를 제출 준공검사를 받아야 한다.

중간감리보고서

보고구분	2008년도 조림사업 감리중간보고 (제 차)
작 업 명	조림 예정지정리						면적		ha
위 치
감리기간				감리대상지역
감 리 내 용
소반명		계획(ha)	실적(ha)		실행율(%)			적합여부
								□적합 □부적합
감 리 자 의 견		필요시 별첨
위와 같이 감리 중간보고서를 제출합니다. 2008. . . 주 소 : 상 호 : 감리자 : (인) 정선군수 귀하

감 리 일 지

일련번호			작성일
사 업 명
감리대상지
감리내용	작업종	점 검 대 상			작업적정성
특이사항
부적합사항 조치결과
작 성 자	감리원 (인)

예비사업완료검사 결과보고서

사 업 명	2008년 조림사업(예정지정리,식재, 활착율조사)				사업량		ha
위 치
소 반	계획(ha)	실적(ha)	달성율(%)	점검일자		적합여부
						□적합 □부적합
점검동행자
예비준공 검사내용
붙임자료	1. 필지별 실행내역
위와 같이 예비사업 완료검사 결과보고서를 제출합니다. 2008. . . 주 소 : 상 호 : 감리자 : (인) 정선군수 귀하

필지별 실행내역

입소반	면	리	지번	지적(ha)	면적(ha)	점 검 결 과

감리완료 보고서

보고구분	감리완료보고
사 업 명							면적	ha
위 치
감리기간			감리대상소반
감 리 내 용
소 반 명	계획(ha)	실적(ha)		실행율(%)		적 합 여 부
						□적합 □부적합
감 리 자 의 견
붙임자료	1. 소반별 사업시행 조사표 2. 소반(표준지)별 작업확인조서
위와 같이 예비사업 완료검사 결과보고서를 제출합니다. 2008. . . 주 소 : 상 호 : 감리자 : (인) 정선군수 귀하

소반별 사업시행 조사표

사 업 명					사업량		ha
위 치	정선군 면 리 산 번지
임. 소반	계획(ha)	실적(ha)	달성율(%)	적합여부		비 고
감 리 자 의 견

소반(표준지)별 작업확인조서

임. 소반명
1. 예정지정리
지 적			설계면적		작업면적			실행율(%)		비 고
2. 식재 및 활착율 조사
수 종		설계서상 식재본수		조사결과							설계서대비 실행율(%)
				식재본수		고사본수	잔존본수		고사율
계
3. 감리의견