정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	주례마을 어울연못 조성
② 추진배경	국회 42호선 우회도로 개통, 정선~진부 59호선 직선화에 따른 방문객 감소 기존 레일바이크 종착역인 아우라지역과 여량면 시가지 연계 관광공간 조성
③ 사업개요	- 위치 : 여량면 여량리 262-3번지 외 13필지 - 사업량 : 어울연못 조성 4,764㎡, 주례마을~시가지 연계경관 조성 L=200m - 사업비 : 4,000백만원(폐기금) ‘18년 900백만원, ‘21년 2,100백만원, ‘21년 이후 1,000백만원
④ 사업부서	여량면		⑤ 담당자	면장 최춘택 행정7급 김동건
⑥ 선정기준	10억이상 예산투입 사업		⑦ 사업기간	2018년~2022년
<그간 주요 추진내용>
○ 주례마을 어울연못 조성계획		‘17.10.18	황승훈 면장 유신 총무담당 최미희 주무관
○ 2018년도 공유재산 취득(안)에 대한 공유재산심의회 심의 결과 알림		‘17.12.01	황승훈 면장 유신 총무담당 최미희 주무관
○ 여량면 중장기 발전 기본계획수립 용역 완료		‘17.12.26	황승훈 면장 유신 총무담당 최미희 주무관
○ 주례마을 어울연못 조성사업 실시설계용역 완료		‘18.12.10	황승훈 면장 박원기 총무담당 김제일 주무관
○ 정선군 공유재산심의회 변경 심의 (제2019-35호)		‘19.07.09	황승훈 면장 김영준 총무담당 유영훈 주무관
○ 주례마을 어울연못 조성사업 손실보상 계획 알림		‘19.10.11	최춘택 면장 김영준 총무담당 김동건 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 주례마을 어울연못 조성사업 일괄 위탁 협약 (한국농어촌공사 원주지사)	‘19.11.26	최춘택 면장 김영준 총무담당 김동건 주무관
○ 주례마을 어울연못 조성사업 감정평가 시행	‘19.12.06	최춘택 면장 김영준 총무담당 김동건 주무관
○ 주례마을 어울연못 조성사업 문화재 관련법 검토 의뢰	‘20.02.13	최춘택 면장 김영준 총무담당 김동건 주무관
○ 주례마을 어울연못 조성사업 위탁사업비 교부결정 및 지급결의	‘20.02.14	최춘택 면장 김영준 총무담당 김동건 주무관
○ 주례마을 어울연못 조성사업 손실보상금 지급 (6건)	‘20.03.30~20.06.01.	최춘택 면장 김영준 총무담당 김동건 주무관
○ 편입부지 보상금 산정을 위한 감정평가(2차) 및 토지분할측량	‘20.05.14	최춘택 면장 김영준 총무담당 김동건 주무관
○ 주례마을 어울연못 편입부지 분햘측량 수수료 납부 결의	‘20.05.26.	최춘택 면장 김영준 총무담당 김동건 주무관
○ 토지이동(분할)공부 정리 요청 / 여량면 여량리 263-1 외1필지	‘20.05.28.	최춘택 면장 김영준 총무담당 김동건 주무관
○ 양도소득세 신고 안내 (6건)	‘20.07.07.	최춘택 면장 박명숙 총무담당 김동건 주무관
○ 주례마을 어울연못 조성사업 추진 협조(손실보상 : 대한예수교장로회여량교회 외 1건)	‘20.09.25.	최춘택 면장 박명숙 총무담당 김동건 주무관
○ 양도소득세 신고 안내 (1건)	‘20.10.05.	최춘택 면장 박명숙 총무담당 김동건 주무관
○ 주례마을 어울연못 조성사업 주민설명회 알림	‘20.10.26.	최춘택 면장 박명숙 총무담당 김동건 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 개발행위허가 신청에 따른 관련법 검토 결과 알림(접수) 도시과-47391 개발행위허가신청에 따른 관련 법 의제 협의 요청 농업기술센터-41325 농업생산기반시설(국유재산) 사용허가 알림 여량면-10937 개발행위허가 신청에 따른 관련법 검토 알림	‘20.11.05.	최춘택 면장 박명숙 총무담당 김동건 주무관
○ 주례마을 어울연못 조성사업 참관조사 결과 회신	‘20.11.17.	최춘택 면장 박명숙 총무담당 김동건 주무관