≪ 정선읍(신촌) 배수펌프장설치공사 실시설계 용역 ≫

과  업  지  시  서

2007.  2.

정    선    군

(재난안전관리과)

목      차

1. 과   업   개   요

2. 일   반   사   항

3. 실시설계과업지시서

4. 측 량 과 업 지 시 서

5. 성      과      품

과  업  지  시  서

1. 과업 개요

가. 과 업 명 : 정선읍(신촌) 배수펌프장설치공사 실시설계 용역

나. 위    치 : 정선군 정선읍 봉양5리 신촌

다. 목    적 : 2002 ․ 2003 ․ 2006년도 태풍 ․ 집중호우시 하천수 역류 및 내수

로 인하여 상습 침수되어 따른 배수펌프장을 설치코자 함

다. 적용범위 : 본 과업지시서는 정선군 정선읍 봉양5리 신촌지구에 한하여

적용한다.

라. 과업기간 : 본 용역의 과업기간은 착수일로 부터 60일간으로 한다.

마. 과 업 량 : 실시설계-1식, 지형현황측량 A=8,000㎡

바. 과업내용 : 배수펌프장 실시설계 ․ 현황측량-1식

2. 일반사항

가. 본 용역은 엔지니어링기술진흥법 제10조 제2항의 규정에 의한 엔지니어링

사업대가의 기준(과학기술부 공고 제2001-116호)에 의하여 작성되었다.

나. 수급인은 계약 체결후 착수계, 대리인계등 과업수행에 필요한 제반서류를

제출하여야 한다.

다. 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정하였는 바, 이에 규정되지

아니한 사항은 감독관과 협의하여 수행하여야 한다.

라. 감독관이 필요하다고 인정할 경우 과업의 추진사항을 보고하여야 한다.

마. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 중요한      사항은“갑”과 협의하여 결정하고 필요한 서류를 성실하게 제출 및 협조

하여야 하며 기타 경미한 사항은 감독관의 지시에 따른다.

바. 능률적인 과업수행과 기간단축을 위하여 가능한 전산처리에 의한 결과를

얻도록 한다.

사. 본 용역의 수행상 과업의 변경요인이 발생 되었을시에는 반드시 승인을

받은후 변경할 수 있다.

아. 보안사항

1) 수급인은 보안 대책을 수립하여야 한다.

2) 모든 성과품은 수급인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서

는 않된다.

3) 과업 수행중 발생된 폐품은 소각처리 하여야 한다.

4) 기타 과업 수행시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며 보안사항 불이행으로

발생된 모든 책임은 수급인이 진다.

자. 설계변경조건

1) 계획변경으로 인하여 과업의 내용이 변경될 때.

2) 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때.

3) 과업수행중 측량 과업량의 증․감에 대하여 변경될 경우

3. 실시설계 과업지시서

가. 일반지침

1) 본 계획에 앞서 면밀한 현황조사와 분석을 통하여 주변의 토지이용과

조화될 수 있도록 하여야 한다.

2) 관리보호를 요하는 시설과 건축물 신축이 필요한 시설등에 대하여 처리

계획을 반영한다.

3) 구상안에 대한 공사비는 합리적이고 경제적인 최상안을 선택하여 최종안      은“갑”과 협의 결정하여야 한다.

4) 공급처리 시설계획은 상위계획을 검토하여 기존시설과의 연계여부를 고려

하여 합리적이고 경제적인 계획이 되도록 한다.

5) 본 용역이 기본 설계는 제외되어 있으나 도급자는 배수펌프장 시설용량의

결정과정의 기초자료(계획빈도, 적용공식, 강우량산정, 구조검토서, 기타등

감독관이 요구하는 자료)를 보고서로 반드시 제출하여야 한다.

나. 세부지침

1)일반사항

① 공사비산정은 건설교통부제정 토목 표준시방서 및 각종 시방서와 건설

공사 표준품셈 및 2007년 노임단가에 의거 작성한다.

② 본 공사에 필요한 자재중 주요자재는 관급으로 하고 기타 자재는 사급

처리한다.

③ 설계예산서 작성은 “지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률”시행

규칙 제6조 규정에 의한 원가계산에 의한 방식에 의한다.

④ 본 과업의 실시설계는 측량성과 및 설계자료에 의하여 설계하되 감독관

과 협의하여 추진한다.

⑤ 각 공종별 사용 공법에 대하여 감독관과 충분한 협의를 거쳐 결정토록

한다.

4. 측량과업지시서

“을”은 용역을 착수하면서 단계별로 “갑”에게 실시설계 진행 내용을 제출     하여 검토를 받은후 다음단계 작업을 진행하여야 한다.

가. 1차 성과 제출

○ 지형측량 완료 후 평면도에 정비계획 노선을 “갑”에게 검토후 결정하여      야 한다 (착공일로부터 5일 이내)

나. 2차 성과 제출

○ 1차 성과 제출 후 완성된 원도면(평면도, 종․횡단면도, 구조물 기타)을

제출하여 검토를 받아야 한다.(계획단면 및 단면 계산서, 수량 계산서) - 1

차 납품일로부터 5일 이내

다. 3차 성과 제출

○ 설계 심의를 위한 완성된 도면을 제출한다.

1) 지형측량(평판측량)

․ 공사계획 중심선의 양측으로 각각 5m씩 70m폭으로 한다.

․ 측량 도면은 축척 1:500~1,000으로 한다.

․ 등고선 간격은 1m으로 한다.

․ 기준점 T.B.M.등은 모두 도면상에 표시하여야 한다.

․ 도면에는 건축물 및 기타 구조물들에 대하여 정확하게 형태를 표시하되

그 명칭등 용도를 명시한다.

2) 종단측량

․ 측점 간격은 20m로 하고 수평 1:500~1,000, 높이 1:100~200으로 축척을

표시한다.

․ 종단면도에 구조물의 위치와 규격등을 표시하고 상세한 사항을 표시한다.      ․ 측량은 2회 이상 반복측량 성과를 표시한다.

․ 기준측점이외 지형이 현저히 변하는 지점은 반드시 보조측점을 사용하여

야 한다.

4) 구조물 설계

․ 모든 구조물의 설계는 국내에서 토목설계에 적용되는 모든 규정과 시방

서의 요건에 부합되도록 한다.

5. 성 과 품

가. 설계도면

○ 설계도는 고급“트레이싱지”에 제도하고 선명한 복사가 가능하도록 함은

물론 수정하여도 인쇄가 선명하게 나올 수 있도록 한다.

○ 도면만으로도 누구나 시공이 가능하도록 한글표시를 원칙으로 하고 가능한

영문 사용은 억제한다.

○ 설계는 59.4㎝× 84.1㎝의 표준 규격으로 제도함을 원칙으로 한다.

○ 주요 구조물에 대한 시공 순서를 표시한다.

나. 과업성과 제출

1. 설 계 서 -------------------------------------------  각5부

2. 청 사 진(축소도면 3부 별도) -------------------------   5부

3. 합본도서(내역서+수량산출서+단가산출서+도면) ------ 5부(상향)

4. 설계보고서 ----------------------------------------    5부

5. 용지도 및 용지조서(해당될시) ----------------------    5부

6. 트레이싱 원도 -------------------------------------    1부

7. 측량자료 ------------------------------------------    1식

8. CD제작 --------------------------------------------    1식