2007.  11.

2008년도 숲 가꾸기 사업 실시설계 용역

과 업 지 시 서

정    선    군

과   업   지   시   서

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명 : 2008년도 숲 가꾸기 사업 실시설계 용역

2. 과업목적

2008년도 숲 가꾸기 사업 대상지의 사업비 산출과 작업방법을 위한 세부적인 지침을 작성하고 현지에 적합한 설계로 숲 가꾸기 사업의 성과를  제고함에 있다.

3. 과업대상

◦ 위  치 : 정선군 고한읍 고한리 산13-2번지 외 199필지

◦ 사업명 : 2008년도 숲 가꾸기 사업 실시설계

◦ 면  적 : 800ha

4. 과업의 내용

◦ 기본설계서 검토

◦ 표준지조사

◦ 설계도서 작성

◦ 제시방서 작성

◦ 사업지 내의 소나무재선충병 감염여부 확인

◦ 기타지시사항

5. 과업기간 : 계약일로부터 60일간

Ⅱ. 과업수행 준수사항

1. 다음사항에 대하여는 발주자의 승인을 받아 기간을 변경할 수 있다.

◦ 과업기간 중 강우일수가 최근 5년간 연평균강우일수보다 많아

과업수행 상 차질이 있을 때

◦ 천재지변으로 인하여 과업수행이 불가능 할 때

◦ 발주자 지시에 의하여 과업수행이 중단되었을 때

◦ 기타 부득이한 사유가 발생하였을 때

2. 실시설계자는 계약체결 후 7일 이내에 작업을 착수하여야 하며   착수계, 과업수행계획표, 책임기술자 자격증 사본 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 제출하여야 한다.

3. 책임기술자는 실시설계 계약에서 규정된 업무를 관련 법규에 따라        총괄․수행하여야 한다.

4. 책임기술자는 감독자와 협의하여 숲 가꾸기 사업시행에 이상이

없도록 적절한 방안을 마련하여 실시설계도․서에 반영하여야 한다.

5. 실시설계자는 작업착수 후 15일 이내에 기본설계도․서를 검토하고 개략적인 현지조사를 실시하여 그 결과를 기초로 사업대상지와 설계방향 등을 결정하여 과업을 수행하여야 하며, 필요할 경우에는 발주자와 협의하여 확정한 후 표준지조사 및 세부설계를 하여야 한다.

6. 아래의 각종 자료를 참고로 하여 과업을 수행하여야 하며 과업     수행 상 필요한 자료는 발주자에게 요청하여 과업을 수행하여야 한다.

◦ 발주자가 제공한 기본설계도․서

◦ 지속가능한 산림자원 관리지침(산림청훈령 제890호 : 2006.09.25.) 및

숲가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침(산림청훈령 제907호 : 2007.04.17.)

◦ 지역산림계획, 산림경영계획 등 상위계획

7. 실시설계자는 계약체결 후 발주자가 제시하는 과업수행 준수사항과

기본적인 과업지침 등을 숙지한 후 충분한 사례 및 자료를 수집 하여

본 과업의 성과가 수준급이 되도록 최선을 다하여야 한다.

8. 실시설계자는 발주자가 요청할 경우 사업시행자와 감리자를 대상으        로 실시설계의 방향, 작업요령, 작업시 주의사항 등에 관한 교육과        현장 설명을 하여야 한다.

9. 실시설계자에게 발주자가 제시하는 기본요소의 제원은 다음과 같다.

◦ 과업수행 준수사항 및 과업지침

◦ 설계 단위별 사업비내역 및 위치도

◦ 기본설계도․서

◦ 설계와 관련한 각종 자료의 제공 등

10. 실시설계자는 사업계획, 계약사항에 의거 선목량 등을 결정하여

실시설계에 반영하여야 한다.

11. 실시설계자는 과업진행 중 발주자가 필요하다고 요구하는 사항에 대하여 보고할 책임을 진다.

12. 실시설계자는 감리자의 실시설계 사전검토를 위하여 계약기간의 9할 이전까지 설계를 완료하고 문서로 감리자와 감독자에게 사전검토을 요청하여야 한다.

13. 실시설계자는 과업수행 완료전 이라도 발주자의 요구가 있을 경우에         는 부분적으로 정리하여 기성과를 제출하여야 한다.

14. 본 과업의 품셈은 숲 가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침(산림청훈령 제907호 : 2007.04.17.)의 숲 가꾸기 품셈 적용기준을 적용한다.

15. 본 과업지시는 과업수행에 필요한 사항을 규정하였는바, 이에 규정

되지 아니한 사항은 정부 관련법령과 자료를 수집, 발주자와 협의하여 수행하여야 한다.

16. 본 과업지시에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는    중요사항은 발주자와 협의 결정하고 기타 경미한 사항이 발생하여 추가 과업이 필요하다고 인정될 시 실시설계자는 이에 따라야 하며 소요되는 경미한 비용은 실시설계자가 부담한다.

17. 실시설계자는 다음과 같은 보안 대책을 준수하여야 한다.

◦ 실시설계자는 보안 대책을 수립하여야 한다.

◦ 모든 성과품은 실시설계자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로

유출 시켜서는 아니 된다.

◦ 과업 폐기물은 소각 처리하여야 한다.

◦ 기타 과업 수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안 사항

불이행으로 발견되는 모든 책임은 실시설계자가 진다.

18. 본 과업의 진행 중 안전사고 발생에 따른 모든 책임은 실시설계자가 진다.

19. 본 과업 수행 상 다음과 같은 조건 발생시 발주자의 방침에 의거설계변경을 할 수 있다.

◦ 계획변경으로 인하여 과업의 범위가 변경될 때

◦ 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때

◦ 위 각호의 사유로 과업 변경 요인이 발생될 시 또는 계약 체결 후 예정가격 및 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견 되거나 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때

20. 발주자는 다음과 같은 조건이 발생되면 용역계약을 해약할 수 있다.

◦ 설계 이행이 불가능하다고 인정될 때

◦ 발주자의 지시에 불응하고 설계를 진행할 때

◦ 기타 계약조건에 위배할 때

21. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제31조 관련〔별표11〕책임기술자․감리원 배치기준의 실시설계의 책임기술자를 배치하여야 하며, 설계도․서에는 실시설계 책임기술자가 서명 날인하여야한다.

Ⅲ. 설계과업지침

1. 일반사항

◦ 과업 대상지는 발주자가 선정한 지역에 조사, 설계함을 원칙으로 하되 사업시행에 장애요인 발생시에는 발주자와 협의하여 과업 대상지를 변경조정 할 수 있다.

◦ 설계사업비 예산은 『숲 가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침(산림청훈령 제907호 : 2007.04.17.)』에 의거 설계하여야 하며 설계조사 결과 현지 여건, 공사의 난이도에 따른 사업비 조정은 발주자의 승인에 의거 조정할 수 있다.

◦ 사업비는 부가세를 포함한 총액으로 산출하여야 한다.

◦ 실시설계도․서 작성 시 작성내용에 관한 이의가 있을 경우와 기타 과업수행과 관련하여 실시설계도․서 작성자가 단독 결정이 곤란한 사항에 대하여는 발주자와 협의하여 결정한다.

◦ 사업비가 최대한 절감되도록 설계하되 현지 여건에 부합한 완벽한 설계를 하여야 한다.

◦ 작성된 각종 실시설계도․서는 상호 그 내용이 합치되어야 하며 해독이 용이하도록 작성하여야 한다.

◦ 성과품 납품 전에 발주자의 사전 검토를 받은 후 납품하여야 하며 납품 후 설계 심사과정에서 수정 및 보완을 요하는 사항이 발견되어 발주자의 지시가 있을 경우 즉시 이에 응하여야 하며 수정 및 보완에 소요되는 기간은 과업수행 기간에 제외한다.

2. 표준지조사

◦ 표준지 조사비율을 사업대상지 면적의 1% 이상으로 하여야 한다.

◦ 표준지 크기를 개소당 100㎡～400㎡ (10m×10m, 10m×20m,

20m×20m사각형 또는 반지름 5.67m, 8.0m, 11.3m 원형 표준지)로 하여야 한다.

◦ 사업대상지를 표시한 지형도상에서 최대 200m×200m 격자상의 교차점에 400㎡의 표준지를 일정 간격으로 교차점에 배치하여야 한다. 다만, 일정 격자의 교차점에 표준지 배치가 불가능할 경우 상하좌우 50m범위 내에서 표준지 위치를 조정 할 수 있다.

◦ 사업대상지가 소면적으로 분산되거나 임상이 다를 경우에는 그 임분의 표준이 되는 곳에 표준지를 배치하고 GPS를 이용하여 좌표를 기록하여야 한다.

◦ 공정하고 정확한 표식과 사업비산출을 위하여 표준지내에서는 다음과 같은 측정 또는 표식을 한다.

- 가슴높이 지름은 표준지 내에 6cm 이상 교목을 대상으로 2cm 괄약으로 측정한다.

- 표준지경계는 친환경성 백색수성페인트로 표시한다.

- 제거대상목은 친환경성 적색수성페인트로 표시한다.

- 도태간벌의 미래목 또는 정량간벌의 형질우세목 및 가지치기

대상목은 친환경성 황색수성페인트로 표시한다.

◦ 입목의 수고는 설계대상임분에서 경급별 3본 이상을 m 단위로 측정한다.

◦ 작업조건별 난이도를 적용하기 위하여 대상 사업지의 접근성, 경사도, 하층식생 등을 조사한다.

◦ 표준지 배치는 임도변, 도로변 등 접근이 용이한 지역으로만 배치하지 않도록 하여야 한다.

◦ 표준지에 대해서는 사업 전후 대비, 사후 점검이 용이하도록 숲가꾸기 사업을 실행하지 않고 보존하므로 설계서에 반영하지 않는다. 다만, 도로변 등 경관적으로 중요한 지역일 경우 발주자와 협의하여 설계서에 반영하고, 사업 실행 사유를 실시설계도․서에 기록 하여야 한다.

3. 임소반 및 표준지 GPS좌표 기입

사업지역의 위치정보의 표준화 및 산림지리정보와 연계, 사후관리

자료확보 등을 위하여 임소반 및 표준지 GPS좌표를 다음 서식과

같이 기입하여야 하며, 좌표의 기입 방법은 임소반 및 표준지의

중심부 선택하여 TM좌표 또는 경위도좌표 값을 기입한다.

임소반별	GPS 좌표	표준지번호	GPS 좌표
1-0-1		1
		2
		3

4. 설계도서의 작성

가. 조사결과

◦ 조사결과는 다음의 내역이 나타나야 한다.

- 표준지 번호, 표준지 면적, 조사자, 조사일자

- 수종, 흉고직경, 수고, 재적

- 가지치기본수, 제거목 본수

- 할인․할증 요소 등

나. 실시설계의 내용 - 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행지침(산림청훈령 제 900호 : 2007.04.17.)의 다음 각 호에 해당하는 서식에 따라 실시설계를 작성한다.

- 설계설명서 : 별지 제7호서식

- 소반별시방서: 별지 제8호서식

- 작업지시도 : 별지 제9호서식

- 실시설계표준지배치도 : 별지 제10호서식

- 사업시행예정공정표 : 별지 제11호서식

- 사업비원가계산서 : 별지 제4호서식

- 설계내역서 : 별지 제5호서식

- 소반별(ha당) 숲가꾸기 단가산출서 : 별지 제12호서식

- 소나무 재선충병 미감염 확인서 : 별지 제13호서식

- 선목사업이 분리발주될 경우 선목사업 설계도․서

- 그 밖에 발주자가 용역 계약시 요구하는 사항.

다. 설계도면 작성

◦ 위치도는 축적 1/25,000지형도를 사용한다.

◦ 설계도는 발주처에서 제공하는 지적도(임야도)와 1/5,000 수치지형도를 활용하여 작성한다.

◦ 설계도에 사용된 1/5,000 수치지형도(측량의 기준;좌표)는 사업시행및 각종 확인에 용이하도록 세계측지계( ITRF2000, GRS80)인지 또는 한국측지계(BESSEL)인지를 표기한다.

◦ 설계도면에는 표준지배치도 와 작업지시도가 포함되어야 한다

-표준지위치배치도: 수치지형도상 임소반구역 및 표준지 위치표시

-작업지시도(작업내역도): 지번도 및 임야도에 소반 및 사업종

구역별 임지현황 작업시방 등을 요약하여 표시

․소반 사업구역별 사업종 및 주요수종, 산림의 기능, 관리목표, 사업량 ( 미래목, 제거목, 가지치기 본수 등), 작업시방 및 산물수집선등 특이사항 표시

5. 성과품 납품

아래와 같이 설계도․서를 납품한다.

가. 설계서 : 각5부

나. 설계도 : 각5부(A1)

다. 설계도․서 CD : 1EA

Ⅳ. 기타 요구사항

1. 과업 대상지는 발주자가 선정한 지역에 조사, 설계함을 원칙으로          하되 사업시행에 장애요인 발생시에는 발주자와 협의하여 과업 대         상지를 변경조정 할 수 있다.

2. 도급․계약 실행 대상지는 사업량을 감안하여 100～150ha로 구분

하여 설계도․서를 작성하고 각 5부를 납품 하여야 한다.

3. 산주직접 실행지는 산주별로 구분하여 실시설계도․서를 작성하고         각 5부를 납품 하여야 한다.

4. 노임단가는 대한건설협회 조사․공표하는 2007년도 하반기 시중

노임단가를 적용한다.

5. 사업시행 예정공정표 작성시 도급․계약 대상지 건별 사업시행

기간은 100일, 산주실행 대상지 건별 사업시행기간은 180일

내외로 한다.

6. 사업시행예정공정표작성 시 각 사업별로 예상 소요인원 및 1일

기능인 소요인원을 산정하여 제출한다.

7. 본 실시설계 용역 완료 승인 후 감리자로부터 실시설계도․서 검토시

(숲 가꾸기 설계․감리 및 사업시행지침 제28조 2항 관련) 수정 및

보완을 요하는 사항이 발견되어 발주자의 지시가 있을 경우 즉시 이에

응하여야 하며 소요되는 비용은 실시설계자가 부담한다.