2009 소하천 정비사업 실시설계 용역

과     업     지     시     서

2008.   10

정    선    군

목           차

Ⅰ. 설  계  설  명  서

Ⅱ. 과  업  지  시  서

Ⅲ. 설  계  예  산  서

Ⅰ. 설 계 설 명 서

1. 과 업 명 : 2008 소하천 정비사업 실시설계용역

2. 위    치 : 강원도　정선군 정선읍 북실리, 북평면 숙암리

3. 과업목적

본 과업은 정선군 관내 미개수된 소하천을 정비함에 따라 소하천의 안정적인 관리 및 홍수로부터 인명,재산을 보호하여 주민의 삶을 윤택하도록 하는데 그 목적이 있음.

4. 과업개요 :

등 급	소 하 천 명	위 치	과 업 개 요	비 고
소하천	기 우 천	강원도 정선군 정선읍 북실리(골안)	200 m
		강원도 정선군 북평면 숙암리(단임마을)	400 m
	단 임 천
계			600 m

5. 과업수행기간

본 과업의 수행기간은 착수일로부터 30일로 한다.

6. 설계변경

가. 본 용역 설계는 설계 당시 조사된 내용을 토대로 일부 추정 설계한 것인바 확정 물공량이 계약 물공량보다 줄거나 늘어날 경우 실지대로 조정 변경 할 수 있다.

나. 시・종점의 위치변경으로 조사구간의 증감이 있을 경우

다. 용역수행 중 시행청의 방침 변경이 있을 경우

라. 당초 추정 설계한 지하 지반의 실제대로 조정 변경

마. 구조물 수량 등이 현저히 변경될 경우

바. 기타 불가피한 사유가 발생한 경우

7. 보안관리

본 과업 수행 중에 지득한 요 보안 사항과 성과품은 관계 법령에 따라 제반 보안 조치를 취하여야 하며 제반자료 및 그 성과는 감독원의 사전 승인없이 타인에게 열람케하거나, 임의로 복사케 해서는 안된다.

8. 성과품 제출

본 과업 수행 완료시에는 다음 성과품을 납품하여야 한다.

가. 설계보고서 : 5부

나. 설계원도(트레싱) : 1부

다. 설계도 : 5부

라. 구조 및 수리계산서 : 5부

마. 토질조사보고서 : 5부

바. 설계예산내역서(일위대가포함,내역유) : 5부

사. 설계예산내역서(일위대가포함,내역무) : 20부

아. 공사시방서 : 5부

자. 수량산출서 : 5부

차. 단가산출서 : 5부

카. 편입용지도 및 조서 : 각 5부

타. 각종 인・허가 도서 : 각 5부

파. 조사측량 야장 : 일체

하. 과업수행 사진첩 : 1부

Ⅱ. 일 반 과 업 지 시 서

1.  각종 시방서 및 제기준 숙지

본 용역은 정부에서 제정한 아래의 각종 시방서 및 규정과 용역설계서의 과업지시서에 의거 시행하여야 하고, 각종 시방서 및 제기준 등은 반드시 용역과업을 수행하는 사무실에 비치하여 용역 참여자가 필히 숙지・활용하도록 하여야 한다.

가. 하천설계기준

나. 건설교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

・토목공사 일반 표준시방서

・하천공사 표준시방서

・콘크리트 표준시방서

・구조물 기초설계기준

다. 기수립된 하천정비기본계획 및 소하천정비기본계획

라. 하천구조물 표준도

마. 건설공사 관련 법령 및 규정 (건설기술관리법, 하천법, 도시계획법 등)

바. 한국산업규격

사. 건설공사 품질 및 규격관리실무 편람

아. 산업안전보건법

자. 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영 규정

차. 기타 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

카. 도로・도로교 표준시방서 및 도로관련 각종 지침

2.  공사금액 산정시 적용기준

가. 노임  단가 : 대한건설협회에서 조사・공포한 납품당시 시중노임단가(이월시는 성과품 납품 당해년도분 반영)

나. 환      율 : 외국환 거래법에 의한 기준환율 적용

다. 중기사용료 : 납품당시 기준 조달청 중기 사용료

라. 자재  단가 : 최근 조달청 가격정보에 수록된 단가를 우선 적용하고 가격정보지에 없는 품목은 물가정보지, 물가자료 등 적용.

마. 수량 및 단가산출은 정부제정 건설공사 표준품셈에 의하여 산출하고 이에 의할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정단가를 감독관과 협의하여 산출하여야 한다.

3.  자료수집 및 현황분석 계획

관련 계획을 지역 관련계획과 하천시설 관련계획으로 분리하여 본 과업의 사회. 경제적 분석 및 재해예방, 제방법선 계획, 하천시설물 설치에 필요한 각종 관련 계획을 종합 정리하고 이를 근거로 본 과업 수행에 철저를 기하여야 한다.

가. 지역관련계획

우리군의 도시계획 및 경지정리 계획등기타 지역과 관련된 계획

나. 하천시설 관련계획

당해 하천에 대한 하천정비기본계획 및 기타 하천시설관련 계획

4.  조사 및 분석

가. 조사 및 분석방법

(1) 현황조사에 앞서 지형도(1/5,000, 1/25,000, 1/50,000), 기타 수집한 자료 등을 참고로 도상에서 예비조사를 실시한다.

(2) 조사구간을 현장 답사하며 기존제방상태, 교량 및 하천구조물, 농경지 등의 현재 상태 및 주변농로와의 접속현황 등을 조사한다.

(3) 주요 조사내용은 개수연장, 하상경사, 하폭, 하도상태, 제방선형 등의 기존 하천관련 조사와 자연환경, 골재원, 취수 및 배수시설물, 합류되는 하천현황 지장물 등을 조사한다.

나. 현황조사 흐름도

계획수립		도상예비조사		하천답사		현장 세부조사
∘ 조사지역 및 범위 ∘ 조사항목 및 내용 ∘ 조사기간 및 방법 ∘ 조사양식 및 인원 편성	→	∘ 1/50,000,1/25,000, 1/5,000 지형도 ∘ 하천정비기본계획 ∘ 도시계획도 ∘ 지적도	→	∘ 지형 및 유로현황 ∘ 현장시행가능 토질 조사 ∘ 토취장 및 골재원 조사 ∘ 강우 및 홍수피해	→	∘ 측량 및 토질조사 ∘ 토지이용 현황조사 ∘ 환경영향조사 ∘ 민원 및 지장물조사

다. 현장 조사

(1) 기존제방상태 및 지형상태를 파악한다.

(2) 기존 제방 및 호안 배수구조물 등 하천시설물 현황을 조사한다.

(3) 부체도로 및 농로설치 위치를 계획한다.

(4) 주변 개발현황과 지장물 및 토지이용상태를 조사한다.

(5) 지역 개발과 연계된 하천 계획을 조사한다.

(6) 용수 및 배수계통조사

(7) 하천시설물 계획 및 기존시설물과의 연결, 확장 등 검토

(8) 토취장 조사

라. 수문 및 배수조사

(1) 신설 하천구조물 위치를 선정하고, 기존 하천구조물의 개보수와 구조물의 규격을 계획하여야 한다.

(2) 현지조사 항목 : 과거 홍수 흔적 부근 기존 구조물의 제원 부근 수리시설 용량 하천의 현황 (침식, 퇴적 등) 내수침수시간

(3) 자료수집 항목 : 인근 우량관측소의 강우, 수위관측 자료 과거 홍수흔적이 있는 호우에 대한 강우량 및 강우 지속시간

마. 용지 및 지장물 조사

(1) 용지도 작성

(가) 우리군에서 발행된 지적도 및 임야도 등본에 의해 작성하여야 한다.

(나) 용지도에 측점 표시를 한 후, 중심선은 가는 실선, 용지매입선은 굵은 실선으로 표시하여야 한다.

(다) 편입되는 지역은 일련번호를 붙여 표시하되 토지조서의 일련번호와 일치하도록 하여야 한다.

(라) 용지도에 가옥, 전주, 분묘, 수준점 등 지장물의 위치를 표시하되 물건 조서와 부합되는 일련번호를 기재하여야 한다.

(마) 가옥, 전주, 분묘, 수목 등의 지장물 조서는 현지와 정확히 일치시켜야 한다.

(2) 하천경계말뚝 설치

(가) 하천경계말뚝(지적경계용:4.5× 4.5× 45cm)은 제방법선의 측점 좌우에 40m간격으로 설치하고 곡선부는 그 선형을 파악할 수 있도록 간격을 20m 이내로 좁혀 박도록 한다.

(나) 경계말뚝은 가급적 논, 밭의 경계부분에 설치하여 경작에 지장을 주지 않도록 하고 지적분활 측량시까지 보존될 수 있도록 유의하여 설치하여야 한다.

(3) 분할측량 준비 및 실시

(가) 하천경계 말뚝설치가 완료되면 분할측량 신청에 필요한 제반서류를 발주청에 최소한 준공 1개월전에 제출하여야 하며 기제출된 용지도등이 분할측량 성과와 상이할 경우는 용역 준공후라도 분할측량성과가 제출된 후 30일이내에 동 성과와 부합되도록 보완 제출하여야 한다.

(나)  분할측량 실시일정이 확정되면 용역수급자는 용역준공후라도 사전에 현지를 조사를 하여 분할측량에 필요한 경계말뚝 설치상태 등을 확인하여야 하며 훼손 또는  망실된 말뚝이 있을 경우는 즉시 이를 보완하여 분할측량에 지장이 없도록 하여야 한다.

(다) 용역 수급자는 지적공사의 분할측량 시행시 측량담당자를 현지에 파견하여 분할측량에 필요한 현지안내 등 제반사항을 수행토록 하여야한다.

(4) 편입토지 및 지장물 조서 작성

(가) 편입토지 및 지장물조서는 붙임 서식에 의거 작성하되 용지도의 일련번호와 일치되는 번호를 기재하여야 하며 편입면적은 평방미터 단위로 정확히 산출하여야 한다.

(나) 토지 공부상 지목과 이용상황이 다를 때 그 실제 이용상황을 조사・표시하여야 한다.

(다) 토지대장 소유자와 등기부상 소유자를 조사・표시하되 국유지와 사유지를 구분・작성하여야 한다.

(라) 소유권 이외의 권리자가 설정되었을 때 동 권리의 내용을 상세히 조사하여 표시하여야 한다.

(마) 공사에 편입되는 공공시설물 및 지장물(지하매설물 포함)현황을 상세히 조사하여 지장물건 조서를 작성하여야 한다.

(바) 폐천부지 발생여부를 조사하여 폐천부지조서(지번, 지목, 면적)를 작성・제출하여야 한다.

(5) 지하매설물 조사

지하 매설물의 이설 방안을 조사하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다

(가) 전기 및 통신시설물, 상・하수도 시설물

(나) 송유관 및 가스관, 기타 시설물

바. 토질 및 재료원 조사

(1) 조사목적

토질조사는 제방설계에 필요한 지질공학적 설계인자를 도출 제시하고 공법 선정 및 구조물설계에 필요한 제반사항을 파악하기 위하여 현장조사 및 자료 등을 면밀히 검토한 후 현장여건에 상호 부합하도록 효율적으로 분석하여야 한다.

(2) 토질 조사는 예비조사 및 현지답사, 본조사, 보완조사의 순서로 실시하며, 토질조사항목은 아래 표를 표준으로 작성한다.

										사전조사					· 기존조사 자료 수집분석 · 지형 및 지질 특성 파악 · 조사계획의 수립
	조사의 주종류
	지층분포 파악
										현장조사					· 지표 지질조사 · 시추조사(BORING) · 시굴조사(TEST PIT)
	Boring 각종 Sounding
										SOUNDING					· 표준관입조사 · 공내 재하시험 · 투수 및 수압시험			조사결과 검토
	건설재료원 조사									재료원조사					· 골재원조사 · 석산조사 · 배합설계
	보강축제에 따른 지반 및 구조물 상태조사
										실내시험					· 토질시험 · 암석시험 · 재료원 품질시험
					종 합 평 가 및 분 석
					· 성토부 기초지반의 안정성 검토 · 축제재료의 적정성 판단 · 구조물 설계자료 제공 · 재료원의 매장량, 품질특성, 재료원현황 등 평가결과 제공

(3) 토질조사

(가) 토질조사는 현장 답사전에 토질조사 계획서를 제출하여 승인을 득한 후 조사를 시행토록 하며 과업지시서 이외의 추가되는 토질조사 항목 및 조사는 계약금액을 조정할 수 있다.

(나) 토질조사의 조사항목 및 조사빈도, 조사심도는 과업지시서에 의거하여 계획서를 작성후 발주청의 승인을 득한 후 시행한다.

구 분	토질조사법	조사기준	시험내용
∘토질조사	보링(시추조사: NX)	- 제 방 : 200m당 1공 - 배수문 : 개소당 1공 - 교 량 : ∘50m미만 3공 ∘50m이상 (L/50+2)공	- 시추공내 수위측정 - 표준관입시험 (심도1.5m마다) - 실내시험

(4) 재료원 조사

(가) 토취장 조사

시험굴착(Auger Boring)조사와 실내시험을 하고 종평면 및 횡단면도 작성하여 토취가능량을 명시하여야 한다.

(나) 하상 골재원 조사

1) 운반거리 20Km 이내 골재원을 상세히 조사

2) 골재원 위치, 매장량, 골재종류 등 조사

(다) 석산조사

1) 기개발된 석산위치를 파악하여 품질 및 가용매장량을 조사하여 품질과 수급에 차질이 없는 지점을 조사한다.

2) 석산에서 생산되는 석재에 대한 암석종류 및 암질상태 등을 고려하여 선정하여야 한다.

(라) 각종 자재 공급원 조사

1) 레미콘 : 인근 레미콘 공장을 조사하되 운반거리, 사용골재의 품질시험 및 운반시간, 생산능력, 운반차 보유대수 등을 조사하여야 한다.

2) 철근 시멘트등 주요 자재 (사급자재시) 및 기타 주요 자재의 공급처를 조사하여야 한다.

(5) 사토장 조사

사토장 선정시는 관계 시・군의 인허가 가능여부 및 토지소유자의 동의여부를 확인하여 근거서류를 제출하여야 하며, 민원이 발생치 않는 장소를 선정하여야 한다.

5.  과업수행 조직 및 일정계획

가. 과업수행 조직표

과업수행을 위하여 필요한 조직을 아래 표에 의거 작성 제출하여야 한다.

					사업책임기술자
수자원개발분야			구조분야				토질분야			측량분야				환경분야
기술사 /			기술사 /				기술사 /			기술사 /				기술사 /
자격증 / 성명			자격증 / 성명				자격증 / 성명			자격증 / 성명				자격증 / 성명

나. 과업수행의 흐름

본 과업의 흐름은 다음과 같이 4단계로 구분하며 단계별 수행계획을 붙임 양식에 의거 수립한 후 착공 7일이내에 감독관을 경유하여 제출하여야 한다.

(1) 관련계획 및 현황조사 단계 (1단계)

(2) 관련계획 및 하천정비 기본계획 검토(2단계)

(3) 실시설계 단계 (3단계)

(4) 설계도서 작성단계 (4단계)

다. 단계별 과업수행 계획

						① 관련계획 및 현황 조사 단계
		제 1 단 계				· 관련 도시계획과의 연계성 조사 · 축제 구간의 주변여건 및 지형적 특성의 정밀조사
						↓
						② 관련계획 및 하천정비 기본계획 검토 단계
		제 2 단계				· 관련계획 검토 · 하천정비 기본계획 검토 · 조사자료 검토
						↓
						③ 실시설계 단계
		제 3 단계				· 측량 및 토질조사 등 현장세부조사 실시 · 조사자료를 토대로 종・평면 및 횡단면도 작성 · 토공, 호안배수공 및 하천시설물 실시설계 수행 · 편입토지 및 지장물 조사
						↓
						④ 설계도서 작성단계
		제 4 단계				· 보고서 작성 · 수량, 단가산출서 및 각종계산서 작성 · 설계도서 작성 · 성과품 인쇄 및 납품

(붙임 양식)

단 계 별	과업내용	공 정 (월)									비 고
제 1 단계	1. 관련계획 및 현황조사 1) 착수준비 2) 관련계획검토 및 일반현황조사 3) 수문 및 하천조사 4) 기존구조물조사
제 2 단계	2. 관련계획 및 하천정비 기본계획 검토 1) 관련계획 검토 2) 하천정비 기본계획상의 법선검토 3) 홍수량, 홍수위, 하폭검토 4) 지장물 편입에 따른 시공성, 경제성 검토 5) 제방 선형 확정
제 3 단계	3. 실시설계 1) 조사측량 2) 토질조사 및 실내시험, 3) 골재원 조사 4) 설계기준확정 및 표준도작성 6) 토공 및 호안공설계, 구조물설계, 부대시설설계
제 4 단계	4. 설계도서 작성 1) 수량 및 단가산출 2) 설계서 작성 3) 용지 및 지장물도 작성 4) 설계도 및 보고서 작성

6. 기타사항

가. 일반과업지지서의 내용과 특별과업지시서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별과업지시서가 우선한다.

나. 일반 및 특별과업지시서에 명기된 내용이외에 정밀시공 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주청과 협의하여 시행하여야 한다.

보  안  대  책

본 용역설계의 설계도서 및 제반자료에 대하여는 보안관리에 철저를 기하여야하며 다음과 같이 보안 대책을 이행하여야 한다.

1. 용역회사 대표자는 용역착수시 발주청이 제시하는 서식에 의한 보안각서를 제출하여야 하며, 용역참여자에 대한 보안각서는 회사 대표자 책임하에 징구제출하여야 한다.

2. 용역과업 사무실을 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

3. 자료보관함은 별도로 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정부책임자를 지정하여 관리하여야 한다. 단, 비밀이 아닌 용역의 경우에는 비밀보관함을 비치하지 않을 수 있다.

4. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과품을 발간하고자 할 때는 정부비밀 취급인가업체를 이용하여야하며 본 과업지시서에 명시한 부수만 인쇄하는 것은 물론 발주청의 비밀 취급인가자의 입회하에 행하여야한다.

5. 용역의 참여자가 교체될시는 감독관의 승인을 득한후 인수인계를 철저히 하고 감독관의 확인을 받아야한다.

6. 기타 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행상 별도의 보안관리 등을 요하는 사항이 시달될 경우는 이를 준수하여야 한다.

7. 용역업체는 용역물의 보안관리에 철저를 기하기 위하여 용역설계 전후를 막론하고 다음 사항을 준수하여야 하며 용역계약시 이를 준수하겠다는 각서를 제출하여야한다.

가. 용역설계 참여자 명단 제출

나. 본 용역설계도서에 의한 기록 및 인지사항을 누설하지 않겠다는 각서

다. 본 용역설계서 작성 기간중 출입자 통제

라. 용역자료 등의 방치를 금할 것이며 본 용역수행에 관련된 모든 자료는 견고한 용기에 보관하고 보안관리책임자가 직접 관리하여야 하며 지정된 용기외 보관은 금한다.

마. 불 필요한 원고 및 자료는 반드시 소각 조치할 것.

8.  기타사항에 대하여는 보안업무 규정을 준수하고 감독관의 지시를 받는다.

기  타  사  항

1. 하도급의 제한, 범위, 책임은 다음과 같으며 용역계약자는 철저히 이행하여야 한다.

가. 용역계약자는 도급받은 설계 등 용역을 다른 설계 등 용역업자에게 일괄하여 하도급 할 수 없다.

나. 하도급 받은 용역업자는 다른 용역업자에게 재하도급 할 수 없다.

(1) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

(2) 지질 및 토질조사와 이에 부수되는 시험 등 작성

(3) 제도 및 도면작성 등 작업

(4) 건설공사의 수량내역서 작성 및 견적업무

(5) 기타 발주청이 특별히 인정하는 업무

다. 계약상대자는 하도급한 경우에도 계약에 의한 계약상대자의 의무가 면제되지 아니하며, 하도급 용역에 대한 모든 책임을 진다.

라. 계약상대자는 용역을 하도급한 경우에는 하도급 계약체결후 15일이내에 발주청에 통지하여야 한다.

마. 발주청은 하도급 계약금액이 원도급 해당금액의 88%미만으로서 하도급용역의 적정한 이행이 되지 아니할 우려가 있다고 인정되는 때에는 하도급 계약내용의 변경을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

바.  발주청은 하도급자가 부적당하다고 인정될 때에는 하도급자의 교체를 요구할 수 있으며 이 경우, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 하도급자를 교체하여야 한다.

2. 용역준공후 지반선이나 구조물 기초 지반 등이 설계도서와 상이함이 발견되어 시행청의 요청이 있을 시는 즉시 이를 재조사하여 변경설계도서를 작성한 후 책임기술자의 확인서명 날인된 변경도면 및 사유서를 제출하여야한다.

3. 각종 개발계획 및 기존시설물 유지관리등과 관련하여 따라 기타 관계기관과 협의가 필요시는 사전협의를 완료한 후 그 결과를 발주청에 보고하고 설계에 반영하여야 한다.

4. 본 실시설계 이전의 기존자료는 최대한 활용할 수 있다.

5. 보링 등 토질조사시에는 반드시 감독관 입회하에 실시하여야 하며, 토질담당기술자가 필히 참여하여야 한다.

6. 용역 최종 보고서에는 참여자별 성명, 주민등록번호, 담당분야 및 참여기간, 소지자격증 종류 등을 상세히 기록하여 추후 부실 설계 부분이 있을 경우 책임자를 분명히 파악할 수 있도록 기록하여야 한다.

7. 설계도면에는 개별 낱장마다 책임기술자가 서명을 하여야 한다.

8. 본 설계서에 의하여 납품되어야 할 성과품과 수량은 다음과 같다.

가. 실시설계 보고서 및 부록 ------------------ 5부

나. T/C 원도 --------------------------------- 1부

다. 설계도         A1 ------------------------- 5부

A3 ------------------------- 5부

라. 조사측량 관계야장 ------------------------ 1식

마. 용역중 시료조사 성과품 ------------------- 1식

바. 수리 및 구조계산서 ----------------------- 각 5부

사. 수량 및 단가산출서 ----------------------- 각 5부

아. 설계예산서 ------------------------------- 각 5부

자. 용지도 및 용지조서, 지장물조서 ------------- 각 5부

차. 토지대장 및 등기부등본 -------------------- 각 1부

카. 상기사항 전산화 디스크 및 도면CD ---------- 각 5부.

타. 기타 발주청이 요구하는 성과품 -------------- 1식

Ⅲ. 설  계  예  산  서