2007년 조림사업 감리용역 설계서

정    선    군

설 계 설 명 서
용 역 명	2007년도 조림사업 감리용역
용역장소	과업지시서 참조
용역내역	2007년도 조림사업 감리
1. 감리목적 o 조림사업의 품질향상 2. 감리물량 o 사업량 : 177ha (조림지도160. 활착율조사177) 3.감리범위 : 2007년도 조림예정지정리 및 식재 현장지도와 예비 준공검사. 조림지 활착율 조사 (활착율 조사는 2006년도 추기조림지를 포함한다) 3. 감리용역사업비 : 13,956,000원 4. 감리용역기간 : 착수일로 부터 ~ 2007. 8. 30. 5. 세부추진사항 : 과업지시서 참조

조림사업 감리용역비 산출내역 □ 조림면적 : 160 ha
구분	항 목	수량		품		단가	(원)	할인 할증	금 액(원)
			단위		단위		종류
직접인건비	현장지도 -예정지정리 -식 재	160 160	ha ha	0.05 0.10	인/ha 인/ha	173,417 173,417	고급기술자 고급기술자		1,387,336 2,774,672
	예비준공검사 -예정지정리 -식 재 -활착율조사	160 160 160 160 177 177	ha ha ha ha ha ha	0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05	인/ha 인/ha 인/ha 인/ha 인/ha 인/ha	173,417 104,129 173,417 104,129 173,417 104,129	고급기술자 초급기술자 고급기술자 초급기술자 고급기술자 초급기술자		554,934 333,212 1,387,336 833,032 1,534,740 921,541
	소 계								5,564,795
제 경 비		직접인건비×90%							5,008,315
기 술 료		(직접인건비+제경비)×20%							2,114,622
총 원 가		직접인건비+직접경비+제경비+기술료							12,687,732
부가가치세		총원가×10%							1,268,773
합 계									13,956,505
재 계		천원단위 이하 절사							13,956,000
※ 엔지니어링 기술자 노임 단가는 2007년도 엔지니어링사업 노임단가 기준 건설 및 기타부문 적용

○ 산출기초

- 현장지도 예정지정리는 조별(고급기술자 1인) 1일 20ha 현장지도 기준

- 현장지도 식재감리는 조별(고급기술자 1인) 1일 10ha 현장지도 기준

- 예정지정리의 예비준공검사는 조별(고급기술자1인. 초급기술자1인)

1일 50ha 검사 기준

- 식재작업의 예비준공검사는 조별(고급기술자1인. 초급기술자1인) 1일 20ha

검사 기준

- 활착율조사의 예비준공검사는 조별(고급기술자1인. 초급기술자1인)

1일 20ha 검사 기준

- 활착율 조사는 2007년도 조림지 160ha와 2006년도 추기 소나무 용기묘

조림지 17ha로 한다.

과 업 지 시 서

1. 과업개요

가. 사업명 : 2007년도 조림사업 감리용역

나. 과업목적

조림사업의 품질향상

다. 과업대상 위치 및 사업량

1) 위치 : 정선군 관내 2007년도 조림지 및 2006년도 추기조림지

2) 사업량 : 177ha (2007년도 조림160ha. 2006년 추기조림지 17ha)

※ 필지별내역 붙임 참조

라. 과업의 범위

1) 조림예정지 정리작업 지도

2) 2007년도 조림사업 식재지도

3) 예비준공검사

4) 조림지 활착율조사 (2007년도 조림지 및 2006년도 추기 소나무용기묘

조림지)

마. 설계적용 기준

1) 본 조림지 감리설계는 산림청 [조림설계.감리 시행지침]에 의함.

2) 노임단가 : 2007년도 엔지니어링사업 노임단가 기준건설 및 기타부문

적용

2. 과업지시서

가. 일반사항

1) 감리자는 산림자원의조성 및 관리에 관한 법률 및 동 법의 규정에 의한

명령이나 그 밖의 관계법령의 규정에 적합하게 감리하여야 한다.

2) 과업지시서에 명시된 사항이나 감독관청(정선군) 자체의 정책변화 등에

의하여 사업변경이 불가피한 경우 과업지시 내용을 변경할 수 있다.

3) 용역추진내용에 관한 해석에 이의가 있을 경우와 기타 과업수행과 관련

하여 과업수행자가 단독 결정이 곤란한 사항에 대하여는 감독(정선군)의

지시에 따른다.

4) 본과업 지시서에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 감독관청(정선군)과

협의 및 지시에 따른다.

5) 묘목수급 계획 등 사유로 조림계획 변경시 별도의 감리계약 변경 없이

변경된 내용에 따라 감리사업을 수행한다.

나. 과업수행시 유의사항

1) 감리용역 수행자는 과업 착수 전에 기술1급 이상인 산림경영기술자 1인

의 감리원을 배치하여 관리. 감독하여야 한다.

2) 감리용역 수행자는 감리원의 업무를 수행할 수 있는 자격을 갖춘 자를

선정하여 발주자에게 승인을 받아야 한다.

3) 감리용역 수행자는 과업 착수전에 착공계, 과업수행 내역서, 예정공정표

등 제반 서류를 제출하여야 하며 과업수행 세부 공정표를 별도로 작성

하여 감독관의 승인을 얻어야 한다.

4) 정리작업시 희귀한 수종과 후계수로 가치 있는 것은 잘 가꾸어 보존하도록

한다.

5) 임지내에 버려져 있는 초두부와 가지 등 벌채산물은 가능한 등고선과

평행하게 정리한다.

6) 정리산물의 길이는 30～50m로 하고 그 사이에 작업자가 통과할 수 있도록

1～2개의 통로를 둔다.

7) 열간 폭은 산물량에 따라 식재열을 1열 또는 2열로 배치한다.

8) 묘목대운반이 완료되면 조림예정지와 가까운 지역 그늘진 곳에 즉시

가식하도록 지도하여야 한다.

9) 가식은 묶음을 풀어서 가식하되 묘목의 끝부분이 북쪽을 향하게 가식

하도록 지도한다.

10) 조림은 사업종별 식재기준 본수에 맞게 묘간거리 유지하여 식재하도록

지도한다.

11) 식재는 너무 깊거나 얕게 식재하지 않고 비스듬히 식재하지 않도록

한다.

12) 묘목 구덩이에 돌이나 나무뿌리, 낙엽, 잡풀 등 불순물이 들어가지 않도록

한다.

13) 식재는 정조식으로 줄을 맞추어 식재한다.

14) 묘목이 다른 곳으로 유출되거나 산원에 방치되는 일이 없도록 하고 남은

묘목이 발생되지 않도록 하여야 한다.

15) 묘목을 심지 않고 불법으로 매립하지 않도록 한다.

16) 묘목은 수급되는 즉시 조림하도록 하고 잘 밟아 바람에 쓰러지거나

뽑히는 일이 없도록 한다.

17) 묘목망태기에 물쑤세미를 넣고 다니며 시재하여 뿌리건조를 막도록

한다.

다. 서류제출

감리수행자는 사업시행 중 해당하는 시점에서 다음 각호에 해당하는

보고서를 작성하여 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.

1) 중간감리 보고서

2) 예비사업 완료검사 결과보고서

3) 필지별 실행내역

4) 감리완료 보고서

5) 감리일지

라. 감리 용역의 준공

감리가 완료되었을 경우 중간감리보고서를 제외한 예비사업 완료검사

결과보고서, 필지별 실행내역, 감리완료보고서, 감리일지, 기타 정선군

에서 요구하는 서류를 제출 준공검사를 받아야 한다.

중간감리 보고서

보고구분	2007년도 조림사업 감리중간보고 (제 차)
작 업 명	조림 예정지정리						면 적		ha
위 치
감리기간				감리대상지역
감 리 내 용
소반명		계획(ha)	실적(ha)		실행율(%)			적합여부
								□적합 □부적합
감 리 자 의 견		필요시 별첨
위와 같이 감리중간보고서를 제출합니다. 2007. . . 주 소 : 상 호 : 감리자 : (인) 정선군수 귀하

감   리   일   지

일련번호			작 성 일
사 업 명
감리대상지
감리내용	작업종	점검대상			작업 적정성
특이사항
부적합사항 조치 결과
작 성 자	감리원 (인)

예비사업완료검사 결과보고서

사 업 명	2007년 조림사업9예정지정리,식재, 활착율조사)				사업량		ha
위 치
소 반	계획(ha)	실적(ha)	달성율(%)	점검일자		적합여부
						□적합 □부적합
점검동행자
예비준공 검사내용
붙임자료	1. 필지별 실행내역
위와 같이 예비사업 완료검사 결과보고서를 제출합니다. 2007. . . 주 소 : 상 호 : 감리자 : (인) 정선군수 귀하

필지별 실행내역

입소반	면	리	지번	지적(ha)	면적(ha)	점 검 결 과

감리완료 보고서

보고구분	감리완료보고
사 업 명							면적	ha
위 치
감리기간			감리대상소반
감 리 내 용
소 반 명	계획(ha)	실적(ha)		실행율(%)		적 합 여 부
						□적합 □부적합
감 리 자 의 견
붙임자료	1. 소반별 사업시행 조사표 2. 소반(표준지)별 작업확인조서
위와 같이 예비사업 완료검사 결과보고서를 제출합니다. 2007. . . 주 소 : 상 호 : 감리자 : (인) 정선군수 귀하

소반별 사업시행 조사표

사 업 명					사업량		ha
위 치	정선군 면 리 산 번지
임. 소반	계획(ha)	실적(ha)	달성율(%)	적합여부		비 고
감 리 자 의 견

소반(표준지)별 작업확인조서

임. 소반명
1. 예정지정리
지 적			설계면적		작업면적			실행율(%)		비 고
2. 식재 및 활착율 조사
수 종		설계서상 식재본수		조 사 결 과							설계서대비 실행율 (%)
				식재본수		고사본수	잔존본수		고사율
계
3. 감리의견