지장천 자연형하천정화사업 실시설계용역

과 업 지 시 서

2006. 11

정    선    군

목         차

제1장  설 계 설 명 서 ------------------------ 01

제2장  과 업 지 시 서 ------------------------ 04

제3장  예 정 공 정 표 ------------------------ 31

제1장 설계설명서

제1장 설 계 설 명 서

1. 과업의 목적

본 과업은 지방2급하천인 지장천에 대하여 군민의 정서함양 및 하천문화를 위한 공간계획, 생태환경개선 및 자정력 증대와 수질개선을 위한 계획, 하천생태계보전을 위한 계획을 검토하여, 치수안정성 및 하천문화 창달에 기여하고, 생물에게는 친근하면서 인간에게는 쾌적한 경관을 제공하기 위하여, 기 수립된 하천정비기본계획과 지장천 자연형하천 정화사업 기본설계 및 하천설계기준에 의거 자연형하천 정화사업 실시설계 용역을 시행코져 함.

2. 과업의 범위

- 지장천 : 15.0km(강원 정선군 고한읍 고한리 삼탄재재소~강원 정선군 남면 무릉리 청명소)

3. 과업수행기간

본 과업수행기간은 과업착수 후  210일(7개월)로 하고 다음의 경우 발주처의 승인을 득한 후 과업수행기간을 연장할 수 있다.

가. 천재지변 등 불가항력으로 작업이 불가능할 때

나. 발주처의 지시에 의해 작업이 중단되었을 때

다. 관련기관 협의 및 검토기관의 사유로 지연될 경우

라. 발주처의 본 용역 자문결과 보완이 필요하여 과업수행기간의 연장이 필요한 경우

마. 기타 불가피한 상황이 발생되었을 경우

4. 설계변경조건

가. 본 과업의 실시설계는 개략공사비 비율에 의한 기술용역대가 기준(요율)을 적용 설계하였는바, 본 실시설계 결과, 공사비 및 조사 연장의 증․감에 따라 예산범위내에서 설계변경을 할 수 있다.

나. 계약담당 공무원은 과업위치의 변경 및 과업의 중지가 필요하다고 인정될 때는 계약자에게 서면으로 이 사실을 지시할 수 있다. 이로 인하여 계약기간의 변경, 계약금액의 증․감이 필요할 때는 계약자와 협의하여 결정한다.

다. 발주청에서 설계자문이 필요하다고 인정하여 요청할 경우 자문을 받아야 하며 비용은 발주청의 설계자문위원회 운영규정에 의해 지불하여야 하며 이에 따라 정산한다.

라. 기타 정당한 변경사유가 있을 경우

마. 추가되는 하천환경시설 및 기타의 공사비 증감으로 인하여 실시설계비의 증감이 발생할 경우, 실정에 맞게 설계변경 할 수 있다.

제2장 과업지시서

제2장 과 업 지 시 서

1. 일반사항

가. 각종 시방서 및 제 기준 숙지

본 용역은 정부에서 제정한 아래의 각종 시방서 및 규정과 용역설계서의 과업지시서에 의거 시행하여야 하고, 각종 시방서 및 제 기준 등은 반드시 용역과업을 수행하는 사무실에 비치하여 용역 참여자가 필히 숙지 활용하도록 하여야 한다.

(1) 하천설계기준

(2) 건설교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

ㅇ 토목공사 일반 표준시방서

ㅇ 하천공사 표준시방서

ㅇ 콘크리트 표준시방서

ㅇ 구조물 기초설계기준

ㅇ 2004 자연형 하천정화사업 추진지침(오염하천정화사업)

ㅇ 자연친화적 하천정비 지침

ㅇ 기설계된 사례

(3) 하천정비기본계획

(4) 자연형하천 정화사업 기본설계

(5) 하천구조물 표준도

(6) 건설공사 관련 법령 및 규정(건설기술관리법, 하천법, 도시계획법 등)

(7) 한국산업규격

(8) 건설공사 품질 및 규격관리실무 편람

(9) 산업안전보건법

(10) 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영 규정

(11) 기타 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

나. 공사금액 산정시 적용기준

(1) 노임 단가  : 대한건설협회에서 조사 공포한 납품당시 시중노임단가(이월시는 성과품 납품 당해년도분 반영)

(2) 환     율  : `2006. 1. 2. 기준 전신환매도율 적용(이월시는 성과품 납품 당해년도분 반영)

(3) 중기사용료 : `2006. 1. 2. 기준 조달청 중기 사용료

(4) 자재 단가  : 최근 조달청 가격정보에 수록된 단가를 우선 적용하고 가격정보지에 없는 품목은 물가정보지, 물가자료등 적용.

(5) 수량 및 단가산출은 「건설공사 표준품셈」, 「기계 설비공사 품셈」, 「전기통신 표준품셈」에 의하여 산출하고 이에 의할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정단가를 감독관과 협의하여 산출하여야 한다.

다. 설계방침

(1) 계약자는 설계내용과 설계과정에서의 중요사항에 대하여는 발주청과 사전에 충분히 협의를 한 후 설계에 착수하여야 한다.

(2) 본 과업에 직접 간접으로 참여하는 인력은 해당 분야별로 경험이 풍부한 전문가로 구성하여, 합리적이고 효율적으로 과업이 수행될 수 있도록 해야 한다.

(3) 감독관은 필요한 경우 과업내용 중 완료부분의 중간 성과품을 납품토록 하게 할 수 있다.

(4) 콘크리트 구조물 설계시는 강도설계법을 원칙으로 하여야 한다.

(5) 조사 검토 대상지구 중 하천정비기본계획과 자연형하천 정화사업 기본설계 및 하천환경관리계획과 상이한 내용이 발생시 감독관과 협의하여 결정한다.

라. 자료수집 및 현황분석 계획

(1) 관련 계획을 지역 관련계획과 하천시설 관련계획으로 분리하여 본 과업의 사회, 경제적 분석 및 재해예방, 제방법선 계획, 하천시설물 설치에 필요한 각종 관련 계획을 종합 정리하고 이를 근거로 본 과업 수행에 철저를 기하여야 한다.

◦ 지역관련계획

해당시군의 도시계획 및 경지정리 계획 등 기타 지역과 관련된 계획

◦ 하천시설 관련계획

당해 하천에 대한 하천정비기본계획 및 자연형하천 정화사업 기본설계 기타 하천시설관련 계획

마. 현황조사

(1) 조사 및 분석방법

◦ 현황조사에 앞서 지형도(1/5,000, 1/25,000, 1/50,000) 지질도, 기타 수집한 자료 등을 참고로 도상에서 예비 조사를 실시한다.

◦ 조사구간을 현장 답사하며 기존제방상태, 교량 및 하천구조물, 농경지 등의 현재 상태 및 주변농로와의 접속현황 등을 조사한다.

◦ 주요 조사내용은 개수연장, 하상경사, 하폭, 하도상태, 제방선형 등의 기존 하천관련 조사와 자연환경, 골재원, 취수 및 배수시설물, 합류되는 하천현황 지장물 등을 조사한다.

(2) 현황조사 흐름도

계 획 수 립	→	도상 예비조사	→	하 천 답 사	→	현장 세부조사
∘ 조사지역 및 범위 ∘ 조사항목 및 내용 ∘ 조사기간 및 방법 ∘ 조사양식 및 인원 편성		∘ 1/50,000, 1/25,000, 1/5,000 지형도 ∘ 하천정비기본계획 및 지장천자연형하천 정 화 사업 기본설계 ∘ 도시계획도 ∘ 지적도		∘ 지형 및 유로현황 ∘ 현장시행가능 토질 조사 ∘ 토취장 및 골재원 조사 ∘ 강우 및 홍수피해		∘ 측량 및 토질조사 ∘ 토지이용 현황조사 ∘ 사전모니터링 ∘ 민원 및 지장물조사

(3) 현장 조사

◦ 기존제방상태 및 지형상태를 파악한다.

◦ 기존 제방 및 호안 배수구조물 등 하천시설물 현황을 조사한다.

◦ 부체도로 및 농로설치 위치를 계획한다.

◦ 주변 개발현황과 지장물 및 토지이용 상태를 조사한다.

◦ 지역 개발과 연계된 하천 계획을 조사한다.

◦ 하천 생태계 및 경관 등 하천환경과 관련된 상태를 조사한다.

◦ 하천문화 및 역사와 관련한 내용을 조사한다.

◦ 하천시설물 계획 및 기존시설물과의 연결, 확장 등 검토

바. 단계별 과업수행 계획

제1단계		① 관련 계획 조사 및 현장답사
		․ 관련 계획(도시계획 등)과의 연계성 검토 ․ 제방, 고수부지, 제내지 등 주변여건 및 지형적 특성의 조사 ․ 조사측량 ․ 하천정비기본계획 검토, 자연형하천 정화사업 기본설계 검토, 하천환경관 리계획 검토
		↓
제2단계		②실시설계 단계
		․ 하천정화사업 및 환경정비 세부구상 ․ 지반조사 등 현장 세부조사 실시 ․ 조사자료를 토대로 종평면 및 횡단면도 작성 ․ 고수부지 정지공, 배수공 및 하천시설물 실시설계 수행 ․ 용지도작성 및 지장물 조사
		↓
제3단계		③ 설계도서 작성 단계
		․ 수량 및 단가산출 ․ 보고서 및 설계서 작성 ․ 설계도 작성 ․ 성과품 인쇄 및 납품

2. 특별사항

가. 기본방향

(1) 물리적, 생태적 잠재성을 충분히 고려하여 자연의 흐름에 부합하는 새로운 형태의 하천으로 조성한다.

(2) 접근 및 관찰이 용이한 공간조성으로 시민에게 휴식, 자연학습, 생태체험 등의 기능을 제공할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

(3) 수리와 관련하여 시설물의 안정성 검토 및 이용 관리방안을 제시한다.

나. 과업수행 검토사항

(1) 검토 착안사항

◦ 당해 하천의 기 수립된 하천정비 기본계획과 자연형하천 정화사업 기본설계 및 하천환경관리계획에 의거 계획되어야 한다.

◦ 신공법 및 최신 전산 프로그램을 활용하여 과업을 수행하여야 하며 미관을 고려하되, 안전하고 경제적인 설계를 실시하여야 한다.

(2) 설계방침 및 중간보고

◦ 설계방침은 현지측량 실시 이전에 용역 수급자 및 발주청의 감독과 합동으로 현지답사를 실시하여 관련 계획검토 및 현황을 조사한 후 지형도(축척 1/5,000～1/25,000)상에 제방선형을 표시하여 발주청과 협의하여야 한다.

◦ 설계방침 검토시 상세한 현황을 지형도에 표기하고 주변 전경사진 등을 첨부하여야 한다.

◦ 설계 방침 또는 중간보고시 결정된 사항이 변경될 경우는 변경사유를 첨부하여 발주청의 변경방침을 받아야 한다.

다. 분야별 과업수행

(1) 조사측량

지장천 자연형하천정화사업 기본설계 측량성과 이용

(2) 재료원 조사

◦ 석산조사

- 기 개발된 석산 위치를 파악하여 품질 및 가용매장량을 조사하여 품질과 수급에 차질이 없는 지점을 조사한다.

- 석산에서 생산되는 석재에 대한 암석종류 및 암질상태 등을 고려하여 선정하여야 한다.

◦ 각종 자재 공급원 조사

- 레미콘 : 인근 레미콘 공장을 조사하되 운반거리, 사용골재의 품질시험 및 운반시간, 생산능력, 운반차 보유대수 등을 조사하여야 한다.

- 철근 및 시멘트 등 주요 자재(사급자재시)철근 및 시멘트, 기타 주요 자재의 공급처를 조사하여야 한다.

(3) 보상조사 (용지 및 지장물)

(가) 용지도 작성

◦ 지적도는 지적관서(시‧군발행)에서 보관하고 있는 지적도 등본(전도)을 교부 받아 지번순으로 연결한 후 편입 토지를 필지 경계선과 구별되도록 구획선으로 표시하여 제출하여야 한다.

◦ 용지도는 중심선을 정확히 지적도에 표시하여 제방부지는 물론, 제외지 보상대상 구역까지 포함하여 작성하여야 한다. (지적도 1/1,200, 임야도는 1/1,200로 확대 작성하여야 한다)

◦ 용지도에 제방으로 새로 편입되는 구역을 구분할 수 있도록 채색 표시하여야 한다.

◦ 용지도에 측점 표시를 한 후, 중심선은 가는 실선, 용지매입선은 굵은 실선으로 표시하여야 한다.

◦ 편입되는 지역은 일련번호를 붙여 표시하되 토지조서의 일련번호와 일치하도록 하여야 한다.

◦ 용지도에 가옥, 전주, 분묘, 수준점등 지장물의 위치를 표시하되 물건 조서와 부합되는 일련번호를 기재하여야 한다.

(나) 토지 및 물건조서 작성

◦ 토지조사 및 물건조사는 별표 1, 2, 3호 서식의 내용에 따라 조사 작성하여야 한다.

◦ 토지는 현지답사, 공부조사, 거래가격 조사 등을 실시하여 보상예정 금액을 조사하여야 하며, 공사별 용지보상비 현황을 별표4호(공사별 용지보상비 총괄표), 5호(공사별 용지 보상비 내역)서식에 따라 집계하여야 한다.

(다) 지하매설물 조사

◦ 지하 매설물의 이설 방안을 조사하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

- 전기 및 통신시설물

- 상‧하수도 시설물

- 송유관 및 가스관

- 기타 시설물

(라) 세부조사 요령

◦ 토지조사

- 서    식 : 별표 1호 서식의 내용에 따라 조사 작성한다.

- 소 재 지 : 군. 읍. 면 . 리. 동까지 조사한다.

- 지    번 : 편입예정지번, 토지대장상지번, 등기부상지번을 모두 조사하여야 한다.

- 소유권자 : 토지대장상의 주소, 성명과 등기부상의 색출번호, 주소, 성명, 소유권 이외의 권리 설정여부와 실제상 소유자 주소, 성명 등을 조사한다.

- 등기부 및 토지대장등본은 필히 교부 받아야 한다.

- 개간지는 허가의 유무와 개간지의 소유자, 피허가자, 개간일자, 허가면적, 개간후의 지목개간지의 원소유자 주소, 성명을 조사하여야 한다.

◦ 지장물 조사

- 별표 2호 서식은 지번별 소유자별로 작성한다.

연 번	물 건 소 재 지				물건명	규 격	단 위	수 량	보상비	소유권자
	시․군	읍․면	리․동	지․번						주 소	성 명

- 별표 3호 서식

- 지번별, 소유자별로 작성한다.

- 한 필지의 토지 지번과 동일 소유자의 지장물 보상비 총액을 필히 가입하여야 한다.

- 건 축 물 : 용도별로 사용 자재와 연면적(㎡), 산출근거, 보상비등을 상세히 조사하여야 하며, 시설물은 등기의 유무와   그 소유권 이외의 제한 물건설정 여부를 정확히 조사하여야 하고, 간이 농막등 가설 건축물은 별도 조사하여  야 한다. 가옥인 경우 임차인(사용자)에 대하여도 별도로 조사하여야 한다.

- 공 작 물 : 돈사, 계사, 전주, 양수장, 관정, 수로 통신케이블, 장독대, 비닐하우스(작물 제외), 보 등을 종류별로 규모, 단위, 수량, 보상비 등을 상세히 조사하여야 한다.

- 수목 영년작물 : 과수목, 영년작물, 기타 임목 등은 수종, 수령, 수고, 면적, 수량, 이식가능여부, ㎡당 수량, 보상비등을 조 사하여야 하며, 특히 영년작물중 마을 단위로 조성한 용재림은 소유권 귀속관계까지 상세히 조사하고, 토지권리 소유권자와 영년작물의 영농권자가 다른 경우에는 그 소유권자를 상세히 조사 명기하여야 한다. (반드시 면적은 실측하여야 한다.)

- 분묘 및 분묘 부속 공작물 조사 : 분묘는 위치, 유‧무연여부, 수량, 소유자 주소 및 성명, 보상비등을 조사하여야 하며, 분묘 부속 공작물의 명칭, 단위수량, 합장 여부, 석관묘인지 목관묘 인지의 여부, 보상비 등을 상세히 조사하여야 한다.

- 어업권 조사 : 종류, 단위수량, 년간생산량, 판매량, 판매고, 세무서장이 인정하는 월수입액, 읍면장 또는 조합이 확인하는 생산량과 판매고 등을 조사하여야 한다.

- 제외지 및 하천구역내 하천 점용 및 사용실태를 상세히 조사하여야 한다.

3. 실시설계

가. 세부 정비계획 방향

(1) 하천이 갖는 자연성, 종(種) 다양성, 개방성, 쾌적성, 청정성이 확보되어야 한다.

(2) 하천의 3대기능(치수, 이수, 환경)에 만족할 수 있는 계획이어야 한다.

(3) 주민과 지역사회의 발전을 바람직하게 선도하는 계획이어야 한다.

(4) 하천환경 관리가 원활할 수 있는 체계적인 자연형하천정화계획이어야 한다.

(5) 사업시행(시공, 감리)이 원활할 수 있도록 민원요소 등을 최대한 고려하여야 한다.

(6) 전구간 우선정비요소와 장래 도시계획에 반영하여 정비할 요소를 구분 제시하여야 한다.

(7) 하천내에는 가급적 인위적 이용시설 계획을 배제하여야 한다.

나. 정화사업 설계시 고려사항

(1) 자연하천 고유 매력의 유지

◦ 하도의 형태, 지질조건, 하상재료 등에도 유의한다.

◦ 하천 작용인 침식, 운반, 퇴적 등을 반영한다.

◦ 동물의 습성과 식물의 서식환경을 고려한다.

(2) 자연과 조화를 이룬 정비

◦ 가능한 필요에 따라 최소한으로 개량하는 선에서 정비한다.

◦ 하천 자연복원력에 한계를 벗어나지 않도록 설계하여야 한다.

◦ 하천의 자연유지 및 회복에 대한 타당성을 충분히 검토한다.

(3) 하천의 상황에 따른 다양한 자연재료의 사용 및 적절한 하천환경정비 및 정화기법의 도입

◦ 돌, 식생 등 자연재료 이용을 우선적으로 검토한다.

◦ 필요시 최근의 개량제품인 콘크리트제품을 도입할 경우 다공질의 형상이나 자연에 가까운 형태를 신중히 검토한다.

(4) 다양한 수변공간의 창출

◦ 하천형태 및 흐름의 상황에 대응한 다양한 수변 환경을 조성한다.

◦ 하천의 자연성을 최대한 살릴 수 있는 친수공간을 창출한다.

(5) 본류와 지천, 하천 상하류와의 연속성을 고려

◦ 본류와 지천, 하천 상하류의 연속성을 확보하여 하천생태계의 단절을 방지한다.

◦ 도시하천의 경우 독립적인 하천정비가 아니라 도시정비와 일체감을 갖도록 유의한다.

다. 현지 세부답사 및 보완조사

(1) 하천의 지형, 형상(평면 및 종․횡단형), 지류 유입, 토지이용, 하천구역, 범람원, 과거하천(폐천)의 행적 조사 등 개괄적인 사항을 답사한다.

(2) 과거유로의 행적을 구지적도를 통하여 조사하고 이를 최대한 하천유로 복원화 할 수 있도록 하여야 한다.

(3) 제방의 형상, 규모, 경사, 도로이용 등에 대하여 조사하여야 한다.

(4) 고수부(물터), 둔치부, 하상의 형상에 대하여 조사한다.

(5) 하천내 물이용, 오염원 유입, 수질 및 저질 오염정도 및 특성을 조사하여야 한다.

(6) 하도내 여울, 웅덩이, 수충부, 비수충부, 사주, 하중도, 세굴, 퇴적 등 구조에 대하여 면밀히 조사하여야 한다.

(7) 하천내의 식물분포를 조사하고 식물과 수중동물, 정화, 조류, 육상동물 및 토양의 상호 관계를 조사하여야 한다.

(8) 상류의 오염 수질이 하상조건에 의해 자정되어 가는 과정 또한 식물에 의해 정화되는 특성을 주요구간별로 추정하여야 한다.

(9) 하천의 종방향 및 횡방향으로의 생태통로 단절 요소를 조사하여야 한다.

(10) 하천과 관련한 기존시설물의 위치, 규격, 기능 등 개괄적인 시설물조사를 실시하여야 한다.

(11) 취수보 등은 하천환경 또는 생태통로와 관련하여 양수장으로의 전환, 기타 개량된 시설을 검토하여 농조와 협의할 수 있도록 조사하여야 한다.

라. 수환경 계획

(1) 수질개선 계획은 가급적 인위적 개선계획은 배제하고 자연재에 의한 수질개선이 가능하도록 하여야 하며, 하천내 자정기능을 극대화 할 수 있는 계획이 되도록 하여야 한다.

(2) 하수처리장 및 각종 하수 토출구로부터 발생가능한 수질사고를 예측하여 이에 대한 관리측면의 관리계획을 수립하여야 한다.

(3) 수환경에 대한 사업시행계획 및 수환경과 관련있는 대책과의 조정에 관한 사항 (오.하수 규제, 하수도 정비, 기타 계획 등)

(4) 유입수의 수질관리 방안(습지, 생태원 조성 등)

마. 자연형 하천정화 실시방안

(1) 퇴적 오니 준설

◦ 오니분포 실태조사 : 오니의 분포 및 심도를 조사하기 위하여 현지조사 및 저질조사 내용을 활용하되 기 수립된 하천정비 기본계획 측량성과 및 자연형하천 정화사업 기본설계의 측량 성과를 비교하여 보완하며 하천 종단 및 횡단상에 오니분포 및 심도를 표시한 오니분포도를 작성한다.

◦ 안정하상 검토 및 오니준설량 결정

- 안정하상경사를 유지하고, 홍수에 의한 세굴 및 퇴적이 적게 발생하는 하상경사를 선택한다.

- 안정하상은 평형하상경사 경험식을 이용하여 분석 시행

- 오니준설심도 및 준설량은 안정하상고 계산결과와 비교하여 결정하되 안정하상 이상 오니준설이 필요한 경우는 하상토 치환방법 등을 고려하여 계획한다.

◦ 경제적, 기술적 오니준설방법 및 준설계획 수립

- 준설심도 및 준설량을 결정한 후 경제적이고 기술적으로 준설에 의한 하천 오염이 적은 방안을 선택하여 계획

- 준설방법은 현지여건 및 국내외 신기술을 검토하여 최적 준설방안을 선택

- 준설기간이 장기간일 경우 계절적 영향을 검토하여 시기별 최적 준설방안을 선택

◦ 오니 적치, 운반, 처리에 관한 기본계획 수립 : 준설된 오니토에 의한 2차 오염이 발생하지 않도록 적치, 운반 및 처리에 대한 계획을 수립

◦ 오염된 토사 및 오염물질 유입방지 시설계획 : 오니 준설 후 유지관리를 위한 오염물질 및 오염된 토사 유입방지시설을 계획

(2) 제방 및 고수부지

◦ 생물유형별로 서식조건을 파악하여 먹이 환경을 제공하고 번식처, 은신처, 피난처 등을 조성한다.

◦ 침수되는 정도에 따라 구분되는 각 식생대에 적합한 수종을 선택하고 치수안정성을 검토하여 수목을 식재한다.

◦ 하천변 공공녹지와 하천생태계를 생태통로를 통해 연결한다.

(3) 호안

◦ 저수호안의 기울기를 완만하게 하여 물리적 안정성을 확보하고 다양한 식생대를 이루도록하며, 저수호안은 식생호안공법 중 생명재료를 우선 사용하여 자연에 가까운 생물서식처를 형성하고 수리안정성을 고려하여 석재등을 사용할 때는 하천생태계에 나쁜영향을 미치지 않도록 한다.

◦ 투수성, 식생이 유지되는 자연형 호안(블럭) 등을 설치한다.

(4) 저수로

◦ 저수로 폭은 가급적 원래 하천이 가지고 있던 정도를 유지하도록 하며, 훼손이 큰 지역이외에는 인위적인 변형을 최소화한다.

◦ 여울과 소를 조성하여 용존산소량을 증가시키고, 경관개선 및 어류의 서식처를 제공할 수 있도록 한다.

◦ 하천생태환경 보전측면을 고려하여 자연재료를 이용하되, 홍수시 유량 및 유속증가로 인한 시설의 유실․파손 등에 대해서도 사전에 충분히 검토하여 꼭 필요한 부분에는 견고성 및 안정성도 고려하여야 한다.

(5) 어도설치

◦ 낙차공, 보의 설치를 최소화하고 어류 및 수생생물의 이동에 장애가 예상되는 곳에 어도를 설치한다.

◦ 어도는 해당 하천내에 서식하는 어류 및 수생생물 종의 생태와 습성을 고려하여 적절한 폭과 경사도, 유속 등이 유지될 수 있도록 한다.

(6) 수질정화

◦ 호안에 수생생물대를 설치하여 오염물질을 정화한다.

◦ 오염된 퇴적오니를 준설할 경우 수생생물에 미치는 장․단기적인 영향을 검토하여 하천생태계에 미치는 충격이 최소화되도록 한다.

◦ 고수부지에 오염물질 여과 및 흡착시설을 설치한다.

바. 식재설계

(1) 일반사항

◦ 하천내 식재는 가급적 자생을 유도할 수 있는 설계를 검토하여야 한다.

◦ 경관적으로 우수하고 바람직한 생태적 천이를 도모하고 지속 가능한 녹지 기능을 유지할 수 있도록 가능한 한 자생 식물종 재료를 선정한다.

◦ 식재설계시 초․수종별로 적합한 식재밀도와 간격을 유지하고 저습지, 고습지, 건초지 등에  따라 조화롭게 식재한다.

◦ 식재설계는 수변공원의 특수성을 감안, 여건에 맞게 식재 방식을 도입하여 자유롭고 안정된 배식방법을 시도한다.

◦ 잔디는 전면 평떼로 식재하되 주변상황 여건에 따라 줄떼를 식재한다.

◦ 식물생육에 불량한 식재지반은 충분한 토심을 확보하고 생육을 위한 별도의 조치를 강구한다.

◦ 서양(西陽)을 받아 불편한 곳은 차양(遮陽)이 될 수 있도록 식재한다.

(2) 천변초지군락 조성

◦ 하천변 습지식생의 구조를 고려하여 분포역에 의한 식생유형을 구분한 후 기존의 양호한 천변 식생은 보존하고 식생이 훼손된 지역은 식생 복원계획 수립을 검토하여야 한다.

◦ 하천에 자생하는 식물종을 우선검토하고 특성에 맞는 위주로 식생구조를 구성하여야 한다.

◦ 수제부에는 유수, 침수에 적응할 수 있는 하천 식물종을 도입하여야 한다.

◦ 기존의 호안부를 우점하고 있는 외래 귀화식물 및 교란종의 선택적 제거를 통해 자생식물 정착을 도울 수 있도록 조성하여야 하며, 공사 직후 교란식물에 의한 식재식물 보호를 위해 식물 및 하천유지관리비용반영을 적극 검토하여야 한다.

◦ 저수로 하단부는 기존 저수호안의 치수적 안정성을 저해하지 않으면서 생태적 재생이 가능하며 수류에 따른 퇴적 특성을 고려한 식생호안을 도입하여야 한다.

◦ 수중․고수부지 생태계를 고려한 계획을 수립하여 수중․수변 및 고수부지 생태계의 연계성 회복을 도모하여야 한다.

(3) Biotope 조성계획

◦ 기존 자연생태계의 분석을 통하여 목표종(target species)을 우선 선정하고, Biotope를 조성함으로써 생물 서식처 복원을 도모하여야 한다.

◦ 수질정화기능이 있는 침수식물과 정수식물의 도입하여야 한다.

◦ 타 생물종의 서식을 유발하는 식물종을 식재하여야 한다.

◦ 물리, 환경적 조건에 부합하는 식물종을 선정하여야 한다.

(4) 천변습지 조성방안

◦ 생물종 부양능력이 높고 수질정화능력을 지닌 습지의 조성, 보전하여야 한다.

◦ 저습지는 불투수층인 토양을 기반으로 하고, 연중 침수 또는 습윤상태에 있는 육지와 개방수역의 전이지대로서 유수의 흐름이 약하거나 정체되어 있는 수환경을 가져야하며, 고유의 식물종과 다양한 생물종 서식환경 조성방안을 검토하여야 한다.

◦ 천변습지는 양서파충류 산란, 각종 남한강에 서식하는 유해하지 않은 곤충서식 등 생물서식처의 기능을 가지며, 토양수분 유지에 도움을 주는 습지와 유속을 완화, 정체시키고 어류 서식처 및 홍수시 피난처를 제공하는 습지로 구분하는 등의 검토를 통하여 조성방안을 수립하여야 한다.

(5) 식재식물종 선정시 고려사항

식재 식물종 선정시에는 물흐름, 유량, 토양 등 환경특성을 고려하여 선택하여야 한다.

◦ 물흐름

- 수충부는 집중류로서 유속이 상대적으로 빠르고 수심이 깊으므로, 근계의 발달이 왕성하여 유실되지 않고 수류에 의해 쓰러지거나 부분적 손상이 있더라도 재생할 회복력이 있는 종을 도입하여야 한다.

- 비수충부는 분산류로서 유속이 완만하고 수심이 얕아 지속적인 토양이 퇴적되는 환경조건에서 지하경과 포복경이 발달하여 부분적으로 매몰되더라도 계속적인 생장이 가능한 종을 도입하여야 한다.

◦ 유  량

- 수변부는 유량에 따라 수위의 변동이 빈번하게 일어나는 부위로, 홍수시에는 침수되고 갈수기에는 지상부가 드러나는 환경조건에 내성이 있는 식물종을 도입하여야 한다.

◦ 토  양

- 자연하천의 토양 토성과 하상재료의 입경에 따라 식물종 조성이 달라지므로 호안부의 토양특성에 따라 식물종 도입하여야 한다.

- 굵은 입자의 하상재료로 이루어진 호안부에는 내건성과 유수에 대한 저항력이 높은종을 도입하고, 가는 입자의 하상재료로 이루어진 호안부에는 상대적으로 유수에 대한 저항력이 낮고, 내건성이 낮은 식물의 도입하여야 한다.

- 홍수 후에는 범람지의 토양이 변화하는 것을 고려하여야 한다.

사. 하천정화 유지관리 계획

하천정화 사업후 하천에서 이․치수 기능과 조화를 이루면서 하천 환경적 기능을 확보하고 보전해 나가기 위한 하천정화 유지관리계획을 수립한다.

4. 설계도서 작성

가. 설계내용에는 보고서, 설계계산서, 세부도 작성, 시방서, 공정계획, 물량산출서, 공사비 내역서 등을 포함한다.

나. 모든 도면은 반투명 용지에 작성하며, 명칭, 축적, 방향표시, 범례 등 필요사항을 기재하여 표기한다. 단, 설계도면의 규격은 국제규격에 일치하거나 발주청에서 제시하는 기준에 따른다.

다. 입찰서류(자재구매 포함)에는 토목, 건축, 기계, 전기, 조경 등 포함 일괄 작성한다.

라. 설계기준 및 참고자료

◦ 건설부 제정 각종 시방서, 설계기준 및 표준품셈을 적용하여 설계한다.

◦ 정부 또는 공공단체가 발행한 자료를 이용하고, 그 외 자료를 참고하고자 할 때에는 출처와 근거를 명시한다.

◦ 관급자재의 운영방법, 자재단가의 적용 등은 설계 착수전에 감독관과 충분한 협의를 한다.

5. 감독 및 보고

가.  본 과업은 발주처가 지명하는 감독관의 지시․감독 하에 수행한다.

나.  용역수행중에도 감독관의 지시에 따라 업무보고, 지시사항의 전달 등을 착오 없이 수행한다.

다.  계약 체결후 7일 이내에 다음 사항에 대해서 사전에 감독관의 승인을 받아 과업을 수행한다.

(1) 사업수행계획서

(2) 과업지시서 이외 과업을 승인 받아야할 사항

라. 주․ 월간 진도보고는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함하여 매주 금요일 및 매월말일을 기준으로 하여 익월 5일까지 감독관에게 제출한다.

(1) 과업추진현황 및 공정현황

(2) 각종 승인사항 및 관계기관 협의사항 등

(3) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

4)  다음달 과업수행계획

6. 설계심의 및 자문

가. 용역수행 기간 중 “지장천 자연형하천 정화사업 심의위원회의 심의”를 받아 충실히 반영하여야 하며, 요구하는 사항을 충실히 이행 하여야 한다.

나. 용역진행 단계에 따라 과업수행결과를 토대로 보고회를 개최하여 주민들의 의견을 최대한 수렴하여야한다.

(1) 1차(주민설명회) : 실시설계 50% 진행시

(2) 2차(최종보고회) : 실시설계 90%진행 시

7.  기  타

가. 과업지시서에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 시행되어야 할 경미한 사항에 대하여는 용역사의 부담으로 시행하여야 하며, 중대한 상황의 변동 및 추가조사 등으로 과업의 내용을 변경할 때에는 발주청과 용역사가 서로 협의하여 과업의 범위, 비용 및 과업기간을 변경할 수 있다.

나. 본 과업수행에 있어서 과업지시서의 해석 등에 대하여 계약 쌍방간의 의견이 상이할 때는 상호 협의하되, 상호 협의가 이루어지지 않을 경우에는 관련 회계 법규에 따른다.

다. 본 용역성과 최종안을 작성 감독관의 검토를 받아 완성한다.

라. 본 용역과업이 완료된 후라도 각종 성과품의 미비사항 및 승인과정에서 보완사항이 발생할 경우, 최종 성과품에 그 내용을 즉시 보완하여 제출한다.

마. 본 과업수행 중 책임기술자 및 각 분야의 기술자 교체 시는 반드시 사전에 감독관의 승인을 받는다.

라. 과업수행계획서에 제시한 각종 수행계획 및 방법에 대해서는 계약상대자의 부담으로 시행한다.

마.  실시설계에서 산출된 공사비가 집행당시 산출된 개략공사비 보다 적을 경우, 검수시 설계액 비율에 맞추어 정산한다.  단, 설계금액이 추정액보다 초과시는 계약금액으로 하며, 직접경비는 검수시 물량 증감에 따라 정산토록 한다.

8. 성과품 제출

과업완료와 함께 최종도서를 작성하여 다음 성과품과 함께 제출한다.

가. 실시설계종합보고서(CD포함)	: 10부

나. 실시설계보고서 부록	: 10부

다. 자료조서	:  5부

라. 설계예산서	:  5부

마. 일위대가.단가산출	:  5부

바. 청사진	:  3부

사. 용지도 및 용지조서, 지장물조서                               :  3부

아. 축소도면                                                     :  5부

자. 설계도서 작성 및 성과품 작성                                 :  1식

차. 기타 우리 군에서 공사 시행과 관련하여 제출을 요구하는 성과품 :  1식

9. 보안대책

가. 수급회사의 대표자는 과업착수시 보안각서를 제출하고 보안관리 책임자가 관리하여 보안에 철저를 기한다.

나. 용역 업무수행 작업실에는 종사자이외의 타인출입을 통제한다.

다. 본 용역사업 자료는 견고한 용기에 별도로 보관하고, 보안관리 책임자가 관리하여 보안에 철저를 기한다.

라. 본 과업수행상의 폐기물은 일괄 수거하여 완전 소각한다.

마. 용역성과 발간시에는 반드시 보완 관리책임자 입회하에 필요한 보완조치를 취한 후 발간하여야 한다.

바. 본 과업수행 전후를 막론하고 자료 및 성과물의 타용도 사용을 엄금한다.

사. 기타 보안과 관련되는 사항을 발주청에서 요구할 시는 이에 따라야 한다.

10. 별지서식

별   지   서   식

공사용토지 기본조사서

(별표1)

공사명 :

연번	소 재 지			지 번			지 목			지 적			소 유 권 자								비 고
	군 (시)	면 (읍)	리 (동)	편입 예정	토지 대장	등기부	토지 대장	등기부	현 실	편입 예정	토지 대장	등기부	토지대장		등 기 부				실 제
													주 소	성명	색출번호	주 소	성명	소유권의 설정권리	주 소	성 명

(별표2)

지  장  물  조  서

공사명 :

연번	물 건 소 재 지				물건명	규 격	단 위	수 량	보 상 비	소 유 권 자		비 고
	시․군	읍․면	리․동	지 번
										주 소	성 명

(별표3)

지장물 기본조사서

공사명 :

일련번호	물 건 의 소 재 지										토지면적			지장물 소유자		주 소							보상비용액		지장물배치도 ※ 경계선은 주서로 표시할것.
	시 읍 리 번지 군 면 동										㎡					성 명
용 도 별	사 용 자 재							연 면 적			면 적 산 출 근 거												보 상 비
종 류	규 모	단위			수량			보 상 비			※ 수 목	수종	수령		수고		면적			수량	이식가능여부			보상비
																									사진		필림봉투
업 종 업체명	허 가				시설규모		년 간 순수익금			보상비	※ 영년작물
	일 자		번 호
위 치	유무연			수 량		보상비			소 유 자					분 묘 부 속 공 작 물											설명
									주 소		성 명			명 칭		규 격			단 위			수 량	보 상 비

※ 공작물 : 돈사, 계사, 전주, 양수장, 관정, 수로, 통신케이블, 장독대, 비닐하우스(작물제외)등, 지번별, 소유자별로 작성할 것

※ 보상비는 원고에만 명기후 별도제출

(별표4)

공 사 별 용 지 보 상 비 총 괄 표

(금액단위  :     원)

공 사 별	보 상 비 총 액	토 지			지 장 물		비 고
		필 지 수	지 적( )	보 상 비	건 수	보 상 비

(별 표 5)

공사별 용지보상비 내역표

공 사 명 :	금액단위 :    원

구 분	물 건 명	필 지 수(규격)	지 적 (수량)	보 상 비	비 고
합 계	토 지 지 장 물
토 지	대 지 전 답 임 야 구 거 도 로 하 천
지 장 물	가 옥 전 주 체 신 주 양 수 장 창 고 돈 사 비닐하우스 영년작물 분 묘 과 수 목

(별 표 6)

폐 천 부 지 현 황

연 번	지 번	지 목		면 적	경 작 유 무 (경 작 자)	비 고
		등 기 부	현 실

(별 표 7)

분야별 참여기술자 명단

착공일 :

준공일 :

분 야	직 책	자격종목 및 등 록 번 호	회사내 직 위	성 명	서 명	용역과업 수행내용	참여기간

제3장 예 정 공 정 표

예 정 공 정 표

과 업 내 용	공 정 (월)
	1		2		3		4		5		6		7
1. 관련계획조사 및 현장답사
1) 착수준비
2) 관련계획검토(일반현황조사)
3) 수문 및 하천조사
4) 조사측량
5) 하천정비기본계획 및 자연형하천 정화사업 기본계획 검토
6) 하천환경관리계획 검토
2. 실시설계
1) 자연형하천 정화사업 세부구상
2) 현장 세부조사
3) 종․횡․평면도 작성
4) 관련 시설물 계획 설계
3. 보고서 및 설계도서 작성