정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	세대2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
② 추진배경	사면불량에 따른 잦은 낙석 및 낙반 발생으로 대형안전사고 및 인명피해 우려
③ 사업개요	○ 목 적 : 붕괴위험 해소로 주민의 소중한 생명과 재산 보호 ○ 위 치 : 정선군 정선읍 봉양리 861번지 일원 ○ 사업비 : 금12,726백만원(국 6,363 도 1,273 군 5,090) ◾ ‘18년까지 8,250백만원, ‘19년 4,476백만원 ○ 사업량 : 피암터널 250m, 사면보강 2,032㎡, 역T형옹벽 160m
④ 사업부서	정선군 건설과		⑤ 담당자	과장 최종수 시설6급 고승구
⑥ 선정기준	10억이상 예산투입 건설사업		⑦ 사업기간	2016년 ~ 2019년
<그간 주요 추진내용>
○ 자연재해위험개선지구 지정고시		‘15.03.18.			전정환 군수 장대순 부군수 최종수 과장 박명호 담당 고승구 주무관
○ 지방재정 투자심사(중앙)		‘16.03.04.			최종수 과장 박명호 담당 고승구 주무관
○ 실시설계 추진		‘16.02.~‘17.04.			최종수 과장 박명호 담당 고승구 주무관
○ 설계경제성검토(VE)		‘16.09.~12.			최종수 과장 박명호 담당 고승구 주무관

○ 설계 사전검토(행정안전부)	‘16.11.15.	최종수 과장 박명호 담당 고승구 주무관
○ 강원도 건설기술심의위원회 심의	‘17.03.03.	최종수 과장 박명호 담당 고승구 주무관
○ 계약심사 및 일상감사	‘17.03.~04.	최종수 과장 박명호 담당 고승구 주무관
○ 공사 입찰 및 업체선정(계약)	‘17.06.20.	신주호 부군수 한종수 과장 최경희 담당 김미라 주무관
○ 공사 착공 및 추진 ◾ 장기1차 공사 착공 ◾ 장기1차 공사 준공 ◾ 장기2차 공사 착공	‘17.06.23. ‘18.01.18. ‘18.01.23.	전정환 군수 신주호 부군수 최종수 과장 박명호 담당 고승구 주무관
◾ 장기2차 공사 준공 ◾ 동절기 공사 일시정지	‘19.01.15. ‘19.01.17.	최승준 군수 정태규 부군수 최종수 과장 윤광수 담당 고승구 주무관