[별지 제2호서식]

정책실명제 사업관리이력서

등록번호

2015-5

담당부서

작성자

수질환경사업소 / 하수시설

(김진석/560-2524)

정 책 명

회동지구 하수관로 정비사업

사업개요

○ 추진배경

- 하수도 정비를 통한 발생하수의 적정처리 및 주민생활여건 개선

○ 추진기간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.

○ 총사업비 : 1,863백만원(국비 1,304 기금 335 군비 224)

○ 주요내용

- 오수관로 3.05km, 배수설비 75가구, 펌프장 3개소

추진경과 및 사업관련자

□ 추진경과

- 실시설계용역 추진 : 2015. 1. 22일 ∼ 2015. 3. 23.

- 재원협의 및 기술검토 : 2015. 3.

- 하수도시설 설치인가(강원도) : 2015. 6. 26.

- 시설공사 계약심사(강원도) : 2015. 7. 14.

- 공사발주 : 2015. 9. 30.

□ 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담내용)
부군수	윤성보	4급	`16. 1 ~ 현재	부군수
소장	전증표	행정5급	`15. 8 ~ 현재	수질환경 사업소장
팀장	김영도	시설6급	`16. 1 ~ 현재	사업 관리
담당자	김진석	시설8급	`15. 1 ~ 현재	공사 관리관