정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	정선군 보건소	②담당자 (연락처)	소 장 조장명 보건8급 정의일 (033-560-2060)
③정책사업명	정선군의료원 건립
④선정기준	군이 발주하는 10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤사업기간	2013. ~ 2016.
⑥주요내용	○ 사업개요 - 위 치 : 정선군 사북읍 사북리 375-4(강원랜드 사업지구 내) - 사업비 : 293억(국비 90억, 지방비 203억) ※ 지방비 폐광기금 활용 - 규 모 : 부지면적 17,340㎡, 건축연면적 12,232㎡ (지하1층, 지상4층) - 병상규모 : 150병상(일반병상90, 중환자실10, 진폐요양 병상50) - 주요시설 : 응급의료센터, 진폐환자 요양시설, 중독치유 센터, 부대사업(숙소 등) - 개설 예정과목 : 12개 과목(필수 9, 선택 3) ⇒ 필수 : 산부인과, 마취통증, 영상의학, 진단검사의학, 소아청소년, 내과(일반, 소화기, 호흡기), 일반외과 ⇒ 선택 : 정신건강의학, 정형외과, 피부과 - 기 간 : 2013. ~ 2016. ○ 추진상황 - 2010. 11. ~ 2012.05. : 타당성 용역 - 2012.07. : 강원도 투·융자심사 승인 - 2012.08. : 정선군의료원 2013년 국비사업 신청 - 2012.09. : 강원랜드 사업부지 제척(제112차 이사회) - 2012.10. : 신규사업 심사 및 선정(보건복지부) - 2012.12.17. : 정선군공유재산관리계획 의결(토지) - 2013.04.19. : 정선군의료원 설립 및 운영에 관한 조례 제정 - 2013.05.29.(2회 개최) : 정선군의료원건립추진위원회 구성·운영 - 2013.08.01. : (주)동원 토지사용승인 - 2013.08.14. : 강원도개발공사 대행사업 업무협약 - 2013.09.04. : 강원도개발공사 대행사업 계약체결 - 2013.11.12. : 설계현상공모 당선작 선장 - 2013.11.25. : 기본 및 실시설계 계약 - 2014.01.06. : 기본설계 심의 회의 참석 - 2014.01.23. : 기본설계 심의 결과 통보(불승인) - 2014.02.28. : 기본설계 심의 회의 참석(재심의) - 2014.03.06. : 기본설계 심의 결과 통보(승인) ○ 향후 추진계획 - 2014.05. : 제2차 강원도 투·융자 심사 추진(조건부 승인관련) - 2014.06. : 강원도 건설기술심의 ○ 기대효과 - 병원급 의료기관 신축에 따른 의료취약지역 해소 및 지역 주민에게 양질의 서비스제공 - 응급, 분만, 소아청소년과 등 관내 미개설 의료과목 신설 로 공공의료 기능 강화 - 지역주민 의료서비스 만족도 향상 및 건강권 보장