2008. 01.

2008년도 숲가꾸기사업 설계․감리실시

감리용역 과업지시서

정    선    군

숲가꾸기사업 감리용역 과업지시서

1. 용 역 명 : 2008년도 숲가꾸기사업 감리용역

2. 목    적 : 실시설계, 선목, 사업시행에 대한 기술적인 검토․자문․지도

및 사업실행지에 대한 점검 등을 수행하여 숲가꾸기사업의 질적 향상과

사업의 효율성을 높이고 공신력 있는 사업 실행 하고자 함.

3. 용역대상

가. 위    치 : 정선군 고한읍, 사북읍, 신동읍 일원

나. 작 업 종 : 통합숲가꾸기사업

(어린나무가꾸기, 솎아베기, 천연림개량, 산물수집 등)

다. 면    적 : 800ha

4. 감리원 업무내용

가. 감리원은 비상주하면서 감독자를 보조한다.

나. 감리자는 실시설계자로부터 실시설계의 작성완료를 통보받았을 경우에는 실시설계 사전검토 보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

다. 감리원은 사업착수 전에 설계도서를 검토하여 ‘숲가꾸기 설계․감리  및 사업시행 지침’ 기준에 적합한지를 확인하고 실행시 불합리한 부분, 착오, 불명확하거나 예상되는 문제점이 있는 경우에는 감독자를 경유하여 발주자에게 보고하여야 한다.

라. 감리 표준지의 조사․관리는 「지속가능한 산림자원 관리지침」의 숲가꾸기 표준지의 조사․관리에 따른다.

마. 감리원은 작업의 품질이 불량할 경우, 실시설계도․서대로 작업이 되지 않을 경우 또는 안전상 필요한 경우에는 사업시행자에게 시정 또는 작업중지를 명하거나 작업원의 재교육 또는 교체를 요구할 수 있다.

바. 감리원은 사업시행자가 시정 또는 작업중지를 명받고도 적절한 조치를 취하지 않을 경우에 감독자에게 즉시 보고하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

사. 감리원은 선목 또는 숲가꾸기사업 시행과정에서 설계변경이 필요한 경우에는 사업시행자와 감독자의 의견을 들어 그 내용을 발주자에게 서면 보고하여 설계변경 절차를 거친 후 착수하도록 하여야 한다.

아. 감리원은 발주자가 당해 사업과 관련하여 작업방법의 변경요구 등 중요한 기술적인 사항에 대하여 자문을 서면으로 요구하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

자. 감리자는 선목 또는 숲가꾸기 사업시행자로부터 예비사업완료검사를 요청받았을 경우에는 예비사업완료검사를 실시하고 그 결과에 대해 예비사업완료검사 결과보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

차. 감리원은 기성부분 검사 및 준공 검사시 입회하여야 한다.

5. 감리 방법

감리원은 감독자를 보조하며 비상주 감리를 원칙으로 하되, 최소 3회 이상(사업시행 전, 사업시행 중, 사업완료시점) 현지 방문하여 관련도서의 검토 및 사업시행결과를 점검하여야 한다.

□ 단계별 감리방법

1) 설계서 검토

○ 설계내용의 현장조건 적합성 및 시행가능성 등의 검토.

- 산림의 기능 : 목재생산림, 수원함양림, 산지재해방지림, 자연환경보전림,

산림휴양림, 생활환경보전림 등

- 경영목표 : 목표수종, 벌기령 등

- 사 업 종 : 덩굴제거, 어린나무가꾸기, 솎아베기, 천연림보육, 산물수집 등

- 시방서 및 사업비

○ 사업시행계획 및 예정공정표 검토

- 사업시행자가 작성한 사업 착수부터 완료시까지의 사업시행계획이 현지여건            이나 계절적 조건에 적합한지 검토

○ 작업자 교육 실시(사업 착수전 1회/건당)

○ 작업원 확보여부 검토 및 점검(사업시행 중 수시 확인점검)

- 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행 지침 제20조(작업원) 관련

○ 실시설계 표준지의 관리

- 표준지는 숲가꾸기 사업시행시 작업하지 않고 보존

- 도로변 등 경관적으로 중요한 지역일 경우 숲가꾸기가 반드시 필요한 지역에

대해서는 감리자의 확인을 받아 사유를 감리보고서에 기재한 후 작업시행

○ 선목작업 검토(선목작업 완료 후, 숲가꾸기 사업착수 전)

- 실시설계 작업지침에 따라 적정량의 선목여부

- 선목 표식의 적정성 등

※ 선목작업에 대한 감리 실행시는 별도의 용역비 산출 기준에 따름

○ 조치할 사항

- 보완할 사항이 있는 경우, 설계서 보완 및 시행계획 변경의견 제시.

- 설계서 검토 보고서 제출

2) 감리표준지 배치 및 조사 (사업시행 중 수시)

○ 표준지 조사비율은 사업대상지 면적의 0.25% 이상으로 하고 실시설계표준지

와 중복되지 않도록 한다.

○ 사업대상지를 표시한 지형도상에서 최대 400m× 400m 격자상의 교차점에 400㎡

의 표준지를 일정 간격으로 배치하고  GPS좌표를 기록(표준지 좌표체계는           TM좌표 또는 경위도좌표 값을 병행하여 기재할 수 있으나 경위도 좌표값은          소수점 둘째자리까지 기재함   예)125˚ 10´ 58.81″)

- 다만, 그 지점에 배치가 불가능할 경우 상하좌우 50m 범위 내에 표준지

위치조정 가능

○ 실시설계 작업지침에 따라 사업 시행여부를 감리표준지를 통하여 조사하여          그 결과를 감리완료보고시 첨부하여 제출

○ 감리표준지 배치도 작성

- 수치지형도상 표준지 위치를 표시하고 감리완료보고시 첨부하여 제출

3) 감리중간보고 (사업시행 중 수시)

○ 설계서의 내용에 적합하게 행하여지고 있는지 검토

- 작업강도(제거율), 조재 및 하산집재

- 미래목 배치, 가지치기 높이와 본수, 하층식생관리 등

○ 안전장구 착용 여부 등 안전관리 점검

○ 설계변경 요청 시 적정성 검토 후 의견 제시

○ 사업시행 진척상황에 대한 조사 및 보고

○ 조치할 사항

- 문제점 발생시 사업시행자에게 시정하도록 지시

- 감리 중간보고서 제출

4) 예비준공검사

○ 검사시기

- 시공자가 사업을 완료한 직후 또는 소반별 사업완료 시점

○ 검사내용

- 작업면적, 작업강도(제거율) 점검.

- 가지치기 높이 및 본구 점검

- 산물수집량 점검 등

○ 조치할 사항

- 예비준공검사결과를 발주처에 보고

5) 감리완료보고 (사업완료 시점)

- 감리일지, 관련사진 등을 첨부하여 감리완료보고서 제출

6. 감리 보고서 제출

감리자는 사업시행 중 해당하는 시점에서 다음의 각 호에 해당하는 보고서를 작성하여 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 하며, 감리가 완료되었을 경우 다음 각 호를 포함한 전자기록매채(CD)와 용역계약시 발주자가 요구한 사항 등을 포함하여 최종감리완료보고서를 발주자에게 제출 하여야 한다.

가. 실시설계 사전검토 보고서

나. 선목 예비(부분)사업 완료검사결과 보고서

다. 중간감리보고서

라. 감리일지

마. 예비사업완료검사 결과보고서

바. 필지별 실행내역

사. 감리완료보고서

아. 임․소반별 사업시행 조사표

자. 감리표준지 조사보고서

차. 소반별 작업확인 조서

카. 감리표준지 배치도 등

타. 그밖에 발주자가 용역계약시 요구하는 사항

7. 과업 수행 기간

계약 후 착수일로부터 사업시행 완료 후 14일까지로 하며, 다음의 경우에 한하여 발주자의 승인을 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.

가. 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

나. 발주자의 계획변경이나 방침에 따라 본 과업이 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

다. 기타 불가피한 상황이 발생하였을 때

8. 과업수행의 원칙

가. 감리원은 계약체결과 동시에 감리업무를 수행하여야 한다.

나. 감리용역 수행자는 감리원의 업무를 수행할 수 있는 자격을 갖춘 자를

선정하여 발주자에게 보고하여야 한다.

다. 감리원은 과업의 보안유지에 철저를 기하여야 한다.

라. 본 과업지시에 명기하지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요한 사항은 발주자와 협의하여 결정한다.

9. 과업의 세부원칙

가. 감리업무 착수

1) 감리자는 감리용역 착수시 감리업무수행계획서와 감리원자격증 사본을 첨부한 착수계를 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.

2) 감리원은 실시설계도면, 시방서, 산출내역서, 사업계약서 등의 내용과 당해 사업의 내용을 충분히 숙지하여 감리하여야 한다.

3) 감리원은 실시설계서와 사업계약문서 상호간의 모순되는 사항이나 현장실정과의 부합여부 등을 해당 사업 진행 전에 검토하여야 한다.

4) 감리원은 감리용역 완료시까지 근무하여야 하며, 교체가 필요한 경우에는 교체인정사유를 명시하여 감독자를 경유하여 발주자에게 사전 승인을 받아야 한다.

나. 사업 착수계 검토 및 보고

감리원은 선목 및 숲가꾸기 사업이 착수된 경우에 사업시행자로부터 다음 각 호의 서류가 포함된 착수계를 제출 받아 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 감독자를 경유하여 발주자에게 보고하여야 한다.

1) 선목자 지정신고서

2) 안전관리 및 품질관리 계획서

3) 작업원 운영계획서(자격증 사본 포함)

4) 노무동원 및 장비투입 계획

5) 산출내역서

6) 착수전 사진

다. 사업 시행 단계

1) 감리원은 다음 문서를 기록 비치하고 완료 후 발주자에게 인계하여야 한다.

- 공사 감리 일지

- 각종 정기보고 및 발주자가 요구하는 자료

2) 감리원은 민원발생이 예상되는 사항을 사전에 도출하여 발주자에게 보고하는 등 민원발생이 최소화 되도록 노력하여야 한다.

3) 감리원은 선목자 또는 현장작업자 등이 적절치 않다고 인정되는 경우 경고 등의 조치를 하고 이에 불응시는 사유를 명시하여 발주자에게 보고하여야 한다.

4) 감리원은 사업시행자가 계약문서에서 정한 선목, 간벌율, 가지치기, 하층식생관리 등 일련의 작업방법을 요건대로 수행하는지 확인․관리하여야 하며 사업이 정해진 기간 내에 완료되도록 감리에 철저를 기하여야 한다.

5) 사업시행 중 부득이 설계변경 또는 추가 작업이 발생할 경우에는 설계변경 개요서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

라. 사업 완료단계

1) 사업시행자로부터 예비(부분)사업 완료검사를 요청받았을 경우, 감리자는 예비(부분)사업 완료검사결과 보고서를 작성하고 감독자의 확인을 받아 발주자에게 제출하여야 한다.

2) 감리원은 사업완료 전에 예비완료검사를 실시하여 미흡한 사항에 대하여는 보완하도록 지시하여야 한다.

3) 완료계가 제출된 때에는 7일 내에 감리완료보고서를 작성, 감독자의 확인을 받아 발주자에게 제출하여야 한다.

4) 기타 자세한 사항은 감리업무수행지침서(건설교통부 고시 제2001-259호)를 준용한다.

10. 감리원의 책임한계

1) 현저하게 부실감리를 하였거나 정당한 이유 없이 계약사항을 이행하지 않은 경우 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제76조의 규정에 의한 부정당업자로 제재할 수 있다.

〔별지 제22호서식〕

실시설계 사전검토 보고서(예시)
사 업 명			사업량	ha
위 치
구 분		내 용	적 합 여 부
설계서 검토	숲의 기능	경제림(일부지역 수원함양림)	☑ 적합 □ 부적합
	경영목표	참나무류, 소나무 대경재생산	☑ 적합 □ 부적합
	사 업 종	천연림보육	☑ 적합 □ 부적합
	접 근 성	마을인근, 도로변으로 양호	☑ 적합 □ 부적합
	경 사 도	경～급으로 어려움	☑ 적합 □ 부적합
	장 애 물	밀생된 하층식생으로 어려움	☑ 적합 □ 부적합
	시 방 서	일반, 특별, 전문시방서	☑ 적합 □ 부적합
	내 역 서	원가계산서, 설계내역서	☑ 적합 □ 부적합
공정표 검토	기 간	0000. 00. 00 ～ 0000. 00. 00	☑ 적합 □ 부적합
설계도 검토	작업위치도, 작업지시도, 표준지배치도 등 표기방법		☑ 적합 □ 부적합
검토자 의견	필요시 별첨
위와 같이 실시설계 사전검토 보고서를 제출합니다. 0000년 00월 00일 주 소 : 상 호 : 감리자 : ꄫ 정선군수 귀하

〔별지 제23호서식〕

선목 예비(부분)사업 완료검사결과 보고서(예시)
사 업 명						면적	ha
위 치
사업기간
소반명	계획(ha)	실적(ha)	실행(%)	점검일자	적합여부
1-1-1	30	30	100	12. 4	☑ 적합 □ 부적합
1-1-2	45	45	100	12. 4	☑ 적합 □ 부적합
1-1-3	53	53	100	12. 5	☑ 적합 □ 부적합
1-1-4	44	30	68	12. 5	□ 적합 ☑ 부적합
1-1-5	65	-	-	-	□ 적합 □ 부적합
감리의견	o 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3 소반 총 128ha는 실시설계서에 따라 적합하게 선목 및 표식이 완료되어 사업착수가 가능함 o 1-1-4 소반은 총대상 면적 중 14ha에서 선목이 누락되었으며 실행지의 선목량과 질도 부적합함 o 1-1-5 소반은 아직 선목작업이 미착수 되었으며 12. 15일부터 착수하여 12. 22일에 완료할 계획임 o 12.23일 1-1-4 소반의 부적합 사항에 대한 조치사항과 점검과 함께 1-1-5 소반에 대한 선목예비(부분)완료검사를 실시할 계획임
위와 같이 선목 예비(부분)사업 완료검사결과 보고서를 제출합니다. 0000년 00월 00일 주 소 : 상 호 : 감리자 : ꄫ 정선군수 귀하

〔별지 제24호서식〕

중간감리보고서
보 고 구 분	감리중간보고 (제OO차)
사 업 명						면 적		ha
위 치
감 리 기 간			감리대상소반		전 체
감 리 내 용
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)		실 행(%)			적합여부
							☑ 적합 □ 부적합
감 리 자 의 견	필요시 별첨
붙임자료	1. 임․소반별 사업시행 조사표 2. 소반(표준지)별 작업확인 조서 ※ 감리완료보고서 참조
위와 같이 감리중간보고서를 제출합니다. 0000년 00월 00일 주 소 : 상 호 : 감리자 : ꄫ 정선군수 귀하

〔별지 제25호서식〕

감 리 일 지
일련번호			작 성 일	0000년 00월 00일
사 업 명
감 리 대 상 지
감리내용	사업종	점검대상			작업 적정성
특이사항
부적합 사항 조치결과
작성자	감 리 원 O O O ꄫ

〔별지 제27호서식〕

예비사업완료검사 결과보고서(예시)
사 업 명						사 업 량	ha
위 치
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)	달성율(%)	점검일자	적합여부
					□ 적합 □ 부적합
점검동행자
예비완료 검 사 내 용	◦ 사업지 전 면적에 대하여 작업은 실시하였으나, 부분적으로 산물작동이 불량하거나 미래목 주변의 경합목이 제거되지 않은 지역이 있어 재작업을 지시하여 사업실행을 완료하였음 ◦ 가지치기는 소나무 미래목과 우량목에 대하여 모두 실시하였음 ◦ 묘지 주변 및 소로길 주변 제거목을 정리토록 하였으며, 소로길 주변과 도로 인근지역은 제거목을 짧게 작동하여 지역주민이 필요시 반출이 용이하도록 작업을 실행하였음 ◦ 전체적으로 작업강도는 대체로 양호하나 미래목 선목 수준이 낮음 ◦ 세부 작업내용은 붙임 필지별 실행내역 참조
붙임자료	◦ 필지별 실행내역(임․소반별 사업시행 조사표)
위와 같이 예비사업완료검사 결과보고서를 제출합니다. 0000년 00월 00일 주 소 : 상 호 : 감리자 : ꄫ 정선군수 귀하

〔별지 제28호서식〕

필지별 실행내역
임/소반	리	지 번	지적(ha)	면적(ha)	점검결과

〔별지 제29호서식〕

감리완료보고서
보 고 구 분	감리완료보고
사 업 명						면 적		OOha
위 치	OO도 OO군 OO면 OO리 산OO번지 (OO임반 O소반)
감 리 기 간			감리대상소반		전 체
감 리 내 용
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)		실 행(%)			적합여부
							□ 적합 □ 부적합
감 리 자 의 견	필요시 별첨
붙임자료	1. 임․소반별 사업시행 조사표 2. 감리표준지 조사보고서 3. 소반별 작업확인 조서 4. 감리표준지 배치도 5. 표준지 조사야장 등
위와 같이 감리완료보고서를 제출합니다. 0000년 00월 00일 주 소 : 상 호 : 감리자 : ꄫ 정선군수 귀하

〔별지 제30호서식〕

임․소반별 사업시행 조사표(예시)
사 업 명					사 업 량		OOha
위 치	OO도 OO군 OO면 OO리 산OO번지 (OO임반 O소반)
임․소반	계 획(ha)	실 적(ha)	달성율(%)	적합여부		비 고
1-1-1	32.80	32.80	100	☑ 적합 □ 부적합
1-1-2	60.20	60.20	100
1-1-3	39.60	39.60	100
1-1-4	49.40	49.40	100
1-1-5	41.00	41.00	100
1-1-6	29.00	29.00	100
1-1-7	66.10	66.10	100
1-1-8	31.90	31.90	100
1-1-9	2.60	2.60	100
1-1-10	7.40	7.40	100
합 계	360.00	360.00	100
감리자 의 견	◦ 6개 작업단이 투입되어 작업을 하였으며, 여러 차례의 보완작업을 거쳐 사업완료 하였음. ◦ 부분적으로 작업강도가 강한 지역과 약한 지역이 있음. - 리기다소나무 임분은 강도의 밀도조절 작업을 하였음. - 리기다소나무와 소나무가 혼효되어 있는 임분은 소나무를 미래목으로 선정하고 주변의 리기다소나무를 강하게 제거하였음. - 소나무림은 미래목 주변의 방해목 제거 위주의 약도작업을 하였음. ◦ 가지치기는 소나무 미래목과 우량목을 중심으로 실시하였음. ◦ 산물수집은 계곡부와 임연부를 대상으로 실시하였으며, 계곡부는 상향, 임연부는 하향 집재하였음. ◦ 소로, 묘지접근로와 주 능선부에는 작업로를 설치하여 주민들의 통행에 불편이 없도록 하였음. ◦ 또한, 많은 작업단을 투입함으로서 작업단간에 품질의 차이가 있었으며 가능하면 숙련된 작업단을 선발하여 작업에 투입할 것을 권고함.

〔별지 제31호서식〕

감리표준지 조사보고서
사 업 명				사 업 량		00ha
위 치	충남 00시 00면 00리 산00번지외00필지
표준지번호	위 치		실행 여부(%)		비 고
	위도(X)	경도(Y)
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행
합 계			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행
감리자 의 견

〔별지 제32호서식〕

소반별 작업확인 조서
임․소반명
1. 작업면적
지적	설계면적		작업면적		실행율(%)		사업필지
2. 작업강도
경급	설계서상 제거본수		조사결과(본)					설계서대비 실행율(%)
			잔존본수	제거본수		총 본수	제거율
계
6cm 미만
8～12
14～18
20cm이상
3. 미래목(가지치기 대상목) 관리 및 산물수집
구분	미래목본수 (가지치기 대상목)		가지치기			산물수집		비고
			본수(본)	높이(m)		면적(ha)	방법
설 계 서
조사결과
실행율(%)
4. 기타의견 1) 임연부 관리 : 2) 계곡부 관리 : 3) 제거목 정리 :
별첨 : 표준지 조사야장

〔별지 제33호서식〕

감리 표준지 배치도(예시)