- 조성예정 예미농공단지 - 문화재지표조사용역 과업지시서

2007.  7.

정   선   군

(산업경제과)

목     차

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명                         5. 과업내용

2. 근    거                         6. 수행기간

3. 목    적                         7. 예정공정표

4. 범    위

Ⅱ. 일반사항

1. 적용범위                         12. 자 문

2. 법규 우선 준수                   13. 자료의 사용

3. 용어의 정의                      14. 용역중지

4. 용역감독의 권한                  15. 보안 및 비밀유지

5. 수급인의 책임                    16. 설계변경

6. 사전협의                         17. 예비준공검사

7. 용역수행자의 자격 및 교체        18. 성과품(보고서 등)의 작성

8. 제출물                            19. 용역준공

9. 착수신고서 제출                   20. 성과품의 소유와 사용

10. 과업수행 보고                   21. 기  타

11. 협의와 조정

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명

ㅇ 과업명 : 조성예정 예미농공단지 문화재지표조사 용역

ㅇ 위  치 : 정선군 신동읍 예미리 일원

ㅇ 조사면적 : 185,469㎡(예미리 146,840 및 천포리 38,629)

- 개발면적 : 15만㎡ 이하

2. 근  거

ㅇ 도시개발법 제3조 및 제4조, 도시개발업무지침 제1편 3장 제11절 및 제2편 8장 제12절(문화재보호계획)에 의거 문화재보호계획 수립

ㅇ 문화재보호법 제74조의2(건설공사시의 문화재보호)

3. 목  적

3.1. 농공단지조성 예정부지 내의 문화재 부존 혹은 전승 유무와 위치ㆍ범위ㆍ중요도 등을 조사하고 문화환경 전반에 대한 지표상의 문화적 흔적과 징후를 확인ㆍ분석

3.2. 문화재가 향후 사업추진에 미칠 영향을 파악하여 개발사업 및 문화재의 보존ㆍ보호에 대한 종합적인 대책을 수립하고 개발계획에 반영

3.3. 농공단지조성 예정부지내 건설사업으로 인하여 훼손ㆍ멸실될 우려가 있는 문화유산의 보존ㆍ보호

3.4. 민속ㆍ인류문화 현장의 보존 및 지속가능한 활용방안을 모색

4. 범  위

4.1. 시간적 범위

ㅇ 농공단지 구역지정을 위한 기초조사 및 지정단계 : 2007~2008년

4.2. 공간적 범위

4.2.1. 조성예정 농공단지 후보 구역

4.2.1. 예정지역 밖이라 하더라도 지역내의 문화재로 인하여 각종 법률상 저촉되는 범위 혹은 연장선상에 있는 유적은 포함하여야 한다.

5. 과업내용

ㅇ 문화재보호법 시행령 제43조의4 규정 및 과업지시서에 의거 작성 하여야 한다.

5.1.  농공단지조성 예정부지 내 고고ㆍ민속ㆍ역사ㆍ건축에 대한 현황조사

5.1.1. 고고학적 조사 : 구석기시대에서 근ㆍ현대에 이르는 지표상 또는  매장된 문화재에 대한 정밀조사

5.1.4. 민속학적 조사 : 지역 내의 무형문화재에 대한 정밀조사

5.1.2. 역사학적 조사 : 지역의 역사ㆍ문화적 변천과정에 대한 정밀조사

5.1.3. 건축학적 조사 : 지역내의 문화재적 가치가 높은 역사적 건축물에 대한 정밀조사

○ 주거지ㆍ사지ㆍ고분ㆍ패총ㆍ성지ㆍ궁지ㆍ요지ㆍ경승지ㆍ

주요분묘ㆍ유물포함층(산포지) 등 포괄적 문화유적 자료

○ 건조물ㆍ전적ㆍ서적ㆍ고문서ㆍ회화ㆍ조각ㆍ공예품 등 유형의

문화적 소산 일체

○ 지역별 연혁ㆍ사건ㆍ인물ㆍ상징ㆍ정신 등에 관한 역사

○ 문화재로 지정되었거나 역사적 가치가 높은 건축물에 대한 심층조사

○ 기타 문화재적 가치가 있다고 판단되는 자료

5.2. 보고서 작성

6. 수행기간

ㅇ 착수일로부터 31일(1개월)

7. 예정공정표

조 사 내 용	일 정 계 획												비 고
	5 일		10 일		15일		20 일		25일		30일
자료수집․기초조사
주변유적 탐문조사
현장정밀조사
유적․유물 내용정리
사진 및 도면편집
편집및보고서작성
완료 및 제출

Ⅱ. 일반사항

1. 적용범위

1.1. 본 과업내용서는 농공단지 조성사업을 위하여 시행하는 다음 과업의 수행에 필요한 사항을 규정한다.

1.1.1. 농공단지조성 예정부지 내 고고ㆍ민속ㆍ역사ㆍ건축에 대한 현황조사

1.1.2. 농공단지조성 예정부지 내 문화유산 활용방안 수립

1.2. 모든 과업은 본 과업내용서에 의하여 수행하고, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령에 따라 감독원과 협의하여 수행한다.

2. 법규 우선 준수

ㅇ 수급인은 이 과업내용서에 “○○은 관련법규(조례를 포함한다. 이하 이 과업내용서에서 같다)의 규정에도 불구하고 이 항에서 정하는 바에 따른다.”라고 별도로 명시되어 있지 않는 한 이 과업지시서의 내용이 대한민국 관련 법규와 상호모순 될 경우(과업수행중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)에는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

3. 용어의 정의

3.1. 발주자

“발주자”라 함은 당해 용역의 시행주체인 “정선군”를 말한다.

3.2. 수급인

“수급인”이라 함은 당해용역의 시행주체인 “정선군”의 계약상대자를 말한다.

3.3. 감독원

“감독원”이라 함은 수급인이 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록 지휘·  감독하는 자로서 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 의하여 발주자가 임명·통보한 직원을 말한다.

3.4. 기타 과업내용서상의 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하며, 발주자와 과업수행자간 해석상 차이가 있을 때는 발주자의 지시에 따른다.

4. 용역감독의 권한

4.1. 용역감독

감독원은 이 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.

4.1.1 인력 동원현황

4.1.2. 부문별 과업 이행실태

4.1.3. 기타 확인이 필요한 사항

4.2. 용역점검

감독원은 용역의 적정성 확보를 위해 수급인에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 수급인은 지적된 사항을 감독원과 협의하여 시정하여야 한다.

5. 수급인의 책임

5.1. 책임한계

5.1.1. 감독원의 승인을 받은 성과품이라 할지라도, 수급인의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정․보완요구가 있을 때에는 수급인의 부담으로 이를 시정․조치하여야 한다.

5.1.2. 수급인이 감독원에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

5.2. 관계기관 협의

5.2.1. 수급인은 관계기관과 업무협의를 하기 전에 협의할 내용 및 자료 등에 대하여는 반드시 감독원과 협의하여야 한다.

5.2.2. 수급인은 협의 완료 후 협의 결과를 감독원에게 즉시 보고하여야 한다.

5.3. 공정관리

수급인은 과업수행시 과업량과 과업기간을 상시 점검․관리하여야 하며, 과업수행 실적이 상당부분 계획공정에 못 미칠 경우에는 이에 대한 만회 대책을 수립하여 감독원에게 제출하여야 한다.

5.4. 문서의 기록비치

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 감독원의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 감독원의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

5.5. 재조사

수급인이 본 과업을 수행함에 있어 감독원이 조사과정 및 성과가 부실하여 재조사를 요구할 경우 수급인은 지시에 따라야 하며, 이에 소요되는 비용은 수급인 부담으로 지불하여야 한다.

5.6. 법규준수의 의무

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 관련법규에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해에 대하여 책임을 져야 한다.

6. 사전협의

6.1. 수급인은 다음 사항에 대해서는 사전에 감독원과 승인을 받고 과업을 수행하여야 한다.

6.1.1. 착수신고서의 내용변경

6.1.2. 주요 과업내용의 변경

6.2. 수급인은 다음 사항에 대해서는 감독원과 사전협의를 통해서 과업을 수행하여야 한다.

6.2.1. 주요 과업내용의 하도급

6.2.2. 자문 및 관계기관과의 협의사항

6.3. 수급인은 과업의 효율적인 수행을 위하여 해외 선진사례 등의 조사가 필요한 경우 사전 조사계획을 수립하여 감독원과 협의 후 사례조사를 실시할 수 있다.

7. 용역수행자의 자격 및 교체

7.1. 본 과업에 참여하는 연구원은 충분한 자격, 학력 및 경험 등을 갖추어야 하며, 책임연구원 또는 용역에 참여하고 있는 연구원이 과업의 수행에 불성실하거나 부적당하다고 감독원이 인정하는 경우 수급인에게 교체를 요구할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

7.2. 본 과업에 참여하는 연구원이 퇴직 혹은 기타, 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 감독원의 승인을 받아 그와 동등 이상의 자격을 갖춘 연구원으로 즉시 교체하여야 한다.

8. 제출물

8.1. 수급인은 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여 제출하여야 한다.

8.2. 감독원은 원활한 용역수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 과업내용서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

8.3. 수급인은 모든 제출물에 대하여 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체 없이 재작성하여 제출하여야 한다.

8.4. 수급인이 제출한 서류가 계약에 위배되는 경우 수급인은 감독원이 검토 승인한 자료를 근거로 책임을 회피할 수 없다.

9. 착수신고서 제출

ㅇ 수급인은 계약일로부터 5일 이내에 다음의 내용을 포함하는 착수신고서를  발주자에게 제출하여야 한다.

9.1. 착수계

9.2. 책임연구원 선임계

9.3. 책임연구원 사용인감계

9.4. 예정공정표

9.5. 인력투입계획서

9.6. 보안각서

9.7. 기타 발주자가 요구하는 사항

10. 과업수행보고

10.1. 착수보고

10.1.1. 수급인은 용역착수 후 착수보고 하여야 하며, 보고내용 및 방법에 대하여 감독원과 사전협의를 실시하여야 한다.

10.1.2. 착수보고는 책임연구원이 직접 보고하되 과업내용을 중심으로 세부 과업수행계획을 보고하여야 한다.

10.2. 수시보고

- 본 과업의 추진상황에 대하여 발주자의 요구가 있을 때에는 수시 보고 하여야 한다.

10.3. 월간 진도보고

- 수급인은 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간 진도보고를 매월 말일을 기준으로 다음달 5일까지 감독원을 경유하여 서면보고 하여야 하며, 보고내용에는 공정표와 더불어 조사내용에 대한 요약 보고서가 포함되어야 한다.

10.3.1. 과업추진내용 및 공정현황

10.3.2. 과업수행상 중요 문제점 및 대책

10.3.3. 다음달 과업수행계획

10.4. 중간보고

- 수급인은 중간보고를 실시하여야 하며 보고시기ㆍ내용ㆍ방법 및 참석자에 대하여는 감독원과 사전 협의하여야 한다.

10.5. 현장조사 완료보고

○ 수급인은 현장조사 완료 후 10일 이내에 완료신고서 및 약보고서를 발주자에게 제출하되 세부내용 및 제출부수는 다음과 같다.

1. 완료신고서 2부.

2. 약보고서 2부.

- 조사 경과 내용 및 결과를 기록한 보고문

- 조사된 유적과 관련한 도면 및 사진

-  출토(채집)유물의 종별ㆍ명칭ㆍ수량ㆍ규격ㆍ현상에 관한 설명 및 사진과 유물목록 대장, 출토(채집)유물의 임시보관증 각 4부(완형 또는 완형에 준하는 문화재로서 역사적ㆍ예술적ㆍ학술적 가치가 있는 유물로 문화재보호법 제46조 및 제48조에 의거 처리)

- 유적 현황 및 향후 처리방향에 대한 수급인 의견서 4부.

- 보고서내용에는 사업지구 및 주변의 문화재중 사업시행으로 인하여 직접적으로 영향을 받거나 영향을 받을 우려가 있는 문화재에 대한 정확한 파악과 판단 및 향후의 처리방안에 대한 명확한 의견이 제시되어야 한다.

- 조사된 유적ㆍ유물ㆍ역사ㆍ건축물 등 포괄적 문화유산의 활용방안용역 준공전 종합보고

10.6. 용역준공 전 종합보고

- 수급인은 착공일로부터 25일 전에 최종조사연구 결과를 정리한 종합보고를 실시하여야 하며 보고내용 및 방법에 대하여 감독원과 사전협의하여야 한다.

11. 협의와 조정

11.1. 본 과업을 수행하면서 분야별 연구원들은 수시로 회의를 개최하여 조사내용과 관련된 상호간의 의견을 조정하여야 한다.

11.2. 수급인은 조사내용에 대한 분야별 의견의 협의 조정시 중요사항은 감독원과 협의하여 결정한다.

11.3. 수급인은 본 과업을 수행하는데 있어 전문가 및 각계각층의 의견을 수렴하기 위하여 일반인 또는 전문가를 대상으로 설문조사를 실시할 수 있으며, 다음과 같이 워크숍, 세미나, 협의회 등을 개최할 수 있다.

11.3.1. 설문조사에 대한 세부방안은 수급인이 발주자와 협의하여 마련하며, 과업추진 진도를 감안하여 발주자가 요구할 수도 있다.

11.3.2. 조사연구수행과 관련하여 총괄 및 분야별 자문청취 등을 위한 워크숍, 세미나 등을 개최하되, 세부사항은 발주자와 협의하여 추진한다.

11.3.3. 연구의 원활한 수행을 지원하기 위해 참여기관의 장 및 관계기관과 협의회를 구성할 수 있으며, 세부사항은 발주자와 협의하여 추진한다.

11.4. 본 과업수행을 위하여 관계기관과의 협조가 필요한 경우에는 발주자에게 협조를 요청할 수 있으며, 발주자는 이를 적극 지원하여야 한다.

12. 자 문

12.1. 감독원은 과업수행중 중요한 사항의 결정을 위해 관련분야별 전문가 등에게 자문을 받도록 수급인에게 요구할 수 있으며, 수급인은 효율적인 조사연구용역 자문이 될 수 있도록 감독원이 요구하는 시기에 조사연구용역 자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

12.2. 수급인은 조사연구용역 자문결과 제시된 의견의 반영여부에 대해서 감독원과 협의하여야 하며, 자문결과를 보고서에 기술하여야 한다.

13. 자료의 사용

ㅇ 자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 자료를 적용ㆍ활용하여야 하며, 자료의 출처를 명확히 하여야 한다.

14. 용역중지

ㅇ 수급인의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독원은 용역중지를 명할 수 있다.

15. 보안 및 비밀유지

15.1. 수급인은 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

15.2. 수급인은 보안대책을 수립하여야 하며 용역착수계와 함께 수급인 보안각서와 용역참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역참여자가 교체될 시에도 또한 같다.

15.3. 용역참여자가 교체될 시에는 감독원의 승인을 받아야 하며 인계․인수 등을 철저히 하여 과업수행에 차질이 없어야 한다.

15.4. 수급인은 본 용역의 자료정리 장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

15.5. 수급인은 조사지역에 대한 기록(조사내용ㆍ사진ㆍ도면 등)을 철저히 하여 조사과정에서 출토(채집)된 유물은 도난ㆍ훼손되지 않도록 보관해야 한다.

15.6. 용역의 책임연구원은 추진 과정 중 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물이 작성될 것으로 판단된 때에는 사전에 감독원과 협의하고 업무일지를 비치하여 작업내용을 기록 유지하여야 한다.

15.7. 수급인은 필요시 착수 및 최종보고서 등 과업 성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 감독원과 협의하여야 한다.

15.8. 수급인은 과업수행 중 보안 및 안전대책에 대하여 책임을 지며, 본 과업의 고용인, 자문위원에 대해서도 이에 준한다.

15. 9. 수급인은 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며, 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

15.10. 수급인은 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 발주자의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안 된다.

15.11. 작업장에서 발생되는 원지, 파지, 잉여분 등 과업폐기물은 반드시 소각 또는 분쇄처리 하여야 한다.

15.12. 책임연구원은 과업 수행기간 중 매주 1회 용역참여자에 보안교육을 직접 실시하여야 한다.

16. 설계변경

16.1. 발주자는 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

16.1.1. 조사구역 또는 발주자의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경 될 경우

16.1.2. 관계기관 등과의 협의내용 반영을 위해 과업구역이 추가 또는 제외 될 경우

16.1.3. 수급인의 귀책사유가 아닌 용역 중지 혹은 부득이한 사유로 과업기간을 단축하거나 연장될 경우

16.2. 용역수행 과정에서 과업의 조사면적이 변경될 경우 용역비용 내역산정은 붙임근거와 같이「조성예정 예미농공단지 예정지 문화재 지표조사 내역서 산출기준」을 우선한다.

16.2.1. 과업내용 및 용역비용의 일부 조정이 필요하거나 상이하다고 인정될 경우에는 발주자와 과업수행자가 협의하여 과업지시내용 및 용역비용을 조정할 수 있다.

17. 예비준공검사

- 수급인은 용역준공 25일전까지 예비준공검사를 신청하여야 하며 감독원이 용역성과를 검토ㆍ확인하여 지적한 사항에 대해서는 용역준공시까지 조치하여야 한다.

18. 성과품(보고서 등)의 작성

18.1. 보고서 작성과정에서 과업수행자는 항상 발주자와 긴밀한 협의를 하여야 한다.

18.2. 본 과업의 목적을 달성하기 위해 취득한 현황조사 결과와 기존자료를 최대한 포함시켜 보고서를 작성하여야 하며, 기존에 연구하였거나 진행중인 연구는 이를 최대한 활용하여야 한다.

18.3. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 인쇄하고자 할 경우에는 과업수행 감독관 입회하에 정부 비밀취급인가업체에서 발간하여야 하며, 성과품에는 발간근거를 명시(업체명, 인가근거, 참여자, 발간일자)하고 원지‧폐지 등을 완전 회수‧소각하여야 한다.

18.4. 성과품 작성시 서술원칙은 다음과 같다.

18.4.1. 문장내용은 간단 명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피해야 한다.

18.4.2. 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말아야 한다.

18.4.3. 긍정문으로 알기 쉽게 서술해야 한다.

18.4.4. 정확한 문법으로 기재해야 한다.

18.4.5. 예측보다는 사실적으로 기술해야 한다.

18.4.6. 모순된 항목은 배제하여 작성한다.

18.4.7. 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용한다.

18.4.8. 정확하고 통일된 용어를 사용한다.

18.4.9. 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피한다.

18.5. 성과품 작성에 사용하는 문장구성은 다음과 같이 한다.

18.5.1. 성과품 내용에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양한다.

18.5.2. 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실하도록 사용한다.

18.5.3. 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 평이한 문장을 사용한다.

18.5.4. 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적인 구술체를 사용한다.

18.6. 성과품 작성 양식

18.6.1. 성과품의 표지 및 양식 CD제작 등은 감독원과 협의하여 작성한다.

18.6.2 보고서 작성은 사전에 원고 및 원도를 작성하여 감독원의 검사를 받은 후 인쇄 작성하여야 한다.

19. 용역준공

ㅇ 수급인은 과업기간내에 용역을 준공하고, 다음의 자료를 발주자에게 제출하여야 한다. (단, 용역준공 후 문화재 지표조사 보고서 문화재청에 제출후 보완 요청이 있을 때 수급인 부담으로 신속히 보완 제출 하여야 한다)

1. 조사용역준공계 3부 등 준공에 필요한 관련 서류

2. 문화유산 활용방안이 포함된 조사보고서(정선군의 간행물임을 명시해야 함)는 발간부수 10부

3. 조사구역내 유적현황 (1/50,000 원본 도면상에 지표조사 범위와 주변문화재 분포현황 및 유적의 위치표기, 1/5,000 원본 도면상에 유적의 위치 및 범위 표기) 각 3부(조사보고서 포함 외 별도)

4. 조사보고서가 기록된 저장매체(CD 또는 디스켓)

5. 조사현황 및 조사유물에 대한 사진자료(슬라이드ㆍ칼라ㆍ디지탈사진첩등) 각 3부

20. 성과품의 소유와 사용

20.1. 과업수행 과정에서 생산된 조사자료ㆍ도면ㆍ사진 및 보고서 등 일체와 용역성과품에 대한 판권 등 모든 권리와 과업수행을 위해 구입한 각종 자료 등은 발주자가 소유한다.

20.2. 수급인은 용역수행 과정중에 취득한 조사자료를 상업적 목적 이외의 용도로 사용하고자 할 경우에 한하여 발주자의 승인을 득한 후 이를 사용하거나 대여할 수 있다.

21. 기  타

ㅇ 제비용은 준공 전에 관련 증빙 서류를 첨부하여 정산한다.

보  안  각  서

(수급인용)

본인은     년   월    일 정선군과 계약체결 한 ‘에미농공단지조성 예정지 문화재지표조사용역’을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 용역수행전에 용역참여자에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 용역시행부서에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 당 기관의 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 의거 처벌받음은 물론 기관에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않

년    월    일

소속 :                     직위 :

성명 :                       (인)

( 계약시 사용인장을 사용할 것 )

정선군수  귀하

보  안  각  서

(용역참여자용)

본인은    년   월   일 정선군과 계약체결 한 ‘예미농공단지 조성 예정지 문화재지표조사용역’을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 제법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

년    월    일

소속 :                          직위 :

성명 :                       (인)

( 계약시 사용인장을 사용할 것 )

정선군수 귀하