고한종합복지센터 부지조성공사 통합책임감리용역

설계설명서 및 과업지시서

2007. 5.

담당자	담 당	과 장

정 선 군

목     차

Ⅰ. 용역설계설명서	1
Ⅱ. 일반과업지시서	2
Ⅲ. 특별과업지시서	9
Ⅳ. 보안 및 기타유의사항	42
Ⅴ. 감리내역서	43

Ⅰ. 설계설명서

1. 목 적

본 과업은 고한종합복지센터 부지조성공사 통합책임감리용역으로서 건설기술관리법(이하 건기법이라 한다)제27조 규정에 따라 발주기관장의 권한을 대행하여 공사의 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 성실히 수행토록 하여 품질관리, 공사관리 및 안전관리 등에 향상을 도모하고자 함.

2. 과업의 범위

1) 용 역 명 :

- 고한종합복지센터 부지조성공사 통합책임감리용역

2) 위    치 :

- 정선군 고한읍 고한리 80-4번지 일원

3) 사업개요

- 부지조성공사  :  1식

- 교량가설공사  :  1식

- 사면보강공사  :  1식

4) 용역비 :

- 일금일억오천오백이만삼천원정(￦155,023,000)

5) 용역기간 :

- 착수일로부터 6개월로 한다.

Ⅱ. 일반과업지시서

1. 책임감리를 수행함에 있어 본 공사의 설계도서 감리업무수행지침서, 감리과업지시서와 아래의 각종 시방서 및 규정에 의하여 수행할 수 있도록 사무실에 비치하여 이를 충분히 숙지하고 철저히 이행하여야 한다.

1) 도로의 구조, 시설기준에 관한 규칙

2) 건설교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

∙ 토목공사 일반 표준시방서

∙ 도로공사 표준시방서

∙ 도로교 표준시방서

∙ 도로포장 설계 및 시공지침

∙ 콘크리트 표준시방서

∙ 구조물 기초 설계기준

∙ 터널 표준시방서

∙ 아스팔트포장 설계․시공 요령

∙ 도로 설계기준

3) 건설공사관련 법령 및 규정(건기법, 도로법, 도시계획법 등)

4) 한국산업규격(KS)

5) 건설공사 품질 및 규격관리실무 편람

6) 환경․교통․재해 등에 관한 영향평가법

7) 산업안전보건법

8) 기타 건설공사에 관한 법령 및 규정

9) 발주기관의 설계 및 시공에 관한 지시사항

10) 장대교가 포함된 시공임으로 감리원은 이를 숙지하고 감리업무를 성실히 수행하고 건설공사의 품질향상에 적극 노력해야 한다.

2. 감리원의 기본업무

“감리원”은 건기법 제27조에 따라 발주기관의 장의 공사감독업무를 대행하며 발주기관의 장에게 고용 또는 예속되지 아니하고 감리계약에 의해 독립적으로 그 업무를 성실히 수행하고 건설공사의 품질향상에 노력하여야 한다.

3. 감리원의 직위

1) 감리업무를 수행함에 있어 감리원은 발주기관의 장에게 고용 또는 예속되지 아니하며, 발주기관의 장과의 계약에 의하여 독립적으로 발주기관의 장의 감독업무를 대행하게 된다.

2) 감리원은 당해 공사가 설계도서 및 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 안전관리 및 공정관리 등에 대한 기술지도를 하며, 발주기관의 장의 위탁에 의하여 건설기술관리법령에 따라 발주기관의 장의 감독권한을 대행하게 된다.

3) 감리원의 업무자세

감리업무에 종사하는 자는 그 업무를 성실하게 수행하고, 건설공사의 품질향상에 노력하며, 감리원으로서의 품위를 유지하여야 한다.

(1) 감리원은 법률과 이에 따른 명령, 공공복리에 어긋나는 어떠한 행위도 하지 않으며 신의와 성실로서 업무에 임한다.

(2) 감리원은 품위를 손상하는 행위를 하여서는 안 된다.

(3) 감리원은 담당업무와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 안 된다.

(4) 감리원은 공사감리를 수행함에 있어서 성실, 친절, 공정, 청렴결백하게 업무를 수행하여야 한다.

(5) 감리원은 건설공사의 품질향상을 위하여 기술개발 및 보급에 전력한다.

4) 감리원의 근무지침

(1) 감리원은 감리업무를 수행함에 있어서 당해 공사의 공사계약문서, 감리과업지시서, 기타 관계규정 등의 내용을 숙지하고 당해 공사의 특수성을 파악한 후 감리에 임해야 하며, 보상관련 업무에 있어 업무담당관을 최대한 보좌하여야 한다.

(2) 감리원은 당해 공사가 공사계약문서, 공정계획표, 발주기관의 장의 지시사항 등 기타 관계규정 내용대로 시공되는가를 공사시행시 수시로 입회하고 공정 단계별로 시기를 적절하게 확인, 검측하여 엄격한 품질관리에 임해야 하고 기타 시공자에게 품질, 시공, 안전, 공정관리 등에 대한 감리수행을 하고 확인하여야 한다.

(3) 감리원은 시공자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경시키거나 기일연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 아니 된다.

(4) 감리원은 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공에 관련한 중요한 변경 및 산과 관련되는 사항에 대하여는 수시로 발주기관의 장에게 보고하고 그 지시를 받아 업무를 수행한다.

다만, 인명손실이나 시설물의 안전에 위험이 예상되는 사태가 발생할시에는 먼저 적절한 조치를 취한 후 즉시 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

(5) 감리전문회사 대표자 및 감리원은 당해 공사시행중인 물론 공사가 종료된라도 감사기관의 수감요구가 있을 경우에는 이에 응하여야 하며, 감리업무 수행과 관련하여 발생된 사고 또는 피해발생으로 피해자가 소송제기시 국가지정 소송업무에 대하여 적극 협력하여야 한다.

5) 비상주감리원의 업무범위

감리전문회사의 본사 등에 근무하면서 현장 상주감리원의 업무를 지원하는 비상주감리원의 업무범위는 다음과 같다.

(1) 설계도서 등의 검토

(2) 현장감리원의 능력범위를 벗어난 현장 시공상의 문제점에 대한 기술검토와 민원사항에 현지조사 및 해결방안 검토

(3) 중요한 설계변경에 대한 기술검토

(4) 설계변경 및 계약금액 조정의 심사

(5) 기성 및 준공검사

(6) 정기적(분기 또는 반기별)으로 현장 시공상태를 종합적으로 점검, 확인, 평가하고 기술지도하여야 하며 필요시 비상주감리원 중 1인이상이 현장을 점검하여야 한다.

(7) 기타 감리업무 추진에 필요한 지원업무

4. 감리업무 절차 및 운영

1) 절차

가) 책임감리원은 비상주감리원 및 보조감리원의 개인별 업무분담 내용에 따라 업무수행계획을 수립하고 다음 절차에 의거 과업을 수행토록 하여야 한다.

								∙일일감리계획수립(책임감리원) ∙현장감리원별 수행업무 지정, 지사사항 시달 ∙지정된 업무에 대한 시공 및 품질관리계획 등의 검토 ∙착안 사항 준비 및 지시사항 숙지
			일일감리계획수립
								※ 사전준비 : 설계도서의 숙지, 시공법 및 관련 작업 내용 파악, 검측요령 작성
								∙시공 상태 확인 ∙시험실시 입회 및 성과확인 ∙각종 검측 등 지정업무 수행 ∙지적사항 시정조치 결과 확인 등 ∙일일업무 수행일지, 감독일지, 자재수불부 정리 등
			감 리 원
비상주감리원
현장조사분석 주요구조물의 기술적 검토 기성 및 준공검사 행정지원업무 등								※ 주요구조물은 전 공종 비디오 촬영기록
								∙당일 수행업무 분석 및 평가 ∙문제점 토의 및 시정 등
			일 일 평 가
								※ 현장대리인, 업무담당관과 합동회의 실시결과는 월간보고서에 수록 제출
								∙부실공사 방지대책 토의 ∙품질 및 안전관리 사항 ∙공사추진계획 및 실적 ∙공사추진 저해요인 분석 ∙지시사항에 대한 이행상태 ∙기타 문제점, 애로 및 건의사항
			주 간 평 가

2) 운영

(1) 승인된 감리원은 업무의 연속성, 효율성 등을 고려하여 특별한 사유가 없는 한 감리용역 완료 시까지 근무토록 하여야 하며 교체가 필요한 경우에는 교체사유를 명시하여 발주기관의 장의 사전 승인을 받아야 한다.

(2) 감리단의 조직은 공사담당과 품질담당으로 현장여건에 따라 구성토록 하여 감리업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 하여야 한다.

			감리전문회사 대표자
비상주감리원
‧ 기술검토 ‧ 기성, 준공검토
			책 임 감 리 원				‧ 감리업무 총괄
	공 사 담 당						품 질 담 당
	‧ 시공 및 안전관리 ‧ 공사행정 업무보조						‧ 품질관리 담당 ‧ 품질보조

(3) 책임감리원은 보조감리원에게 개인별로 업무를 분담하고 분담 내용에 따라 업무수행계획을 수립하여 과업을 수행토록 하고 매일 감리업무의 추진계획 및 실적이 기록된 개인별 일지를 취합하여, 그 내용을 점검하고 이를 비치하여야 하며 준공시에는 발주기관의 장에게 제출하여야 한다.

(4) 감리원은 업무계획을 수립, 운영하고 특히 엄격한 품질관리를 위하여 공사단계별 품질시험을 철저히 시행해야 하며, 미시행 또는 불합격일 경우 즉시 시정토록 하고 그 구간에는 재시공을 실시하여 시정이 완료될 때까지 후속 공사를 시켜서는 안 된다.

(5) 감리원의 구성은 과업지시서에 기술된 과업내용에 의거 관련분야 기술자격자 또는 학력, 경력을 갖춘 자로 구성하고 공사발주 초기에 보상 등이 지연되거나 민원발생 등으로 공사추진이 원활치 않을 경우와 동절기 공사중지기간, 해빙기로 인하여 공사진척이 잘 안되는 경우 및 공종이 단조로워질 때 등을 고려하여 추가 공종과 공사진행 상태에 따라 발주기관의 장과 협의하여 인력을 탄력적으로 조정하여야 한다.

(6) 각 감리원이 작성 비치하여야 할 일지에는 다음 내용 등이 수록되어야 한다

가. 일일 감리업무 수행내용

- 주요 구조물 등의 검측 결과, 지적사항 및 시정조치사항

나. 시공과정에서의 문제점과 이의 해결방법 등 시공에 대한 전반적이 자체 평가서

다. 민원사항 접수, 처리 및 조치계획

라. 공사추진중에 발생된 실패 사례를 육하원칙에 따라 상세히 기록하고 개선 결과도 상세하게 기록, 작성

마. 품질관리시험 실시, 지도 및 시험성과에 관한 검토 확인

바. 재해예방대책 및 안전관리의 지도

사. 하도급에 대한 타당성 검토

아. 용지보상 지원 및 민원사항 해결을 위한 업무수행

자. 기타 주요 감독업무 수행사항

(7) 발주기관의 자문요구

가. 발주기관은 당해 공사와 관련하여 공법의 변경, 특수공법 등에 대한 기술적인 자문을 요구할 수 있으며, 이 경우 감리전문회사는 필히 자문에 응하여야 한다

나. 감리원은 발주기관의 장이 요구하는 중요한 사항에 대하여 본사 지원반을 운영 자문하여야 하며, 검토가 불가능하여 제3자에게 의뢰해야 하는 전문성을 요하는 자문은 발주기관과 협의하여 국내외 전문가에게 자문을 받아 의견을 제시하여야 한다.

5. 상주감리원의 현장근무 수칙

1) 상주감리원은 공사현장(공사와 관련한 외부 현장점검, 확인 등 포함)에 상주하여야 하며 업무 또는 부득이한 사유로 1일이상 현장을 이탈하는 경우에는 반드시 근무 상황부에 이를 기록하여야 하며, 책임감리원인 경우에는 발주기관의 장 또는 지원업무수행자의 확인(부재시 유선보고)을 받아야 한다.

2) 상주감리원은 감리사무실 출입구 부근에 부착한 근무 상황판에 당일 현장 근무위치 및 업무내용 등을 기록하여야 한다.

3) 감리전문회사는 감리업무에 종사하는 감리원이 감리업무 수행기간중 건기법에 의한 교육이나 민방위기본법 또는 향토예비군 설치법에 의한 교육을 받는 경우나 근로기준법에 다른 유급 휴가로 현장을 이탈하게 되는 경우에는 감리업무에 지장이 없도록 직무대행자 지정 및 업무인계인수 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

4) 상주감리원의 근무는 근로기준법에 준하여 근무토록 하며 공사추진에 지장이 없도록 하기 위하여 발주기관의 요청이 있을 경우 요청내용에 따라 초과근무를 하여야 하며, 시공자의 요청이 있을 경우에는 발주기관의 승인을 받아 초과근무를 하여야 한다. 이 경우 대가지급은 건설공사 감리대가 기준에 따른다.

6. 감리용역 계약자는 계약체결후 10일이내에 착공신고서와 다음의 감리수행계획 내용 등이 첨부된 예정공정표, 수석감리원 사용인감계, 감리원 서약서, 보안각서, 기타사항을 작성 지원업무수행자를 경유하여 발주기관에 제출하여야 한다.

1) 과업수행계획 및 월별 세부감리계획

가. 공사의 품질, 규격 및 공정관리 등에 대한 주간․월간 감리업무 수행계획을 수립 비치하여야 한다.

나. 주간․월간 감리업무 수행계획은 각 현장 감리원별로 작성하여야 한다.

다. 일일 감리업무는 주간․월간 감리업무 수행계획에 의거 철저히 수행하여야 한다.

2) 비상주 감리원은 본사 지원반 운영체계 및 기타 필요한 사업

3) 건기법 시행령 제6조 및 규칙 제2조의 규정에 의한 현장 감리원이 건설기술자 경력사항 확인서

4) 건기법 제21조의 규정에 의한 용역사업 수행능력평가시 제출된 참여기술자로 제출하여야 한다.

7. 일반과업 지시서의 내용과 특별과업지시서의 내용이 상이할 경우에는 특별과업 지시서가 우선한다.

8. 일반 및 특별과업지시서에 명기된 내용이외에 정밀공사 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주기관의 장과 협의하여 시행하여야 한다.

Ⅲ. 특별과업지시서

1. 감리용역기간 : 감리 착수일로부터 본 공사의 준공검사 완료일까지 6개월로 한다.

2. 설계변경조건

1) 감리기간 및 책임감리의 중단 등으로 감리기간이 증․감 되었을 때

2) 감리 업무량에 따라 감리원 수 증․감이나 등급 변경이 있을 때

3) 제경비 및 기술료는 직접인건비 증․감에 따라 정산한다.

4) 직접경비는 당해 업무 수행에 필요한 감리원의 현지근무 수당, 숙박비 및 현지 운영 등에 필요한 아래 비용을 포함하며 계상기준은 건설공사 감리대가기준에 따른다.

5) 야간 및 휴일근무 등으로 감리원의 근무일수에 변경이 있을 때

6) 기타 발주기관의 사정에 의한 예산의 증․감 등 정당한 사유가 발생되었을 때

3. 감리원의 배치기준

1) 감리용역 수급자는 본 감리용역의 입찰참가 자격심사시 입찰참가 제안서에 명시된 자로 참여하여야 하며, 만약 불가피한 경우에는 자격 및 해당분야 경력이 그 이상이거나 동등한 자로 하여 발주기관의 장의 승인을 득하여야 하며, 본 사업의 특성을 감안하여 감리업무를 책임감 있게 수행하고 모든 분야에서 책임감리를 완수할 수 있는 능력과 자격을 갖춘 자로서 감리수행 능력이 우수한 다음과 같은 기술자를 현장에 배치하여 특별한 사유가 없는 한 감리용역 완료시까지 근무토록 하여야 하며, 감리수행중 부적격 사유가 발생하여 발주기관의 장이 교체를 명할 때에는 이에 응하여야 하고, 감리전문회사의 사정에 의하여 감리원을 교체하고자 할 경우에는 동등이상의 기술자격, 경력 등을 종합적으로 검토하여 감리업무수행 능력이 저하되지 않는 범위내에서 필히 발주기관의 장의 사전승인을 득하여야 한다.

단, 감리회사의 사정이나 발주기관의 장의 교체 요청에 따라 입찰참가 제안서에 명시된 자 또는 승인된 감리원이 교체된 경우에는 다음의 책임감리용역 입찰시 감점대상이 된다.

가. 수석감리사(감리총괄)

건기법 시행규칙 제34조의2, 책임감리원의 경력기준 이상인 자

나. 감리사 : 별표1의 자격기준 이상인 자

다. 감리사보 : 별표1의 자격기준 이상인 자

※ 다만 사업수행능력 평가시 참여감리원중 자격평가만 실시한 감리원에 대하여는 발주기관장의 승인을 득하여야 한다.

라. 비상주감리원 : 현장감리업무의 지원

감리사 자격이상의 자로서 도로 및 공항, 토목구조, 토질 및 기초기술사 자격보유자(사업수행능력 평가기준 참고)

2) 책임감리원을 포함한 총 감리수행중 90%이상 현장상주 감리하여야 하며 비상주 감리원은 상주감리원으로 동시에 배치할 수 없고 원활한 감리수행을 위하여 현지 사무원 1인이 상주하여야 한다.

3) 상주감리원의 배치는 발주기관의 사전승인을 받아야 하며, 발주기관의 장은 현장 여건에 맞추어 감리원의 현장 상주감리원 및 감리원 자격등급과 인․월을 조정할 수 있다.

4. 세부수행 업무

1) 현장 착임시 업무연락처, 감리수행계획 및 설계도서 검토내용 보고

(1) 감리원은 현장에 착임하는 즉시 현장사무소, 숙소 또는 비상연락처의 전화번호 및 FAX, 우편연락처 등을 발주기관에 보고하여 업무연락에 차질이 없도록 하여야 하며, 변경되었을 경우에도 즉시 보고하여야 한다.

(2) 감리원은 해당 공사 시행전에 설계도서의 구조적 안전성, 시공성 등에 대한 적정 여부를 검토하여 공사계약문서 등의 상호 모순되는 사항 및 현장  실정과의 부합여부 등을 검토하여 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

(3) 도면과 시방서가 상이할 경우에는 발주기관의 장과 별도 협의하여 시공하여야 하며, 착공후 시공자로 하여금 공사세부시공 계획서를 작성, 제출케 하고 각 공종을 시작할 때마다 해당 공종에 대하여 구체적인 품질 확보 방안이 포함된 시공계획을 제출하게 하여 이를 감리원의 승인을 득한 후 시공토록 하여야 한다.

2) 사무실 및 서류등의 보관

(1) 발주기관 또는 시공자가 제공하는 감리사무실은 공사규모 및 현장실정에 부합되도록 업무용 사무실과 상황실, 숙소를 발기관과 협의하여 감리업무에 지장이 없도록 설치하고, 시험실은 가급적 감리원 사무실 옆에 배치토록 하여 효율적인 업무추진이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

현장의 중요도 또는 위험도에 따라 제한구역 및 통제구역을 설정하고 출입자를 철저히 단속하도록 하여야 한다

가. 상 황 실             : 제한구역

나. 감리사무실 및 시험실 : 제한구역

다. 현장사무실 부지      : 제한구역

(2) 현장사무실 부지 입구에 출입자를 통제할 수 있는 시설을 시공자에게 설치토록 하고, 제한구역 및 제한지역내의 출입자에 대해서는 직업, 성명, 방문목적, 시간 등을 기록, 비치토록 하여야 한다.

(3) 감리원 사무실에는 각종 사무용집기 및 감리업무에 지장이 없도록 비치하고 설계도서 보관함, 서류함 및 캐비넷에는 정․부책임자의 명패를 부착하고 관리하여야 한다.

(4) 감리원은 착공과 동시에 공사설계도서 및 자료, 공사계약문서 등을 발주기관으로부터 인수하여 관리번호를 부여하고, 관리대장을 작성하여 공사관계자외의 유출을 방지하는 등 관리를 철저히 하여야 하며, 외부유출시 업무담당관의 승인을 받아야 한다.

(5) 케비넷등에 보관된 설계도서 및 관리서류의 명세서를 기록하여 내측에 부착하여야 한다.

(6) 설계도서는 반드시 도면 보관함에 보관하며 관계자외에는 열람, 차용 등을 금지하여야 한다. 설계도서에는 필히 우측 상단에 관리번호를 부여하여 관리하여야 한다.

“예”	1 ～ 20 20

※ 윗숫자는 관리번호, 아래숫자는 총생산 부수

(7) 시공자는 차용하여 간 설계도서도 필히 상기 요령에 의거 보관하여야 한다.

(8) 감리원은 공사완료 후 인수할 설계도서는 발주기관의 장에게 반납하거나 지시에 따라 폐기 처분한다.

3) 공사안내표지판 및 각종 표지판 제작설치

(1) 감리원은 공사착수 이전에 공사안내 표지판을 제작 설치하도록 하여야 하며, 기타 성실시공 등 공사와 관련된 표지판을 지원업무수행자와 협의하여 제작, 설치하도록 하여야 한다.

(2) 도로부대시설(차선도색, 교통표지판 등) 설치전 상세도면을 작성토록 하여 발주기관의 장에게 제출하여야 한다.

(3) 시설물의 안전을 확보하기 위한 점검시설, 교통신호등, 도로표지판 교통안전시설 등의 중요도가 높아짐에 따라 종합적이고 구체적인 내용을 검토하여야 한다.

(4) 도로표지판은 주로 연계성 결여로 이용자들이 불편을 겪게 되므로, 도로표지판의 위치선정 및 우선 도상의 노선에 표지판의 위치 등을 기재하여 도상에서 검토한 다음 실제로 현장을 조사한 후 적정성 여부를 확인한 후 전문가 등의 자문을 받아 결정하여야 한다.

4) 용지도 및 조서작성과 지장물 및 용지경계 표지 등 확인

(1) 감리원은 분할 용지도에 의한 용지경계 설정을 확인하고 수급자로 하여금 경계표시를 설치하게 하여야 한다.

(2) 분할용지도, 용지조서 및 지장물 조서 등을 활용, 현지를 재확인하여 공사추진에 지장이 없도록 당해 연도 시공구간에 대한 기공승락징구 등 보상협의를 지원 및 협조하여야 한다

(3) 편입용지 보상협의 유무와 지장물 철거 및 이설확인 등을 철저히 파악하여 공사추진 장해요소를 사전 해소하여야 한다.

(4) 공사중 지하매설물 등 새로운 지장물 발견시에는 수급자로부터 상세한 내용을 제출받아 이를 확인한 후 발주기관의 장에게 조속히 보고하여야 한다.

5) 사업관련 인․허가 서류 등 작성

(1) 본 사업시행을 위한 각종 법령에 의한 협의서류를 검토, 확인 및 작성 제출하여야 한다.

가. 산림법 제62조 및 제90조의 규정에 의한 벌채 등의 허가

나. 사방사업법 제14조의 규정에 의한 임죽목의 벌채 등의 허가

다. 도시계획법 제4조의 규정에 의한 행위의 허가, 동법제12조의 규정에 의한 도시계획의 결정, 동법 제20조의 제2 제4항의 규정에 의한 시가화조정구역안에서 행위의 허가, 동법 제25조의 규정에 의한 도시계획사업 실시계획의 허가

라. 농지의 보전과 이용에 관한 법률 제4조의 규정에 의한 농지전용의 허가, 동법 제5조의 규정에 의한 농지전용의 협의․동의 또는 승인

라. 초지법 제23조의 규정에 의한 초지전용의 허가

마. 농지확대개발촉진법 제8조의 규정에 의한 행위의 허가

바. 군사시설보호법 제7조의 규정에 의한 협의

(2) 도시계획법 제21조, 동법시행령 제20조의 규정에 의거 개발제한구역내에서의 행위제한 협의등

(3) 기타 관련법에 의해 공사수행과 관련한 인․허가 및 관계기관의 협의 필요한 서류를 관계법 규정에 의거 검토․확인․작성 제출하여야 한다.

6) 측점표기 및 구조물위치 표지판 설치

(1) 확인측량 및 중심점 말뚝 측량이 완료되면 매측점마다 측점표기를 하고 절토부 성토부에 각 측점마다 토공규준틀을 설치하여야 한다.

(2) 지하차도부의 암거 및 옹벽구간 시종점에는 구조물의 위치를 알 수 있도록 표지판을 설치토록 하여야 한다.

7) 확인측량 실시

(1) 감리원은 착공과 동시에 시공자로 하여금 발주 설계도와 실제 현장의 이상유무를 확인하는 확인측량을 조속히 실시토록 하여야 한다.

가. 삼각점 또는 도근점에서 중간점(IP)등의 측량기준점의 위치(좌표)를 확인하고 기준점은 공사시 유실방지를 위하여 필히 인조점을 설치하여야 하며, 시공중에도 활용할 수 있도록 인조점과 기준점과의 관계를 도면화하여 비치하여야 한다.

나. 공사준공까지 보존할 수 있는 가수준점(TBM)을 시공이 편리한 위치에 설치하고 국립지리원에서 설치한 주변의 수준점으로부터 2Km내외 구간마다 왕복 수준측량을 실시하여 왕복허용 오차 7.5√S(mm) (s=수준측량의 편도거리 Km)이내일 경우에 이를 보정하여 TBM의 표고를 결정한 후 이를 활용하여 수준측량을 실시한다.

다. 평판측량은 주변 지세를 알 수 있도록 도로폭의 2배정도 좌우로 실시하여야 한다.

라. 횡단측량은 부지경계선으로부터 주변지형을 알 수 있는 범위까지 측량하여야 하며, 종단이 급변하는 지점(+측점)에 대하여도 필히 실시하여 도면화 하여야 한다.

마. 절취면에 암이 노출되어 있는 경우는 필히 토사, 리핑암, 발파암 등의 경계지점을 정확히 측정하여 횡단면도에 표기하여야 한다.

바. 인접공구 또는 기준시설과의 접속부 등을 상호 확인하고 측량결과를 교환하여 이상유무를 확인하여야 한다.

(2) 감리원은 사전 설계도서를 숙지하고 확인측량시 입회, 확인하여야 하며 필요시 실시설계 용역회사 대표자의 위임장을 지참한 임직원 등과 합동으로 이상유무를 확인토록 하여야 한다.

8) 유관자 합동회의 실시

(1) 감리원은 지원업무수행자와 합동으로 다음 각호의 사항에 대하여 시공전에 유관자 합동회의를 실시하고 이를 조정 또는 변경여부를 검토하여 사후에 민원 등이 야기되지 않도록 하여야 한다.

가. 전력 및 통신간선 시설

나. 급수간선 시설

다. 도시가스배관

라. 배수관 및 암거 등의 규격, 위치

마. 방음벽, 육교, 지하통로, 버스정차장 등 지역 편의시설

(2) 감리원과 시공자는 유관자 합동회의를 실시하기 전에 현장을 정밀하게 조사하고, 설계도서 등을 숙지하여 그 내용을 유관자에게 설명하여야 한다.

(3) 유관자 합동회의 결과 설계변경이 필요하거나 추가 구조물 설치 등의 건의사항이 타당하면 설계변경 절차에 의거 처리하여야 한다.

9) 사토장 및 골재원 등의 선정 및 결과보고

(1) 감리원은 착공 즉시 설계시 선정된 사토장 및 골재원에 대한 사용 적합여부 허가가능 여부 및 경제적, 환경적인 장소 등을 조사 분석하여야 하고 위치가 설계시 선정된 장소와 상이할 경우에는 발주기관의 장에게 골재원 및 사토 등의 가능량과 운반거리, 현지여건 등 필요한 자료들을 첨부토록 하여 결과보고 하여야 한다.

(2) 땅깍기 작업에서 발생한 재료중 흙쌓기에 부적합하거나 유용하고 남은 재료는 설계도서 지시에 따라 사토 처리하여야 한다.

(3) 지정된 사토장의 위치를 변경코자 할 때에는 사토운반 시작전에 발주기관의  승인을 받아야 한다.

10) 건기법 제24조, 동법시행령 제42조 및 동법시행규칙 제17조에 의한 품질시험 실시계획은 공사 수급자로부터 세부추진계획(전체분 및 당해연도분)을 제출받아 공종별로 검토하여 발주기관에 제출하여야 한다.

(1) 선정시험

가. 각종 토취장, 골재원, 석산에서 대표시료를 채취하여 선정시험을 실시한 결과가 시방규정에 부합 되는지의 여부를 확인하고 여러재료를 제시한 후 주변 여건 등을 고려하여 발주기관의 장과 협의하여 결정한다.

나. 착공 20일 이내에 선정시험 계획서를 작성 제출토록 하여야 한다.

다. 설계변경으로 시험회수가 변경될 경우에는 즉시 변경계획서를 제출토록 하여야 한다.

라. 선정시험을 실시하기 이전에 시공을 하지 않도록 하여야 한다.

마. 현지여건을 고려한 여러개의 보조기층 또는 기층, 표층 입도중 어느것을 실제 사용할 것인가에 대한 여부는 발주기관의 장과 협의하여 결정한다.

(2) 관리시험

가. 착공 20일내에 관리시험 계획서를 작성 제출토록 하여야 한다.

나. 설계변경으로 관리시험 회수가 변경될 경우는 변경 즉시 관리시험 변경계획서를 제출토록 하여야 한다.

다. 수석감리원은 당일 시행한 각종 관리시험 성과를 당일 확인하고 품질시험 미이행 또는 불합격된 구간의 시정여부를 확인하여 익일작업 시행여부를 결정하여야 한다.

(3) 공사수급자의 시험 담당직원의 선임 및 시험장비 비치

가. 공사수급자가 제출한 품질시험 직원의 자격증 소지여부, 도로분야 시험업무 수행경력 등을 면밀히 검토하여 당해 공사의 품질관리업무를 원활히 수행할 수 있는지에 대하여 검토 후 발주기관의 장에게 제출하여야 한다.

나. 감리원은 현장품질시험을 철저히 시행하기 위하여 시험장비 및 시험요원을 필히 현장시험실에 비치 및 배치토록 하여야 하며, 그 계획 및 결과를 공사착공 20일 이내에 제출토록 하여야 한다.

다. 공사수급자의 현장시험 담당직원 및 시공에 따라 필요한 시험기구가 현장에 배치 및 비치되기 전에는 시공을 하지 않도록 하여야 한다.

라. 각종 시험기기는 소정기간내에 검정하여야 하고 검정필증 및 검증결과에 의한 보정치를 당해 시험기기 상단부위에 잘 보이도록 부착하여야 한다.

11) 각종 운반거리 확인

(1) 감리원은 골재원, 사토장에서 본선까지의 운반거리 및 현장내의 운반거리를 측정한 후 본선과의 연관 약도 등을 작성하여 결과 보고하여야 한다.

(2) 철근 등 한 장소에 집중 보관 관리하여야 하는 주요자재의 운반거리는 현장 보관 장소와 관리장소까지의 운반거리 및 보관장소와 작업현장까지의 현장 평균운반 거리를 별도 측정하여 결과 보고하여야 한다.

12) 소요장비 협의결정 및 투입촉구

감리원 착공계 제출시의 장비투입계획서의 상의 장비의 규격, 투입시기 등에 대한 적정성 여부를 면밀히 검토하여야 하며 부정정할 경우에는 장비투입계획의 조정등 필요한 조치를 취하여야 하며, 또한 필요한 장비를 조속 투입토록 하여야 한다.

13) 도로유지관리

(1) 감리원은 공사기간중 차량 등이 원활히 통행할 수 있도록 기존 도로 및 기존 구조물에 대한 일상점검을 실시하는 등 유지관리를 철저히 하도록 하여야 하며, 이상을 발견시는 즉시 조치하고 그 결과를 발주기관의 장에게 보고하여야 한다. 특히 확장하는 구간에 노반불량으로 통행이 불통되는 사례가 없도록 하고, 특히 강우시는 필히 도로를 점검하여 차량통행에 지장이 없도록 모든 조치를 취하여야 한다.

(2) 감리원은 교량 등 주요구조물의 보수, 보강이 필요할 때에는 이에 대한 대책을 비상주감리원으로 하여금 검토 보고토록 하여야 한다.

14) 금일작업계획 및 명일작업계획서 확인, 검토와 감리일지 및 자재수불부 등의 정리

(1) 감리원은 수급자로부터 금일작업 실적서를 제출받아 현장대리인, 공무담당자, 자재담당자, 시험실장 및 노무담당자 등 관계직원 합동으로 금일작업에 대한 실적 확인을 하고 시공결과 잘못 시공한 것에 대한 문제점 지적 및 재시공등의 지시와 이러한 문제점이 재발되지 않도록 하는 대책협의 및 공사추진상 필요한 공사회의를 실시하고 그 회의결과를 기록 유지하여야 한다.

(2) 감리원은 수급자로부터 작업일지를 제출받아 금일작업 실적과 사용자재량, 품질관리시험회수 및 성과 등이 삼위일체가 되는지의 여부를 확인하고 명일작업 계획량에 대한 사전관리시험계획과 자재사용 계획의 일치여부를 검토 확인하여야 한다.

(3) 금일 작업실적서를 확인, 점검할 때는 필히 품질관리시험 실시여부와 그 성과를 확인하여야 한다.

(4) 당일 작업량, 자재사용량, 관리시험 시행 등을 확인하고 모두 일치되면 금일작업 실적서에 기재된 작업과 자재사용량을 각각 감독일지 및 주요자재 수불부에 기록 정리하여야 한다.

(5) 명일 작업계획서를 징구할 때에는 상기 관계자와 필히 그 시행상의 가능성 및 각자가 수행하여야할 사항에 대하여 철저히 협의 검토하여야 한다.

(6) 자재담당자에게 자재불출 상황과 작업종료후 사용량 및 잔량유무의 점검을 철저히 하도록 지시하여야 한다.

(7) 명일 작업계획서에 의하여 당일 작업이 시행되었는지는 일과후 필히 점검, 확인하여야 한다.

(8) 감리원은 감리업무수행중 생산된 모든 문서에 대해서는 준공후 발주기관의 장에게 인계하여야 한다.

15) 자재공급원 승인 검토제출

(1) 사급자재인 흄관, 보조기층, 경계석 등 주요자재를 공급원 승인대상으로 한다.

(2) 레미콘, 아스콘의 공급원 승인 신청시에는 생산공장에서 저장한 골재의 품질 즉입도, 마모율, 조립률, 염분 함유량 등에 대한 품질시험을 직접 실시하거나 발주기관에 의뢰 실시하여 합격여부를 판단하여야 하며 공급원의 일일생산량, 기계의 성능, 각종 계기의 정상적인 작동유무, 사용재료의 골재원 확보여부, 동일골재(품질, 형상등)로 지속적인 사용가능 여부, 현장도착 소요시간 등에 대하여 사전에 충분히 조사하여 공사기간중 지속적인 품질관리에 지장이 없도록 하여야 한다.

(3) 흄관 등 기성제품에 대하여는 KS 규격품을 사용하여야 한다.

(4) 공급원 승인후 반입사용자재에 대한 품질관리시험 및 품질변화 여부 등에 대하여도 수시 확인하여야 한다.

(5) 공급원 승인요청은 2개 이상의 공급원을 제출 및 승인받아 제품의 생산중지등 부득이한 경우에도 예비적으로 사용할 수 있도록 하여 공사 및 품질관리에 지장이 없도록 하여야 한다.

(6) 각종 재료, 품질 등은 자체 생산시와 동일하게 충족되어야 한다.

(7) 공급원 승인을 득한 후 구매 사용하여야 한다.

(8) 공급원 승인시는 업체, 생산공장의 계약조건, 사후 품질관리 방법 등을 확보하기 위하여 필히 다음 사항 등이 첨부되어야 한다.

- 감리자, 업체, 생산공장 합동으로 배합설계 실시

- 조골재의 형상변화(당초 강자갈→쇄석골재), 세골재의 조립률 변화 또는 골재원이 변경될 때 배합설계를 재실시

- 수시, 정기점검 결과 시정, 보완이 있을 시는 즉시 이에 응할 것

- 필히 염분측정기기를 비치하고 매일 측정하고 그 결과를 기록 비치

- 아스콘 운반중 온도저하를 방지 할 수 있는 구체적인 보완방법을 명시하고 이를 준수할 것 (특히 동절기)

- 레미콘 운반도중 슬럼프 저하방지를 위한 구체적인 방법을 선택

- 레미콘 운반시간(생산, 타설시간 감안)을 필히 준수하고 시간이 초과되었을 경우에는 비록 슬럼프치 저하가 없더라도 감리자는 필히 반환조치 지시를 하여야 한다.

- 운반과정에서 가수할 경우에는 이유 여하를 불문하고 반환지시를 하여야 한다.

16) 주요자재 검수

(1) 검수대상 자재는 레미콘, 아스콘, 철근, 흄관, 강재 등으로 한다.

(2) 자재공급원을 승인받은 후 자재가 현장에 도착하면 즉시 수급인으로부터 반입된 송장사본을 징구함과 동시에 반입한 자재를 검수하고 그 결과를 기록, 비치하여야 한다.

(3) 자재검수시는 수량확인 뿐만 아니라, 필히 품질변질 여부를 확인하여야 하고 변질되었을 때는 즉시 현장에서 반출토록 하고 반출여부를 확인하여야 하며, 의심스러운 것은 별도 보관토록 한 후 품질시험 의뢰결과에 의거 검수여부를 확정하여야 한다.

(4) 주요 사급자재에 대하여는 검수부에 검수결과를 기록 비치하여야 한다.

(5) 품질시험을 실시하여야 할 경우에는 발주기관 또는 국․공림시험기관에 의뢰하여야 한다.

(6) 현지 여건등을 고려한 SB-1, SB-2, SB-3 등 여러개의 보조기층 입도범위가 제시된 보조기층 입도중 어느 것을 실제 사용할 것인가에 대한 여부는 발주기관의 장과 협의하여 결정하여야 한다.

(7) 중차량 등에 의한 소성변형 및 현지여건 등을 고려한 여러 가지의 기층 표층입도(조세골재 합성입도)범위중 어느것을 사용할 것인가는 발주기관의 장과 협의하여 결정하여야 한다.

(8) 내마모성, 내구성, 내유동성, 미끄럼저항성등과 일반지역 적설지역 등을 고려하여 가열아스팔트 혼합물의 골재표준 입도가 표준입도 범주내에 포함되는지의 여부를 검토하고 발주기관장과 소성변형 발생가능성 등을 고려하여 협의 결정하여야 한다.

(9) 노체 성토재료의 최대치수(300m/m이하), 입도범위, 수침 CBR치(2.5이상), 다짐도 및 노상의 성토재료 최대치수(100mm이하), 입도범위, 밀도, 다짐도 등을 검토하고 동 입도점주에 드는 여러재료를 검토한 후 주변여건 등을 고려하여 발주기관의 장과 협의하여 결정하여야 한다.

(10) 아스콘 및 레미콘은 수급자가 자기책임하에 품질확보를 할 수 있도록 하고 반드시 감리자, 생산자, 수급자가 합동으로 배합설계를 실시하여 그 결과를 발주기관의 장에게 보고한다.

17) 수명사항 이행철저

(1) 감리원은 발주기관의 장이 지시하는 공문을 철저히 숙지하여야 되며, 보조감리도 필히 공람하여야 한다.

(2) 공문내용중 현장대리인이 숙지하여야 될 것은 현장대리인에게 서면으로 통보하여야 하고 이행을 촉구 하여야 한다.

(3) 감리원은 발주기관 지시사항을 필히 이행하고 그 결과를 보고하여야 한다

(4) 지원업무수행자의 확인 요구가 있을 시에는 이에 적극 호응하여야 한다.

18) 콘크리트 품질관리 철저

(1) 콘크리트 배합설계 실시

가. 감리원은 공급원 승인과 동시에 공사착수전 배합설계를 발주기관의 건설관리실 직원, 수급자, 레미콘회사 등 관계자 합동으로 배합설계를 실시하여야 한다.

나. 골재의 최대치수 및 소요강도가 동일 하더라도 타설시의 기온, 타설방법 등으로 인하여 슬럼프치가 변경되어야 하므로 표준 슬럼프치 이외에 타설기온(고온시) 및 타설방법에 따라 소요되는 슬럼프치 별로 각각 배합설계를 하여야 한다.

다. 본 공사에 사용될 레미콘의 배합설계는 소요강도별, 타설방법 별로 콘크리트 슬럼프치가 다르므로 각각에 대하여 배합설계를 달리 실시하여야 한다. 이 때 같은 강도라도 타설방법에 따라 슬럼프치를 달리하여야 하므로 이를 감안하여야 한다.

라. 현장도착시의 콘크리트 슬럼프치를 기준으로 배합설계하여야 하므로 공장에서 현장도착시까지 운반, 타설하는데 따른 기온의 영향 등을 추가로 감안하여 배합설계시의 슬럼프치를 결정하여야 한다.

마. 강도 및 타설방법이 동일할지라도 타설시 대기온도에 따라 슬럼프치를 달리한 배합설계를 실시하여야 한다.

바. 모래(조립률 변화), 자갈의 품질 또는 형상 등이 변화할 때도 필히 배합설계를 재실시 하여야 한다.

사. 감리원은 배합설계 완료결과를 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

(2) 감리원은 구조물 검측시 구조물별, 부위별 슬럼프치 타설시의 온도, 콘크리트의 종류(예 : 25-240-15) 실측 슬럼프치, 타설시간 등을 반드시 기록, 유지하여야 한다.

(3) 콘크리트의 타설은 도면에 명기된 타설 순서도, 골재의 최대치수, 소요강도, 소요 슬럼프치, 소요배합(현장배합수정), 타설방법 등에 따라 시행하여야 한다

(4) 콘크리트가 응결되는 즉시 모래 또는 톱밥과 같이 장시간 동안 보습할 수 있는 재료를 일정 두께로 깔고 양생포를 덮은 후 양생기간동안 모래 등이 계속 습윤상태를 유지할 수 있도록 하고 피막양생을 할 경우에는 양생제의 종류와 사용조건, 사용방법, 사용시기, 주의사항 등을 검토하여 적절한 방법을 선택하여야 하는 등 양생 방법을 수급자로부터 사전에 제출받아 양생관리가 소홀함이 없도록 감리를 철저히 하여야 한다.

(5) 시험담당 감리원은 작업계획서에 의한 시공시 품질관리시험 여부를 반드시 확인하고 시험성과서의 적정여부를 확인, 서명하여 책임감리원에게 보고하여야 한다. 시험성과의 불합격 또는 품질시험의 미실시 시에는 후속 공사를 착수시키지 말아야 한다.

(6) 수급자는 콘크리트 압축강도별 X-R 관리도 등을 필히 작성토록 하여 콘크리트 품질관리를 철저히 하도록 하여야 한다.

(7) 콘크리트 다짐을 할 때는 구조물의 두께 등에 따라 사용 바이브레이터의 규격을 사전 검토하여야 한다.

(8) 품질확보를 위한 시공계획서를 당해 공사 착수전에 감리원의 승인을 받아서 시공토록 하고 이때 시공계획에는 콘크리트 부위별로 타설방법, 양생방법, 타설순서, 동일구조물 동일 강도라도 부위별로 슬럼프치, 운반과정에서의 슬럼프치 저하방지대책, 양생방법 등 공사시공 단계별로 공사품질을 확보할 수 있는 방법을 모두 제시하여 감리자의 승인을 받아 시공토록 하여야 한다.

(9) 동절기 콘크리트 작업을 위한 콘크리트 보완장비, 아스콘 운반시의 보완장치 등에 대해서는 반드시 발주기관의 장의 사전승인을 득한 후 시공하여야 한다.

19) 부실공사방지 세부실천계획 수립 및 이행철저

(1) 감리원은 수급자와 협의하여 매월별 추진하여야 할 공사에서 발생될 수 있는 부실공사요인을 도출하고 이를 방지할 수 있는 대책을 수립하여 집중 관리하여야 한다.

가. 부실공사 요인을 각 공종별로 도출하되 현재의 공정계획상 그달에 시공될 대상공사에 대하여 매월별로 도출하여야 한다.

나. 기능공의 숙련도 및 작업습관에 대한 부실요인도 도출하여야 한다.

다. 부실공사 방지대책에는 기능공 등 현장조사 전직원에 대한 의식개혁 교육개혁이 포함되어야 한다.

라. 감리원 전원과 시공회사의 공사담당 전직원이 공사업무 수행시에는 도출된 부실요인을 항시 휴대토록 하여 검측이나 현장확인시에 이를 활용토록 하여 부실요인을 근절시켜야 하며, 확인과정에서 부실요인이 추가 발생될 경우에는 추가 부실요인에 대한 특별확인 등으로 부실공사를 사전에 방지하여야 한다.

마. 매월별 수립된 부실공사방지 세부실천계획 및 실적을 정리하여 필히 비치 보관하여야 한다.

20) 구조물 검토 및 검측실시

(1) 감리원은 현장조사 기능공 및 기술자들이 구조물의 특히 복잡한 부위에 대한 시공을 동일하게 할 수 있도록 시공자가 시공상세도를 작성한 후 당해 구조물을 시공하기 전에 제출하여 이를 검토 확인하여야 한다

- 특수비계, 동바리 및 가교, 가도 등의 설치도

- 구조물의 모따기 상세도

- 콘크리트 타설 순서도

- 옹벽, 콘크리트 측구의 끝부분 처리도

- 배수관, 암거, 교량용 날개벽 등의 설치위치 및 연장규격, 치수 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는 부위의 각종 상세도면

(2) 각종 구조물의 구조검토, 시공계획, 시공시 예상문제 등을 재검토 하여야 한다.

(3) 감리원은 최종 검측전에 각종 구조물의 터파기, 철근가공 및 조립, 거푸집 설치과정을 수시 확인․검측 하여야 한다.

(4) 각 작업별 검측을 실시한 후 구조물 검측대장을 작성 비치하여야 하며 지하차도부의 가시설 및 구조물에 대하여는 시설관리 지침서를 작성하여야 한다.

(5) 가시설에 대하여는 계측시설 설치후 변위가 일어나는지 여부를 수시확인하여 그 기록을 비치하고 이상 또는 문제점이 발생시에는 즉시 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

(6) 교량 등 점검이 용이하지 않은 교량에 대하여는 점검통로를 설치토록 하여야 한다.

(7) 점검통로가 필요없는 소규모 교량이라 하더라도 교대(ABUTMENT) 또는 교각에 교좌장치를 수시로 용이하게 점검할 수 있는 점검시설 설치와 관련도면을 교량별로 작성토록 하여야 한다.

(8) 스틸 등 각종 박스거더(BOX GIRDER)교의 경우 교량단부와 박스거더 내부간을 통행할 수 있는 통행로와 내부점검 및 유지관리를 위한 환기, 조명시설 설치 도면 등을 작성토록 하여 시공하여야 한다.

(9) 토질조사시 실제로 보링하지 않고 추정치를 사용한 지점을 도면 및 특별시방서에 명기하였을 때에는 지점에 대해서 보링을 실시하여 그 결과에 따라 시공하여야 한다.

(10) 교량의 상관 슬래브 콘크리트 타설시 데크피니셔(DECK FINISHER)를 사용하여 시공토록 하여야 한다.

(11) 아스콘 포장의 기층, 표층시공시 발생하는 콜드 조인트(COLD JOINT)에 우수가 침투하여 포장의 내구성을 저하시키는 경우가 빈번하므로 종방향 콜드 조인트가 생기지 않도록 2차로 폭의 휘니셔를 사용하거나 1차로 폭의 피니셔 두 대를 동시에 사용하여 시공토록 하여야 한다.

(12) 본 공사에 소요되는 각종 재료(시선유도시설, 표지병, 갈매기표지판, 흄관두께, 본당 표준길이, 강관두께, 내경, 외경, 강재품질 등 기타재료)의 품질확보를 위한 재료의 소정 품질 및 규격 등을 필히 검토하여야 한다.

(13) 기타 검측시기, 검측빈도, 검측절차, 검측체크리스트 등의 상세한 검측업무는 감리업무수행지침에 따라 철저히 이행하여야 한다.

(14) 배수관 및 암거의 도면에는 규격별로 표준도만 있을 경우 개소별로 상세한 설계도를 작성토록 하고 각 암거마다 콘크리트, 철근, 거푸집 물량을 도면에 명기토록 하여 작업자의 착오가 없도록 검토하여야 한다.

(15) 교량 및 암거가 사각(斜角)이 되는 경우에는 예각부에 대한 단부 철근배근 상세도 등을 검토하여야 한다.

(16) 암거, 교량 및 배수관의 날개벽에 대해서는 현지 지형과 여건에 맞게 설계도 및 전개도를 필히 작성하였는지를 검토하여야 한다.

(17) 암거의 연장이 긴 경우에는 필요에 따라 시공 및 신축이음의 위치, 구조상세도 작성 및 채움재료의 품질 등을 명기하였는지 검토하여야 한다.

(18) 암거의 연장이 길어 콘크리트 타설, 양생시 발생될 신․수축 등을 고려하여 이음부를 설치할 경우에는 필히 전단부에 단부보강 면벽을 설치하였는지 검토

(19) 옹벽의 전개도에 이음부위치 상세도(시공, 신․수축이음) 및 구조상세도를 검토하여야 한다.

(20) 배수로, 도수로의 입․출구부 도면을 검토하여야 한다.

(21) 고정, 이동 교좌설치 위치도(각 교량마다)를 검토하여야 한다.

(22) 교명주 설치, 신축이음, 난간의 앙카부 등 상세도를 검토하여야 한다.

(23) 교량 난간기둥 하부철판과 난간기둥의 기초 콘크리트 사이의 틈새에 대한 처리재료. 채움시기, 방법 등에 대한 상세도를 검토하여야 한다.

(24) 강교제작시 제작공장의 QA/QC 조직도, 검사 및 시험소견서, 검사 및 시험계획서, 용접 및 비파괴검사를 위한 WELDING MAP/NDE MAP, 용접사 자격기록, 용접절차 사용서, 용접절차 인증시험을 확인하여야 한다.

(25) 강교의 품질관리를 위한 계측기 관리절차서, 자재보관 및 취급관리절차서, 용접재료 관리절차서, 용접사자격관리절차서, 비파괴검사요원의 자격 및 인증관리절차서, 비파괴시험(액체침투탐상시험:PT, 자분탐상시험:MT, 초음파탐상시험:UT, 방사선투과시험:RP)절차서를 확인, 검교정대상 품목은 반드시 주기적으로 검교정을 하여야 하며, 계측기에는 검교정 스티커를 부착하여 관리토록 한다.

(26) 재단도(NESTING PLAN)즉, 절단상세도는 부재의 형상에 따른 실치수를 압연방향으로 작성하여야 한다.

(27) 강판 입고시 자재성적서 즉 첨부된 MILL SHEET 원본의 자재와 규격, LOT NO 등을 대조 확인하고 관련 KS규격과도 비교 검토하여야 하며, 또한 MILL SHEET에는 반드시 검토자의 서명 날인을 확인하여야 한다.

(28) 도면에 인장 및 압축부재를 구분하여 명기하여야 한다.

(29) 강교제작 및 가설공사 기간 등에는 반드시 강교에 대한 전문지식 및 경     험이 풍부한 자로 하여금 상주감리토록 하여야 한다.

(30) 교량의 사후 유지관리를 위한 교량 점검용 시설도면을 검토하여야 한다.

(31) 교량에 추후 통신관로, 상수관로, 가스관로 등이 설치될 경우에 미리 대비하     여 이를 감안하였는지를 검토(앵커볼트, 콘크리트 브라켓 설치 등)하여야     한다.

(32) 기타 유지관리를 위하여 필요한 시설의 설치방법에 대하여 명기하였는지     를 검토하여야 한다.

(33) 구조물 도면에 발생가능 균열(CRACK)의 종류, 허용폭 등에 대해 검토하   고 균열발생시의 처리방법에 대하여 검토하여야 한다.

(34) 상세도로 표시할 수 없는 주의사항(시공시 유의사항 등)에 대해서는 필히 검토   하여야 한다

(35) 콘크리트 타설방법, 타설순서, 양생방법을 검토하여야 한다.

(36) 성토층, 노상면, 동상방지층 및 보조기층 완성면을 검측하여야 한다.

(37) 아스콘 포장의 평탄성 검사를 받아야 한다.

(38) 아스콘 송장수량과 설계수량과의 일치여부, 공급원 승인시의 배합설계치 및   골재의 품질과 실제 생산혼합물 배합치 및 골재품질의 일치여부를 검토한다

(39) 포장의 평탄성이 확보되도록 평탄성 확보 센서가 부착된 피니셔의 사용여부,   다짐장비 용량과 실지 포설량과의 다짐능력에 대비한다.

(40) 아스콘 다짐밀도, 온도 및 구간별 시공일자, 아스콘 운반시간 및 도착온도를   검측한다.

(41) 주요자재의 공급에 대한 KS 규격, 품질시험 성과확인 등을 검토하여야 한다

(42) 교량 슬래브 두께가 응력계산 상으로는 문제가 없다하더라도 반복하중에 의   한 피로 응력으로 쉽게 균열이 발생하는 경우가 있으므로 반드시 이점을 고려    하여 두께를 결정하였는지를 검토하여야 한다.

21) 암반선 확인 및 노상, 보조기층, 기층 표층 완성면 검측

(1) 감리원은 설계시 암반선에 대하여 시공중 실제 암반선 노출시에 현지 확인하고 필요시 시험을 실시하여 암반선을 판정하여야 한다.

설계시에는 물리탐사, 시추조사 및 실내시험성과에 의하여 암을 분류하고 지층경계선을 추정하나, 현장 작업시에는 직접 육안으로 확인하고 필요한 시험을 실시하여 더욱 정확한 판정을 하여야 한다. 암판정 준비 및 절차는 다음과 같은 요령으로 실시한다

가. 암판정 대상

1) 절토부 암선 변경시

2) 구조물 기초암판정 (암거,교량 등)

나. 암판정 요청 체계도

시 공 자	→	현장감리원	→	암판정위원회	→	조사 및 판정

다. 암판정위원회 구성

1) 암판정 위원은 감리전문회사 지질 또는 토질분야 전문가, 지원업무수행자,

책임감리원 등으로 암판정 대상 공종의 중요성, 수량, 시공현장 여건 등을

종합적으로 고려하여 수시 구성

라. 판정방법

현지 확인, 자료 검토

마. 준비사항 및 보고방법

1) 절토부 암선변경시

(1) 첨부서류

∙ 물량증감 현황

∙ 토 적 표

∙ 횡단도(암질구분표시)

∙ 공사비 증감대비표

(2) 현장준비사항

∙ 측량기, 야장, 줄자, 카메라, 깃발

2) 구조물 기초 암판정

(1) 보고서식

공구	구조물명	부위	E.L		차이	설계기초 암반종류	설계분포 암반종류
			당초	변경

(2) 현장준비사항

∙ 주상도 작성 : 당초와 변경 비교

∙ 도면도

∙ 측량성과표

∙ 시공계획(기초에 대한 의견서)

∙ 기초확인 측량시 사진촬영 보관(근경, 원경)

∙ 시추 및 굴착에 의한 시료함 보관(시험실 비치)

(2) 감리원은 노상 및 보조기층이 각각 완료되었다고 수급자가 보고하면 즉시 완성면 검측을 철저히 이행하고 검측후 그 결과를 월간 감리보고서에 수록하여 보고하고 현장에 비치하여야 하며 검측사항은 다음과 같다.

가. 노상

□□ 들밀도

□□ 계획고와의 차이

□□ 프루프로링

※ 이 경우 완화구간, 편구배구간(편구배량)을 잘 검측하여야 함.

나. 동상방지층, 보조기층

□□ 두께

□□ 들밀도 또는 평판재하시험

□□ 프루프로링

(3) 다음 공종에 대한 관리도를 작성 관리토록 한다.

- 노체, 노상 다짐도

- 보조기층(두께, 다짐도)

- 기층(두께, 다짐도, AP 함량)

- 표층(두께, 다짐도, AP 함량)

22) 실정보고

(1) 감리원은 시공도중 또는 시공전에 현지여건상 당초 설계대로 시공이 불가능하던가, 구조상 변경이 필요할 때에는 즉시 수급자에게 변경사항을 대표이사의 명의로 제출받아 확인한 후 의견서를 첨부하여 발주기관의 장에게 신속히 실정보고를 하여야 한다

(2) 실정보고후 지시가 있을 시까지는 작업을 시행토록 하여서는 안된다.

(3) 감리원은 공사시공중 불가항력적인 재해의 발생, 공사중단의 필요성, 설계와 현지실정의 불일치, 감리원의 권한에 속하지 않는 사태가 발생될 경우 육하원칙에 따라 검토의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 현장실정을 상세하게 보고하여야 한다.

23) 시공후 매몰부분에 대한 조치

감리원은 시공후 매몰되어 추후 확인할 수 없는 부분에 대하여는 필히 사진(3매) 또는 비디오로 촬영토록 하여 이를 보관하였다가 준공후 발주기관에 제출하여야 한다.

24) 공사진척 광경 사진촬영 및 비디오 제작

(1) 감리원은 공사 착수전에 주요 부분에 대한 전경사진 및 비디오로 촬영 비치토록 하여야 한다.

(2) 촬영할 시는 필히 지형을 포함한 전경 및 세부광경을 촬영토록 하여야 한다.

(3) 특히 구조물을 암반위에 설치하여야될 경우에는 필히 암반임을 확인하는 촬영기록을 보관하였다가 준공시 발주기관에 제출하여야 한다.

(4) 사진첩은 토공, 배수공, 가시설공, 구조물공, 치수공 등으로 구분하여 작업 순서대로 일목요연하게 작업광경을 알 수 있도록 촬영하여 보관하여야 한다

(5) 각 광경마다 사진설명을 기재하여야 한다.

(6) 위 항의 필림을 포함한 사진첩 2부 및 촬영한 비디오테이프를 제출받아 수시 검토확인 할 수 있도록 1종 교량이나 특수공법으로 가설되는 교량은 시공자로 하여금 전 공종에 대한 공사광경을 담은 비디오로 촬영케 하여 준공시에는 100분이상의 비디오 테이프를 기획, 제작, 편집하여 발주기관의 장에게 제출토록 한다.

25) 민원사무

(1) 감리원은 민원이 야기될 수 있는 요소를 사전발견, 긍정적으로 처리함으로써 민원이 야기되지 않도록 하여야 하며 수급자에게도 동일 내용을 지시하여야 한다.

(2) 발주기관장으로부터 민원에 관하여 현지조사 및 대책 등을 명령할 경우에는 필히 기일엄수 제출토록 하여야 한다(필요시 사진첨부)

(3) 불가피하게 기일을 엄수하여 보고하지 못할 경우에는 그사유를 첨부한 중간보고(제출기일 2일전)를 하여야 한다.

(4) 감리원이 민원에 대한 정보를 사전 입수한 경우에는 업무담당관에게 즉시 보고함과 동시에 민원발생 원인 및 대책 등을 수립하여 사전 대처 하여야 한다.

(5) 민원인이 감리원 또는 현장관계자와 면담요구가 있을시에는 요구사항을 친절, 성실하게 청취하고, 현 설계내용을 상세히 설명하여 이해설득 시키거나 개선함이 명확히 타당할 시에는 조치할 의사를 표시하여야 하며, 검토하여야만 할 경우에는 민원내용, 현지여건 및 검토의견을 공사관리관과 협의하여 발주기관에 즉시 보고 후 결과에 따라 조치할 계획임을 민원인에게 설명하여야 한다.

(6) 감리원은 감리용역의 과업범위내에서 도로점용허가 신청이 있는 경우, 이에 대한 현지조사 및 허가가능 여부를 검토하고, 도로점용허가 등 각종 인․허가 사항이 허가내용대로 이루어지고 있는지의 여부를 감리(지도, 감독)하여야하며, 이에 소요되는 비용은 본 공사의 감리대가에 포함된 것으로 간주한다. 또한 인․허가로 인한 설계변경(비탈면 보호공 삭제 등)요인을 검토․확인하여 반영하여야 한다.

26) 안전관리 및 환경관리

(1) 감리원은 공사수행에 따른 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 수급자가 수립한 안전관리 대책의 적정여부를 검토하여야 한다.

(2) 수급자의 안전관리 점검상황을 재점검하여야 하며, 수급자의 안전관리 이행사항을 직접 현지점검 및 확인하고 그 기록을 비치하여야 한다.

(3) 설계에 계상된 안전관리비 사용실적을 확인하고 그 결과를 비치하여야 한다.

(4) 수급자가 현장 종사자들에게 수시 및 정기안전교육을 실시하도록 하여야

한다.

(5) 시공구간내 위험개소에는 필히 안전조치를 취하고 안내간판을 설치토록 하여야 한다.

(6) 기존 통행로의 교차지점 및 복잡한 작업장에는 안전시설 및 신호수를 배치토록 하여야 한다.

(7) 가시설 설치 등 위험작업시는 안전헬멧을 항시 착용토록 하고 안전관리 표지설치 및 필요시 교통통제원을 배치토록 하여야 한다.

(8) 감리원은 수급자로부터 세부공종별 안전관리계획서를 제출토록 하여 안전관리계획서 및 시방서와 연계하여 안전상 문제점을 사전에 검토하고 수급자에게 필요한 조치를 취하도록 하여야 한다.

(9) 수급자가 제출한 현장 안전관리자의 자격기준 및 경력 등을 검토하여 적임 여부에 대한 의견서를 첨부하여 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

(10) 감리원은 안전관리 교유계획을 수립하고 정기 및 수시교육을 실시하여야 한다.

(11) 감리원은 산업안전보건법에 의한 모든 안전관리 지침사항에 대하여 이행하여야 하며, 현장감리원의 과실로 인한 안전관리 사항에 대하여 책임을 져야 한다

(12) 감리원은 공사로 인하여 대기 및 수질오염, 악취, 분진, 소음, 진동 등 환경오염이 발생되지 않도록 하여야 한다.

27) 체불노임 등의 확인

(1) 현장감리원은 수급자의 임금지불 대장을 수시 확인하여야 한다.

(2) 확인결과 임금 미불이 있을시는 즉시 미불을 해소토록 촉구하여야 하며, 이에 대한 대책을 수립하여 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

28) 하도급 처리의 지도감독

감리원은 하도급에 대하여 발주기관의 장의 요구사항 또는 아래 사항을 검토하여 그 의견을 제시하여야 한다.

(1) 감리원은 시공자가 도급받은 건설공사를 건설업법 제22조, 제22조의2 및 공사계약 일반조건 제22조의 규정에 의거 하도급 하고자 발주기관의 장에게 통지하거나, 동의 또는 승낙을 요청하는 사항에 대해서는 다음 각호의 사항에 관한 적정성 여부를 검토하여 발주기관의 장에게 제출하여야 한다.

가. 하도급자 자격의 적정성

나. 도급한도액 초과여부

다. 하도급 통지기간 준수 등

(2) 감리원 (1)항에 의거 처리된 하도급에 대해서는 시공자가 건설업법 제27조 내지 제32조 및 하도급거래공정화에 관한 법률에 규정된 사항을 이행하도록 지도, 확인하여야 하며 또한 건설업법 제22조의 2의 제1항에 규정된 전문건설공사 하도급 비율을 준수하도록 착공단계부터 관리하고 지도, 확인하여야 한다.

(3) 감리원은 시공자가 하도급 사항을 (1)항 및 (2)항에 의거 처리하지 않고 위장하도급 하거나, 무면허자에게 하도급 하는 등 불법적인 행위를 하지 않도록 지도하고 현장입구에 “불법하도급 행위신고 표지판”을 시공자에게 설치하도록 하여야 한다.

(4) 계약단가를 기준으로 90% 미만의 하도급 금지 및 노임과 자재를 적기에 지급토록 하여야 한다.

29) 신규단가 및 산출서 검토

(1) 감리원은 시공도중 설계된 공종 즉 단가가 없는 신공종이 발생될시는 즉시 수급자로 하여금 신규단가(산출서 포함)를 제출토록 하고 내용검토하여 의견서를 첨부, 발주기관에 제출하여야 한다.

(2) 신규단가는 수급자가 제출한 단가산출서 내용중 인용할 수 있는 것은 인용토록 하여야 한다.

30) 현장내 발생된 문제점 검토 등

(1) 감리원은 감리대상 공사가 장기계속 공사일 경우 당해연도 계약구간 이외의 공사구간에 대하여도 수시로 현장을 순찰하여 타 관련 공사 시행등으로 인한 중복공사 발생방지를 공사수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

(2) 또한 공사시행중 발생되는 기술적인 검토사항과 문제점에 대하여는 해당 분야별 비상주감리원으로 하여금 현지확인 검토(필요시 현장시험 등 실시)후 보고서를 책임감리원이 제출받아 공사시행 계획을 수립 보고 하여야 한다.

31) 응급조치

(1) 감리원은 태풍피해, 천재지변 등 불가항력적으로 공사구간에 피해가 발생되어 이를 즉시 보수치 않고 방치하므로써 교통두절 등 제반 문제점이 야기될 경우에는 즉시 응급조치토록 함과 동시에 보고하여야 한다.

(2) 응급조치할 시는 사전에 피해량 조사, 피해도면 작성, 세부 및 전경 사진을 촬영토록 하여야 한다.

32) 기존 구조물 철거

(1) 기존 구조물을 철거할 시는 수급자가 현황도(도면, 철거구조물 수량산출서) 및 현황사진을 작성하여 제출토록 하고 이를 확인 점검하여 발주기관에 보고하고 설계변경시 계상하여야 하며, 철거구조물의 도면작성은 다음과 같다

가. 측면도

나. 단면도

다. 상세도 (수량산출시 필요함)

라. 평면도

마. 기타 수량산출시 필요한 사항

33) 폐도 및 폐교량 보고

(1) 책임감리원은 공사로 인하여 발생된 폐도 등에 대한 활용여부를 조사하여 계획을 수립하여야 한다.

(2) 보수보강이 필요한 폐도, 폐BOX(수로, 통로) 그 내역과 보수보강공법 및 소요비용 등을 발주관서에 보고하여야 한다.

(3) 폐도부지 활용을 위한 현장조사시에는 관할 구청과 도로안전관리사업소등 관계기관을 참석시켜 의견을 들은 후 폐도부지 면적, 크기, 모양 또는 지형여건에 따라 활용여부를 판단하여야 한다.

(4) 활용여부 검토후 폐도부지에 대하여 분할측량(행정조치에 대하여는 기초 자료를 작성하여 발주기관의 장에게 보고)을 실시하여 용지도를 작성하고 지적도, 등기부등본, 토지대장(임야대장), 폐도부지조서, 활용방안 등을 서류 3부를 공사준공 2개월전까지 발주기관의 장에게 제출하여야 한다.

34) 지장물 철거

감리원은 분묘, 가옥, 과수목 등의 지장물조서가 작성되면 철거전에 배경을 넣은 사진을 촬영하고 철거 후에 광경사진을 촬영하여(동일지점) 사진첩을 작성하여 보고하여야 한다.

35) 설계변경시 조치사항

(1) 감리원은 수급자가 그간 제출한 실정보고 등으로 인한 물량변경은 물론, 추후 시공시 변경될 수 있는 설계변경 요인을 사전 충분히 도출하여 설계변경 하므로서 회수를 최대한 줄일 수 있도록 하여야 한다.

가. 현장정밀조사를 실시하여 민원사항 및 우회도로, 교차방법 등 시설개선사항 등을 최대한 도출

나. 발주기관에서의 변경 지시사항 및 기타 변경이 불가피한 사항을 최대한 반영

(2) 설계변경은 감리원 책임하에 실시하여 감리회사 대표이사 명의로 발주기관에 제출한다. (설계변경 절차)

			감리회사
설 계 자 (책임감리원)			심 사 자 (비상주감리원)				설계변경서제출 (감리회사대표이사 →발주기관의 장)
				보고
			발주기관					보고
검 토 (지원업무수행자)							결 재 (과장,시장)

36) 보고사항

(1) 정기보고

가. 월간 또는 분기 감리보고서(감리보고서로 대체)

감리원은 다음 사항을 포함한 감리보고서를 매월 또는 분기마다 발주기관의 장에게 제출하여야 한다.

보고서의 제출기한은 다음달 5일 이내로 한다.

(가) 공정현황 : 주요공정별 간략한 설명이 포함되고 계획이 실적이 표시된 공정현황

(나) 품질관리 시험실적 : 선정, 관리 및 검사시험 실적

(다) 안전관리 실적보고

(라) 지급자재 수불현황 : 지급자재 입․출고가 명시된 수불현황

(마) 신기술, 특수공법 사용실적

(바) 기타 감리에 관하여 중요하다고 인정하는 사항

(사) 건설폐기물 처리 사항

나. 최종 감리보고서

감리원은 다음 사항을 포함한 최종 감리보고서를 감리기간 종료후 20일이내에 감리전문회사 대표자 명의로 발주기관장에게 제출하여야 한다.

(가) 사업개요 : 건설공사 및 감리용역 개요

(나) 기술검토내용 총괄적

(다) 공사추진내용 총괄실적 : 인력, 장비투입 현황등

(라) 검측내용 총괄 : 공종별 불량율, 부실 유형별 원인 및 방지대책

(마) 우수시공 및 실패시공 사례

(바) 품질관리 시험내용 총괄

(사) 안전관리 실적총괄 : 안전관리활동, 안전관리비 사용실적, 안전사고 발생건수 및 원인방지대책

(아) 종합분석

(자) 주요 구조물에 대하여는 공사준공 1개월전까지 발주기관과 사전 협의하여 교량의 점검 및 유지보수사양서와 시설물별 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 교량별로 별도 CD자로 작성하여 5부를 제출하여야 한다.

(2) 수시보고

감리원은 다음 각호의 사항을 검토하고 필요시 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

(가) 다음 각호의 시공자 제출서류

- 착공신고서

- 공정현황보고

- 지급자재 수급요청서 및 대체사용 신청서

- 주요기자재 공급원 승인 요청서

- 품질시험대장

- 품질시험실적보고서

- 각종 시험성과표

- 설계변경 여건보고

- 준공기한 연기신청서

- 기성․준공검사원

- 하도급 통지 및 승인요청서

- 현장실정보고서

- 안전관리추진실적 보고서(안전관리활동, 안전관리비 사용실적 등)

- 확인측량 결과보고서

- 명일작업계획서

- 물공량 확정보고서 및 물가 변동지수 조정율 계산서

- 기타 시공과 관련되는 보고 및 신청서

- 기타 필요한 서류 및 도표(천후표, 온도표, 수위표, 조위표)

(나) 다음 각호의 현장상황 보고사항 (현장 긴급사항)

- 감리원은 공사시공중 불가항력적인 재해의 발생, 공사중단의 필요성, 감리원의 권한에 속하지 않는 사태가 발생될 경우 육하원칙에 따라 검토의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 현장상황을 신속히 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

- 감리원은 공사현장에 다음 사태가 발생하였을 때에는 응급조치를 취하는 동시에 상세한 경위를 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

- 천재지변 등 기타의 사유로 공사현장에 피해가 발생하였을 때 또는 장기간 공사시공이 불가능할 때 공사현장의 피해에 대하여 응급조치가 필요할 시는 사전에 피해량 조사, 피해상세도면 작성, 세부 및 전경 사진을 촬영하여 두어야 한다.

- 시공자의 현장대리인이 사전 승인없이 3일이상 현장에 상주하지 않을 때

- 시공자가 정당한 사유없이 공사를 중단할 때

- 시공자가 공사시행을 불성실하게 하거나 감리원의 정당한 지시에 불응할 때

- 시공자가 계약에 따른 시공능력이 없다고 인정되거나 공정이 현저히 미달 될 때

- 기타 공사추진에 지장이 있을 때

(다) 재시공 및 공사중단 명령을 한 때

- 감리원은 시공자가 건설공사의 설계도서 시방서 기타 관계 서류의 내용과 적합하지 아니하게 당해 건설공사를 시공하는 경우에 재시공, 공사중지 명령 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

- 감리원으로부터 재시공, 공사중지명령. 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받은 시공자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

- 감리원이 시공자에게 재시공, 공사중지명령 기타 필요한 조치를 취한 때에는 지체없이 이에 관한 사항을 당해 건설공사의 발주기관의 장에게 보고하여 한다. 다만, 경미한 시정 사항 및 재시공은 보고를 생략할 수 있다.

- 건설공사의 발주기관의 장은 감리원으로부터 재시공, 공사중지명령 기타 필요한 조치에 관한 보고를 받은 때에는 이를 검토한 후 시정여부의 확인, 공사재개 지시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

- 감리원은 재시공, 공사중지명령을 하였을 경우 발주기관의 장이 공사중지 사유가 해소되었다고 판단되어 공사재개를 지시할 때에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

- 발주기관의 장은 감리원의 공사중지명령 등의 조치를 이유로 감리원 등의 변경, 현장상주의 거부, 감리대가지급의 거부, 지체, 기타 감리원에게 불이익한 처분을 하여서는 안된다.

- 감리원은 시공자가 감리원의 재시공, 공사중지명령등에 대한 필요한 조치를 이행하지 아니한 때에는 건기법 제42조 제5호의 규정에 의한 조치를 취하도록 발주기관의 장에게 요구하여야 한다.

(시공자에 대한 제재 요구)

- 공사중지 및 재시공 지시 등의 적용한계는 아래와 같다.

∙재시공

시공된 공사가 품질확보상 미흡 또는 위해를 발생시킬 수 있다고 판단되거나 관계규정에 재시공을 하도록 규정된 경우

∙공사중지

시공된 공사가 품질확보상 미흡 또는 중대한 위해를 발생시킬수 있다고 판단되거나, 안전상 중대한 위험이 발견될 시에는 공사중지를 지시할 수 있으며 공사중지는 부분중지와 전면중지로 구분한다.

a. 부분중지

ㄱ. 재시공 지시가 이해되지 않는 상태에서는 다음 단계의 공정이 진행됨으로써 하자 발생이 될 수 있다공 판단될 때

ㄴ. 안전시공상 중대한 위험이 예상되어 물적, 인적 중대한 피해가 예상될 때

ㄷ. 동일공정에 있어 3회이상 시정지시강 이행되지 않을 때

ㄹ. 동일공정에 있어 2회이상 경고가 있었음에도 이행되지 않을 때

b. 전면중지

ㄱ. 시공자가 고의로 건설공사의 추진을 심히 지연시키거나, 건설공사부실 발생우려가 농후한 상황에서 적절한 조치를 취하지 않은채 공사를 계속 진행하는 경우

ㄴ. 부분중지가 이행되지 않음으로써 전체공정에 영향을 끼칠 것으로 판단될 때

ㄷ. 지진, 해일, 폭풍 등 천재지변으로 공사를 계속할 시 공사전체에 대한 중대한 피해가 예상될 때

ㄹ. 전쟁, 폭동, 내란, 혁명상태 등으로 공사를 계속할 수 없다고 판단되어 발주기관의 장으로 지시가 있을 때

(라) 시공자가 다음 사항의 불법하도급 행위를 한 때

- 하도급 통지 또는 승인사항에 위반하여 하도급하거나 일괄하도급 하는 경우

- 하도급 업체가 재하도급 하는 경우

- 발주기관이 시공자에게 선금급, 기성금, 준공급을 지불한 경우 시공자가 하도급자에게 선금급, 기성금, 준공금의 내용과 비율에 따라 법정기간내에 지불하지 아니한 경우

- 하도급 대금지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생한 경우

- 기타 시공과 관련하여 중요하다고 인정되는 사항이 있을 때

∙ 지급자재의 잉여자재가 발생한 경우

∙ 지급자재가 유실, 망실되는 경우

∙ 현장대리인 및 하도급자 등의 교체가 필요한 때

∙ 세부공정계획, 시공자의 현장기술자 확보사항, 기타 공사계획에 관한

사항을 검토한 결과 공사진행상 문제가 있다공 판단되는 경우

37) 공정관리

감리원은 당해 공사가 정해진 공기내에 설계도서 등에 의하여 완성될 수 있도록 지도, 감독하여야 한다.

(1) 감리원은 시공자가 제출한 공정계획이 공사의 종류, 특성, 공기 및 현장의 실정 등을 감안하여 수립되었는지를 검토, 확인하고 시공의 경제성과 품질확보에 적합하게 실행성 있는 최적 공기가 되었는지를 검토하여야 한다.

(2) 공사추진이 부진하여 공기내 준공에 지장이 예상될 경우에는 공정만회대책을 수립하여 시공자에게 장비, 인원 등의 추가 투입을 지시하여야 한다.

(3) 공사추진상 문제가 있다고 판단될 경우에는 발주기관의 장에게 검토의견을 첨부 보고하여야 한다.

(4) 공사가 현장실정에 따라 공기연장이 불가피한 경우, 공기연장 사유가 타당성이 있는지 여부를 검토한 의견서를 첨부하여 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

(5) 감리회사의 귀책사유로 공정이 늦어지게 되어 감리기간이 늘어나게 된 때에는 당초 계획기간 이외의 근무기간 동안은 감리용역비를 지급받지 못한다.

(6) 공사기간을 막연하게 산정하지 않고 CPM 공정계획등에 의거 정확하고 합리적으로 산정토록 하여야 한다.

38) 감리원은 현재 수행중인 감리용역의 전체과업의 범위중 이미 준공된 부분에 하자(장기 계속공사의 전차분)가 발생하였을 때에는 수급자가 제출한 보수방법 등의 적정여부를 검토하여야 하며, 보수시에는 감독을 철저히 하여야 한다.

39) 각종 일지정리(건기법 및 동법시행규칙에 준함)

(1) 책임감리원은 공정현황, 기자재 검토, 하도급, 안전관리, 발주기관의 지시사항 등에 대한 서류 및 도표를 작성하여 비치하고 준공시 발주기관의 장에게 제출하여야 한다.

(2) 공사감리일지

가. 책임감리원은 수급자에게 아래 서식에 의한 금일 작업실적 및 명일 작업계획서(이하 “작업일지”라 한다)를 제출받아 금일 작업실적인 시공량, 사용자재량, 품질관리시험 회수 및 성과 등을 종합적으롱 검토 확인하고 확인된 물량을 감리일지에 기재하여야 하며, 명일작업 시행여부를 결정하여야 한다.

공사명 :                              200  .     .    .     현장대리인 (인)

금일작업실적	명일작업계획	비 고
∙공종 ∙위치 ∙시공량 ∙품질관리시험회수 및 성과 ∙자재사용량 ∙기타 필요사항	∙공종 ∙위치 ∙시공량 ∙품질관리시험 ∙자재사용량 ∙기타 필요사항

보조	보조	보조	책임감리	결재

(3) 일일업무 수행일지

가. 책임감리원과 보조감리원은 당일 작업계획서 등에 따라 각자가 수행한 업무내용을 기록한 일지 즉, 일일업무 수행일지(이하 “일지”라 한다)를 개인별로 작성하여야 한다.

나. 책임감리원은 수급자의 작업실적과 당일 감리업무계획을 비교 검토하여 수급자의 작업실적에 부응되도록 각 보조감리원이 감리업무를 적정하게 수행하였는지의 여부를 확인하는 등 감리 개인별로 작성한 감리업무 수행일지를 총괄한 종합일지를 작성 비치하여야 하며, 종합일지의 주된 내용은 월간보고서에 수록하여야 한다.

(4) 명령부

가. 책임감리원은 발주기관의 장이나 발주기관으로부터 명령을 받았을 때에는 직접 조치할 사항은 직접 조치하고, 수급자가 조치하여야 될 사항은 문서로 지시하여 이행여부를 확인하고, 명령에 대한 처리결과를 즉시 보고하여야 한다.

나. 명령한 사항의 처리에 장기간 소요될 경우에는 조치계획 및 추진일정을 즉시 제출하여야 하며, 조치 완료시에는 최종결과를 즉시 보고하여야 한다.

(5) 지시부

가. 책임감리원은 명령받은 사항중 수급자에게 지시할 사항 또는 금일 작업중 시정하여야될 사항 등에 대하여는 수급자에게 6하원칙에 의한 지시를 발송하여야 하며, 단기간내 시정을 요구한 사항은 신속히 처리결과를 보고토록 하고 조치에 장기간이 소요되는 내용은 조치계획 및 추진일정을 수급자로부터 제출받아 단계별 조치내용을 확인하고 최종 조치결과 보고를 확인하여 공사추진에 철저를 기하여야 한다.

나. 책임감리원은 공사시행중 발견된 시정사항에 대하여는 발견 즉시 시정토록 지시부를 발송하여 즉시 시정토록 하고 시정이 완료될 때까지 후속 작업을 시공하지 않도록 하여야 하며, 수급자로부터 시정완료 일시 및 조치내용이 기록된 회신공문을 제출받는 즉시 확인하여 후속작업 추진에 지장이 없도록 하여야 한다.

(6) 발생품 정리부

가. 공사구간내 기존 도로상의 모든 부대시설물은 공사기간중에 관리 보호되어야 하므로, 수급자가 이를 철저히 이행하는지 여부를 감리원은 확인하여야 한다.

나. 기존 도로의 이정표, 행정구역 표시 등 각종 표지판 철거시에는 이를 보관하여 해당 국도유지 및 관계기관 등에 이관토록 하고 인수증을 수급자로부터 제출받아 확인하고 그 결과를 발주기관에 보고하여야 한다.

다. 기존 구조물 철거시 발생되는 발생품에 대하여 수량, 규격을 확인하고 보관관리가 용이한 곳에 운반토록 하며, 발주기관에 보고하여 그 지시에 따라야 한다.

(7) 주요자재 수불부 정리

가. 감리원은 주요자재 현황을 파악하기가 용이하도록 일정장소에 보관하여야 하며, 특히 철근은 재질(연, 고강) 및 규격별로 구분하여 한곳에 저장, 가공하여 명일작업 계획에 따라 운반, 조립토록 하고 잔량 발생시에는 저장장소로 운반토록 하여야 하며 금일사용 실적을 작업일지에 기록하여야 한다.

나. 확인된 주요자재 사용량을 당일 즉시 자재수불 상황부에 기재하고 책임감리원은 확인, 날인을 하여야 한다.

다. 주요자재 수불상황부 첫장에 가시설설치, 흄관(파형강관)의 암거에 사용되는 주요자재량을 규격별로 1M당 소요량 등을 첨부하고 레미콘, 아스콘 등 구입자재 사용시에는 배합표에 의한 소요량을 기록하여 현지 확인시 정확한 사용량을 알 수 있도록 하여야 한다.

라. 명일 작업계획서 내용을 검토하여 사용계획량만을 출급하고 금일 작업실적에서 확인된 미사용 주요자재량은 명일 사용계획에서 제외한 량을 출급하여야 한다.

(8) 공사현장 방문일지 정리

가. 감리원은 현장에 방문하는자 모두 기록 유지하여야 한다.

40) 준공도면

(1) 공사를 준공할 때는 필히 준공도면(KS F1001에 의한 KS A5201의 A1크기)을 3부 작성하여 발주기관의 장에게 제출하여야 한다.

(2) 준공도면에는 감리업무수행지침서의 별지 제18호 서식 등을 참조하여 실제 시공한 표고 및 규격 등을 작성하여야 한다.

(3) 책자형 축소준공도면(A3〔297×420m/m〕크기)은 3부를 작성하고 그 표지는 가죽 또는 비닐재질 등을 사용하여 장기보관시 훼손되지 않도록 하여야 한다.

(4) 준공도면 원도는 마이크로 필름화 및 CD화를 추진하고 준공도면 제작비 및 원도의 마이크로 필름화 비용을 설계에 반영한다.

(5) 책임감리원은 상기 준공도면과 별도로 시설물의 안전에 관한 특별법 제17조 및 동법시행규칙 제12조 규정에 의한 준공도서를 수급자로 하여금 작성토록 하고 그 결과를 비상주감리원과 합동으로 점검, 확인, 검토하여 발주관서에 제출하여야 한다.

5. 발주기관의 근태점검 등

1) 발주기관의 장은 소속직원을 지원업무수행자로 임명하여 현장에 상주시킬 수 있으며 지원업무수행자가 원활한 추진을 위하여 감리원에게 필요한 사항 또는 잘못된 사항 등을 시정하기 위한 지시에 모든 감리원은 정당한 사유가 없는 한 충실히 따라야 하며 지원업무수행담당자의 임무는 다음과 같다.

- 감리자에 대한 지도감독(근태사항 확인 점검 등)

- 책임감리용역의 기성 및 준공검사 입회

- 감리자의 감독업무 수행능력 판단 및 이에 대한 보고

- 감리자가 공사를 감독함에 있어 특별한 사유 없이 공사를 지연시키는 사실이 있는지 여부 파악

- 현장에서 발생하는 각종 민원사항 파악, 검토(필요시 감리자의 협조를 받아 수행)

- 보상업무 협의 추진

- 설계변경사항의 요인 파악 및 보고

- 기성검사(필요시) 및 준공검사시 입회

- 매일 업무일지를 기록, 매월마다 복명

- 기타 발주기관의 장이 필요하다고 판단한 사항 등

2) 발주기관의 장은 지원업무수행자 또는 소속직원을 임명하여 감리원의 근태점검을 수시로 실시할 수 있으며, 근무시간중에 사전승인 등의 절차없이 근무지를 무단 이탈하는 사례가 일정횟수 이상 적발되는 감리원은 관계규정에 따라 소정의 불이익 처분을 받아야 한다.

3) 감리원의 업무수행 능력부족과 지장물 및 용지보상과 관련한 업무지시를 받았으나 업무태만으로 보상업무가 지연되었다고 인정되었을 경우 또는 고의․과실 등으로 공사실정보고 및 설계변경, 공사 검측지연, 기성검사 지연, 기타 골재원, 사토장 등 위치변경 승인 지연 등의 사실이 발견되어 발주기관의 장이 해당 감리원을 교체 지시한 경우에는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

< 별표 1 >

감리원의 자격(제51조의2제1항관련)

등 급	기술자격자	학력․경력자
수 석 감리사	․기술사 또는 건축사의 자격을 취득한 자로서 10년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․기사의 자격을 취득한 자로서 19년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․산업기사의 자격을 취득한 자로서 22년 이상 건설공사업무를 수행한 자	․박사학위를 취득한 자로서 14년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․석사학위를 취득한 자로서 19년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․학사학위를 취득한 자로서 22년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․전문대학을 졸업한 자로서 25년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․고등학교를 졸업한 자로서 28년 이상 건설공사업무를 수행한 자
감리사	․기술사 또는 건축사 ․기사의 자격을 취득한 자로서 9년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․산업기사의 자격을 취득한 자로서 12년 이상 건설공사업무를 수행한 자	․박사학위를 취득한 자로서 4년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․석사학위를 취득한 자로서 9년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․학사학위를 취득한 자로서 12년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․전문대학을 졸업한 자로서 15년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․고등학교를 졸업한 자로서 18년 이상 건설공사업무를 수행한 자
감리사보	․기사의 자격을 취득한 자 ․산업기사의 자격을 취득한 자로서 2년 이상 건설공사업무를 수행한 자	․석사 또는 박사학위를 취득한 자 ․학사학위를 취득한 자로서 2년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․전문대학을 졸업한 자로서 5년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․고등학교를 졸업한 자로서 8년 이상 건설공사업무를 수행한 자

< 별표 2 >

출          근          부

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2006. ○월분

일자 성명	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일
	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일
책임감리원 ○ ○ ○
보조감리원 ○ ○ ○
보조감리원 ○ ○ ○

(작성 및 기재요령)

◦ 규격은 가로 29.7cm, 세로 21.1cm 용지에 작성

◦ 감리원 전원을 기재함.

◦ 감리원 본인이 직접 자필로 서명(도장은 인정 안됨)하여야 하며, 서명은 형식적

이 아닌 실제 쓰고 있는 서명이어야 함.

Ⅳ. 보안 및 기타유의사항

1. 국가보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 시건장치가 되어 있는 함에 보관하고 열쇠는 책임감리원이 소지하여야 한다.

2. 모든 비밀문서는 관리번호를 부여하여 기록한 후 시건장치가 이중으로 되어 있는 함에 보관하여 열쇠는 책임감리원이 소지하여야 한다.

3. 감리원은 본 업무와 관련 있는 모든 기록과 자료에 대하여 업무와 관련 없는 일에 사용할 수 없으며, 발주기관장의 사전 서면 승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

4. 편집된 모든 도서 및 기타 자료를 다른 목적에 이용 또는 이용토록 할 수 없으며 감리업무수행중 취득한 사실을 누설하여서는 않되며 누설로 인하여 문제점이 발생될 시에는 감리원은 물론 감리전문회사가 모든 책임을 진다.

5. 본 공사구간은 교량의 형식, 재질 등의 변경이 있을 때 감리원에게 일반 및 특별과업지시서 등을 보완 지시 할 수 있다.