-보건진료소(용탄ㆍ도전) 신축공사-

설계용역 과업지시서

			소 장
결재	실 무 자	담 당

보   건   소

-보건진료소(용탄ㆍ도전) 신축공사-

설계용역 과업 지시서

Ⅰ. 과 업 명 : 보건진료소(용탄ㆍ도전) 신축공사 설계용역

Ⅱ. 과업목적

ㅇ 농촌지역 의료기관의 시설낙후와 전문의료인력의 근무기피 등으로 점점       보건의료서비스 환경이 열악해져 가고 있어, 이에 시설개선을 통하여 주민      들에게 양질의 보건의료서비스를 제공하기 위하여,

ㅇ 2007년도 보건진료소(용탄ㆍ도전) 신축공사를 추진함에 있어 설계용역        수행사항 전반을 규정함으로서 설계용역업무에 원활을 기하고자 함.

Ⅲ. 과업의 개요

1. 용탄보건진료소 신축공사 설계용역

가. 위    치 : 정선군 정선읍 용탄리 691-15번지

나. 부지면적 : 660㎡(분할 전)

다. 토지조서

지 번	지목	면적(㎡)	부지	용도지역	비고
정선읍 용탄리 691-15	전	2,514	660	관리지역

라. 건축규모

1) 연면적 : 135㎡(40평)

2) 층  수 : 부지 여건에 따라 지상 1층 또는 2층으로 설계

3) 용  도 : 제1종 근린생활시설(보건진료소)

마. 구    조 : 철근콘크리트조

바. 추정공사비 : 151,901천원(부가세 포함)

※ 설계에 따라 신축되는 진료소는 최적의 공법, 경제적인 자재 선정 등으로

가능한 추정 공사비 범위 내에서 설계되도록 한다.

2. 도전보건진료소 신축공사 설계용역

가. 위    치 : 정선군 임계면 도전리 736-5번지

나. 부지면적 : 299㎡

다. 토지조서

지 번	지목	면적(㎡)	용도지역	비고
임계면 도전리 736-5	대	299	관리지역

라. 건축규모

1) 연면적 : 135㎡(40평)

2) 층  수 : 부지 여건에 따라 지상 1층 또는 2층으로 설계

3) 용  도 : 제1종 근린생활시설(보건진료소)

마. 구    조 : 철근콘크리트조

바. 추정공사비 : 135,000천원(부가세 포함)

※ 설계에 따라 신축되는 진료소는 최적의 공법, 경제적인 자재 선정 등으로

가능한 추정 공사비 범위 내에서 설계되도록 한다.

Ⅳ. 과업의 범위

가. 위 공사 추진에 필요한 모든 설계도서를 그 범위로 하며, 이에 수반되는       측량, 지질조사 등 기초조사 및 관련법에 의한 협의, 인가, 승인, 심의절차      이행에 필요한 자료를 포함하며, 기타 공사와 직접적으로 관련이 있는 사항      으로서 발주기관에서 요구하는 전반사항은 계약 상대자의 부담으로 이행        하여야 한다.

나. 본 과업수행 종료시점은 실시설계 완료후로 하되, 사업 추진중 설계도서가      현장여건에 부적합 하거나 시공이 불가능하여 설계변경이 불가피한 경우        에는 발주기관의 요구에 따라 지체 없이 계약상대자 부담으로 변경 설계        하여야 한다.

다. 계약상대자는 동 부지의 신축공사 타당성 검토를 위해 기존 자료와 별도       조사한 자료를 철저히 분석하여 기본설계(안)을 발주기관으로부터 승인을       득한 후 실시설계에 착수하여야 한다.

Ⅴ. 일반사항

가. 설계용역자의 성실 등의 의무

설계용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 안전하고 경제적이며         주민들이 편리하게 이용 할 수 있는 시설이 될 수 있도록 한다.

나. 법규준수 및 설계책임

설계내용은 국토의계획및이용에관한법 및 건축법 등 관계법규와 제반규정에       저촉되지 않아야 하며, 설계자는 건축사법의 규정에 따라 제출된 도서에         대하여 잘못된 사항이 발생할 경우 일체의 책임을 진다.

다. 보안 등

과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생      되는 모든 책임은 설계용역자가 진다.

라. 진행보고 : 설계용역 자는 설계진행중 다음 사항을 이행하여야 한다.

1) 정기보고 : 착수일로부터 15일 단위로 과업 진척사항 보고 및 협의

2) 중간보고

o 1차 : 기본설계 완료 시점

o 2차 : 구조도면 완성 시점

o 3차 : 실시설계 완료 시점

3) 수시보고 : 발주기관에서 지정한 설계 감독의 요청이 있을 때 또는 다음

단계의 설계업무 착수 전

마. 설계변경 및 조정

설계진행중 발주기관에서 필요하다고 인정되어 설계내용의 변경 또는 수정을

요할시 설계용역 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 하며, 동 설계      변경에 따른 용역기간 연장이나 용역금액의 증액을 요구할 수 없다.

바. 감  독

설계용역 자는 모든 설계과정에서 감독관의 지시에 따라야 한다. 다만 감독      관의 지시가 부당하다고 판단될 경우 사유를 명기하여 발주기관에 서면으로      이의신청을 할 수 있다.

사. 설계자료 조사 성실 이행

1) 설계용역 자는 충실한 설계를 위하여 각종 자료가 되는 조사를 성실하게        이행하여야 하며, 지질조사 계획 시에는 발주기관과 사전 협의하여 각종        안전사고 발생에 유의한다.

2) 설계용역 자는 기본조사설계를 진행함에 있어 충분한 자료를 수집하여          설계의 질을 높여 설계하여야 한다.

3) 설계도서 및 채택된 각종 자료는 객관적인 타당성을 제시할 수 있는 내용        이어야 하고, 발주기관에서 근거자료를 요구하면 언제라도 제시하여야 한다.

아. 회의참석 등

설계용역 자는 본 과업과 관련된 각종 심의, 보고회 등에 참석하여 설명        하고, 각 분야별 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금 답변토록 하여야      한다.

자. 보고 등 의무 성실이행

1) 설계용역 자는 아래 각 사항에 대하여 발주기관에 사전 보고한 후 검토        된 자료에 의하여 과업을 진행한다.

o 설계용역 능력 향상을 위한 기본계획 수립 및 제도개선에 관한 사항

o 각종 심의, 보고회에서 검토되어야 할 사항

o 설계자료 또는 통계조사 연구 적용 및 개선 등에 관한 사항

o 기술인력 구성에 관한 사항

o 새로운 기술도입에 관한 사항

o 공사비, 공사기간 등

o 설계용역과 관련된 홍보활동 및 간행물 발간 등

o 기타 발주기관으로부터 지시받은 사항에 대한 조치결과

2) 설계용역 자는 과업수행 중 각종 심의, 보고회 등을 위하여 자료제출          요구가 있을 시 이에 응하여야 한다.

(자료제출 등에 소요되는 경비는 용역 자가 부담한다.)

3) 용역 자는 계약 후 7일 이내에 아래의 서류를 제출하여야 한다.

o 용역수행 계획서

- 예정 공정표

- 분야별 설계용역수행 책임 기술진 구성현황

․ 분야별 : 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경

․ 용역책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본)

․ 분야별 참여 기술자 투입계획 및 작업계획서(참여기술자 인적사항,              참여과업 내용, 참여예상 기간을 구체적으로 기재)

- 보안대책 및 보안각서

- 세부 시행계획서(분야별 세부 공정계획 및 업무 흐름도)

- 기타 용역수행에 필요한 사항

차. 각종 설계심의, 보고회 개최운영

1) 설계용역 자는 각종 심의, 보고회를 개최 운영함에 있어 보고, 검토된         자료에 의거 출석 설명토록 하고,결정․보완․지시된 사항에 특별한 사유가        없는 한 이를 수용하여 다음 과업에 반영한다.

2) 설계용역 자는 각종 심의, 보고회에 따른 보고서를 성실히 준비하여 제출한다.

3) 보고자료는 알아보기 쉽게 작성하고 필요시 투시도, 슬라이드 등의 보조        설명자료를 준비하여 이해를 돕도록 하는 등 보고자료 준비에 만전을           기하여야 한다.

4) 보고용 설계도면은 설계도서 작성기준에 의하여 작성하고 각종 심의 및         인․허가에 필요한 설계도서로 사용할 수 있도록 하여야 한다.

5) 각종 심의, 보고회 결과에 대하여는 조속히 처리하되 발주기관에서 별도        로 조치하여야 할 사항이라고 판단되는 경우에는 그 조치를 요구하여야         하며 이를 이유로 과업을 지연시키거나 진행이 늦어지도록 하여서는 아니 된다.

카. 의견수렴

각종 심의․보고회에서 토의된 내용과 필요시 심의위원회 심의사항을 우선       반영한다.

타. 의견청취 등

발주기관은 본 과업 진행상 필요하다고 인정하는 경우 관계전문가를 자문       위원으로 위촉하여 그 의견을 청취하거나, 필요부분에 대한 특수용역을         수행할 수 있도록 조치할 수 있으며, 이때의 용역비 부담은 설계용역 자가      부담한다.

파. 관계사항 숙지의무

설계용역 자는 본 과업지시서 내용과 본 용역 시행관련 전반사항을 숙지        하여야 하며, 이를 숙지하지 않아서 발생되는 사항에 대하여는 용역 자가       책임진다.

하. 변경 및 정산

발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할           필요가 있다고 인정될 때에는 설계용역 자에게 이 사실을 요구할 수 있으며      발주기관의 방침에 따라야 한다. 이때 과업 범위의 증감이 발생한 경우에       는 예산의 범위 내에서 당해 계약 금액을 조정 또는 정산한다.

거. 기  타

1) 용역 자는 각종 인․허가를 완료할수 있도록 제반서류를 준비하여야 하고

인․허가 시 보완사항 또한 작성 제출한다.

2) 본 과업 지시서에 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 발주기관과          협의하여 결정하고, 기타 경미한 사항은 협조하여야 하며 이에 소요되는        경비는 용역 자가 부담한다.

3) 감독관이 과업수행 중 하도급자나 고용인이 과업수행에 부적합하다고          판단될 경우에는 즉시 교체 요구할 수 있다.

4) 용역수행 중 또는 수행 완료후에 설계용역비가 과다 산정되었거나 지급        되었음이 판명되어 발주기관으로부터 재산정 또는 반납 요구가 있을 경우        이에 응하여야 한다.

5) 실시설계가 완료되었을 시 준공계를 제출하고 성과품을 납품한다.

6) 본 과업 지시서에 언급되지 않은 사항은 수시로 발주기관에 문의하여          협의하여야 하며 의문사항은 발주기관의 해석에 따른다.

Ⅵ. 설계지침

가. 계획의 기본원칙

1) 신축되는 진료소는 환자진료와 농촌지역 주민들의 건강을 증진시키는          기관으로서 상징성과 조형미, 친근감을 느낄 수 있어야 하며, 공간배치에        있어서는 이용주민들은 물론, 근무자의 동선과 편리성을 최대한 고려하여        설계하여야 한다.

2) 기본계획이나 재료의 선정 시 에너지를 적게 사용하여 건물이 유지․관리        될 수 있도록 하고 냉난방 부하를 최소로 할 수 있는 계획이 되어야 하며,          반드시 유지․관리가 용이한 재료를 내부는 물론 외부에도 적용하도록 한다.

나. 배치계획 시 고려사항

1) 진료소의 내부 배치는 수용기능간의 기능적 상관도에 따라 효율적으로         배치되어 이용주민과 진료원의 움직임을 최소화 할 수 있어야 한다. 또한        각종 설비 역시 건물내 설치거리를 단축시킬 수 있도록 동일 설비가 요구        되는 기능들은 서로 인접되게 배치되도록 한다.

2) 진료소는 최일선 보건의료기관으로서 주민들에게 친밀감을 줄 수 있어야        하고, 또한 농촌지역 주변 환경과 조화를 이루어 지역 주민들에게 이질감        이 조성되지 않도록 하여야 하며, 특히 진료공간과 생활공간이 완벽히 분        리 배치되어 이용주민들의 불쾌감 조성은 물론 진료원 사생활 침해             소지가 없도록 하여야 한다.

다. 평면계획 시 고려사항

1) 진찰실

환자 및 진료원이 자유스럽게 움직일 수 있는 적절한 공간의 확보와 함께

환자진찰에 적정한 밝기의 조명이 제공되어야 하며, 마감 재료의 내부          색상은 환자에게 심리적인 안정감을 줄 수 있도록 한다.

2) 건강증진실

진료 대기시간 등을 활용하여 혈압측정, 자가 신장․체중 측정, 간단한 맛사지기,         안마기, 런닝머신 등을 설치할 수 있는 공간과, 동시 수용인원 20명 내외의      건강교육을 수행할 수 있는 공간을 확보한다.

3) 진료원 주거공간

진료원 주거공간은 도시지역 서민주택 규모로 하되 진료공간과 구분하여        사생활이 침해받지 않도록 한다.

4) 화장실

화장실은 주민들이 이용하는 진료용과 진료원 가족들이 이용하는 가족용

으로 구분설치 한다.

5) 기타 : 보일러실, 주방 등은 통상 설계에 준하되 발주기관과 협의하여         설계에 반영한다.

라. 각종 시설의 설치기준

1) 각종 설비

에너지 절약형 및 유지관리에 용이하여야 한다.

2) 자연채광 및 통풍

진료공간 및 주거공간은 자연채광 및 통풍을 가능한 고려

3) 옥외시설

담장, 주차장, 조경, 건물증축에 필요한 공간 등은 발주기관과 협의

4) 기자재 선정

각종 소요자재 및 기기는 원칙적으로 국산 KS제품을 우선적으로 선정 사용

Ⅶ. 과업수행상의 적용법규 및 기준

가. 본 용역을 수행함에 있어 관계법규와 설계기준, 용역과업지시서 내용에          합당하여야 한다.

나. 본 과업지시내용에 의문이 있거나 과업지시 내용에 명시되지 않은 사항에        대하여는 발주기관과 협의하여 결정한다.

다. 본 과업지시내용에 대한 해석 또는 결정이 어려울 경우에는 발주기관의         의견에 따라야 한다.

Ⅷ. 견적기준

가. 수량산출은 건설교통부 제정 적산요령으로 산출하되 적산은 실시설계납품      기준일의 가격(거래실례, 견적, 정부고시 등)을 기준으로 산정하여야 한다.      단, 납품일과 공사발주일이 다른 경우에는 납품이후 발주예정일에 맞게         설계내역상의 단가를 조정하는데 협조하여야 한다.

나. 관급자재로 구매하여야 할 대상과 수량,금액,시방이 별도로 명시되어야 한다.

다. 복합단가로 구성되는 가격은 반드시 일위대가표를 작성하고 일식으로         적용되는 단가에도 충분히 납득될 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.

라. 각 공사별 내역서를 작성하여 총괄 내역서를 작성하고 재료 및 인건비의      수량 산출근거를 상세히 작성 첨부하여야 한다.

마. 국내 자재단가는 조달청 가격정보를 우선 적용하고 기타 물가자료, 물가정보      등 3개 이상 물가의 가장 낮은 단가를 적용하며, 조사단가표를 비교 작성 첨부한다.

바. 노임은 정부 노임단가를 우선 적용하고 대한건설협회에서 발표되는 개별      직종 노임단가 또는 통계청에 등록된 통계관련 업체에서 발표되는 노임단가      를 적용하고 제잡비는 원가계산준칙 비율을 적용하여야 한다.

사. 과업 수행자는 본 용역집행 완료후에 감사 또는 기타 사유로 위반사항이      발생하였을 때에는 변상 또는 이에 상응하는 어떠한 조치에 대하여도 이를      감수하여야 한다.

아. 물가시세표에 표시되지 않은 품목은 생산업체의 원가조사서가 첨부된         견적서를 첨부한다.(3개 이상 단가기준을 별도 작성)

Ⅸ. 성과표 작성 기준

설계용역 자는 성과품 작성에 있어서 현재 가장 일반화된 관행에따라 시공상    의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되, 다음 사항은 그 정하는     바에 따른다.

가. 설계 설명서

1) 기본계획

환경 및 대지조건, 자료수집 및 분석평가, 현지 답사분석, 예상 공사비,         타당성 검토, 설비방식, 지질지형 및 하부구조, 법규검토

2) 계획구조

실별면적, 배치계획, 각종 구조, 설비시스템 용량의 비교분석평가, 건축미        도출과정 등 취지 및 구상 표현

3) 기본설계

배치계획, 평면, 입면, 단면, 구조도와 설비계통도 등 설계개념 및 마감         자재 선정 등

나. 시방서

1) 각 분야별 공정별로 건설교통부 제정 표준시방서를 준용하여 상세히 작성 한다.

2) 설계도, 내역서 만으로는 표기할 수 없는 사항 및 일반사항 외의 특별한 사항은

따로 특별 시방서를 작성하되 재료, 규격, 색상, 품질, 시공방법 등을 상세히 기술한다.

다. 계산서

1) 구조 계산서외에 전기 및 설비용량(전력, 조도, 냉․난방부하, 기기용량)계산서

라. 공사비 산출내역서

1) 공사비 내역서는 건설교통부 표준 품셈에 의거 작성하되, 노임및 자재비        는 조달청 발행 가격정보에 의한다. 단 조달청 가격정보에 미 수록된           자재 또는 품목은 3개 이상의 시중 물가정보지 중 최저가격으로 하고           시중 물가정보지에도 없는 것은 견적서 또는 원가계산에 의한 실거래           가격을 조사하여 적용한다.

2) 공사비는 발주기관이 제시한 범위를 가능한 준수한다.

3) 공사비에는 한전 인입비, 상수도 인입비, 시운전비(전기, 기계 등) 등을

포함하여 내역서에 표기하여야 한다.

Ⅹ. 성과품 제출목록

가. 설계내역서(총괄) 3부 ⇒ A4 규격

나. 설계내역서(분야별) 각 3부(건축+기계+조경분야, 전기분야, 통신분야) ⇒ A4규격

다. 시방서 및 도면(총괄) 3부 ⇒ A4규격 및 A3규격 각각 작성

라. 시방서 및 도면(분야별) 각3부 ⇒ A4규격 및 A3규격 각각 작성

마. 총괄 및 분야별 내역과 도면이 담긴 CD 각 2매

바. 설계원도 1부

Ⅺ. 용역 및 설계납품 기한

가. 용역기한 : 본 용역의 용역기한은 착공일로부터 60일간으로 한다.

나. 성과품 납품기한

o 기본안 제출 : 계약일로부터 10일이내

o 기본설계    : 기본안 제출 후 20일이내

o 실시설계    : 기본설계 승인일로부터 30일

Ⅻ. 기타사항

가. 건설공사중 기초설계 변경이 필요한 경우 발주기관의 공사감독관이 요구      할때 설계용역 자는 즉시 설계변경 도면을 작성하여 발주기관에 제출하여야      한다.

나. 발주기관은 아래와 같은 사유가있을 경우 본 과업용역을 일방적으로 해약      할 수 있다.

o 설계용역 자의 실정변화로 과업이행이 불가능하다고 인정될 때

o 발주기관의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때 또는 고의적인 불성실로         과업성과를 만족하게 기대할 수 없을 때

o 기타 계약조건을 위배한 때

다. 설계용역 자는 설계상의 잘못으로 발주기관에 피해를 입힐 경우 이에         대한 책임을 지고 실액을 변상하여야 한다.

라. 설계용역 자는 용역완료 후 정부 또는 도 감사기관으로부터 감사 지적에      따른 변상 요구가 있을 때에는 이를 환불하여야 하며, 이의를 제기할 수        없다.

마. 설계용역 자는 과업 진행 또는 완료 후 본건 용역에 관한 일체사항을         외부에 누설하여서는 안된다.

바. 설계하는 자재는 필수 불가결한 것 이외에는 모두 국산품 및 규격품(생산

되고 있는 것에 한함)으로 설계하되, 부득이한 경우 발주기관과 협의 결정       한다.

사. 설계용역 자는 과업종료 후 발주기관에 용역결과 보고(보고방법은 추후

별도 통보)를 하여야 한다.

아. 기타 본지시서에 명기가 없거나 의문이 있는 사항은 감독관과 협의하여

감독관의 지시에 따른다.

보건진료소 시설개선 명세

1. 건축시설(기본시설 면적현황 및 필요면적표)

(단위 : ㎡, 실수)

실 명	면적(㎡)		면적계 (㎡)	비 고
	실수	단위면적 (㎡)
총면적 계	116.01㎡(35.09평)
가. 진료활동				(1층)
계			59.58
진찰실	1	17.82	17.82	3.3m×5.4m, 일반적 진찰
대기공간	1	35.64	35.64	대기실 및 주민교육장소로 이용고려
화장실	1	3.24	3.24	1.8m×1.8m, 남․녀 미분리
현관	1	2.88	2.88	1.2m×2.4m
나. 숙 소				(필요시 2층)
계			56.43
안방	1	13.86	13.86	3.3m×4.2m
방	1	8.91	8.91	2.7m×3.3m
거실	1	16.20	16.20	3.6m×4.5m
식당 및 주방	1	8.10	8.10	3.0m×2.7m
화장실	1	4.86	4.86	1.8m×2.7m
현관	1	1.80	1.80	1.2m×1.5m
보일러실	1	2.70	2.70	1.8m×1.5m

용탄보건보건진료소 신축공사 실시설계 용역
공종		품 명 및 산 식	산 출 내 역	금 액 (원)
실시설계비 적용대상 사업비 산출 내역
1. 총 사업예산				151,901,000
2. 공 제 금 액 산 출
	A	보 상 비	(토지 + 지장물)	0
		ㅇ.토 지		0
		ㅇ.지 장 물		0
	B	부 대 비		0
	C	설 계 비		0
	D	소 계(=A+B+C)		0
	E	부가세(1-Dx10%)	151,901,000÷1.1×10%	13,809,180
	계	D)+E)		13,809,180
3. 적용 대상 사업비(x)			151,901,000 - 13,809,180	138,091,820
4. 실시설계요율 산출			(공사비 비율에 의한방식) 『과학기술부공고 제2001-116호』
		1억원이하(X₂)	5.11%(Y₁)
		2억원이하(X₁)	4.08%(Y₂)
5. 잔액비계산			직선보간법에의거 계상
		직선보간법	( X - X₂) x ( Y₁- Y₂) Y = Y₁- ---------------------- X₁- X₂
		적 용 요 율	(138,091,820-100,000,000)x(5.11-4.08) {5.11 ― --------------------------------} ×1.3 = 4.5999% 200,000,000 - 100,000,000
6. 실시설계비			138,091,820 x 4.5999%	6,352,080
실시설계비 산출 내역
	Ⅰ	실시설계비		6,352,080
	Ⅱ	측 량 비		0
	Ⅲ	지질조사비		0
	Ⅳ	도서인쇄비		0
소 계			(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) =	6,352,080
부 가 세			10%	635,200
손 해 보 험 료				0
합 계			6,352,085 + 635,208 = 6,987,293 『천원단위 절사』 ≒ 6,987,000	6,987,000

※ 공사비 요율에 의한 방식 적용

도전보건보건진료소 신축공사 실시설계 용역
공종		품 명 및 산 식	산 출 내 역	금 액 (원)
실시설계비 적용대상 사업비 산출 내역
1. 총 사업예산				135,000,000
2. 공 제 금 액 산 출
	A	보 상 비	(토지 + 지장물)	0
		ㅇ.토 지		0
		ㅇ.지 장 물		0
	B	부 대 비		0
	C	설 계 비		0
	D	소 계(=A+B+C)		0
	E	부가세(1-Dx10%)	135,000,000÷1.1×10%	12,272,272
	계	D)+E)		12,272,272
3. 적용 대상 사업비(x)			135,000,000 - 12,272,272	122,727,720
4. 실시설계요율 산출			(공사비 비율에 의한방식) 『과학기술부공고 제2001-116호』
		1억원이하(X₂)	5.11%(Y₁)
		2억원이하(X₁)	4.08%(Y₂)
5. 잔액비계산			직선보간법에의거 계상
		직선보간법	( X - X₂) x ( Y₁- Y₂) Y = Y₁- ---------------------- X₁- X₂
		적 용 요 율	(122,727,720-100,000,000)x(5.11-4.08) {5.11 ― --------------------------------} ×1.3 = 4.8056% 200,000,000 - 100,000,000
6. 실시설계비			122,727,720 x 4.8056%	5,897,803
실시설계비 산출 내역
	Ⅰ	실시설계비		5,897,800
	Ⅱ	측 량 비		0
	Ⅲ	지질조사비		0
	Ⅳ	도서인쇄비		0
소 계			(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) =	5,897,800
부 가 세			10%	589,780
손 해 보 험 료				0
합 계			5,897,803 + 589,780 = 6,487,583 『천원단위 절사』 ≒ 6,487,000	6,487,000

※ 공사비 요율에 의한 방식 적용