정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	치매 정신건강 통합센터 증축
② 추진배경	치매를 조기에 지속적으로 치료, 관리함으로써 치매증상의 호전과 증상심화 방지 및 관내 정신관련 의료기관과 요양시설이 전무한 현실 반영
③ 사업개요	○ 목 적 : 효율적 사업추진을 통하여 지역주민의 보건수요 부응 및 양질의 보건의료서비스를 제공하고자 함. ○ 추진내용 · 위 치 : 정선읍 녹송로 33 · 사업량 : 연면적 A=1,350㎡(지하1층/지상1층) - 치매센터 : 지하1층 A=819㎡ - 정신건강센터 : 지상1층 A=531㎡ · 사업비 : 4,800백만원(국 494, 도 25, 군 4,281)
④ 사업부서	보건소 보건행정		⑤ 담당자	소장 전희자 행정6급 유영선
⑥ 선정기준	대규모사업(10억원 이상의 예산이 투입되는 사업)		⑦ 사업기간	2017년~2019년
<그간 주요 추진내용>
○ 정선군 치매안심센터 설치 계획(안) 보건소-22459 · 치매국가책임제 운영에 의한 하반기 내 전국 지자체 설치·운영 지시에 따라 설치·운영 및 규모 파악		‘17.07.10	전정환 군수 신주호 부군수 전희자 보건소장 신애정 건강관리담당 한보연 주무관
○ 치매·정신건강통합센터 증축 기본계획 수립 보건소-31267 · 국가시책에 따른 치매와 정신건강부서의 중요 성에 따른 청사 부족공간의 효율적 재배치로 보건기관 목적에 부합하는 양질의 보건의료서 비스 제공 추진		‘17.09.25	전정환 군수 신주호 부군수 전희자 보건소장 안철용 보건행정담당 유영선 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 치매·정신건강통합센터 실시설계용역 추진계획 보건소-1598 ·『건축서비스산업 진흥법 등』설계공모 활성화 및 공모방식 우선적용대상 외의 설계발주에 따른 추진방향 설정 ○ 기술용역(설계,감리) 조달청 계약요청 의뢰	‘18.01.10	신주호 부군수 전희자 보건소장 안철용 보건행정담당 유영선 주무관
○ 실시설계용역 계약 및 착수(공동수급계약) - 건축 : DS건축사사무소 - 전기,통신,소방 : 성우이엠이	‘18.03.20~ ‘18.07.30	정태규 부군수 전희자 보건소장 안철용 보건행정담당 유영선 주무관
○ 강원도 계약심사 의뢰(건축, 전기)	‘18.08.14
○ 증축공사 추진계획 방침결정 - 보건소-26873	‘18.09.12
○ 사업착공 -건축및감리,전기및감리,소방및감리,통신,폐기물	‘18.10.15
○ 공사 일시정지(지적불일치에의한 설계보완) - 보건소-32901	‘18.11.15
○ 동절기 공사정지 - 보건소-36331	‘18.12.18