목 차
Ⅰ.	설 계 설 명 서
Ⅱ.	타 당 성 조 사 과 업 지 시 서
Ⅲ.	기 본 설 계 용 역 과 업 지 시 서
Ⅳ.	보 안 대 책
Ⅴ.	예 정 공 정 표
Ⅵ.	설 계 예 산 서
Ⅶ.	위 치 도

Ⅰ. 설 계 설 명 서

Ⅰ. 설계설명서

1. 과업명 : 군도 개설공사 타당성조사 및 기본설계용역

2. 과업목적

본 과업은 군도 노선중 미포장 구간 도로확장 및 터널개설을 통하여 날로 증가하는 교통량의 수요 대처와

농가에서 생산되는 물동량 수송에 원활을 기함으로서 지역개발촉진 및 국토의 균형발전을 도모하기 위하여

사업시행의 타당성조사와 기본설계용역을 시행하는 것임.

3. 과업대상지역 :  정선군 사북읍 직전리, 신동읍 예미리, 남면 광덕리 일원

4. 과업개요 :   연장 6.15km, 타당성조사(6.15㎞), 기본설계(4.65㎞) (문화재지표조사포함)

5. 과업기간

본 과업 설계기간은 착수일로부터 4개월(120일) 하고 다음의 경우 관의 승인을 득한후 기간을 연장할 수 있다.

가. 천재지변등 불가항력으로 작업이 불가능 할때

나. 발주기관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 경우

다. 관계기관의 협의 및 검토가 관의 사유로 지연되었을 때

라. 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때

Ⅱ. 타당성조사 과업지시서

Ⅱ. 타당성조사 과업지시서

1. 업무의 범위

본 과업구간의 물동량 수송의 원활과 지역개발촉진 및 국토개발촉진 및 국토의 균형발전을 도모하기 위하여 경제적, 기술적, 사회 및 환경적 사항을 종합 검토하여 사업시행의 타당성을 판단하고, 여러대안을 비교․검토하여 최적노선을 선정하고 투자방안과 적정투자시기등을 도출하기 위한 타당성조사와 합리적인 건설공사 기본계획을 수립하기 위함.

2. 과업 수행기간

타당성조사는 본과업의 착수일로부터 2월(60일)이내에 성과품을 제출하여야 한다. 다만 다음의 경우에 발주청에 조사기간을 연장 할 수 있다.

가. 관계기관의 협의 및 검토가 지연되었을 때

나. 민원의 발생에 의한 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

다. 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능 할때.

3. 설계변경 조건

수급인은 다음과 같은 사유가 발생되었을 때 감독관과 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

가. 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

나. 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산변경시

다. 민원의 발생에 의한 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

4. 주요 업무의 사전승인 등

수급인은 다음 사항에 대해서는 사전에 발주청과 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

가. 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

나. 주요 설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

다. 관계기관과의 협의사항

라. 설계기준의 설정 또는 변경

마. 기타 감독관의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

바. 기본조사설계용역전 타당성조사용역을 실시하여 그결과를 발주청에 보고후 기본조사설계용역 실시여부를 결정

5. 과업수행 및 공정보고

가. 착수보고서 제출

수급인은 과업착수시 예정공정표, 사업책임기술자 선임신고서가 포함된 착수보고서를  제출한다.

나. 과업수행계획서

수급인은 착수보고서를 제출한 후 현장여건 등을 검토한 후 과업수행계획서를 제출한다. 이에 포함할 내용은 다음과 같으며 2부를 발주청에 제출하여 승인을 받아야 한다.

① 세부공정계획서

② 과업의 단계별 성과품 제출계획서

③ 과업수행조직 및 인력(장비)투입계획서

④ 건설기술 경력사항 확인서

⑤ 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

⑥ 참여기술자 보안각서

다. 월간 진도보고

수급인은 과업수행기간중 다음 사항을 포함한 월간진도보고를 매월 말일을 기준으로 다음달 10일까지 감독관에게 제출하여야 한다.

① 과업추진내용 및 공정현황

② 각종 도서수발현황(승인사항포함)

③ 과업수행상 중요 문제점 및 대책

④ 참여기술자 현황

⑤ 다음달 과업수행 계획

라. 중간보고

수급인은 감독관의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 감독관의 지시사항 (구두 및 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

① 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

② 반기 1회 이상의 중간 보고 시

③ 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

6. 용역감독 등

가. 용역감독

발주청은 이 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.

① 기술인력 동원현황

② 타당성조사 보고서 작성현황 및 업무수행상태

③ 기타 확인에 필요한 사항

나. 용역점검

발주청은 설계품질 확인을 용역업무 수행을 위해 수급인에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 수급인은 감독관과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

7. 수급인의 책임

가. 수급인의 책임범위

수급인은 발주청의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등 과업수행상 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대한 우리부의 수정․보완요구가 있을 때는 수급인 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나. 문서의 기록비치

수급인은 이 과업을 수행함에 있어서 발생하는 관계기관과의 협의사항,   발주청의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성  비치하여야 하며, 발주청의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

다. 안전관리의 의무

수급인은 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

라. 법률준수의 의무

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로  인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

8. 관계기관 협의

본 과업과 관련되는 사항으로서 외부기관과의 협의는 발주자가 주관하며 수급자는 협의에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

9. 설계자문 등

가. 발주자는 건설기술관리법령 의한 설계자문을 받도록 수급인에게 요구할 수 있다

나. 발주자는 설계자문 시기, 자문내용 등 설계자문 계획을 자문시행전 수급인에게 통부하여야 하며, 수급인은 효율적인 설계자문이 이루어 질 수 있도록 자문시행전까지 설계자문을 위한 자료를 제출하여야 한다

다. 수급인은 발주청으로부터 통보 받은 설계자문 결과를 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다

10. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

수급인은 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주위와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

나. 과업성과품 발간시 유의사항

수급인은 필요한 중간 및 최종보고서 등 과업 성과품을 감독관과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류된   자료의 발간시 감독관과 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

다. 보안관리의 책임

수급인은 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며, 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여는 책임을 져야 한다.

11. 용어해석

과업지시서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 우리군과 수급인이 상호 협의하여 결정하여야 한다.

가. 성과품 작성에 사용하는 용어

① 계약조건에서 정의, 사용한 언어

②  KS 등 표준규격에서 정의

③ 기술용어 사전에서 정의

④ 정부제정 제기준 용어

⑤ 기타 국어사전에서 정의, 사용한 용어

나. 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

① 한글 맞춤법(교육과학기술부)

② 외래어 맞춤법(교육과학기술부)

③ 기본외래어 용어집

다. 성과품 작성에 사용하는 문장구성

① 과업지시서에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양한다.

② 형용사, 부사는 문자의 연결이 확실히 되도록 사용

③ 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장사용

④ 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체를 사용

라. 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

① 애매한 표현배제

- 원칙적으로, 대체로, 충분한 등의 애매한 표현을 최대한 배제

② 주어를 명확히 표기

- 주어, 술어, 목적어를 명확히 구분

- 누가, 무엇을, 어떻게 해야하는지를 명확하게 기술

- 수급인은, 감독관은 등 주어 명시

③ 약어사용

- 가능한 약어를 사용하지 말 것

- 약어 사용이 필요한 경우 다음에 따른다.

•건설업 분야에서 제정된 협약

•사전에 수록되어 있는 약어

•KS 규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

•규준 및 규격은 그 단체 및 기관 또는 제조회사에서 제정한 것

•약어는 당초 단어의 특성을 유지하는 데 필요한 최소한의 문자수로 표기

마. 성과품 작성시 서술원칙

① 문장내용은 간단 명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

② 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

③ 불가능한 사항은 규정하지 말 것

④ 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

⑤ 정확한 문법으로 기재할 것

⑥ 예측보다는 직설적으로 서술할 것

⑦ 공법과 결과를 모두 기재하지 말 것

⑧ 모순된 항목은 배제할 것

⑨ 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 하지 않도록 구두점을 사용할 것

⑩ 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

⑪  KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

⑫ 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

12. 용역수행자의 교체

가. 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 감독관이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나. 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 자격을 갖춘 기술자로 발주청의 승인을 받은 후 즉시 교체한다.

13. 부실업자 등에 대한 제재

과업수행자는 과업을 수행함에 있어 다음의 경우에 해당하는 경우에는 국가를 당사자로하는계약에관한 법률 제27조의 규정에 따라 입찰참가자격을 제한함

가. 사전조사를 소홀히 하여 기본계획을 불합리하게 수립하고 설계부실을 유발한 경우

나. 고의 또는 중대한 과실로 총사업비를 적정하게 산정하지 아니한 경우

다. 용역의뢰자 기타 이해 관계인의 요청을 받아 기본계획 또는 설계를 사업목적 달성을 위한 적정 규모보다 필요 이상으로 확대하여 국가예산을 낭비하게 한 경우

Ⅱ 조사업무

1. 관련계획 조사 및 검토

가. 상위계획, 지역개발계획, 산업시설계획, 교통관련계획 등을 조사하고, 필요한 경우 관계기관과 협의한다

나. 상위계획

① 국토종합개발계획

② 경제사회발전 5개년 계획

③ 광역개발계획

다. 지역개발계획

① 광역시 및 도 종합개발계획

② 도시기본계획

③ 도시계획

라. 산업시설계획

① 국가공단 및 지방공단계획

② 신항만, 공항, 댐 등의 건설계획

마. 교통관련계획

① 전국간선도로망 계획

② 광역종합교통계획

③ 고속국도, 국도, 지방도 등 도로건설 및 확충계획

④ 기타 주변도로계획

2. 현지 조사 및 답사

가. 수급인은 예정노선의 해당 계획 지역에서의 지형, 지물, 식생, 용배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악․확인한다.

나. 현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 VIDEO 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성한다

3. 수리․수문조사

계획지역 하천의 상태, 정비계획, 유역면적 및 주변개발상황 등을 주로 기존 자료에 의존하여 조사한다.

4. 기상 및 해상조사

계획지역이 해상인 경우에는 기상자료(천기일수, 강우량, 강설량, 기온, 풍속 등)와 해상자료(조류, 조석, 파랑 등)를 조사한다.

5. 선박운항조사

가. 계획시설물이 해상에 설치되는 경우, 통행하는 선박의 종류, 크기, 회수 등을 조사한다.

나. 계획지역 인근의 부두시설, 물양장, 선착장 등의 위치, 규모 등을 조사한다.

6. 환경영향조사

최적 노선대에 대한 문화재 분포, 생태계 보존 필요성 등을 관련자료 또는 현지답사를 통해 조사한다

7. 교통량 및 교통시설조사

가. 교통량 조사는 계획시설물의 도로기능에 있어 교통량 특성을 파악하는 것을 목적으로 한다.

나.  계획지역 인근의 도로망을 조사하고 주요 교차지점의 교통량을 시간별,   방향별 및 차종별로 조사한다.

다. 계획지역 인근의 도로형태, 교차로시설, 대중교통시설, 병목구간 및  교통유발시설 등을 조사한다.

Ⅲ. 계획업무

1. 예비타당성조사 검토

예비타당성조사의 성과품을 검토․분석하여야 하며 조사, 계획, 설계부문 등 각 업무의 결과를 타당성조사에 최대한 활용하도록 한다.

2. 교통분석 및 평가

가. 교통현황 분석

① 교통계획에 필요한 모든 자료는 합리적으로 분석하기 위해 교통조사 대상 지역을 구분하고 교통지구를 설정한다.

②  조사분석에 포함된 일반사항으로 인구, 토지이용 및 건물면적 및 자동차  보유대수 등을 포함하여 교통지구 단위별로 정리․분석한다.

③ 대중교통 운행실태, 주요 가로 및 교차로의 소통실태 및 주요 교통시설의 이용실태를 조사․분석한 후 차량 O/D를 이용하여 추정된 교통량과 조사된 교통량을 비교․분석한다.

나. 장래 교통여건 전망

① 장래 교통여건 분석시 필요한 관련계획을 검토하여 분석대상 도시의 교통수요 예측에 반영한다.

② 대상지역 및 주변지역 대해 인구, 자동차보유대수, 토지이용 및 건물면적을 교통지구별로 전망․분석한다.

③ 장래 교통수요 전망에서는 대상지역 및 주변지역에 대해 사람 및 화물통행량, 지구별 발생, 도착 통행량, 기․종점 통행량의 각 세부사항과 주요가로 및 교차로의 소통여건에 관한 사항을 수록한다.

④ 교통수요예측은 원칙적으로 4단계방법을 사용하되 다른 절차를 사용할 경우 선택된 사유를 제시한다.

⑤ 장래 교통수요는 노선 대안별 시행여부에 따른 교통체계 변화를 파악할 수 있도록 예측되어야 한다.

⑥ 전국 및 당해지역의 수송수요 실적과 장래전망을 년도별로 20년간 분석 예측하여야 하며, 교통량 예측시에는 아래사항이 포함되어야 한다

- IC간 차종별 교통량

- IC 유출입 교통량

⑦  조사대상 도로에 대한 교통량의 증가추세, 수송수단간 이용패턴 및 장래 교통량 예측 등을 위하여 필요시 교통조사(일반교통량조사, O/D조사, 여객.화물의 성향조사, 속도조사 등)를 시행하고 이를 분석하여야 한다.

⑧ 기존도로 및 계획도로에 대한 교통용량을 산정하고 용량도달시기 등을 분석하여야 하며, 용량분석시에는 당해도로의 조건(도로조건,  교통조건, 교통통제조건)을 종합적으로 고려하여 산정하여야 한다.

⑨ 도로의 기능, 교통특성, 입지 등을 고려하여 서비스수준을 결정하고 각종 보정계수를 이용한 최대 서비스교통량을 산정, 도로의 차로수를 결정해야 한다.

⑩ 교통현황분석 및 교통수요예측은 감독관이 정한 과업의 내용을 분석하여 효율적으로 추진될수 있도록 계획서를 작성하여야

한다

3. 경제성분석 및 재무분석

가. 현재 국내에서 운행중인 차량에 대한 구입가격, 부품비, 유류비 유지관리비 및 인건비 등 최근의 자료를 이용하여 조사한 후 차량의 구성비에 의한 차종별 단위 운행비를 산출한다.

나. 기존 도로의 아스팔트 콘크리트 포장과 시멘트 콘크리트포장의 차선별 유지관리비를 분석하여 적용해야 한다.

다. 도로건설사업비 및 유지관리비와 이용자 편익을 비교하여 편익비용비(B/C), 초년도 수익률(FYRR), 내부수익률(IRR), 순현재가치(NPV) 등을 산정하여야 하며, 이때 시간편익을 고려한 경우와 고려하지 않은 경우로 구분하여야 한다.

라. 경제성 분석은 전구간을 동시에 건설할 경우와 교통량 예측 및 우리부의 재정 전망을 고려하여 단계별로 건설하는 경우로 구분 분석하여야 하며, 단계별 건설시 구간별 투자우선순위를 제시하여야 한다.

마. 건설비, 차량운행비, 교통량, 공사기간 등 경제성 분석시 사용한 제요인이 변경될 경우 경제성에 미치는 영향을 검토하기 위하여 민감도 분석을 시행하여야 한다.

바. 사업대상노선에 대하여 민간투자사업으로의 추진 가능여부와 경제성 분석을 통한 최적개통시기(사업시기)를 제시하여야 한다.

4. 공사시행방법 검토

수급인은 사업추진에 유리한 공사발주형태(턴키, 대안입찰, 기타공사 등)의 장단점을 분석하여 검토하여야 한다.

5. 민감도 분석

민감도 분석에 의거 사업비 증액에 따라 경제적 타당성이 없어지는 사업비(이하 한계사업비라 한다)를 제시하여, 추후 기본설계 또는 실시설계 산출사업비와 비교함으로써 사업의 타당성 여부를 재검토 할 수 있도록 한다.

6. 노선선정

가. 1/25,000 지형도를 이용하여 후보노선대를 설정하고 노선대별로 검토한 후 최적노선대를 선정한다.

나. 1/5,000 지형도를 이용하여 개략노선대를 선정한다.

다. 인터체인지 등의 출입시설 위치(지명, 개략위치) 및 연결도로와의 접속을 검토한다.

라. 대상도로의 규모(도로의 규모, 설계속도, 시․종점 위치, 노선대, 차로수 및 출입시설 위치)를 결정한다.

마. 터널, 장대교량, 등 주요구조물 및 휴게소, 버스정류장 등 주요 도로시설물의 개략적인 위치를 구상한다.

바. 최적노선대는 지형여건과 지장물, 관련계획을 종합적으로 취합하여 검토하여야 한다.

Ⅳ. 설계업무

1. 설계기준

가. 도로의 종류, 교량의 등급과 터널의 종류 등을 규정한다.

나. 설계속도 및 폭원구성을 제안한다.

다. 구조물 설계방법과 내진설계 등급을 제안한다.

라.  계획시설물 설계에 적용할 홍수재현 빈도에 따른 계획홍수량, 계획홍수위 등을 제안한다. [중․소교량(하천폭 50m이하)은 50년 이상, 장대교(하천폭 50m이상)는 100년 이상의 홍수재현빈도를 적용한다. 특히 홍수 피해가 있는 지역은 홍수 재현 빈도를 샹향 조정할 수 있다.]

마. 계획시설물이 해상에 설치되는 경우, 조석의 차 및 설계파고 등을 제안한다.

바. 구조물 설계에 적용할 하중의 종류, 크기 등을 제안한다.

2. 노선설계

가. 노선대 설계

축척 1/50,000～1/25,000 지형도상에서 후보노선대의 설계를 수행하고 최적노선대를 결정한다.

나. 개략노선 설계

최적노선대에 대하여 축척 1/5000 지형도상에서 개략적인 노선설계를 계획하고 주요 구조물을 계획하여 경제성 분석에 필요한 소요사업비를 산출한다.

3. 구조물 설계

가. 구조물 계획결과와 결정된 설계기준을 토대로 주요 구조물의 형식 및 형태를 설계하되, 계약서 또는 과업지시서에 특별한 사항이 없는 경우에는 기존 설계자료 및 관련 기술자료를 참조하여 설계한다.

나. 경제성, 시공성, 안정성, 내구성, 유지관리 등을 고려하여 사용재료를 선정하고, 승차감 등을 고려하여 경간 구성을 설계한다.

다. 도로, 철도, 선박 등의 통과와 계획 홍수위 등을 고려하여 적정 형하고를 결정하고 구조물 설계에 반영한다.

4. 개략설계도

노선도에는 최적 노선대 해당지역의 사회적, 자연적, 문화적요인 및 각종 관련계획을 명시하고 계획 예정인 주요 구조물 및 주요 도로시설물의 위치를 표기하여야 한다. 개략노선은 1/5,000 지형도를 이용하여 종․평면도 (H=1/5,000, V=1/500)를 작성하여야 하며 여기에는 주요 구조물 및 주요 도로시설물의 개략적인 규모 및 형태가 나타나야 한다.

Ⅴ. 건설공사 기본계획 수립

수급자는 타당성조사 결과를 토대로 하여 건설기술관리법 시행령 제38조7의 건설공사 기본계획을 수립하는 데 필요한 아래의 자료를 발주청에 제출하여야 한다.

가. 공사의 목표 및 기본방향

나. 공사내용․공사기간․시행자 및 공사수행계획

다. 공사비 및 재원조달계획

라. 개별공사별 투자우선순위

마. 연차별 공사시행계획

바. 시설물 유지관리계획

사. 환경보전계획

아. 기대효과 등 우리청에서 필요하다고 인정하는 사항

Ⅵ. 성과품 작성기준

1. 최종 성과품의 구성 및 제출할 부수는 다음과 같다.

가. 타당성조사 보고서 : 10부

나. 요약보고서(종합, 국․영문) : 10부

다. 타당성조사 보고서 별책부록 (교통분석, 경제성 및 재무분석, 추정수량 및 추정공사비산출서 등) : 5부

라. 설계도면

① 위치도 또는 노선도 (축척 : 1/25,000 ～1/50,000) : 5부

② 종․평면도 (H=1/5,000, V=1/500) : 5부

마. Compack Disk : 5부

2. 타당성조사 성과품의 내용

가. 타당성조사보고서

① 제출문 (용역업체의 대표이사 명의)

② 참여기술자(명단 및 인적사항, 업무내용)

③ 목차

④ 위치도 (전 노선을 1장으로 표기할 수 있는 축척)

⑤ 과업의 개요 (목적, 범위, 내용, 과업수행방법 등)

⑥ 조사

- 관련계획조사

- 현지조사 및 답사

- 교통량 및 교통시설조사

- 수리․수문조사, 환경영향조사

⑦ 계획

- 교통분석

- 경제성 및 재무분석

⑧ 노선대 검토

- 후보노선대 설정 및 검토, 평가

- 최적노선대 선정 및 노선계획

- 최적노선대의 주요 구조물

⑨ 추정사업비 산출

- 추정 공사량

- 추정 공사비, 용지비, 기타

⑩ 결론 및 종합

⑪ 부록 (기술심의 및 자문사항, 관계기관 업무협의 및 지시사항 등)

나. 타당성조사 보고서 별책부록

① 교통분석

- 조사표 양식, 교통지역 분석

- 교통조사 (O-D조사 포함)

- 장래 교통량 (출입시설 포함)

② 경제성 및 재무 분석

- 대안별 경제성 분석

- 최적 안의 투자 우선순위 분석

- 최적 안의 민감도 분석

- 최적 안의 최적 투자시기 분석

③ 추정수량 및 추정공사비 산출서

- 추정수량산출서

- 추정공사비산출서

다. 설계도면

① 목차

② 위치도 (전 노선을 1장으로 표기할 수 있는 축척)

③ 노선도 (축척 1/25,000～1:50,000)

- 후보노선대

- 최적노선대

④ 노선 종․평면도 (H=1/5,000, V=1/500)

3. 성과품 작성의 특기사항

가. 보고서

① 각종 조사자료는 본 보고서의 항목에 포함하여 수록하는 것을 원칙으로 하되, 그 양이 과대하여 별도보고서를 작성하는 것이 적절한 경우에는 우리군과 협의 후 작성하며, 본 보고서에는 요약분을 수록한다.

② 건설기술심의 및 자문내용, 각종 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

③ 타당성조사 용역의 실명화를 위해, 참여한 연구원, 기술자, 관계공무원 등과 참여 범위를 기록한다.

④ 수급인은 사업추진에 유리한 공사발주 형태(턴키, 대안, 기타공사 등)의 장․단점을 검토․분석한다.

나. 기  타

① 도면의 크기는 KSA5201의 A0-A6에 준하는 것을 윈칙으로 한다.

② 모든 보고서는 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 관련도면, 집계표 등을 위해 A3크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

③ 모든 보고서, 도면을 비롯한 성과품은 CD-ROM 또는 전산디스켓에 저장하여 우리부에 1 SET를 제출한다.

Ⅶ. 기 타

SOC시설 타당성조사 일반지침(2000.12. 건설교통부)에 의거 수행한다.

Ⅲ. 기본설계용역 과업지시서

Ⅲ. 기본설계용역 과업지시서

1. 과업의 범위

가. 주요과업내용

1) 설계 개요및법령등 제기준의 검토

2) 예비타당성조사 및 타당성조사 결과의 검토

3) 공사지역의 문화재등에 대한 문화재지표조사 및 설계반영 필요성 검토

4) 기본적인 구조물 형식의 비교․검토

5) 구조물 형식별 적용 공법의 비교․검토

6) 기술적 대안 비교․검토

7) 대안별 시설물의 규모의검토

8) 대안별 시설물의 공사비등 경제성 비교

9) 시설물의 기능별 배치검토

10) 개략공사비 및 공기산정

11) 측량 및 지반․지질․기상․기후조사

12) 주요자재․장비 사용성검토

13) 설계도서 및 개략 공사시방서 작성

14) 설계설명서 및 계산서 작성

15) 관계법령등의 규정에 따라 기본설계시 검토하여야할 사항

16) 기타 발주청이 계약서 또는 과업지시서에서 정하는 사항

2. 세부과업내용

가. 본 과업은 도로의 계획목표년도를 20년으로 설정하여 장기적인 사회․경제현황 및 교통량 증가 추이를 전국국가 지원지방도 정비계획차원에서 분석, 시행되야 한다.

나. 본 과업은 건설교통부의 도로노선계획수립지침(‘95. 10. 25)과 국도의 노선계획․설계지침(2000.1)을 적용 하여야 한다.

다. 통계자료는 공신력이 있는 국도해양부, 기획재정부 및 정부기관, 한국은행통계, 기타 공공기관의 통계자료를 활용하고 그 출처를 명시하여야 한다.

라. 본 과업지시서에 명시되어 있지 않은 사항은 감독관과 사전 협의, 결정하여 과업을 수행하여야 한다.

마. 본 과업은 예정공정표에 따라 매월말 진도를 익월 10일까지 보고하여야 한다.

바. 모든 과업수행은 가능한 전산처리를 원칙으로 하고 관계자료 및 산출근거 등을 필요시 제출하여야 한다.

사. 보고서 작성에 있어서 수록내용 및 편집순위 등에 대하여는 감독관과 사전 협의하여야 한다.

아. 본 용역 완료후라도 성과품의 보완지시가 있을 때에는 과업수행자의 비용 부담으로 성과품을 필히 보완 제출하여야 한다.

자. 본 과업은 다음 사항을 참고하여 수행한다.

1) 관련계획 검토

가) 제4차 국토종합개발계획

나) 제7차 경제사회발전 5개년 계획

다) 신경제 5개년 계획

라) 국가지원지방도 예비 타당성 조사

마) 주변지역 도로건설계획

바) 기타 본 과업과 관련되는 사업계획

2) 사회․경제현황조사

전국 및 당해지역의 세력권내 인구, 경제, 산업수송부문에 관련된 통계자료를 수집 분석하여 장기간에 걸친 변화를 파악하고, 정부의 장기 경제계획지표 및 정책목표를 토대로 장기전망을 예측하여야 한다.

3) 교통수요 예측

가) 교통량조사

과거 실적자료와 기존의 관련보고서를 최대한 활용하되, 교통량 특성을 추정하기 위하여 필요한 경우 적정한 교통량 조사지점을 선정하여 교통량 조사(일반교통량 조사, O-D, 화물의 수송성향조사, 속도조사등)을 실시하고 이를 분석하여야 한다.

나) 장래 교통수요 추정

조사된 자료를 이용하여 지역여건과 장래 개발계획 등을 고려하여 개통후 5년단위로 20년을 목표연도로 장래 교통량을 추정하여야 한다.

4) 노선 선정

가) 비교노선 선정

지역 및 지형적 특성등을 종합 검토하여 필요한 경우 노선조정 또는 수개의 대안을 설정한 후, 비교․분석과정을 통해 최적노선을 설정한다.

나) 최적노선 선정

선정된 최적노선에 대하여 현지조사, 토지이용현황 및 계획검토 등을 통한 최적노선을 1/5,000지형도를 이용 선정한다.

노선 선정은 가급적 용지매입이 용이하고 경제적인 선형이 될 수 있도록 계획하되, 장래 유지관리측면을 고려하여 가급적 양지를 택하도록 하고 도로안전을 고려한 선형이 되도록 하여야 한다.

5) 기술검토

가) 설계기준 검토

대상노선의 기능적 도로등급, 설계기준 등을 감안하여 간선기능이 확보될 수 있도록 계획되어야 한다.

나) 용량검토

도로용량은 건설교통부에서 발간한 도로용량편람(‘92)에서 제시된 자료를 활용하고 교통량 수요예측 결과 및 도로의 기능적 등급, 설계기준 등에 의한 당해도로의 교통량/용량비를 산정하여 소요차로수를 산출토록 한다.

다) 접속방안 및 교차로 계획

무분별한 주변도로의 접속을 가능한 억제하고 효과적으로 교통처리를 할 수 있도록 교차로등 관련시설 접속방안을 제시토록 한다.

라) 주요구조물계획

대상노선상에 예상되는 장대교, 장대터널등 특수 구조물에 대한 형식, 공법, 공사비 및 장단점 등을 면밀히 검토하여 최적안을 제시하여야 한다.

마) 배수 및 횡단구조물 설계

수문조사에 의한 배수단면을 결정하고 횡단구조물은 인근 주민의 편의와 기계화 영농 등을 고려하여 위치를 선정하고 장래 개발가능성 등을 조사․검토하여 교량이나 통로암거로 결정하고 통로암거는 가능한한 4.5m×4.5m이상의 규격으로 하되, 부득이 통로암거를 크게 할 수 없는 경우는 측도를 개설하여 타 통로암거까지 연결토록 한다.

바) 토질 및 골재원 조사

① 일반사항

선정노선에 대한 연약지반의 위치, 골재원의 위치, 토취장의 위치등을 조사하여야 하며 지지력 계수등을 결정하기 위하여 토질조사 및 시험을 시행하여야 한다.

② 조사 목적

∘토질조사는 계획노선의 설계에 필요한 지질공학적 설계인자를 도출제시하고 공법선정 및 구조물 설계에 필요한   제반사항을 파악하기 위하여 현장조사 및 자료등을 면밀히 검토한 후 현장여건에 상호 부합하도록 효율적으로 분석   하여야 한다.

③ 토질조사는 아래의 분석 흐름도를 표준으로 하여 실시한다

	조사 계획
						1. 터널구간의 안정성 분석 및 굴착공법과 지보공법선정 2. 기초지반의 MODELING 3. 설계자료의 제시 4. 건설재료원 제시
최적 노선 선정 및 시설의 설계			토질조사 및 분석
			∙최종검사기술의 도입 ∙통계적 분석방법의 도입

④ 토질조사항목은 아래표를 표준으로 작성한다

	조사의 종류					사전조사		∙기존조사 자료 수집분석 ∙지형 및 지질특성 파악 ∙조사계획의 수립
	지층분포 파악
	Boring 각종 Sounding
						현장조사		∙지표 지질조사 ∙시추조사(Boring) ∙시굴조사(Test pit)
	건설재료원 조사
						SOUNDING		∙표준 관입조사 ∙공내 제하시험 ∙투수 및 수압시험
	노선변경에 따른 지반 지역과 절.성토 및 구조 물설계 지역조사
											조사결과 검토
						물리탐사		∙탄성파 탐사, 전기탐사
						재료원 조사		∙골재원 조사 ∙석산 조사
						실내 시험		∙흙의 물리시험 ∙흙의 역학시험
						종합분석 및 평가
						∙계획노선의 적정성 판단 ∙성토부 기초지반의 안정성 검토 ∙절토부의 사면구배 결정 및 사면의 안정성 분석 ∙터널구간의 안정성 분석 및 굴착공법과 지보공법의 선정 ∙포장 및 구조물 설계자료 재공 ∙재료원의 매장량, 품질특성, 재료원 현황등 평가결과 제공

⑤ 토질조사

- 도로선형이 결정되면 감독과 사전 협의하여 시추조사 위치를 결정하되, 교량 및 터널은 최소 2개소 이상을 조사하며       해당지역의 지질도나 토양 분포도, 기 조사된 토질재료 및 기타 관련자료들을 포함한 현지의 지질상태를 조사

검토하여 동일한 횡단면으로 간주할 수 있는 도로를 연장별로 구분하여야 한다.

- 과업지시서 이외의 추가시행에 대한 토질조사 항목 및 조사비는 예산범위 내에서 실시설계비보다 우선하여 변경

할 수 있다.

- 본 과업노선에 대하여 노반조사, 교량기초조사, 터널부 지반조사, 사면안정조사 및 기타, 토취장, 골재원조사 등에

대한 토질조사 기준은 다음 표를 기준으로 한다.

구 분	토 질 조 사 법	조 사 기 준	시 험 내 용
․절토부	․보링(시추조사:NX) ․시험굴 조사	․100m당 1개소, 보통암 1m까지 실시 ․500m당 1개소, 2.0m까지	․암석물성시험 ․시추공내 수위측정 ․흙의 물리시험
․성토부, 연약지반	․보링(시추조사:NX) ․오오거 보링	․성토부500m당 1개소, 보통암 1m까지 실시 ․연약지반 100m당 1개소 ․300m당 1개소, 2m까지	․흙의 물리시험, 흙의 역학시험 ․표준관입 시험(1.5m간격)
․교량기초조사	․보링(시추조사:NX)	․매교대 및 교각(상,하행선) ․시추심도는 경암층 2m까지	․시추공내 수위측정 ․표준관입 시험(1.5m간격) ․암석물성 시험
․터널조사	․보링 ․탄성파 탐사	․개소당 3개소 이상	․FEM 해석자료 ․동역학 시험, 암석물성 시험
․사면 안정조사	․시추조사 및 탄성파 탐사	․대절토(절토교 20m이상)부 1개소 이상 ․시추심도는 계획고하 1m까지	․절토부와 동일
․토취장 및 골재원 조사	․시추조사(T․P) 및 시굴조사	․2개소 이상 선정 (매장량, 토취가능여부)	․비중, 함수비, 기타 필요한 시험

⑥ 골재원 조사

골재원(석산, 하상), 토취장에 대해서는 사전 관계기관과 협의하여 채취 가능여부 및 채취가능량, 운반거리 등을 조사하여야 하며 사용가능여부를 판단할 수 있는 시험을 실시하여야 한다.

사) 포장설계

계획 교통량, 골재원 현황, 기상조건, 토질시험결과 및 주요 골재수급현황등을 검토하여 타당한 포장구조로 설계하여야 한다.

아) 공사물량 및 사업비 산정

기본계획수준에서 검토된 대상노선에 대한 공사물량 및 사업비를 산출하여 제시하되, 지역여건을 고려한 용지비등이 현실적으로 고려되어야 한다.

6) 문화재 지표조사

가) 문화재 지표조사

① 용역구간내 공사시행시 지장이 예상되는 문화재의 분포현황과 해당구간의 유적, 문화재 등에 대한 현황을 면밀히     조사하여 도로사업으로 인해 훼손되지 않도록 노선을 계획하여야 하며 도로에 편입이 불가피한 경우 관계기관과 충분

한 협의를 거쳐야 한다.

- 문화재 지표조사 실시

- 관련법에 의한 협의에 필요한 모든 자료

- 지표조사에 소요되는 경비는 예산범위내 실 정산처리 할수 있다

② 문화재지표조사를 위해 지정된 지표조사기관을 대상으로 선정하되 사전에 발주청과 협의하여야 한다.

나) 지명조사

① 지명은 조상이 물려준 훌륭한 문화유산이나 국토개발로 인하여 기록도 없이 귀중한 자료가 소멸되고 있으므로 이를

기록 유지하기 위하여 문화재지표조사 대상사업중 다음에 해당될 경우 지명조사를 실시하여야 한다.

- 사업면적이 10만㎡ 이상 이거나

- 3만㎡이상 10만㎡미만으로서 당해 공사로 인하여 마을, 산, 고개등의 자연지명이 사라지는 경우

7) 경제성 분석

가) 최적노선의 경제적 타당성

노선별로 분석된 경제적 비용과 편익에 의한 B/C, NPV, IRR등의 경제적 지표를 산출하고 이에 따른 경제적 타당성을 검토하여야 한다.

공사비, 차량운행비, 교통량, 공사기간등 경제성 분석시 사용한 제요인이 변경될 경우 경제성에 미치는 영향을 검토하기 위하여 민감도 분석을 시행하여야 한다.

나) 최적 개통시기 검토

경제성 분석기법을 활용하여 최적 개통시기를 노선별(구간이 구분된 경우 구간별)로 제시하여야 한다.

다) 기타 효과 분석

당해 도로건설에 따른 경제적 효과 이외의 각종 효과를 정성적, 정량적으로 분석․제시하여야 한다.

8) 국립해상공원(자연공원법 제23조)구간 내에 공작물 설치시 저촉되는 사항은 관계기관과 협의하여야한다

4. 설계변경조건

가. 타당성조사 결과 본 사업의 타당성이 부족시 기본설계 과업을 중지 및 타절 준공할 수 있다.

나. 타당성조사결과 사업 필요성이 인정되어 시행청의 사업구간 결정 및 공사시행 방식 결정에 따라 설계변경할 수 있다.

다. 과업수행중 여건변동 및 정부가 필요하다고 인정할때에는 설계변경할 수 있다.

라. 추정공사비의 증감에 따라 예산범위내에서 설계변경할 수 있다.

마. 토질조사비는 과업수행결가에 따라 예산범위내에서 설계변경할 수 있다.

바. 용역기간중 강우일수가 평균강우일수보다 많고, 천재지변등 불가항력으로 작업이 불가능할 때 그리고 정부의 불가피한 사유로 인한 변경요인 발생시 조사기간을 변경할 수 있다.

5. 설계자문 등

가. 설계자문 및 결과의 반영

1) 발주청은 건설기술관리법제5조, 시행령 제21조 및 발주청의 설계자문위원 운영규정에 의거 건설기술의 진흥, 개발, 활용 등을 목적으로 전문분야별 외부자문위원에 의한 설계자문을 실시한다.

2) 설계자문은 발주청의 설계자문 규정에 따라 시행하여야 하며, 전체 용역과업을 대상으로 하여야 한다.

3) 수급인은 발주청으로부터 통보 받은 설계자문 결과를 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

6. 주민설명회 개최 및 관계기관의 협의

◦ 계획노선 설치에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화 할수 있는 방안을 검토하여야 하며, 기본설계가 확정되면 민원등으로 실시설계에서 변경이 곤란한 경우가 있으므로 주민설명회, 현장합동조사 등을 실시하여 의견을 수렴하고, 관계기관과의 충분한 협의를 실시하여야 한다.

◦ 집단민원등으로 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 주민설명회 및 관계기관 대책회의 등을 통하여 해결방안을 검토 결정하도록 하고 그 내용을 보고서에 수록하여야 한다.

7. 보고서 작성 및 제출

보고서 및 설계도면은 정부(건설공사의 설계도서 작성기준)의 기준을 참고로 작성하여야 하고, 보고서 작성시 과업수행자는 항상 감독관과 긴밀한 협의를 가져야 한다.

실적공사비 적산제도

표준품셈에 의한 설계성과품 이외에 건설교통부에서 추진중인 실적공사비 적산제도에 따라 『수량산출기준     및 실적공사비축척요령[한국건설기술연구원(http://www.kict.re.kr)]』의거 설계성과품을 작성하고 실적공사     비에 의한 설계성과품 일체를 별도로 납품하여야 한다.

가. 착수보고서

과업착수 10일 이내에 작업계획을 요약한 착수보고서 2부를 감독 경유 제출하여야 한다.

※ 참여기술자 명단은 인적사항, 참여과업내용, 참여예상기간등을 구체적으로 기재한다.

나. 중간보고서

과업착수 45일 이내에 중간작업상황을 요약한 중간보고서 2부를 감독 경유 제출하여야 한다.

다. 최종보고서(초안)

과업준공일 이전에 용역성과품(안) (설계보고서, 구조 및 수리계산서, 토질조사보고서, 개략설계내역서, 설계도면등) 5부를 제출하여 감독관의 사전 검토를 받은후 우리군의 설계심의를 받아야 한다.

8. 설계도서 작성내용 및 기준

기본계획의 제반 조건 등을 바탕으로 하여 사전 조사사항, 계획 및 방침(주요한 설계기준, 구조물 형식 선정, 단면 결정 등), 개략시공방법, 공정계획, 공사비 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표시하여야 할 사항
설계 보고서	∘ 공사개요 목적, 규모, 금액 등 ∘ 계획 및 방침 - 위치선정 - 주요구조물 및 수리계획(사면보호, 식재 계획 등) - 환경 영향평가(환경보존법에 의한 환경영향평가서를 작성 시) ∘ 사전조사사항 ∘ 비교노선 환경성 검토서 ∘ 설계 주요내용 ∘ 주요 시공계획 ∘ 주요 자재 사용계획 ∘ 개략 공정 계획 ∘ 기타 필요한 사항 - 경제분석 ․ 공사비 및 유지 보수비 추정 ․ 투자우선순위 결정 ․ 비용․편익분석(B/C) - 기타사항

구 분	표시하여야할 사항
구조 및 수리계산서	∘ 주요 구조계산 - 구조단면 결정 계산 및 사유 - 기초허용 지지력 계산 - 각부 구조의 제하중에 대한 구조계산 - 수리계산, 이와 관련된 단면 결정 계산
지반조사 보고서	∘ 토질개황 ∘ 토질조사(시추, 시항, 물리탐사 등) ∘ 토질시헙(포준관입시험, CBR시험, 평판재하시험, 토성시험)
개략설계 내역서	∘ 설계 설명서 ∘ 개략 공종별 내역서 ∘ 개략 수량 산출근거 ∘ 기타 필요한 산출근거

구 분	표시하여야할 사항
	도면종류	축 척	사 항
설계도면	위치도 종단면도 및 평면도 횡단면도 구조물도 부대시설도 조경도 기타	1/50,000～1/5,000 축척지형도 1/1,200～1/3,000 1/100～1/200 1/100～1/200 1/100～1/200 1/200～1/500	∘ 주변지형지물 표기 ∘ 주요시설물 종평면도 ∘ 주요 횡단면도 ∘ 주요 구조물 계획도 표준도 등 ∘ 당해 도로 및 주변도로의 차로수 및 기능설정도, 장래 교통량 배분도, 접속 및 교차부의 교통처리도 ∘ 주요부대시설도 주요 가시설물 도면 ∘ 주요조경계획(사면보호, 식재계획도) ∘ 기타 필요한 도면

9. 설계도서 작성시 고려되어야 할 사항

가. 설계변경 및 공사비 증액의 최소화

나. 도로교통 안전성의 강화 방안 검토

다. 환경친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용 기준 제시

라. 건설폐자재 활용방안 검토

마. 설계의 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용 기준 제시

10. 성과품 작성 및 납품

가. 기본설계의 성과품은 각 분야의 설계 성과품 작성 기준에 따라 작성하도록 하며, 최종 성과품의 구성은 다음과 같다.

1) 기본설계 종합보고서 : 10부(요약보고서 5부 별도)

2) 기본설계 도면(1/1,200): 10부

3) 주요 구조물의 개략 구조 및 수리계산: 10부

4) 지반조사보고서: 10부

(지반조사시 시행한 시추조사공에 대한 코아박스와 측량 성과품 및 폐공실시 사진, 측량성과품 1부별도)

5) 기본 설계예산서 : 10부(기본설계 설명서 기본설계내역서, 단가산출서, 수량산출서)

나. 설계도면은 CAD System을 이용하여 작성하고 모든 성과품은 CD-Rom을 함께 제출한다. 그리고, 설계성과품을 추후 유지관리단계에서 활용하기 위하여 HMS등의 수치지도 및 발주청의 유지관리 시스템에 연계시킬 수 있는 방안을 발주청과 협의하여 시행하여야 한다.

다. 관계기관과의 협의사항 및 주요 민원사항, 과업 참여기술자 명단 및 참여분야를 보고서에 수록하여야 한다.

Ⅳ. 보 안 대 책

Ⅳ. 보안대책

본 용역설계의 설계도서 및 제반자료에 대하여는 보안관리에 철저를 기하여야 하며 다음과 같이 보안 대책을 이행하여야 한다.

1. 용역회사 대표자는 용역착수시 발주청에서 제시하는 서식에 의한 보안각서를 제출하여야 하며, 용역참여자에 대한 보안각서는 회사 대표자 책임하에 징구 제출하여야 한다.

2. 용역과업사무실을 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

3. 자료 보관함은 별도로 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정․부 책임자를 지정하여 관리하여야 한다. 단, 비밀이 아닌 용역의 경우에는 비밀보관함을 비치하지 않을 수 있다.

4. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과품을 발간하고자 할 때는 정부비밀취급인가업체를 이용하여야 하며, 본 과업지시서에 명시한 부수만 인쇄하는 것은 물론 우리청의 비밀취급인가자의 입회하에 받아야 한다.

5. 용역의 참여자가 교체될시는 감독관의 승인을 득한후 인수 인계를 철저히 하고 감독관의 확인을 받아야 한다.

6. 기타 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행상 별도의 보안관리 등을 요하는 사항이 시달될 경우는 이를 준수하여야 한다.

7. 용역업체는 용역물의 보안관리에 철저를 기하기 위하여 용역설계 전후를 막론하고 다음사항을 준수하여야 하며 용역계약시 이를 준수하겠다는 각서를 제출하여야 한다.

1) 용역설계 참여자 명단 제출

2) 본 용역설계도서에 의한 기록 및 인지사항을 누설하지 않겠다는 각서

3) 본 용역설계서 작성 기간중 출입자 통제

4) 용역자료 등의 방치를 금할 것이며 본 용역수행에 관련된 모든 자료는 견고한 용기에 보관하고 보안관리 책임자가 직접 관리하여야 하며 지정된 용기외 보관은 금한다.

5) 불 필요한 원고 및 자료는 필히 감독 입회하에 소각 조치 할 것

8. 기타 사항에 대하여는 보안 업무규정을 준수하고 감독관의 지시를 받는다.

Ⅴ. 예 정 공 정 표

Ⅴ. 예정공정표

구 분	보할(%)	제1월	제2월	제3월		제4월	비 고
1. 타당성조사	53.3	25	20	8.3
2. 기본설계	23.4		3.4	10		10
3. 조사측량	23.3		10.0	13.3
4. 보고서인쇄 및 납품
계	100.0	25.0	33.4	31.6		10
누 계	100.0	25.0	58.4	90

Ⅵ. 설 계 예 산 서

일   위   대   가   표

단가 및 수량산출서

Ⅶ. 위      치      도

기 타  참 고 사 항