2007년도

용역명: 군도9호(상자개)임시도로 노선측량 설계예산서

정        선        군

과업지시서

2007

정        선        군

측량설명 및 과업지시서

□ 과업의 목적

○ 2007. 7월 집중호우시 유실된 군도9호(상자개)도로 수해피해구간에 대하여 임시 통행로 확보 및 수해피해시 발생한

폐기물을 처리하여 주변경관을 정비하는 기초적으로 필요한 자료인 측량 성과도를 작성하는데 목적이 있음.

□ 과업의 설명 및 범위

1. 사업개요

○ 용 역 명 : 군도9호(상자개) 임시도로 노선측량용역

○ 위    치 : 정선군 북면 구절리(자개골)

○ 측량연장 : L = 4.0km

2. 과업의 범위

○ 현황조사

- 1/5,000 지형도와 현장조사를 토대로 과업구간의 현황을 조사한다.

- 이 조사의 목적은 과업구간의 현황을 파악하여 설계기준 및 설치구조물의 검토 교통안전 대책 및 작업계획을 수립하는데 목적이 있음.

○ 조사측량

- 종단측량 : 중심선을 따라 매측점의 지반고를 정확하게 측정하여야 한다.

- 횡단측량 : 횡단측량은 각 측점 및 중간점에서 좌,우 지형을 정확히 실측할 것이며, 구조물은 별도로 작성하되 소요연장 현황을 상세히 기입한다.

- 평판측량 : 도로중심선에서 좌,우 15m이상의 지형을 측량 표시하되 지형지물을 상세히 측정 표시하여야 한다.

3. 성과물 제출

○ 용역업체는 용역과업수행계획서를 작성하여 발주청의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

○ 측량용역 완료시 다음사항을 용역기간내 제출하여야 한다.

- 측량원도 --------------------------------------------------------  일체

- 측량야장 --------------------------------------------------------  일체

- 설계도면(대, 소) ------------------------------------------------  각 3부

- 설계예산서 -------------------------------------------------------  3부

- 수량산출서 -------------------------------------------------------  3부

- 단가산출서 -------------------------------------------------------  3부

- 용지도 -----------------------------------------------------------  3부

- 상기사항 전산화 디스크 및 CD일체

□ 기타사항

○ 본 과업의 과업기간은 착수일로부터 30일간으로 한다.

○ 본 과업의 수행 중 천재지변 및 계획 측량물량이 현저하게 상이할 시 발주청의 승인을 득하여 공기연장 및 과업물량을 변경 조정할 수 있다.

예  정  공  정  표

구 분	보 할(%)	예 정 공 정				비 고
		착수 10일	착수 20일	착수 30일
현장조사	10	10
종단․횡단 평판측량	50	20	20	10
도면작성 및 수량산출	40		20	20
일 계		30	40	30
누 계	100	30	70	100

측량용역 과업내역

과 업 명	위 치	과 업 내 용	측 량 물 량	비 고
군도9호(상자개)임시도로 노선측량용역	정선군 북면 구절리(자개골)	노선측량 L = 4.000km	노선측량 L = 4.000km

일 위 대 가 표