정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	상하수도사업소	②담당자(연락처)	소 장 유영수 시설7급 고승구 (033-560-2524)
③정책사업명	지장천 공공하수처리시설 증설사업
④선정기준	군이 발주하는 10억원이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤사업기간	2013. 6. ~ 2017. 12.
⑥주요내용	○ 사업위치 : 정선군 남면 무릉리 425번지 일원 ○ 총사업비 : 16,855백만원(국고 11,799 기금 3,034, 군비 2,022) ○ 사 업 량 : 증설 Q=3,500톤/일(기존시설 Q=6,000톤/일) ○ 사업기간 : 2013. 6. ~ 2017. 12월 ○ 주요시설 - 하수처리시설 증설 Q=3,500톤/일 - 차집관로 L=1.3km ○ 주요 추진상황 - 하수도정비기본계획(부분변경) 승인(원주환경청) : 2013. 5. - 기본 및 실시설계용역 업체선정 및 계약 : 2013. 6. ※ 용역기간 : 2013. 6. 21. ~ 2014. 7. 1. - 설계의 경제성(VE) 검토용역 업체선정 및 계약 : 2014. 5. ※ 용역기간 : 2014. 5. 13. ~ 2014. 6. 11. ○ 향후 추진계획 - 2014. 7. : 설계자문 및 건설기술심의 의뢰(강원도) - 2014. 9. : 하수도사업 재원협의(원주지방환경청) - 2014. 11. : 하수도시설 설치인가(강원도) - 2014. 12. : 공사계약 원가심사(강원도) 및 사업발주 - 2015. 1. : 업체선정 및 계약 - 2015. 3. ~ 2017. 12. : 공사추진 및 종합시운전 - 2017. 12. : 공사준공