2007 소하천 정비사업 실시설계 용역

2007.   2

정    선    군

목           차

Ⅰ. 설  계  설  명  서

Ⅱ. 과  업  지  시  서

Ⅲ. 설  계  예  산  서

Ⅰ. 설 계 설 명 서

1. 과 업 명 : 2007 소하천 정비사업 실시설계용역

2. 위    치 : 강원도　정선군 정선읍 용탄3리, 광하리, 임계면 낙천리

3. 과업목적

본 과업은 정선군 관내 미개수된 소하천을 정비함에 따라 소하천의 안정적인 관리 및 홍수로부터 인명,재산을 보호하여 주민의 삶을 윤택하도록 하는데 그 목적이 있음.

4.과업개요 :

등 급	하 천 명	위 치	과 업 개 요	비 고
지방2급하천	임 계 천	강원도 정선군 정선읍 용탄3리(행마천)	300 m
		강원도 정선군 정선읍 광하리(소탄천)	400 m
		정선군 임계면 낙천리(뒷골천)	300 m
계			1,000 m

5. 과업수행기간

본 과업의 수행기간은 착수일로부터 50일로 한다.

6. 설계변경

가. 본 용역 설계는 설계 당시 조사된 내용을 토대로 일부 추정 설계한 것인바 확정 물공량이 계약 물공량보다 줄거나 늘어날 경우 실지대로 조정 변경 할 수 있다.

나. 시・종점의 위치변경으로 조사구간의 증감이 있을 경우

다. 용역수행 중 시행청의 방침 변경이 있을 경우

라. 당초 추정 설계한 지하 지반의 실제대로 조정 변경

마. 구조물 수량 등이 현저히 변경될 경우

바. 기타 불가피한 사유가 발생한 경우

7. 보안관리

본 과업 수행 중에 지득한 요 보안 사항과 성과품은 관계 법령에 따라 제반 보안 조치를 취하여야 하며 제반자료 및 그 성과는 감독원의 사전 승인없이 타인에게 열람케하거나, 임의로 복사케 해서는 안된다.

8. 성과품 제출

본 과업 수행 완료시에는 다음 성과품을 납품하여야 한다.

가. 설계보고서 : 5부

나. 설계원도(트레싱) : 1부

다. 설계도 : 5부

라. 구조 및 수리계산서 : 5부

마. 토질조사보고서 : 5부

바. 설계예산내역서(일위대가포함,내역유) : 5부

사. 설계예산내역서(일위대가포함,내역무) : 20부

아. 공사시방서 : 5부

자. 수량산출서 : 5부

차. 단가산출서 : 5부

카. 편입용지도 및 조서 : 각 5부

타. 각종 인・허가 도서 : 각 5부

파. 조사측량 야장 : 일체

하. 과업수행 사진첩 : 1부

Ⅱ. 일 반 과 업 지 시 서

1.  각종 시방서 및 제기준 숙지

본 용역은 정부에서 제정한 아래의 각종 시방서 및 규정과 용역설계서의 과업지시서에 의거 시행하여야 하고, 각종 시방서 및 제기준 등은 반드시 용역과업을 수행하는 사무실에 비치하여 용역 참여자가 필히 숙지・활용하도록 하여야 한다.

가. 하천설계기준

나. 건설교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

・토목공사 일반 표준시방서

・하천공사 표준시방서

・콘크리트 표준시방서

・구조물 기초설계기준

다. 기수립된 하천정비기본계획 및 소하천정비기본계획

라. 하천구조물 표준도

마. 건설공사 관련 법령 및 규정 (건설기술관리법, 하천법, 도시계획법 등)

바. 한국산업규격

사. 건설공사 품질 및 규격관리실무 편람

아. 산업안전보건법

자. 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영 규정

차. 기타 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

카. 도로・도로교 표준시방서 및 도로관련 각종 지침

2.  공사금액 산정시 적용기준

가. 노임  단가 : 대한건설협회에서 조사・공포한 납품당시 시중노임단가(이월시는 성과품 납품 당해년도분 반영)

나. 환      율 : 외국환 거래법에 의한 기준환율 적용

다. 중기사용료 : 납품당시 기준 조달청 중기 사용료

라. 자재  단가 : 최근 조달청 가격정보에 수록된 단가를 우선 적용하고 가격정보지에 없는 품목은 물가정보지, 물가자료 등 적용.

마. 수량 및 단가산출은 정부제정 건설공사 표준품셈에 의하여 산출하고 이에 의할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정단가를 감독관과 협의하여 산출하여야 한다.

3.  자료수집 및 현황분석 계획

관련 계획을 지역 관련계획과 하천시설 관련계획으로 분리하여 본 과업의 사회. 경제적 분석 및 재해예방, 제방법선 계획, 하천시설물 설치에 필요한 각종 관련 계획을 종합 정리하고 이를 근거로 본 과업 수행에 철저를 기하여야 한다.

가. 지역관련계획

우리군의 도시계획 및 경지정리 계획등기타 지역과 관련된 계획

나. 하천시설 관련계획

당해 하천에 대한 하천정비기본계획 및 기타 하천시설관련 계획

4.  조사 및 분석

가. 조사 및 분석방법

(1) 현황조사에 앞서 지형도(1/5,000, 1/25,000, 1/50,000), 기타 수집한 자료 등을 참고로 도상에서 예비조사를 실시한다.

(2) 조사구간을 현장 답사하며 기존제방상태, 교량 및 하천구조물, 농경지 등의 현재 상태 및 주변농로와의 접속현황 등을 조사한다.

(3) 주요 조사내용은 개수연장, 하상경사, 하폭, 하도상태, 제방선형 등의 기존 하천관련 조사와 자연환경, 골재원, 취수 및 배수시설물, 합류되는 하천현황 지장물 등을 조사한다.

나. 현황조사 흐름도

계획수립		도상예비조사		하천답사		현장 세부조사
∘ 조사지역 및 범위 ∘ 조사항목 및 내용 ∘ 조사기간 및 방법 ∘ 조사양식 및 인원 편성	→	∘ 1/50,000,1/25,000, 1/5,000 지형도 ∘ 하천정비기본계획 ∘ 도시계획도 ∘ 지적도	→	∘ 지형 및 유로현황 ∘ 현장시행가능 토질 조사 ∘ 토취장 및 골재원 조사 ∘ 강우 및 홍수피해	→	∘ 측량 및 토질조사 ∘ 토지이용 현황조사 ∘ 환경영향조사 ∘ 민원 및 지장물조사

다. 현장 조사

(1) 기존제방상태 및 지형상태를 파악한다.

(2) 기존 제방 및 호안 배수구조물 등 하천시설물 현황을 조사한다.

(3) 부체도로 및 농로설치 위치를 계획한다.

(4) 주변 개발현황과 지장물 및 토지이용상태를 조사한다.

(5) 지역 개발과 연계된 하천 계획을 조사한다.

(6) 용수 및 배수계통조사

(7) 하천시설물 계획 및 기존시설물과의 연결, 확장 등 검토

(8) 토취장 조사

라. 수문 및 배수조사

(1) 신설 하천구조물 위치를 선정하고, 기존 하천구조물의 개보수와 구조물의 규격을 계획하여야 한다.

(2) 현지조사 항목 : 과거 홍수 흔적 부근 기존 구조물의 제원 부근 수리시설 용량 하천의 현황 (침식, 퇴적 등) 내수침수시간

(3) 자료수집 항목 : 인근 우량관측소의 강우, 수위관측 자료 과거 홍수흔적이 있는 호우에 대한 강우량 및 강우 지속시간

마. 용지 및 지장물 조사

(1) 용지도 작성

(가) 우리군에서 발행된 지적도 및 임야도 등본에 의해 작성하여야 한다.

(나) 용지도에 측점 표시를 한 후, 중심선은 가는 실선, 용지매입선은 굵은 실선으로 표시하여야 한다.

(다) 편입되는 지역은 일련번호를 붙여 표시하되 토지조서의 일련번호와 일치하도록 하여야 한다.

(라) 용지도에 가옥, 전주, 분묘, 수준점 등 지장물의 위치를 표시하되 물건 조서와 부합되는 일련번호를 기재하여야 한다.

(마) 가옥, 전주, 분묘, 수목 등의 지장물 조서는 현지와 정확히 일치시켜야 한다.

(2) 하천경계말뚝 설치

(가) 하천경계말뚝(지적경계용:4.5× 4.5× 45cm)은 제방법선의 측점 좌우에 40m간격으로 설치하고 곡선부는 그 선형을 파악할 수 있도록 간격을 20m 이내로 좁혀 박도록 한다.

(나) 경계말뚝은 가급적 논, 밭의 경계부분에 설치하여 경작에 지장을 주지 않도록 하고 지적분활 측량시까지 보존될 수 있도록 유의하여 설치하여야 한다.

(3) 분할측량 준비 및 실시

(가) 하천경계 말뚝설치가 완료되면 분할측량 신청에 필요한 제반서류를 발주청에 최소한 준공 1개월전에 제출하여야 하며 기제출된 용지도등이 분할측량 성과와 상이할 경우는 용역 준공후라도 분할측량성과가 제출된 후 30일이내에 동 성과와 부합되도록 보완 제출하여야 한다.

(나)  분할측량 실시일정이 확정되면 용역수급자는 용역준공후라도 사전에 현지를 조사를 하여 분할측량에 필요한 경계말뚝 설치상태 등을 확인하여야 하며 훼손 또는  망실된 말뚝이 있을 경우는 즉시 이를 보완하여 분할측량에 지장이 없도록 하여야 한다.

(다) 용역 수급자는 지적공사의 분할측량 시행시 측량담당자를 현지에 파견하여 분할측량에 필요한 현지안내 등 제반사항을 수행토록 하여야한다.

(4) 편입토지 및 지장물 조서 작성

(가) 편입토지 및 지장물조서는 붙임 서식에 의거 작성하되 용지도의 일련번호와 일치되는 번호를 기재하여야 하며 편입면적은 평방미터 단위로 정확히 산출하여야 한다.

(나) 토지 공부상 지목과 이용상황이 다를 때 그 실제 이용상황을 조사・표시하여야 한다.

(다) 토지대장 소유자와 등기부상 소유자를 조사・표시하되 국유지와 사유지를 구분・작성하여야 한다.

(라) 소유권 이외의 권리자가 설정되었을 때 동 권리의 내용을 상세히 조사하여 표시하여야 한다.

(마) 공사에 편입되는 공공시설물 및 지장물(지하매설물 포함)현황을 상세히 조사하여 지장물건 조서를 작성하여야 한다.

(바) 폐천부지 발생여부를 조사하여 폐천부지조서(지번, 지목, 면적)를 작성・제출하여야 한다.

(5) 지하매설물 조사

지하 매설물의 이설 방안을 조사하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다

(가) 전기 및 통신시설물, 상・하수도 시설물

(나) 송유관 및 가스관, 기타 시설물

바. 토질 및 재료원 조사

(1) 조사목적

토질조사는 제방설계에 필요한 지질공학적 설계인자를 도출 제시하고 공법 선정 및 구조물설계에 필요한 제반사항을 파악하기 위하여 현장조사 및 자료 등을 면밀히 검토한 후 현장여건에 상호 부합하도록 효율적으로 분석하여야 한다.

(2) 토질 조사는 예비조사 및 현지답사, 본조사, 보완조사의 순서로 실시하며, 토질조사항목은 아래 표를 표준으로 작성한다.

										사전조사					· 기존조사 자료 수집분석 · 지형 및 지질 특성 파악 · 조사계획의 수립
	조사의 주종류
	지층분포 파악
										현장조사					· 지표 지질조사 · 시추조사(BORING) · 시굴조사(TEST PIT)
	Boring 각종 Sounding
										SOUNDING					· 표준관입조사 · 공내 재하시험 · 투수 및 수압시험			조사결과 검토
	건설재료원 조사									재료원조사					· 골재원조사 · 석산조사 · 배합설계
	보강축제에 따른 지반 및 구조물 상태조사
										실내시험					· 토질시험 · 암석시험 · 재료원 품질시험
					종 합 평 가 및 분 석
					· 성토부 기초지반의 안정성 검토 · 축제재료의 적정성 판단 · 구조물 설계자료 제공 · 재료원의 매장량, 품질특성, 재료원현황 등 평가결과 제공

(3) 토질조사

(가) 토질조사는 현장 답사전에 토질조사 계획서를 제출하여 승인을 득한 후 조사를 시행토록 하며 과업지시서 이외의 추가되는 토질조사 항목 및 조사는 계약금액을 조정할 수 있다.

(나) 토질조사의 조사항목 및 조사빈도, 조사심도는 과업지시서에 의거하여 계획서를 작성후 발주청의 승인을 득한 후 시행한다.

구 분	토질조사법	조사기준	시험내용
∘토질조사	보링(시추조사: NX)	- 제 방 : 200m당 1공 - 배수문 : 개소당 1공 - 교 량 : ∘50m미만 3공 ∘50m이상 (L/50+2)공	- 시추공내 수위측정 - 표준관입시험 (심도1.5m마다) - 실내시험

(4) 재료원 조사

(가) 토취장 조사

시험굴착(Auger Boring)조사와 실내시험을 하고 종평면 및 횡단면도 작성하여 토취가능량을 명시하여야 한다.

(나) 하상 골재원 조사

1) 운반거리 20Km 이내 골재원을 상세히 조사

2) 골재원 위치, 매장량, 골재종류 등 조사

(다) 석산조사

1) 기개발된 석산위치를 파악하여 품질 및 가용매장량을 조사하여 품질과 수급에 차질이 없는 지점을 조사한다.

2) 석산에서 생산되는 석재에 대한 암석종류 및 암질상태 등을 고려하여 선정하여야 한다.

(라) 각종 자재 공급원 조사

1) 레미콘 : 인근 레미콘 공장을 조사하되 운반거리, 사용골재의 품질시험 및 운반시간, 생산능력, 운반차 보유대수 등을 조사하여야 한다.

2) 철근 시멘트등 주요 자재 (사급자재시) 및 기타 주요 자재의 공급처를 조사하여야 한다.

(5) 사토장 조사

사토장 선정시는 관계 시・군의 인허가 가능여부 및 토지소유자의 동의여부를 확인하여 근거서류를 제출하여야 하며, 민원이 발생치 않는 장소를 선정하여야 한다.

5.  과업수행 조직 및 일정계획

가. 과업수행 조직표

과업수행을 위하여 필요한 조직을 아래 표에 의거 작성 제출하여야 한다.

					사업책임기술자
수자원개발분야			구조분야				토질분야			측량분야				환경분야
기술사 /			기술사 /				기술사 /			기술사 /				기술사 /
자격증 / 성명			자격증 / 성명				자격증 / 성명			자격증 / 성명				자격증 / 성명

나. 과업수행의 흐름

본 과업의 흐름은 다음과 같이 4단계로 구분하며 단계별 수행계획을 붙임 양식에 의거 수립한 후 착공 7일이내에 감독관을 경유하여 제출하여야 한다.

(1) 관련계획 및 현황조사 단계 (1단계)

(2) 관련계획 및 하천정비 기본계획 검토(2단계)

(3) 실시설계 단계 (3단계)

(4) 설계도서 작성단계 (4단계)

다. 단계별 과업수행 계획

						① 관련계획 및 현황 조사 단계
		제 1 단 계				· 관련 도시계획과의 연계성 조사 · 축제 구간의 주변여건 및 지형적 특성의 정밀조사
						↓
						② 관련계획 및 하천정비 기본계획 검토 단계
		제 2 단계				· 관련계획 검토 · 하천정비 기본계획 검토 · 조사자료 검토
						↓
						③ 실시설계 단계
		제 3 단계				· 측량 및 토질조사 등 현장세부조사 실시 · 조사자료를 토대로 종・평면 및 횡단면도 작성 · 토공, 호안배수공 및 하천시설물 실시설계 수행 · 편입토지 및 지장물 조사
						↓
						④ 설계도서 작성단계
		제 4 단계				· 보고서 작성 · 수량, 단가산출서 및 각종계산서 작성 · 설계도서 작성 · 성과품 인쇄 및 납품

(붙임 양식)

단 계 별	과업내용	공 정 (월)									비 고
제 1 단계	1. 관련계획 및 현황조사 1) 착수준비 2) 관련계획검토 및 일반현황조사 3) 수문 및 하천조사 4) 기존구조물조사
제 2 단계	2. 관련계획 및 하천정비 기본계획 검토 1) 관련계획 검토 2) 하천정비 기본계획상의 법선검토 3) 홍수량, 홍수위, 하폭검토 4) 지장물 편입에 따른 시공성, 경제성 검토 5) 제방 선형 확정
제 3 단계	3. 실시설계 1) 조사측량 2) 토질조사 및 실내시험, 3) 골재원 조사 4) 설계기준확정 및 표준도작성 6) 토공 및 호안공설계, 구조물설계, 부대시설설계
제 4 단계	4. 설계도서 작성 1) 수량 및 단가산출 2) 설계서 작성 3) 용지 및 지장물도 작성 4) 설계도 및 보고서 작성

6. 기타사항

가. 일반과업지지서의 내용과 특별과업지시서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별과업지시서가 우선한다.

나. 일반 및 특별과업지시서에 명기된 내용이외에 정밀시공 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주청과 협의하여 시행하여야 한다.

특 별 과 업 지 시 서

1. 설계기간

본 용역 설계 기간은 착수일로부터 3개월(90일)로 하고, 다음의 경우 발주청의 승인을 득한 후 기간을 연장할 수 있다.

가. 천재지변 등 불가항력으로 작업이 불가능 할 때

나. 발주청의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 경우

다. 관계기관의 협의 및 검토가 관의 사유로 지연되었을 때

라. 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때

2. 설계변경 조건

가. 용역과업 수행중 계획변경으로 인하여 과업내용의 변경 또는 증・감이 발생되었을 때

나.  조사구간의 위치변경은 없으나 조사연장이 증・감될 경우 또는 교량보 등의 주요구조물 계획이 추가될 경우는 설계용역비를 변경할 수 있고, 토질 조사비, 조사측량 등은  실조사 내용에 따라 정산한다.

다. 기타 정당한 변경사유가 있을 경우

3. 설계기준

가. 축제, 호안 및 기타 하천구조물

(1) 축제계획고, 둑마루폭, 비탈경사 등 축제단면과 호안공법, 배수구조물 등 모든 시설은 하천정비기본계획 및 건설교통부제정 하천설계기준, 하천공사 표준시방서 하천설계기준 등에 의거 결정한다.

(2) 제방선형은 당해 하천정비 기본계획에서 결정된 법선을 기준으로 결정하되 밀집가옥이 편입되거나 이설 이 어려운 지장물이 편입될 경우 홍수위 유속 등 수리변동사항과 시공성, 경제성 등을 면밀히 검토한 후 발주청과 협의하여 선형을 조정할 수 있다.

나. 주요 자재 사용 기준

설계기준강도(㎏f/㎠)	적 용 구 조 물
25-240-12	배수BOX , 문기둥, 조작대, 흉벽, 날개벽, 고정형보
25-210-12	옹벽, 배수관기초콘크리트, 집수정, 면벽, 바닥보호공, 부체도로, 배수관 날개벽
40-180-8	구조물 버림 콘크리트, 천단콘크리트, 석축기초, 뒷채움, 가설 건물바닥, 호안기초

4. 과업수행 검토사항

가. 설계방침 및 중간보고

(1) 설계방침은 현지측량 실시이전에 용역수급자 및 발주청의 감독과 합동으로 현지답사를 실시하여 관련 계획검토 및 현황을 조사한 후 지형도(축척 1/5,000~1/25,000)상에 표시하여 발주청과 협의하여야 한다.

(2) 설계방침 검토시 상세한 현황을 지형도에 표기하고 표준단면도 및 주변 전경사진 등을 첨부하여야 한다.

(3)  중간보고는 일반과업지시서 제5항 다호의 단계별 과업수행계획중 제2단계와 제3단계과업이 완료될 때마다 단계별 검토내용을 발주청에 보고·협의하여야 한다.

(4) 설계 방침 또는 중간보고시 결정된 사항이 주민의견 수렴 등으로 인하여 변경될 경우는 변경사유를 첨부하여 발주청의 변경방침을 받아야 한다.

(5) 장래 농어촌 현대화 및 기계화 등을 감안하여 농로(부체도로, 진・출입로)  및 용・배수로를 계획하되 지역주민의 의견을 최대한 반영하여야 한다.

나. 공사시방서 작성

공사시방서는 당해공사의 계약서류에 포함되는 설계도서의 일부로서 법적구속력을 가지므로 공사에 필요한 시공방법, 상태, 허용오차 등 기술적 사항뿐만 아니라 발주청과 공사수급자간의 책임범위와 한계 등을 상세히 명시할 수 있도록 작성하되 건설교통부에서 작성한 공사시방서 작성요령에 의거 작성하여야 한다.

5. 분야별 과업수행

가. 조사측량

(1) 측량준비

현지조사 측량을 실시하기전에 실시설계구간 인근 지역에 국립지리원(이하 지리원이라 함)에서 설치한 수준점 및 삼각점의 위치를 조사하여 1/5,000-1/50,000 지형도에 표기하여야 한다.

(2) 골조측량

(가) 선정된 2개 이상의 삼각점에 대한 지리원의 성과를 이용하여 공공측량의 작업규정 기준에 관한 규칙(이하 "공공측량기준" 이라 한다)에 따라 도근점의 도상 설치계획을 수립한다.

(나) 도근점은 공사완료시까지 보존될 수 있도록 일정 규격 (4.5cm× 4.5cm× 45cm)이상의 각목으로 지상 10cm정도 노출되게 매설한 후 상단면에 못 등으로 표시하고 도면에 표시하여야 한다.

(다) 도근점중 시・종점 2개소에는 공사시 훼손이 되지 않도록 공사 시・종점에서 충분히 떨어진 지점에 설치한다.

(라) 미지의 도근점은 기본 삼각점을 이용하여 공공측량 기준에 따라 최소 독정치가 수평. 수직 각 2초독으로 교각을 측정하되 삼각형의 폐합차가 허용오차 범위내일 경우에만 보정하여 각 도근점의 좌표를 구한다.

(3) 수준측량

(가) 실시설계 조사구간 주변에 공사준공시까지 보존할 수 있는 위치를 선정하여 표석(T.B.M)을 설치하여야 한다.

(나) 표석은 12cm× 12cm× 50cm이상의 말목(콘크리트. 석재 등)으로 지표위 5cm정도 돌출제 방법선의 시・종점부와 공사준공시까지 보존할 수 있는 위치에 매설하고 인근에 반영구 구조물이 있는 경우는 구조물 외곽부에 음각으로 표시한후 도면에 위치 및 표고를 표시하여야 한다.

(4) 중심선 측량

(가) 삼각점을 이용하여 IP점의 위치를 설정하고 공사시 훼손방지를 위하여 필히 인조점을 설치하여 시공중에 활용할 수 있도록 인조점과 IP점과의 관계를 도면화하여야 한다.

(나) 중심선의 간격은 시점부터 스틸테이프 등으로 20m씩 정확히 측정하고 기존 지반이 급변하는 지점, 구조물 설치지점에는 중간측점(+측점)을 설치한다.

(5) 종・횡단 측량

(가) 중심선 측량의 매측점마다 종단측량시에는 인근에 설치한 TBM과의 오차관계를 측정하여 허용오차 범위 이하일 경우에만 다음 종단측량을 실시한다.

(나) 횡단 측량은 제방법선으로부터 제내외지 주변지형을 알수 있는 범위까지 측량하여 도면화하되 제외측으로는 수면까지 제내측으로는 제방 비탈끝에서 20m이상 측량을 실시하여야 한다.

(다) 종단도의 축척은 종 1:100, 횡 1:1000으로 작성하여야 하며, 곡선, 측점, 거리, 누가거리, 지반고, 계획홍수위, 계획축제고, 경사의 순으로 하고 표준단면도(사리부설 포함)를 작성하여야 한다.

(6) 평판 측량

(가) 평판 측량은 제방 주변 지형현황을 알 수 있도록 측정하되 대안측 제방까지 나타낼 수 있는 1/1,200으로 실시하고 세부적인 제방법선과 제방폭, 구조물 위치, 부체도로 계획 등을 상세히 나타낼 수 있는 공사계획 평면도(1/1,000 ～ 1/1,200)를 작성하여야 한다.

(나) 구조물 및 부체도로 설치 지점은 지형 및 시설물 설치계획을 상세히 판단할 수 있도록 1/600 평면도를 별도 작성한다.

(다) 용배수로 및 구조물의 유입 유출구를 측량하여 계획평면도 또는 1/600 평면도에 표시하여야 한다.

(라) 인근의 IP, T.B.M 등의 위치를 평면도에 표시하고 측량성과를 표기하여야 한다.

(마) 곡선부분은 곡선 시・종점, 교각, 곡선장, 곡선반경, 절선장, 외거 등을 표시하되 I.P점에 대하여는 인조점을 설치하여야 한다.

(7) 측량 실시 이전에 측량법 제29조에 의한 공공측량 작업규정에 의하여 국립지리원의 승인을 득한 후 측량을 실시하고 같은 법 제33조 및 제34조에 의한 성과심사를 받아야 한다.

나. 축 제 공

(1) 답사에 의한 축제지역 조사

(가) 축제 예정지의 토질, 토양, 함수상태, 연약지반 유. 무 기초지반의 투수성 등 지반조건을 조사 한다

(나) 기성제방이 설치 되어있을 경우 그 부위를 축제 부위로 이용할 수 있는지의 여부를 조사한다. (특히 토질상태,기존제체의 안정성, 공극상태, 사면경사)

(다) 잡목, 잡초, 유기질토 등 직접 성토하기에 부적합한 요소를 조사한다.

(라)  하천환경의 보전상 주요군락(예 : 수목, 초목, 갈대, 억새풀, 갯버들 등)이 있는 경우 군락의 위치와 범위, 군락 종류 등을 조사한 후 자연생태계 및 환경보전상 필요할 경우는 이・치수상지장이 없는 범위내에서 가급적 존치하는 것으로 계획한다.

(마) 지류 합류부의 축제계획은 본류의 배수위 영향을 검토하여 지류 축제계획을 수립하여야 한다.

(바) 제방이 현재 도로로 활용되고 있는 경우는 향후 안전한 제방역할을 감당할 수 있는지의 여부와, 도로기능을 제내측으로 변환하고 제방의 본래 기능만 담당할 수 있는 여건이 되는지의 여부를 조사하여야 한다.

(사) 도시지역 등 지역적 제약여건으로 흉벽(PARAPET)으로 부득이 축제해야 할 부분이 있는지의 여부를 조사하여야 한다.

(아) 홍수시 투수성 지반을 통해 제내지의 용수현상 등이 발생할 수 있으므로 과거에 형성되었던 하도가 차단된 지역 또는 홍수시 제내측으로의 용수 또는 지하수상승현상발생 여부 그리고 토질시험 결과에 의한 기초 지반투수성등을 면밀히 검토하여 대책을 강구하여야 한다.

(자) 제방의 시・종점부가 산지에 접할 경우 접할 산지부분의 여건조사

(차) 하천 선형의 사행정도 조사

(카) 하도의 하상변동 가능성 및 세굴, 퇴적실상 조사

(2) 축제의 선형(도상)

(가) 축제의 선형은 기본적으로 하천정비 기본계획상의 선형 또는 급류부, 완류부 등의 특성에 알맞는 선형을 유지하되, 자연형(홍수흔적, 과거의 하천형태)에 최대한 가깝도록 하며, 유수의 안전하고 원활한 소통, 효과적인 하천관리가 가능하고, 하천 생태계의 서식 보전이 가능한 선형이어야 한다.

(나) 계획하폭 및 축제선형은 계획홍수규모를 대상으로 하되, 환경, 경관, 친수성 등을 감안하여 검토하여야 한다.

(다) 축제 선형의 중심선은 계획제방의 제외지측 비탈머리를 기준으로 한다.

(라) 지류 하류부의 선형은 가능하면 예각을 유지하고, 유수의 원활한 소통을 고려하여 도류제 설치방안 등에 대하여 검토하여야 한다.

(3)  축제단면

(가) 제방단면은 계획 홍수규모에 대응할 수 있는 규모이어야 하며, 침윤, 제체의 활동, 파이핑, 세굴 침하 등에 대한 안정성을 검토하여야 한다.

(나) 계획제방의 사면경사는 토제일 경우 최소한 1:2이상 유지되도록 하여야 한다.

(다) 지류의 배수영향구간에 대한 제방계획고는 본류의 제방계획고보다 가급적 낮지 않도록 하여야 한다.

(라) 하구부와 같이 파랑이 예상되는 경우의 계획제방고 및 제체단면 규모는 파랑, 파고 등의 영향을 고려하여 결정한다.

(마) 흉벽의 설치는 수방활동의 지장을 초래하고 환경적으로도 불합리하므로 가급적 적용을 피하되 부득이 흉벽(PARAPET)의 설치가 필요한 구간의 흉벽 기초계획고는 계획홍수위 이상으로 하고 높이도 가급적 1.0M이내가 되도록 한다.

(바) 계획제방의 둑마루는 도로로 활용되지 않도록 계획하되 도로가 필요한 경우는 관계기관과 협의하여 관리용 통로를 별도 확보하는 등 하천설계기준에 부합되도록 계획하여야 한다.

(사) 제방의 안정, 비상용 토사의 비축, 조경 등을 위해 필요한 측단을 제방 뒷 기슭에 설치하는 것을 검토한 후 필요할 경우 이를 반영하여야 한다.

(아) 제방의 침하를 감안하여 연약지반에서만 더돋기를 계획하여야 하며 더돋기의 높이 등이 표시된 단면도를 도면에 표시하여야 한다.

(자) 제내측의 원활한 내수처리와 제체 보호를 위하여 필요시에는 제내지측의 배수로 설치를 검토하여야한다.

(차) 기존 제방의 경우 사면 경사가 1:4 보다 급할 때에는 층따기를 실시하고 잡목 또는 수림, 군락지역은 벌개제근을, 잡초, 유기질토 등의 기존제체의 겉표면은 표토제거를 실시하도록 계획하여야 한다.

(카) 생태계를 고려하여 유지관리 및 홍수소통에 지장이 없는 고수부지는 가급적 존치하되 부득이 고수부지의 정리가 필요한 경우 고수부지 정리 절취단면은 배수가 용이한 횡구배를 유지하도록 계획하여야 한다.

(타) 고수부지를 토취장으로 이용할 경우는 토취계획 평면도(1/1,000~1/1,200)및 종・횡단면도를 별도 작성하되 하천환경 변화를 최소화하고 이・치수상 지장이 없는 범위내에서 계획되어야 한다.

(4) 제 방 축 조

(가) 성토용으로 적합한 흙은 투수계수가 10-4cm/s 정도에 가까운 토사로서 현지에서 구득하는 것이 가장 이상적이나 하천의 생태계 보전 등에 영향이 없는 구간 및 심도에 한하여야 하며, 필요시에는 별도의 토취장을 선정하여 양질의 토사를 운반 사용하는 방안 등을 검토하여야 한다.

(나) 토취장은 2~3개의 후보지를 선정하되 현지의 관계인, 지주와 협의하여 사용범위, 진입로, 승낙여부 등의 필요한 사항을 서면 확인(사용승락서)한 후 성토재로서의 적합성 여부를 판정할 수 있는 시험을 실시하여 적합한 토취장을 선정하여야 한다.

(다) 시방기준에 미달되는 축제용 토사가(건조밀도 1.5kg/㎥이하)근거리에 부존할 경우 혼합사용을 검토하여야 한다.

(라) 토취장 복구비용, 진입로 개설 및 지장물 철거비용 등을 설계에 반영하여 완전한 복구가 가능하도록 하여야 한다.

(마) 성토의 다짐율은 일반적으로 90%(현장 건조밀도와 최적함수비 상태의 최대건조밀도와의 비)가 되도록 하고 구조적으로 인해 더 높은 다짐을 요구하는 경우에는 95%가 되도록 하여야 한다.

다. 호 안 공

(1) 호안은 제방이나 하안이 유수에 의한 파괴나 침식으로부터 보호될 수 있는 공법을 채택하되 하상내 호안재료원 (돌망태용 호박돌, 돌붙임용 자연석 등)의 존재 유무, 호안의 중요성, 공사기간, 시공성, 미관, 경제성, 내구성 등과 하천규모, 하천경사, 수심, 하상변동 상황을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

(2) 호안공법은 제방사면의 소류력을 계산한 후 이를 고려하여 결정하되 돌붙임, 블럭붙임, 돌망태 등 여러 가지 공법을 비교・검토하여 현지여건에 적합하고 경제적인 공법을 택하여야 한다.

(3) 호안의 종류를 결정함에 있어 생태계를 보전하고 자연적인 하천환경을 유지하기 위해 자연석, 목재, 나ant가지, 천연섬유 등을 이용한 자연형 호안공법의 적용 여부에 대하여도 검토하여야 한다.

(4) 호안의 법선은 유수가 원활하게 소통될 수 있도록 유수의 방향을 고려하여야 하며, 저수호안의 경우 저수지뿐만 아니라 홍수시의 흐름방향도 감안하며 설계하여야 한다.

(5) 호안의 높이는 설치공법, 설치장소의 수리조건, 지형 등을 고려하여 결정하되 고수호안의 경우는 계획홍수위까지, 저수호안의 경우 홍수터에까지 설치하는 것을 원칙으로 한다.  단, 고수호안의 경우 다음과 같은 경우에는 제방 둑마루까지 설치하여야 한다.

(가) 특별히 중요한 제방

(나) 파랑이 발생하는 장소

(다) 급류하천(수면경사  1/200 이상)

(라) 고조의 영향을 받는 하구부 구간

(마) 굴곡이 심한 만곡부의 외측안

(6) 호안의 파괴는 호안의 기초부분의 세굴에 의한 경우가 많으므로 계획하상에서 1.0m 이상 유지되도록 하되 계획하상에 홍수시 일시적 세굴깊이를 고려하여 호안의 근입깊이를 결정하여야 한다.  또한 수충부로서 깊은 세굴이 예상되는 곳, 보 및 낙차공의 상・하류, 첩수로, 방수로 등 하상저하가 예상되는 하천에서는 더 깊게 설계하여야 한다.

홍수시 일시적 세굴깊이

(단위 : m)

하 상 재 료	홍수시 하안의 유속
	3m/sec 이상	3~2m/sec	2m/sec 미만
조약돌 이상의 입경 자갈 정도의 입경 잔자갈 정도의 입경	1.0 1.5 -	0.5 1.0 1.5	- 0.5 1.0

(7) 저수호안의 경우 저수호안의 법선이 심하게 만곡되어 있는 구간에서는 유수의 직진성으로 인해 저수호안비탈머리 부분이 세굴되는 경우가 많으므로 호안머리 보호공을 설치하도록 한다.

(8) 호안의 기초부분에서 발생하는 파괴를 막기 위해 설치되는 밑다짐공(섶침상, 목공침상, 콘크리트 블럭, 사석공 및 돌망태공 등) 은 소류력을 견딜 수 있고, 하상변화에 대해 굴요성이 있어야 하며, 시공이 용이하고 내구성이 큰 종류를 설치하여야 한다.

(9) 호안은 제방 성토재 또는 뒷채움 토사의 토압 또는 수압, 토사의 유출 등으로 파괴될 수 있으므로 사면정 검토를 실시하여 안정적으로 설계하여야 한다.

(10) 사석을 호안공으로 사용할 경우 하천설계기준에서 정한 방법에 의해 사석의 중량(최소 30kg이상)을 산출하여야 한다.

(11) 블록을 호안공으로 사용할 경우 비탈멈춤공을 반드시 설계하여야 한다.

(12) 밑다짐 사석을 시공할 경우 사석의 높이는 당해 공사구간 하천의 수위를 조사하여 최소한 상시수위보다 0.5m이상 되도록 계획하여야 하며 비탈경사는 1:2, 폭은 중소하천에서는 2.0m이상, 대하천에서는 4.0m이상(최소두께는 1.5m이상)되도록 설계하여야 한다.

(13) 하상저면에 돌망태 설계시 유수방향으로 설계하여야 한다.

라.  배수구조물

(1) 배수구조물을 설계함에 있어 1/5,000 지형도를 이용하여 배수유역도를 작성하고 (유역이 큰 경우/25,000지형도 이용), 집수면적, 배수계통을 파악하여야 한다.  이때 필히 현장조사를 실시하여 배수구조물의 위치도 선정하여야 하며, 배수구조물 계획지점의 유입수로 규격, 유입수로 상류측의 구조물 제원 등을 조사하여 배수문의 단면을 결정한다.

(2) 배수구조물은 유수작용에 안전한 구조가 되도록 하여야 하고 부근의 호안이나 구조물에 현저한 영향을 미치지 않아야 하며, 하상이나 고수부지의 세굴을 방지할 수 있는 구조가 되도록 설계하여야 한다.

(3) 수문의 방향은 제방법선에 직각방향으로 설치하는 것을 원칙으로 하고 수문설치 위치는 수충부나 연약지반을 피하여 하상이 안정된 지점을 선정하여야 한다.

(4) 배수구조물의 단면은 집수면적내의 강우량, 본류와 내수의 유출상황 등을 고려하여 계획배수량을 배제할 수 있는 단면으로 하여야 하되, 유입수로 및 유입수로 상류측 구조물의 규격을 감안하여 결정하도록 하며, 관내유속은 최대 3.5m/sec 이하로 하고 토사나 이물질을 원활하게 배제할 수 있도록 최소 ∮800 m/m 이상의 규격을 사용하도록 한다.

(5) 배수구조물은 철근콘크리트 구조로 하는 것을 원칙으로 하고 아래와 같은 기준에 의하여 설계하여야 한다.

(가) 암거의 길이가 30m 이상일 경우 부등침하에 대한 우려가 있으므로 이음매를 두어야 하며 연약지반인 경우는 20m정도를 기준으로 이음매를 설치하되 중앙부를 피해서 두어야 한다.

(나) 토류벽의 높이는 1.5m를 넘지 않도록 하여야 한다.

(다)  권양대의 높이는 수문개방시 문짝 하단까지의 높이에 문짝의 높이와 관리를 위한 여유고를 더한 값으로 하며, 여유고는 최소한 0.5m이상을 확보하도록 한다.

(라) 수문은 개폐가 용이하고 수밀성을 가져야 하며 유수에 현저한 지장을 주지  않는 구조로 하되 강구조로 설계하는 것을  원칙으로 한다.

(마) 흉벽은 암거의 본체와 제방내 토립자의 이동 및 유출을 방지하고 제방의 붕괴를 방지하도록 설계하여야 하며 날개벽은 독립구조로 설계하여야 한다.

(바) 수문의 차수 널말뚝은 강철판으로 하는 것을 원칙으로 하며 그 깊이, 길이, 위치 등은 침투 유로를 충분히 검토하여 결정한다.

(사) 제방과의 접촉면을 따라 발생하는 침투수류에 의해 암거 주변의 파이핑 현상이 생기는 것을 막기 위해 암거의 본체와 일체로 된 콘크리트 차수벽을 설치하되 폭 1m, 두께 0.35m 이상의 차수벽을 설치한다. 차수벽 공사시 발생되는 슬라암은 제방보강용으로 재활용하여야 한다.

(아) 배수암거의 단면은 상부의 성토높이별 하중에 따라 단면을 구조계산하고 성토높이별 단면도를 각각 작성한다.

(자) 수문설계시 공도교에 대한 구조검토를 필히 시행하여야 한다.

(차) 3련 이상의 수문의 경우 전동수문으로 설계함을 원칙으로 하고 단 전기반입이 곤란할 경우 수동수문으로 한다.

(6)  배수구조물의 도면을 작성함에 있어 다음 사항을 유의하여 설계하도록 한다.

(가) 구조물의 위치 평면도, 일반도, 측면도, 정면도 및 복잡한 부분에 대한 소축척 확대 상세도를 작성하여야 한다.

(나) 철근 배근도, 철근 수량표 작성, 단부 등에 대한 상세배근도, 철근 피복두께 확보와 철근 간격 유지를 위한 받침(chair) 및 간격유지재 (spacer)의 위치도 및 상세도를 작성하여야 한다.

(다) 구조물의 모따기 상세도, 날개벽의 단부 처리도를 작성하여야 한다.

(라) 도면의 상단에 허용응력 설계법이나 강도설계법 등 설계방법을 표기하여야 한다.

(마) 상세도를 표시할 수 없는 시공시 유의사항 등에 대해서는 도면에 명기하여야 한다.

(바) 시공순서도를 표기하여야 한다.

(사) 구조물 별로, 또는 동일한 구조물이라 할지라도 부분별로 각각의 소요 콘크리트 강도 및 조골재허용 최대치수 등을 명기하여야 한다.

(아) 배수문의 설계피토고를 표시하고 피토고의 높이에 따른 사하중을 고려하여 단면을 결정하여야 하며 필요에 따라 시공 및 신축이음, 수축이음의 위치 및 상세도를 작성하여야 한다.

(자) 콘크리트 타설이나 양생시 발생된 신축, 수축 등으로 균열이 발생될 정도로 암거의 길이가 긴 경우는 필히 횡방향으로 이음부를 설치하여야 하며 이음부를 설치하는 경우나 시공여건 완전분리(철근이연속적으로 연결되지 않는 경우)시공하여야 할 경우는 분리된 암거의 양끝에 필히 면벽을 설치하여야 한다.

(차) 유입부 및 유출부에 대한 상세도면을 작성하여야 한다.

(카)  기존암거를 단순히 연장할 경우는 기존암거를 절단하지 않고 신규암거를 연속하여 설치하는 것으로 하고 신규암거 양단에 필히 면벽을 설치하도록 한다.

(타)  배수암거의 내부바닥높이는 유입수로 바닥 높이보다 다소 낮게 계획하여야 한다.

(7) 구조물 기초의 필요성, 기초의 종류, 기초의 형식결정, 구조물의 안정성 확인 등을 위하여 지반에 대한 충분한 조사를 시행하여야 한다. 지반조사는 구조물의 기능, 크기 및 중요성, 인근 지반자료 등을 검토하여 보오링공의 수와 심도, 시행되는 시험의 종류 등을 감독관과 협의하여 시행하도록 하되 다음과 같은 사항에 유의하여야 한다.

(가) 원칙적으로 구조물별로 1개소 이상의 보오링을 시행한다.

(나) 조사심도는 구조물 기초의 충분한 지지층으로 신뢰되는 깊이(암층)까지 시행하여야 하며 만약 암반층이 나타나지 않을 경우 표준관입시험 결과인 N치가 적어도 50이상 되는 심도까지 시행하도록 한다.

(다) 시추에 의하여 채취된 시료는 비중, 입도분석, 자연함수비 등의 물성시험을 하여야 하며 필요에 따라 직접전단, 1축압축, 3축압축, 압밀시험 등의 역학시험을 실시하여야 한다.

(8) 기존 배수구조물을 연결 시공할 경우는 기존시설에 대한 안전도를 검토한 후 그 결과에 따라 보강 및 철거방안 등을 제시하여야 한다.

(9) 배수구조물 설계시에는 다음사항을 반드시 검토하여야 한다.

(가) 지하수 처리계획

(나) 말뚝의 지지력 검토 및 배열

(다) 널말뚝길이

(라) APRON연장

(마) 지수벽 설치여부 및 규격

(바) 수문용량계산 및 산출근거

(사) 수문단면 및 수리계산서

(10) 신설제방과 관련된 기존도로, 양수장, 수로 및 교량등 공공시설의 이용간계를 면밀히 검토하고 필요한 시설을 설계에 반영하여야 한다.

마. 보

(1) 보의 위치는 설치목적, 취수구의 위치, 구조상의 안정, 공사비 및 유지관리의 편의 등을 고려하여 결정하여야 한다.  즉, 용수수급지까지 도수하는 데 필요한 취수위가 확보되어야 하며, 만곡부는 피하도록하고 유속의 변화나 유수에 의한 하상변화가 적고 기초지반이 양호한 곳, 계획홍수량을 충분히 유하시킬 수 있는 충분한 하폭을 가진 곳으로 결정하여야 한다.

(2) 형식은 홍수소통능력, 취수위 및 취수방법, 구조적인 안정성, 공사비의 경제적 타당성, 완전 차수의 필요성 여부, 세굴 상태 등을 충분히 검토한 다음 최적형식을 선정해야 한다.

(3) 보의 평면배치는 되도록 유수방향에 직각이 되도록 일직선으로 설치해야 한다.

(4) 고정보는 다음 사항을 기준으로 하여 설계하여야 한다.

(가) 고정보의 본체는 콘크리트 구조를 표준으로 하되 하상변동이 심한 장소에서는 돌망태 또는 콘크리트 블록 구조 등 굴요성이 있는 구조를 함께 검토하도록 한다.

(나) 고정보의 단면은 사다리꼴 단면으로 하되 상류측은 연직이나 연직에 가까운 경사로, 하류측 경사는 완만하게 하는 것을 원칙으로 하며, 보의 상하류 수위차에 의한 침투수의 침투길이와 외력에 의한 본체의 전도, 활동, 침하 등을 고려하여 결정하도록 한다.

(다) 보상하류의 세굴을 막기 위해 설치하는 물받이는 철근 콘크리트 구조로 하되 바닥보호공을 병용하여 설치하는 것이 좋다.  상류측 물받이는 보 높이가2~3m정도이고 상류측에 퇴사가 예상되는 곳은 설치하지 않아도 된다.

(라) 보를 월류하는 유수에 의해 하상이 세굴되는 것을 방지하기 위하여 물받이 상하류에 굴요성을 가진 바닥보호공을 설치하여야 한다.

(5) 가동보는 다음 사항을 기준으로 설계하여야 한다.

(가) 가동보의 경간길이는 하천상황, 지형상황, 경제성, 시공성을 고려하되 다음 표를 기준으로 결정하도록 한다.

계획홍수량과 경간길이

계 획 홍 수 량 (㎥/sec)	경 간 길 이 (m)
500미만 500이상 2,000미만 2,000이상 4,000미만 4,000이상	15 20 30 40

(나) 가동보의 물받이는 철근 콘크리트 구조를 하는 것을 원칙으로 하고 물받이와 상판과의 연결부는 수밀성이 있고 부등침하에 대응 가능한 구조로 한다.

(다) 상판은 상부하중을 지지하고 문짝의 수밀성을 확보할 수 있어야 하며, 보 기둥사이에서 물받이 역할을 할 수 있는 구조로 한다.

(라) 보 기둥은 상부하중과 홍수시 유수의 수압을 안전하게 상판에 전달하는 구조로 설계하고, 보 기둥의 높이는 인양식의 경우 홍수위 + 수문높이 + 여유고 + 교량높이로 하고 전도식인 경우 수문 마루표고 + 여유고로 한다.

(마) 가동보의 문짝은 개폐가 확실하고 완전한 수밀성을 가지고 홍수소통에 지장을 주지 않는 구조가  되도록 설계하여야 한다.

(바) 투수성 지반에 보를 설치할 경우 파이핑현상이 일어나지 않도록 충분한 투수로 길이를 확보하여야하며, 투수량이 많은 경우 이를 방지하기 위한 차수벽을 설치하여야 한다.

(사) 보의 설치로 인해 필요한 경우 취수구, 배사구, 침사지, 어도, 갑문, 관리용 교량, 수문조작 및 유지관리 시설등을 설치하여야 한다.

(6) 보 설계시 구조물 도면의 작성 및 지반조사는 배수구조물공의 내용에 따라 설계하도록 한다.

바. 부체도로

(1) 제외지측에 설치하는 부체도로는 유수의 방향으로 설치하여야 한다.

(2) 부체도로의 최소폭은 3m로 하고 종단경사는 부득이한 경우를 제외하고 10%이내를 유지하며 횡단경사는 1:2를 기준으로 한다.

(3) 부체도로는 제내・외지 콘크리트 포장을 원칙으로 하고 포장두께는 20cm로 설치하고 와이어메쉬를 부설하여야 한다.

(4) 포장의 마무리는 제방상단 둑마루부까지 연장하여야 한다.

사. 교량설계

(1) 구조설계

(가) 조사, 계획 및 기본설계 결과로 선정된 최적안의 구조형식에 따라 교량의 상부구조, 하부구조, 기초구조의 단면을 설정하고, 구조물의 안정성과 사용성, 내구성 등을 검토하여 상세히 설계하여야 한다.

(나) 콘크리트 교량의 설계법은 극한강도설계법을 원칙으로 하되 특별한 사유가 있는 경우 감독관과 협의하여 별도의 설계법을 적용할 수 있다.

(다) 주요 구조물들에 대한 단면을 가정하고 관련 설계기준 등에 규정된 해석방법으로 모델링하여 구조계산에 필요한 단면계수를 산출하여야 한다.

(라) 주요하중 및 부가하중을 선정하여 조합하고 최대 단면력(또는 최소단면력)이 산출되도록 하중재하 위치를 정한다.

(마) 지진력 계산은 구조물의 형식・형태 등을 고려하여 계산방법을 정한다.

(바) 설계방법에 따른 하중계수, 강도 감소계수 등을 적용한다.

(사) 시공방법 및 시공순서를 고려하여 구조계산을 수행하여야 한다.

(아) 산출된 최대 단면력(휨모멘트, 축력, 전단력, 비틀림 모멘트)에 대한 안정성을 관련 설계기준 등에 근거하여 검토, 확인한다.

(자) 상부구조의 처짐, 하부구조의 전도 및 활동, 기초구조의 지지력, 변위 등을 검토한다.

(차) 구조물의 국부에 작용하는 하중 및 단면력을 산정하고 안정성 등을 확인한다.

(카) 내진설계를 고려하여 상・하부구조 연결부(내진받침, 면진받짐, 강결구조 등)를 검토한다.

(타) 교량받침은 하중의 크기, 상부구조 형식, 지간구성 등을 고려하여 적정한 것을 선정한다.

(파) 온도변화에 따른 구조물의 변위 및 구조물 단면력을 상세히 검토하여 설계한다.

(하) 상부구조에 대한 구조물 각 부위의 단면력 계산결과와 구조 상세도를 작성해야 한다.

(2) 교면포장설계

(가) 교량 상부구조 및 형식을 고려하여 적정한 포장방법을 검토한다.

(나) 소음・진동과 승차감을 고려하여 설계한다.

(다) 추정교통량・기후 등을 감안하여 설계한다.

(라) 교면포장은 차량하중에 의한 충격, 빗물 등 기상조건 등을 고려하여 교면 구조물이 보호될 수 있고 동시에 차량이 쾌적하게 주행할 수 있도록 설계하여야 한다.

(마) 교면포장 설계는 슬래브와의 부착성이 좋고 반복되는 휨응력에 충분히 견딜 수 있도록 하여야 하며 또한 마모 및 방수층 설치 필요성 여부 등을 감독관과 협의후 설계하여야 한다.

(3) 부대시설설계

(가) 난간, 방호책, 중앙분리대, 경계석 등의 크기, 재질 등을 검토하여 도로의 안전기능을 확보하도록 설계한다.

(나) 신축이음(EXPANSION JOINT)은 상부구조의 형식 및 연장, 사용재료 등을 고려하여 적정한 것을 선정한다.

(다) 교명주는 감독관과 협의하여 위치, 크기, 재질 등을 설계한다.

(라) 교량으로 통과가 예상되는 타기관 시설물(통신, 가스, 상수관등)에 대하여 사전에 관계기관과 협의하고 이를 감안하여 설계하여야 한다.

(마) 도로조명기준 등에 의거 가로등의 간격, 높이, 밝기 등을 검토하여 설계한다. 다만 감독관이 본 과업에서 가로등을 설계하지 않기로 한 경우에는 향후 가로등 설치에 지장이 없도록 기초 및 배관시설 등을 설계하여야 한다.

(바) 다음의 유지관리 시설 설치여부에 대해 감독관과 협의한 후 설계하여야 한다.

1) 점검통로 및 교각안전난간

2) 조명 및 환기시설

3) 계측기기

4) 기타 유지 관리에 필요한 시설

아. 가설공법

(1) 교량의 규모, 지반상태, 동원가능 장비의 능력 및 수량, 가설제작장 설치가능여부, 공사소요기간 및 가설공사비 등을 비교・검토하여 설계한다.

(2) 주변시설 및 인근주민에 미치는 소음, 진동과 교통의 혼잡을 최소화할 수 있는 공법으로 설계하여야 한다.

자. 차수공

(1) 답사에 의한 제체보강지역 조사

(가) 제체보강 예정지의 토질, 토양, 함수상태, 연약지반 유ㆍ무, 기초지반의 투수성 등 지반조건을 조사한다.

(나) 본 조사구간은 기성제방구간 이므로 제체의 토질상태, 안정성, 공극상태, 사면경사 등을 세밀히 조사한다.

(다) 제체 횡단시설물 등 일관성 있는 보강대책 수립에 부적합한 지장물을 조사한다.

(라) 홍수시 투수성 지반을 통해 제내지의 용수현상 등이 발생하고 있는 지역이므로 뒷비탈면 국부세굴 및 파이핑 현상, 제방 횡단 구조물 주변누수, 제내지측 인위적 굴착현상 등 홍수시 제내지측으로의 용수도는 지하수상승 현상발생 여부 그리고 토질시험 결과에 의한 기초지반 투수성 등을 면밀히 검토하여 누수원인을 조사하여야 한다.

(마) 두더쥐, 들쥐 등 야생동물의 구멍은 제체누수의 원인이 되므로 세밀한 조사를 실시한다.

(바) 지반누수는 고수부지의 표토가 유실되거나 제체 비탈기슭 부근에서 골재채취 등 굴착을 실시하여 투수층이 노출되어 일어나는 경우가 있으므로 세밀한 조사를 실시한다.

(2) 제체누수 원인분석

(가) 제체의 계획홍수량에 따른 유효단면 확보 검토 여부

(나) 현장 투수시험에 의한 투수계수 결정 및 유선망 작성을 통한 누수 및 파이핑 현상 규명

(다) 제방횡단구조물에 대한 누수에 대해 검토시 구조물과 제체 접촉부의 공동 여부를 판별하여 검토

(라) 지질조사 결과 제체지만의 투수성, 파이핑, 세굴침하 등 제체 안정성을 종합 검토한다.

(3) 제체누수대책 설계

(가) 제방에서의 누수는 비탈면 붕괴, 제방파괴 등의 원인이 되므로 적절한 대책을 강구해야 하며, 제체의 누수대책은 제방 단면의 확대, 비탈면 피복, 차수벽 등으로 누수경로를 차단하거나 제내지 비탈면을 보강하는 방법 등 시공성, 경제성 및 현장여건에 부합하는 적정한 누수방지 대책을 수립하여야 한다.

(나) 지반누수의 대책은 투수층에 차수판을 설치하는 방법, 제방과 제내지 도는 제외지가 접하는 부분을 불투수성 표면층으로 피복하는 방법, 제방의 폭을 넓혀 침윤선을 연장하는 방법, 제외지 앞부분에 수제를 설치하여 세굴을 방지하고 토사의 퇴적을 도모하는 방법 및 제방에 배수로를 설치하는 방법 등 여러가 지가 있으나, 당해 제방의 특성, 전절에서 검토한 누수원인, 현지여건 등을 종합 고려하여 일관성 있고 경제적이며 시공성이 양호한 누수대책공법을 선정하여 설계한다.

(4) 누수방지공의 도면을 작성함에 있어 다음 사항을 유의하여 설계하도록 한다.

(가) 누수방지공의 위치평면도, 일반도 및 복잡한 부분에 대해서는 소축척 확대 상세도를 작성하여야 한다.

(나) 상세도를 표시할 수 없는 시공시 유의사항에 등에 대해서는 도면상에 “NOTE”로 주기를 달아야 한다.

(다) 지반조사 내용을 일반도 및 종단면도 등에 표기하여 누수대책공법의 적정여부를 쉽게 파악할 수 있도록 작성하여야 한다.

(라) 공사시행에 수반되는 기존제방의 철거 및 복구 등은 세부도면을 작성하여야 한다.

6. 설계도서 작성 및 공사비 산출

가. 설계도서의 작성

설계도서의 규격은 건설교통부제정 중앙건설심의위원회 운영규정에 의한 설계도서 작성기준에 의하되, 설계도면의 원도 및 청사진 도면은 A1(594× 841) 규격, 소도면은 A3(297× 420) 규격, 기타 각종 서류는 A4(210× 297)규격으로 하되, 설계서 및 설계도면은 지정된 저장프로그램으로 지정한 CD-ROM으로 내역서는 PC용 디스켓(TXT파일)으로 납품하여야 한다.

(1) 실시설계보고서

(2) 설계도

(3) 설계예산서

(4) 일반 및 특별시방서

(5) 단가 설명서

(6) 기타

나. 산출서 및 계산서 작성

(1) 단가 및 수량산출서 작성

(2) 구조 및 수리계산서 작성

(3) 기타 본 용역에 적용한 각종 설계계산서

다. 기타 보고서 작성

본 용역수행에 있어 조사, 비교, 협의, 방침결정을 위하여 발주기관의 요청시에는 필요한 보고서를 작성・제출하여야 한다.

(1) 설계요약 보고서

(2) 단가적용 설명서

(3) 기타 설계기준 및 구조형식 등 본 용역 방침결정에 필요한 검토서

라. 설계도서 작성시 유의사항

(1) 공통사항

(가) 공사시공시의 유의사항 및 시공과 관련하여 특별히 필요한 모든 사항은 공사 특별시방서에 명시하여야 한다.

(나) 모든 구조물 도면은 평면도, 정면도, 측면도(종단도), 단면도(필요시)를 필히 작성하여야 하며, 부분적으로 확대할 필요가 있을 시는 소축척 확대상세도(이하 부분별 상세도)를 작성하여야 한다.

(다) 평면도 등을 작성할 시는 주위 지형을 표시하여야 한다.

(라) 개별구조물마다 평면도, 정면도, 측면도, 단면도, 철근배근도 및 가공도, 부분별 상세도, 철근수량 등 재료집계표등 구조물에 필요한 도면을 연속하여 작성・편철하여야 한다.

(마) 구조물의 외곽선, 지형선, 철근선, 치수선, 철근종류 표시선등 각선의 굵기가 서로 달라야 되며, 상호 명확하게 구분되도록 도면을 작성하여야 한다.

(바) 철근 배근도, 철근 수량표 작성 특히 구조물의 4면 끝부분에 대한 상세 배근도와 철근 피복두께 확보정. 부철근 등의 간격 유지를 위한 받침(CHAIR) 및 간격유지재(SPACER)의 재료와 설치위치도 및 상세도를 작성하여야 하며 철근을 간격유지재로 사용할 경우는 철근가공도를 작성하고 수량은 개별구조물의 철근 재료표에 명기하여야 함.

(사) 철근을 동일면에서 배근할 경우에는 종·횡 철근중 어느 것이 윗쪽 또는 아래쪽에 배근되는지가 명확히 구분되도록 표기되어야 됨.

(아) 각종 구조물의 모따기 상세도, 옹벽, 콘크리트 측구 의 단부처리도를 작성하여야 한다.

(자) 옹벽 각종 날개벽에 대한 전개도를 작성하여야 한다.

(차) 날개벽 및 옹벽 등에 설치될 각종 배수공의 위치 및 설치 상세도를 작성하여야 한다.

(카) 구조물 도면에 발생가능 균열(CRACK)의 종류, 허용폭 등에 대해 서술하고 균열발생시의 처리방법에 대하여 명시하여야 한다.

(타) 상세도로 표시할 수 없는 주의 사항 (시공시 유의사항 등)에 대해서는 필히 도면에 명기하여야 한다.

(파) 구조물별 또는 동일 구조물이라 하더라도 부위별로 각각 소요 콘크리트 강도와 조골재 허용최대치수 등을 설계도면과 공사특별 시방서에 명기하여야 한다.

(하) 한 구조물에 대한 도면은 상호 연계성이 있게 각 면에 적정 배치하여야 됨.

(거) 구조물도는 쉽게 판독할 수 있도록 가급적 소축척으로 작성하여야 함.

(너) 소축척으로 작성하여도 치수가 작은 부위에 대하여는 보다 적은 소축척으로 부분상세도를 작성하여야 됨.

(더) 암거, 교량 및 배수관의 날개벽에 대해서는 현지지형과 여건에 맞게 설계도 및 전개도를 작성하여야한다

(러) 호안블럭, 돌망태 등은 필히 전개도를 작성하여 각측점별 호안길이뿐만 아니라 변화구간에 대한 시공길이를 명확히 표시하여야 하며, 곡선구간에서는 증・감되는 수량을 보정하여야 한다.

(머) 구조물의 특성과 각종 시멘트 종류에 따른 양생방법을 구체적으로 제시하여야 하며 양생 방법 명기시 양생기간, 양생시 주의사항, 양생재의 종류와 사용조건, 사용시간 등을 구체적으로 명기하여야 한다.

(버) 특수 비계 동바리 설치, 가교, 가도 등 가설시설물 설치안에 관한 도면 및 구조계산을 작성하여야 한다.

(2) 토     공

(가) 성토재료의 최대치수, 입도범위, 다짐도등을 제시하여야 하며,

(나) 동 입도 범주에 드는 여러 재료를 제시한 후 주변 여건 등을 고려하여 발주기관과 협의 결정하여야 한다.

(3) 배수 및 구조물공

(가) 배수문, 배수관 및 암거의 도면 작성시에는 규격별로 표준도만 작성하지 말고 개소별로 상세한 설계도를 작성하고 각 구조물마다 콘크리트, 철근, 거푸집 물량을 도면에 명기하여야 한다.

(나) 배수문의 설계피토고를 표시하고 피토고 높이에 따른 사하중을 고려하여 단면을 결정하며 연장이 긴 경우에는 필요에 따라 시공 및 신・수축이음의 위치, 구조상세도 작성 및 채움재료의 품질 등을 명기하여야 한다.

(다) 배수문의 연장이 길어 콘크리트 타설, 양생시 발생될 신・수축 등을 고려하여 이음부를 설치할 경우에 는 필히 전단부에 단부보강을 위하여 설치하는 면벽을 설치하여야 한다.

(라) 옹벽의 전개도에 이음부위치 상세도(시공, 신・수축이음) 및 구조상세도를 표시하여야 한다.

(마) 배수문, 유입. 출구부 도면을 작성하여야 한다.

(바) 옹벽, L형 측구 옹벽 등에 대한 시공, 신・수축이음 위치, 이음부의 상세도를 작성하여야 한다.

(사) 구조물 부위중 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조 형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도의 설계상세도를 작성하여야 하고, 시공시 유의사항 등을 명기하여야 한다.

(아) 콘크리트 구조물 설계는 구조물별, 부위별로 구체적이 세부적인 콘크리트 타설순서, 타설방법, 콘크리트 종류(압축강도, SLUMP치, 골재크기), 타설 전・중・후의 유의사항 등을 명기하여야 한다.

(4) 기    타

(가) 토질 조사시 실제로 보링하지 않고 추정치를 사용한 지점을 도면 및 특별시방서에 반드시 명기하여  공사시행시 동 지점에 대해서 별도의 지질조사를 실시하도록 하여야 한다.

(나) 공사기간은 막연하게 산정하지 말고 CPM 공정계획 에 의거 정확하고 합리적으로 산정하여야 한다.

(다) 본 공사에 소요되는 각종 재료(흄관두께, 본당 표준길이, 강관두께, 내경, 외경, 강재품질등 기타재료)의 품질확보를 위한 소정의 품질 및 규격, 재질 등을 구체적으로 명기하여야 한다.

(라) 시설물의 안전을 확보하기 위한 점검시설 및 안전시설 등의 중요성을 감안하여 이에 필요한 종합적이 고 구체적인 내용을 제시하여야 한다.

(마) 기타 공사 시공시 필요하다고 인정되는 각종 사항을 발굴하고 이를 구체적으로 제시하여야 한다.

(바) 수량 및 단가 산출은 각각 별책으로 작성하되 참조하기 편리하도록 편집한다.

(사) 수량 및 단가산출시는 발주청 산출기준을 참조하여 작성하여야 한다.

(아) 설계예산서 작성은 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙에 의거 작성한다. (재무부 회계 2000.04 - 105, '95. 7.10)

(자) 각 공정별 소요인원 산출은 상세히 하고 산출근거를 작성하여 단가 산출서에 첨부한다.

(차) 구조계산 등을 컴퓨터로 처리할 경우는 사용 프로그램명 및 개요, Flow Chart입력자료 등을 보고서에 명시하고 구조해석을 위한 하중조합, 모델링, 입력사항 등을 명확히 표시하여 발주청이나 제3자의 검증이 미흡하지 않도록 하여야 한다.

(카)   준공시 준공도면(A1규격) 및 설계서(A4규격)를 마이크로화 및 CD-ROM화하여 납품할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

(타) 아래사항에 대하여는 과업수행 7일전에 감독관에게 통보하여 감독과의 협의하에 과업을 수행하여야한다.

1) 기준점 및 주요구간의 측량시

2) 선행결정시

3) 시료채취 및 토질조사시

4) 기존 구조물 위치 규격 조사시

5) 토취장 선정 및 골재원 조사시

(파) 총사업비 적정 관리를 위한 관리지침에 따라 사업 발주후 과다한 사업량 증가로 인한 사업비 증가발생을 초래할시는 부정당업자의 입찰 참가자격제한 등 불이익을 받을 수 있으며, 아래 내용과 같이 사업추진중에 설계변경 사례가 발생치 않도록 특별히 유념하여야 한다.

1) 사업발주후의 설계 착오 및 누락 등으로 인하여 총사업비가 10%이상 증가되어서는 안된다.

2) 토질조사 불철저로 인한 구조물 기존 심도 증가 또는 구조변경 사례발생으로 공사비 증가 및 공사지연이 되지 않도록 하여야 한다.

보  안  대  책

본 용역설계의 설계도서 및 제반자료에 대하여는 보안관리에 철저를 기하여야하며 다음과 같이 보안 대책을 이행하여야 한다.

1. 용역회사 대표자는 용역착수시 발주청이 제시하는 서식에 의한 보안각서를 제출하여야 하며, 용역참여자에 대한 보안각서는 회사 대표자 책임하에 징구제출하여야 한다.

2. 용역과업 사무실을 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

3. 자료보관함은 별도로 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정부책임자를 지정하여 관리하여야 한다. 단, 비밀이 아닌 용역의 경우에는 비밀보관함을 비치하지 않을 수 있다.

4. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과품을 발간하고자 할 때는 정부비밀 취급인가업체를 이용하여야하며 본 과업지시서에 명시한 부수만 인쇄하는 것은 물론 발주청의 비밀 취급인가자의 입회하에 행하여야한다.

5. 용역의 참여자가 교체될시는 감독관의 승인을 득한후 인수인계를 철저히 하고 감독관의 확인을 받아야한다.

6. 기타 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행상 별도의 보안관리 등을 요하는 사항이 시달될 경우는 이를 준수하여야 한다.

7. 용역업체는 용역물의 보안관리에 철저를 기하기 위하여 용역설계 전후를 막론하고 다음 사항을 준수하여야 하며 용역계약시 이를 준수하겠다는 각서를 제출하여야한다.

가. 용역설계 참여자 명단 제출

나. 본 용역설계도서에 의한 기록 및 인지사항을 누설하지 않겠다는 각서

다. 본 용역설계서 작성 기간중 출입자 통제

라. 용역자료 등의 방치를 금할 것이며 본 용역수행에 관련된 모든 자료는 견고한 용기에 보관하고 보안관리책임자가 직접 관리하여야 하며 지정된 용기외 보관은 금한다.

마. 불 필요한 원고 및 자료는 반드시 소각 조치할 것.

8.  기타사항에 대하여는 보안업무 규정을 준수하고 감독관의 지시를 받는다.

기  타  사  항

1. 하도급의 제한, 범위, 책임은 다음과 같으며 용역계약자는 철저히 이행하여야 한다.

가. 용역계약자는 도급받은 설계 등 용역을 다른 설계 등 용역업자에게 일괄하여 하도급 할 수 없다.

나. 하도급 받은 용역업자는 다른 용역업자에게 재하도급 할 수 없다.

(1) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

(2) 지질 및 토질조사와 이에 부수되는 시험 등 작성

(3) 제도 및 도면작성 등 작업

(4) 건설공사의 수량내역서 작성 및 견적업무

(5) 기타 발주청이 특별히 인정하는 업무

다. 계약상대자는 하도급한 경우에도 계약에 의한 계약상대자의 의무가 면제되지 아니하며, 하도급 용역에 대한 모든 책임을 진다.

라. 계약상대자는 용역을 하도급한 경우에는 하도급 계약체결후 15일이내에 발주청에 통지하여야 한다.

마. 발주청은 하도급 계약금액이 원도급 해당금액의 88%미만으로서 하도급용역의 적정한 이행이 되지 아니할 우려가 있다고 인정되는 때에는 하도급 계약내용의 변경을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

바.  발주청은 하도급자가 부적당하다고 인정될 때에는 하도급자의 교체를 요구할 수 있으며 이 경우, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 하도급자를 교체하여야 한다.

2. 용역준공후 지반선이나 구조물 기초 지반 등이 설계도서와 상이함이 발견되어 시행청의 요청이 있을 시는 즉시 이를 재조사하여 변경설계도서를 작성한 후 책임기술자의 확인서명 날인된 변경도면 및 사유서를 제출하여야한다.

3. 각종 개발계획 및 기존시설물 유지관리등과 관련하여 따라 기타 관계기관과 협의가 필요시는 사전협의를 완료한 후 그 결과를 발주청에 보고하고 설계에 반영하여야 한다.

4. 본 실시설계 이전의 기존자료는 최대한 활용할 수 있다.

5. 보링 등 토질조사시에는 반드시 감독관 입회하에 실시하여야 하며, 토질담당기술자가 필히 참여하여야 한다.

6. 용역 최종 보고서에는 참여자별 성명, 주민등록번호, 담당분야 및 참여기간, 소지자격증 종류 등을 상세히 기록하여 추후 부실 설계 부분이 있을 경우 책임자를 분명히 파악할 수 있도록 기록하여야 한다.

7. 설계도면에는 개별 낱장마다 책임기술자가 서명을 하여야 한다.

8. 본 설계서에 의하여 납품되어야 할 성과품과 수량은 다음과 같다.

가. 실시설계 보고서 및 부록 ------------------ 5부

나. T/C 원도 --------------------------------- 1부

다. 설계도         A1 ------------------------- 5부

A3 ------------------------- 5부

라. 조사측량 관계야장 ------------------------ 1식

마. 용역중 시료조사 성과품 ------------------- 1식

바. 수리 및 구조계산서 ----------------------- 각 5부

사. 수량 및 단가산출서 ----------------------- 각 5부

아. 설계예산서 ------------------------------- 각 5부

자. 용지도 및 용지조서, 지장물조서 ------------- 각 5부

차. 토지대장 및 등기부등본 -------------------- 각 1부

카. 상기사항 전산화 디스크 및 도면CD ---------- 각 5부.

타. 기타 발주청이 요구하는 성과품 -------------- 1식

Ⅲ. 설  계  예  산  서