		2018 회계연도 특수공시 사업목록

연번	사업명	추진부서	담당자	전화번호	비고
1	화암․북평 지역아동센터 신축	여성청소년과	박찬	560-2973
2	인재육성 아카데미 운영	여성청소년과	전성재	560-2185
3	고한 작은영화관 건립	문화관광과	이광은	560-2549
4	도시가스 공급사업	지역경제과	경순현	560-2437
5	낙동2 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	건설과	박기윤	560-2488
6	정선읍 소재지 종합 정비사업	도시과	유수근	560-2468

1. 화암․북평 지역아동센터 신축

	필요성
❍ 열악한 아동복지시설 기반 및 환경조성을 위해 지역아동센터 및 공동생활가정 운영지원으로 아동의 건전한 보호육성

사업개요

구 분		화암면	북평면	비 고
위 치		화암리 1110-2	북평리 693-4
사업비		713백만원	915백만원 (부지매입비 포함)	군비
면적	부지	659㎡	681㎡
	건물	226.05㎡	226.35㎡
사업기간		2018. 5. ∼ 2018. 12.

추진현황

아우라지 지역아동센터 준공 : 2018. 6월

화암·북평면 지역아동센터 실시설계용역 : 2018. 5월

화암·북평면 지역아동센터 공사 착공 : 2018. 9월

화암·북평면 지역아동센터 공사 준공 : 2018. 12월

향후계획

지역아동센터 운영

2. 정선 인재육성 아카데미 운영

	필요성
❍ 정선지역 고등학교 교육경쟁력 강화 ❍ 경쟁력 있는 교육환경 제공 및 올바른 학습습관 배양 ❍ 변화된 입시환경에서 전문 교육컨설턴트에 의한 체계적 비교과 관리

사업개요

운영기간 : 2018. 1. 13. ~ 12. 23.(47주)

- 주 3일 : 수, 토, 일

운영대상 : 군 관내 고등학생

사 업 비 : 1,572백만원

운영방법 : 사북청소년장학센터 위탁운영

운영업체 : ㈜키움에듀(대표: 구지영)

운영내용 : 교과(국,영,수,사회,과학) 비교과수업, 인문논술 등

추진실적

프로그램 추진실적 : 1. 13. ~ 12. 23.(47주)

구분	프로그램명	주요 내용	운영	비고
심화 학습	소 계		119회 5,219명
	아카데미 심화학습	국·영·수1·수2 강의(고 1,2,3)	70회 4,592명
		사탐·과탐 강의(고 1,2)	12회 156명	방학중
		논술 강의(고 2,3)	33회 331명
		추석 특강 강의(고 3)	4회 140명
입시 아카 데미	소 계		6회 366명
	개강식	2018 인재육성아카데미 운영계획·강사소개	2회 199명
	입시아카데미	대학별 입시 전형분석(고 1,2,3)	1회 54명
	학부모 대형 설명회	학부모 대형 입시 설명회	3회 113명
컨설팅	소 계		74회 2,910명
	비교과	진로 학습 3종 진단검사	5회 98명
		학습진단 검사 (1:1 대면해설 운영)	14회 93명
		개별이력 관리 컨설팅	17회 897명
		자기소개서 작성법	9회 423명
		논구술면접 프로그램	17회 983명
		학교생활기록부 관리법 특강	3회 161명
		대학배치 상담	4회 85명
		중3 자기주도 학습강화 진로캠프	5회 170명

‣ 고3 개인별 입시전략 수립 및 컨설팅(수시)

- 진로학습 3종 검사(학습전략, 진로탐색, 심리특성) 실시

- 희망대학(학과) 중심 수시전형 분석 대학배치 : 2018. 5월

- 2차 대학배치 상담 : 2018. 7. ~ 8.

- 3차 수시원서접수를 위한 대학배치 상담 : 2018. 9월

- 고3 수능이후 논술전형 및 면접 준비 특강 : 2018. 11월

- 수시이후 정시원서접수 컨설팅  : 2018. 12월

향후 계획

❍ 지속적인 아카데미 운영

3. 고한 작은영화관 건립

	필요성
❍ 소방취약계층 화재발생시 소방시철 미설치로 인한 재난사고 발생을 사전에 예방함으로써 군민 주거생활 안정에 기여

사업개요

사업기간 : 2017. 1월 ∼ 2019. 3월

위    치 : 정선군 고한읍 고한10길 28-12

사 업 비 : 3,811백만원(국비 500, 도비 150, 군비 3,061, 도교육경비 100)

사업내용 : 작은영화관 신축 1동(1관 50석, 2관 59석)

추진실적

❍ 기본 및 실시설계 완료             : ‘17. 12월

❍ 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 : ‘18. 3월

❍ 시설공사 착공                     : ‘18. 3월

❍ 관련조례 일부개정                 : ‘18. 7월

❍ 정선군의회 위탁 동의              : ‘18. 9월

❍ 시설공사 준공                     : ‘19. 3월

❍ 개관                              : ‘19. 6월

향후계획

지역주민의 편안한 영화관람 제공 및 맞춤형 체험 교육 프로그램 진행

4. 도시가스 공급사업

	필요성
❍ 도시가스 미 공급지역에 공급시설 설치비 지원 및 보급 확대 ❍ 도시가스 공급에 따른 군민 에너지 복지혜택 제공

사업개요

대상지역 : 고한, 사북읍 일원

사업기간 : ′16. 7월 ～ ′18. 12월

총사업량 : 1,537세대, 배관 22.7km, 정압기 5개소

1) 2018년 : 배관 4.5km, 정압기 2개소

총사업비 : 7,696백만원(도 10%, 군 40%, 강원도시가스 50%)

1) 2018년 : 1,708백만원(도 171, 군 683, 강원도시가스 854)

사업주관 : 강원도시가스(주)(정선군&강원도시가스 협약)

추진실적

강원도 제5권역 도시가스 사업자 선정(강원도시가스(주)) : ′10. 6월

정선군 천연가스 공급협약(정선군/강원도시가스) : ′12. 6월

천연가스 공급협약 변경 및 강원랜드 연료전환 : ′16. 6월

강원랜드 LNG 공급개시(호텔, 콘도, 생활관) : ′16. 11월

본관 및 공급관 22.7km(태백-고한-사북)완료 : ′16년 ～ ′18년

내관공사 추진 : 394가구(고한 104가구, 사북 290가구)

향후계획

사유지 구간 토지소유자 사용 승낙 및 공급신청 홍보

5. 낙동2 급경사지 붕괴위험지역

	필요성
❍ 군도4호선(낙동-가수) 구간 내 도로절개지 사면불량으로 상습적인 낙석 및 낙반 등 붕외위험 잔존 ❍ 붕괴위험해소로 통행안전 확보 및 주민의 소중한 생명 및 재산 보호

사업개요

위    치 : 남면 낙동리 산298-1번지 일원(군도4호선)

사 업 량 : 도로개설 L=722m, B=9.5m, 교량2개소 L=215m

총사업비 : 9,626백만원(국비 4,813, 특교세 237, 도비 963, 군비 3,613)

※ 2018년도 : 1,700백만원

사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년)

추진실적

급경사지 붕괴위험지역 지정        : 2014. 1. 16.

실시설계 용역 추진                : 2015. 10월 ~ 2016. 5월

사전 설계검토(행정안전부)          : 2015. 12. 23. / 2016. 5. 23.

인․허가 협의                       : 2016. 6월 ~ 9월

공사 착공                         : 2016. 10. 13.

장기1차 공사 준공                 : 2017. 12. 19.

보상 완료(100%) : 토지 23필지 / 13,353 ㎡, 지장물 10건

장기2차 공사 준공                : 2018. 12. 8.

향후계획

장기 3차 공사 준공 : 2019. 10월경

6. 정선읍 소재지 종합정비 사업

	필요성
❍ 군도4호선(낙동-가수) 구간 내 도로절개지 사면불량으로 상습적인 낙석 및 낙반 등 붕외위험 잔존 ❍ 붕괴위험해소로 통행안전 확보 및 주민의 소중한 생명 및 재산 보호

사업개요

위       치 : 정선읍 일원

2018년 예산 : 1,253백만원(국 37, 도 3, 군 1,213)

사업현황

(단위: 백만원)

읍·면	사업기간	총사업비	사 업 량	현 공정	비고
정선읍	2014∼2018	10,200 국 6,300 도 540 군 3,360	인도교 L=70m, 아케이드 L=150m, 전선지중화 L=1,400m, 가로정비 L=1,400m 주차장 2,700㎡ 전선지중화(2차) L=350m 등	공사완료 (공정율 : 100%)

추진실적

기본계획 및 시행계획 수립         : 2016.  1월

오반천 인도교 설치                : 2016. 12월

정선5일장 아케이트 설치           : 2016. 12월

전선지중화 1차 사업 추진          : 2017. 12월

전선지중화 2차 사업 추진          : 2018. 11월

정선시내 가로정비 완료            : 2018. 12월

향후계획

사업정산 및 시설물 인수