109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 정선군에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
청소년 수련관 건립	9,464	1,381	2,500	5,583	-	2019	2017	79%
골지천유역 침사지 비점오염저감사업	7,600	7,512	29	20	39	2020	2016	60
국가생태문화탐방로 조성사업 (동강따라 천리길)	6,000	1,300	800	0	3,900	2020	2016	38
용탄천 생태하천 복원사업	19,000	3,000	4,000	2,000	10,000	2020	2016	65
목재문화체험장 조성사업	5,500	-	2	2,250	2,950	2020	2017	20
정선 화암동굴 개선사업	3,900	-	200	1,800	1,900	2020	2016	10
화암 (그림바위권역) 창조적마을만들기 사업	3,380	807	1,114	429	1,030	2020	2016	35
정선역광장 조성사업	154	-	154	-	-	2018	2016	100
아우라지 관광지 개발사업	7,000	1,400	1,000	-	4,600	2020	2018	20
제6회 세계 대한민국 아리랑 축전	250	-	250	250	250	2018	2016	100
고한 작은영화관 건립	3,811	31	2,014	1,766	-	2019	2017	100
고한 생활체육공원 비탈면 옹벽 보강공사	2,500	-	2,500	-	-	2018	2016	100
전국육상경기 아시안게임 최종선발 겸 주니어 육상경기 선수권대회 및 청소년 육상경기 선수권 대회	396	-	198	198	-	-	-	100
제 12회 세계청소년 태권도 선수권 최종선발대회	125	-	125	-	-	-	--	100
2018 아리랑 힐 페스타 대회	100	-	100	-	-	-	-	100
정선군 전통김치 6차산업화 지원사업	7,400	4,400	3,000	-	-	2018	2016	100
활기찬 농촌프로젝트 시범사업	8,700	4,924	3,776	-	-	2018	2016	100
야생화마을 추리극장	4,908	793	882	3,233	-	2019	2017	80
강원도 개발공사 보유 강원랜드 주식매입	6,000	4,000	2,000	-	-	2018	2018	100
사북시장 청년몰 조성사업	3,000	-	1,500	1,500	-	2019	2018	10
우주입자연구센터 건립지원	2,200	-	19	2,181	-	2019	2018	10
임계 다목적 복합공간 조성	2,997	-	1,269	1,728	-	2019	2018	20
올림픽 경관도로 개설사업	2,000	-	2,000	-	-	2018	2016	100
행복주택건립사업	20,500	6,814	7,691	5,995	-	2019	2016	55
고한읍 소1-21호선(고토일) 도로 확포장공사	3,600	1,897	1,800	-	-	2019	2016	80
정선군립병원 기능보강	32,924	8,353	11,321	2,950	10,300	2021	2016	69%

사업명

청소년 수련관 건립

담당자

여성청소년과 전제헌(☎560-2360)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년 활동 공간 확충을 통한 건전육성 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 정선군 정선읍 북실리 764-14

○ 규 모 : 청소년수련관 건립 1식

- 지하 1층, 지상 3층(부지 2,644.6㎡, 건물 2,810.22㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,464백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,464	1,381	2,500	5,583
국 비	5,335	223	2,000	3,112
시 도 비	387	17	150	220
시군구비	3,342	1,141	350	1,851
지 방 채
민간자본
기 타	400			400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 79%)

○ 수장공사(내부 천정 마감 시공), 미장공사(내부 바닥 몰탈 시공)

○ 타일공사(내부 바탁 타일 시공), 저수조 보일러 제작 설치

○ 태양광 설치, CCTV 방송장치 설치

□ 향후계획

○ 건물 외부 싸인 설치, 내부 마감공사 완료, 외부 토목 조경공사 완료

○ 공사 준공 : 2019. 10월말

사업명

청소년 수련관 건립

담당자

여성청소년과 전제헌(☎560-2360)

□ 사업변경 내역

《당 초》

○ 총사업비 : 7,659백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,659	781	600	2,500	3,778
국 비	5,685		223	2,000	3,462
시 도 비	387		17	150	220
시군구비	1,587	781	360	350	96
지 방 채
민간자본
기 타

《변 경》

○ 총사업비 : 9,464백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,464	1,381	2,500	5,583
국 비	5,335	223	2,000	3,112
시 도 비	387	17	150	220
시군구비	3,342	1,141	350	1,851
지 방 채
민간자본
기 타	400			400

사업명

정선군 골지천유역 침사지 비점오염저감사업

담당자

환경과 강윤혜(☎560-2910)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고랭지밭 등 비점오염원 저감을 통한 하천 수생태계 건강성 회복 및        수질개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016~2020(5년)

○ 위 치 : 정선군 임계면 임계리 48-76번지 일원

○ 규 모 : 다단침사지(7,900㎥/1개소), 발생원저감시설(사면보호 834㎡,                     우회수로 1,575m, 게비온 9,350㎥)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,600	7,511	29	20	39
국 비	5,320	5,262	20	14	27
시 도 비	342	339	1	1	2
시군구비	342	332	2	1	2
지 방 채
민간자본
기 타(기금)	1,596	1,578	6	4	8

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 한국환경공단 위수탁 협약체결 : ‘16. 2. 5.

○ 유량 및 수질조사 (1차조사 ‘16.7.7~7.8, 2차조사 ’16.8.28) 완료

○ 공공측량성과 심사 (현장측량 시행 ‘16.7.24) 완료

○ 토질조사 (현장시추조사 시행 ‘16.11.19) 완료

○ 토지보상 및 토지사용승낙 완료 : ‘18. 6월

○ 환경부 사업내용변경 및 기본 및 실시설계 승인 : ‘19. 4. 12.

○ 시설공사 착공 : ‘19. 06. 17.

□ 향후계획

○ 시설공사 준공 : ‘20. 9월

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2016년~2019년	2016년~2020년
시설종류 및 사업량	침사지1개소(금방동천유역) (V=7,990㎥), 발생원저감시설(큰골천유역) (사면보호 39,400㎡, 우회수로 10,900m등)	침사지1개소(금방동천유역) (V=7,900㎥), 발생원저감시설(큰골천유역) (사면보호 834㎡, 우회수로 1,575m, 개비온 6,170m(9,350㎡))

사업명

국가생태문화탐방로 조성사업

담당자

환경과 이정혁(☎560-2330)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동강유역 생태․경관보전지역인 평창군, 영월군과 연계한 자연친화적 생태       문화탐방로 조성으로 상생발전 도모 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020년(5년)

○ 위 치 : 정선군 정선읍 광하리 ~ 신동읍 덕천리

○ 규 모 : 탐방로 조성 전체 34km(정선군 25km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원(정선군 3,000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,000	1,300	800	0	3,900
국 비	3,000	650	400	0	1,950
시 도 비	600	130	80	0	390
시군구비	2,400	520	320	0	1,560
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

○ 타당성검토 및 실시설계 추진 : ‘16. 11월

○ 생태경관보전지역내 행위허가 완료 : ‘17. 12월

○ 귤암쉼터 조성사업 준공 : ‘18. 6월

○ 탐방로(나리소, 칠족령), 탐방센터(연포분교) 조성 발주 : ‘18. 12월

□ 향후계획

○ 나리소, 칠족령 탐방로 조성 완료 : ‘19. 11월

○ 연포분교 탐방센터(주차장, 야영데크) 조성 완료 : ‘19. 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

용탄천 생태하천 복원사업

담당자

환경과 고대석(☎560-2332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동강 본류와 합류되지 못하고 물길이 단절되어 하천생태계 훼손 심각

○ 물길 연결을 통한 하천생태계 복원 및 생태 관광자원 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년～2020년(4년)

○ 위 치 : 정선읍 회동리 가리왕산휴양림매표소～용탄리 한강 합류점

○ 규 모 : 생태하천 복원 1.7㎞, 생태하안조성 L=1㎞, 준설 60,000㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	19,000	3,000	4,000	2,000	10,000
국 비	9,500	1,000	2,000	1,000	5,500
시 도 비
시군구비	2,850	1,300	600	300	650
지 방 채
민간자본
기 타	6,650	700	1,400	700	3,850

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중 65%)

○용탄천 생태하천복원 계획 심의 완료(환경부) : ‘16. 4월

○한국환경공단 위·수탁 협약 체결 : ‘16. 4월

○용탄천 기본계획 및 실시설계 용역 : ‘17. 5월

□ 향후계획

○용탄천 실시설계 승인(환경부) : ‘19. 9월

○용탄천 생태하천 심의(강원도) : ‘19.10월

○용탄천 생태하천 복원사업 착공 및 준공 : `19. 11월 ～ ‘20. 12월

□ 사업변경 내역

○사업기간 변경 : 당초 ‘17년∼’19년에서 ‘17년～’20년으로 1년 연장

사업명

목재문화체험장 조성사업

담당자

산림과 배연표(☎560-2086)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목재 및 목재제품에 대한 종합적인 지식과 정보를 제공하고 직접 만들어

볼 수 있는 교육·체험공간으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년(3년간)

○ 위 치 : 정선읍 광하리 16번지 일원(모평문화공원)

○ 규 모 : 25,025㎡(부지면적), 1,089㎡(건축면적)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,500		300	2,250	2,950
국 비	1,800			1,800
시 도 비	2,672			135	2,537
시군구비	1,028		300	315	413

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계용역 : 2018.12.13. ~ 2019. 7.30.

○ 소규모환경영향평가용역 : 2019. 6.28. ~ 2019. 9.25.

○ 소규모재해영향평가용역 : 2019. 7. 5. ~ 2019.10. 2.

○ 실시설계용역 정지 : 2019. 7.12.(환경영향평가용역 등 의견 반영하여 추진)

□ 향후계획

○ 실시설계용역 완료 : 2019년 9월

○ 소규모 환경영향평가·재해영향평가 완료 : 2019년 10월

○ 공원구역변경 및 군 관리계획변경 : 2019년 11월

○ 공사 계약 및 착수 : 2019년 11월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 목재문화체험장 조성 및 운영 지침 일부 개정(2019.1.4.)에 따라 일부사업 변경

- 당초 숲속의 집(숙박시설) 및 산림욕장은 사업계획에서 제외하고,

- 당초 목재문화체험시설 및 목재놀이터 등 체험공간 확충으로 변경 추진

사업명

정선 화암동굴 개선사업

담당자

문화관광과 신석하(☎560-2362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화암동굴내 노후 시설물 개선을 통한 쾌적하고 안전한 관람환경을 구축,       첨단 전시기법을 활용한 새로운 전시물을 설치하여

○ 관광객 요구에 능동적 대처로 관광객 유입 증대 등 지역경기 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 정선군 화암면 화암리(화암동굴) 541번지 일원

○ 규 모 : 화암동굴 재 정비(전시물 교체 및 추가) L=1.8km, A=2,800㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원(국비 1,950, 도비 585, 군비 1,365)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,900	0	200	1,800	1,900
국 비	1,950	0	100	900	950
시 도 비	585	0	30	270	285
시군구비	1,365	0	70	630	665
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지방재정 투자심사 완료 : 2016. 3. 4.

○ 예비타당성 조사완료 : 2016. 6. 13.

○ 실시설계용역 완료 : 2018. 12. 3.

○ 계약심의 완료 : 2019. 8. 13.

□ 향후계획

○ 단계별 사업추진 : 2019. 9월 ~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경사항 없음

사업명

화암(그림바위권역) 창조적마을만들기 사업

담당자

문화관광과 이호연(☎560-2363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화암면 화암리 지역공동체 활성화를 통한 지속 가능한 정주여건 조성

○ 문화관광 자원개발로 지역주민 삶의 질 향상]

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2020년

○ 위 치 : 강원도 정선군 화암면 화암1리, 2리 일원

○ 규 모 : 기초생활기반확충사업(3개), 지역경관개선사업(4개),

지역역량강화사업(4개)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,380	807	1,114	429	1,030
국 비	2,366	565	780	300	721
시 도 비
시군구비	1,014	242	334	129	309
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  35%)

○ 설계 완료 및 시행계획 승인 : 2019. 5. 16.

○ 건축공사착공 : 2019. 6. 12.

○ 지역역량강화사업 진행중 : 2017 ~ 2020

□ 향후계획

○ 총 공사 준공 : 2020. 12.

사업명

정선역광장 조성사업

담당자

문화관광과 신석하(☎560-2362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정선아리랑 열차운행에 따라 정선역 주변에 관광객이 머물 수 있는 편의시설 조성과 주민편의를 위하여 정선역 광장을 정비하고 폐광지역 경제회생을 위해 새로운 관광시장을 확보하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년

○ 위 치 : 정선군 정선읍 애산리 415-20번지 일원

○ 규 모 : 식재(소나무외3종) 4,481주, 잔디 84㎡, 바닥분수교체 1식, 파고라 1개소, 평상 2개소, 아스콘절삭및덧씌우기 260㎡ 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 154백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	154	0	154	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	154	0	154	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계용역 : 2017. 12월

○ 기반시설 사업완료 : 2018. 9. 17.

사업명

아우라지 관광지 개발사업

담당자

문화관광과 신석하(☎560-2362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아우라지 관광지내 장기 미활용 녹지에 대한 관광지 개발을 통하여 관광객의      유입 증대로 지역경제 활성화 및 관광명승지로 발전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2021년

○ 위 치 : 정선군 여량면 여량리 243-1 일원

○ 규 모 : 테마형 캠핑시설, 진입도로(300m), 광장(3,470㎡),주차장(4,480㎡),            다목적운동장, 문화휴양공간, 향토복합전시체험관, 역사공원, 조경식재 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,000	1,400	1,000	0	4,600
국 비	2,800	0	500	0	2,300
시 도 비	840	0	150	0	690
시군구비	3,360	1,400	350	0	1,610
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 지방재정 투자심사완료(강원도) : 2018. 9. 3.

○ 기본 및 실시설계용역완료 : 2018. 12. 4.

○ 문화재 보존정비공사 완료 : 2019. 5. 21.

□ 향후계획

○ 단계별 관광지 조성사업 추진 : 2019 ~ 2020년

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 투자심사 사업비: 7,900백만원 ⇨ 총사업비: 7,000백만원(변경)

사업명

2018 평창 문화올림픽 사업

담당자

000과 홍길동(☎000-0000)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계문화유산 ‘아리랑’을 매개로 대한민국의 우수전통문화를 세계인에게       소개함으로써 대한민국의 문화적 자긍심 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 7월~ 2018년 4월

○ 위 치 : 정선군 일원

○ 규 모 : 2018 평창 동계 패럴림픽 ‘아리랑대축제(무극)공연’ 1식 외 프로               그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,000		1,000
국 비	500		500
시 도 비	150		150
시군구비	350		350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 행사개최 완료(2018년 3월)

○ ‘2018 정선의 밤’공연 및 아리랑 창극, 무극 공연

□ 향후계획

○ ‘대한민국 아리랑 대축제’ 핵심콘텐츠와 동계올림픽 개회식에서 불려진        ‘정선아리랑’ 문화 브랜드를 다양한 형태로 활용하여 남북교류 평화메세지       전달 및 올림픽 레거시 차원에서 문화사업 확대 계획

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

제6회 세계 대한민국 아리랑 축전

담당자

문화관광과 현명희

(☎033-560-2138)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유네스코 인류무형문화유산이며 국가중요무형문화재 제129호인 강원도       무형문화재 제1호 정선아리랑을 원형 보존 및 창조적 계승

○ ‘세계 대한민국 아리랑 축전’ 개최를 통하여 국내.외 관광객이 자유롭게

유입할 수 있는 관광자원으로 활용하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. 6. ~ 10. 9.(4일간)

○ 위 치 : 정선읍 아라리공원 일원

○ 규 모 : 유네스코 인류무형문화유산 교류공연 및 다수프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계
국 비	400	100	100	100	100
시 도 비	180	45	45	45	45
시군구비	420	105	105	105	105
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 12개 부문 51개 행사, 65개 종목의 프로그램 구성

○ 결산보고서 및 정산 완료

□ 향후계획

○ 제7회 세계 대한민국 아리랑 축전 개최 준비

○ 2019년 아리랑축전 프로그램별 추진상황 최종 점검

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

고한 작은영화관 건립

담당자

문화관광과 이광은(☎560-2549)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정선남부권 문화소외지역 주민들의 문화복지 욕구 충족 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 3. ~ 2019. 6.

○ 위 치 : 정선군 고한읍 고한10길 28-12

○ 규 모 : 부지면적 1,308㎡, 연면적 726㎡(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,811백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,811	31	2,014	1,766	-
국 비	500	16	403	81	-
시 도 비	150	4	90	56	-
시군구비	3,161	11	1,521	1,629	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 3. 공사 착공

○ 2019. 3. 고한시네마 관리위탁 계약 체결

○ 2019. 4. 공사 준공

○ 2019. 6. 고한시네마 개관

□ 향후계획

○ 고한시네마 운영 관리 및 감독

사업명

고한 생활체육공원 비탈면 옹벽보강공사

담당자

문화관광과김제일(☎560-2547)

□ 사업목적 및 필요성

○ 비탈면 보강, 시설물 개보수 등을 통하여 시설이용자 및 지역주민의

안전을 확보하고 쾌적한 시설환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5.16. ~ 2018. 5.18.

○ 위 치 : 강원도 정선군 고한읍 고한리(고한생활체육공원)

○ 규 모 : 옹벽보강 1식, 운동장 시설정비 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500		2,500
국 비	1,250		1,250
시 도 비	1,250
시군구비			1,250
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계 완료(2016.12.16.)

○ 강원도 계약심사 완료(2017. 3.22.)

○ 공사기간(2017. 5.16. ~ 2017.12.20.)

○ 2차분 설계용역 준공(2018. 2.23.)

○ 공사기간(2018. 4. 6. ~ 2018. 5.18.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 1차변경

- 사업비(증49,163천원)

․당초 : 도급액(865,741천원), 관급액(1,262,295천원)

․변경 : 도급액(936,037천원), 관급액(1,241,162천원)

- 변경사항

․ 무근 콘크리트에서 철근콘크리트 타설 변경(강관비계 추가)

․ 계단식옹벽 PVC슬라부 누락(추가)

․ 가도설치

․ 영구앵커공 변경(50ton →100ton)

․ 옹벽보강(코어드릴 천공 누락 추가)

○ 2차변경

- 사업비(증27,657천원)

․당초 : 도급액(936,037천원), 관급액(1,241,162천원)

․변경 : 도급액(1,001,500천원), 관급액(1,203,356천원)

- 변경사항

․ 계단식옹벽 물량감소

․ 케미컬앵커설치를 위한 천공공정 추가

․ 영구앵커공 일부 삭제(sat no 180~200 구간)

․ 포장공 기존포장 절삭후 재포장

․ 공사기간 연장(15일 연장)

사업명

제72회 전국육상경기선수권대회

겸 3개 대회

담당자

문화관광과 전영걸(☎2950)

□ 사업목적 및 필요성

○ 엘리트체육의 경기력 향상 평가

○ 지역경기 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.06.26.~06.29(4일간)

○ 위 치 : 정선군 종합경기장

○ 규 모 : 참가인원 2,300명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 198백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	396		198	198
국 비
시 도 비
시군구비	396		198	198
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제72회 전국육상경기선수권대회 개최

- 대회개최 2018.06.26.~06.29

□ 향후계획

○ 전문체육인 육성 및 지역경제 활성화

○ 지속적인 대회개최 추진

사업명

제12회 세계청소년 태권도

선수권 최종선발대회

담당자

문화관광과 전영걸(☎2950)

□ 사업목적 및 필요성

○ 엘리트체육의 경기력 향상 평가

○ 지역경기 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.01.15.~01.19

○ 위 치 : 정선군종합체육관

○ 규 모 : 참가인원 850명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 125백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	125		125
국 비
시 도 비
시군구비	125		125
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제12회 세계청소년 태권도선수권 최종선발전대회 개최

○ 대회개최 : 2018.01.15.~01.19

사업명

2018 아리랑 힐 페스타대회

담당자

문화관광과 전영걸(☎2950)

□ 사업목적 및 필요성

○ 익스트림 롱보드대회 개최

○ 지역경기 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.05.04.~05.06

○ 위 치 : 정선군 화암면 북동리 109

○ 규 모 : 참가인원 480명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	100		100
국 비
시 도 비
시군구비	100		100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018 아리랑 힐페스타 대회

○ 대회개최 2018.05.04.~05.06

사업명

정선군 전통김치 6차산업화 지원사업

담당자

경제과 임영삼(☎560-2352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역농산물 활용한 공장설립과 체험관 운영으로 6차산업 모델 구현

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘16. ~ ’18.

○ 위 치 : 신동읍 예미농공단지 일원

○ 규 모 : 부지면적 15,329.7㎡ / 건물 3동 6,917.24㎡(공장, 체험관, 저온창고)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,400	4,400	3,000
국 비	2,000	300	1,700
시 도 비
시군구비	5,400	4,100	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017.  9월 : 시설공사 착공

○ 2018.  9월 : 공사준공(건축물 사용승인)

○ 2018. 12월 : 사업 완료 및 정산

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증액(6,100백만원 → 7,400백만원, 증 1,300백만원)

- 실시설계완료에 따른 건축공사비 증액

사업명

활기찬 농촌프로젝트 시범사업

담당자

경제과 임영삼(☎560-2352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 예미농공단지 중심의 기업유치와 정주여건 개선을 통한 농촌주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘16. ~ ’18.

○ 위 치 : 신동읍 예미농공단지 및 조동리 151-21번지 일원

○ 규 모 : 건물 3동 4,286.03㎡(근로자기숙사, 근로자복지관, 공동물류창고),

통근버스 1대, 정자 2개소, 주민역량강화교육 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,700	4,924	3,776
국 비	5,600	3,447	2,153
시 도 비
시군구비	3,100	1,477	1,623
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017.  7월 : 시설공사 착공

○ 2018.  6월 : 공동물류창고(저온창고) 준공

○ 2018.  9월 : 근로자기숙사 준공

○ 2018. 12월 : 사업완료 및 정산

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증액(8,000백만원 → 8,700백만원, 증 700백만원)

- 실시설계완료에 따른 건축공사비 증액

사업명

야생화마을 추리극장

담당자

경제과 최연규(☎560-2006)

□ 사업목적 및 필요성

○ “전 세계 어디에도 없는 정통 추리체험마을”을 조성하여 마을을 찾은 고객(수학여행단, 진료체험 학생 등)에게 신선한 충격과 줄거움을 주는 한편, 폐광지역의 모범적인 대체산업으로 성장하여 지역경기 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘17. ~ ’19

○ 위 치 : 정선군 고한읍 일원

○ 내 용 : 추진단 구성, 추리체험시설 구축, 추리골목 디자인, 추리본부 신축

추리체험 프로그램 개발 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,908백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,908	793	882	3,233
국 비
시 도 비	2,995	135	825	1,995
시군구비	1,953	658	57	1,238
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2017. 12월 : 추리본부 신축에 따른 부지매입

○ 2018.  6월 : 체험시설 및 추리본부 신축 실시설계 용역

○ 2018. 12월 : 체험시설(고한행 추리열차, 고한읍 행정복지센터) 착공

□ 향후계획

○ 2019.  6월 : 체험프로그램 개발 용역

○ 2019. 12월 : 체험프로그램 구축

사업명

강원도 개발공사 보유 강원랜드 주식매입

담당자

경제과 최광식(☎560-2432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강원랜드 경영 의사결정 참여 확대 및 강원도와 상생발전 전략 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘17. ~ ’18.

○ 위 치 : 해당없음

○ 규 모 : 주식매입 총 60억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,000	4,000	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	4,000	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 12월 : 주식매입(114,595주)

○ 2018.  9월 : 주식매입( 71,549주)

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

사북시장 청년몰 조성사업

담당자

경제과 이기영(☎560-2440)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사북시장 내 유휴공간을 활용하여 청년몰을 조성하고 창의적인 아이디어와

콘텐츠를 갖춘 청년 상인을 육성하여 사북 시장 활력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘18. ~ ’19.

○ 위 치 : 사북리 366-60 외 5필지

○ 규 모 : 청년몰 조성(20개소), 청년상인 발굴 및 육성(20명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,000		1,500	1,500
국 비	750		750
시 도 비	180		180
시군구비	1,920		420	1,500
지 방 채
민간자본	150		150
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018. 10월 : 사북시장 청년몰 신축계획 방침결정

○ 2018. 11월 : 청년몰 조성사업 사업계획 승인

□ 향후계획

○ 2019.  1월 : 사북시장 청년몰 공간조성 디자인 기본설계 및 실시설계용역

○ 2019.  9월 : 공사 착공

○ 2019. 12월 : 공사 준공

사업명

우주입자연구센터 건립 지원

담당자

경제과 임영삼(☎560-2352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신동읍 일원에 기초과학연구원 우주입자연구센터 건립으로 기초과학

연구이미지 구축 및 각종 세미나 개최를 통한 기초과학발전과 인력양성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘18. ~ ’19.

○ 위 치 : 신동읍 조동리 263-11번지 일원, 구 함백중고 부지 및 건물

○ 규 모 : 17,493㎡(3필지)/구 함백중고 부지 중 도 교육청 소유부지매입

지상연구실(2,531.25㎡)/구 함백중고 본관동 건물 리모델링

(기초과학연구원에서 매입, 정선군에서 내진설계 및 시공)

지하실험실(2,000㎡), 인승용승강기(지하심도 1,100m)/한덕철광(주)부지

(기초과학연구원에서 직접 추진)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,200		19	2,181
국 비
시 도 비
시군구비	2,200		19	2,181
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018.  9월 : 구 함백중고 본관동 내진성능평가 용역 준공

□ 향후계획

○ 2019.  3월 : 구 함백중고 부지 및 건물매입

○ 2019.  4월 : 구 함백중고 본관동 내진시공 및 리모델링 착수

사업명

임계 다목적 복합공간 조성

담당자

경제과 최광식(☎560-2432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 임계면 지역경제 활성화를 위해 주민생활을 뒷받침하기 위한 행정보조기능

및 주민생산활동 지원 보조기능을 수반한 최소한의 편익시설을 갖춘 다목적

복합공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘17. ~ ’19.

○ 위 치 : 임계면 봉산리 234번지 외 4필지(21,774㎡)

○ 규 모 : 다목적 복합공간 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,997백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,997		1,269	1,728
국 비
시 도 비
시군구비	2,997		1,269	1,728
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018.  12월 : 부지 보상 완료

□ 향후계획

○ 2019.  4월 : 다목적 복합공간(복토) 조성공사 착공

사업명

올림픽 경관도로 개설사업

담당자

도시과 유수근(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 올림픽 개최 도시로서의 주민 정주여건 개선 및 교통 불편 해소를 위해 군계획시설의 개설 및 정비 필요.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년~2017년

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 북실리 718-19(조양강변) 일원

○ 규 모 : 도로확포장(B=8.0m) L=513m, 캔틸레버 확장인도교(B=2.0m) L=498m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	2,000	2,000
국 비
시 도 비
폐기금	2,000	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계 : 2016. 10. 27.

○ 사업발주 및 착공 : 2017. 05. 30.

○ 공사 준공 : 2017. 12. 14.

사업명

고한행복주택 건립사업

담당자

도시과 신상진(☎560-2472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐광지역내 청년, 신혼부부 및 주거취약계층의 주거완정과 서민 임대         아파트 건립을 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 고한읍 고한리 63-57번지 일원

○ 규 모 : 150세대(36㎡ 30세대, 45㎡ 120세대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	20,500	6,814	7,691	5,995	-
국 비	4,469	2,011	1,117	1,341	-
시 도 비	3,277	983	1,311	983	-
시군구비	12,754	3,820	5,263	3,671	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  55%)

○ 공모확정(국토부)             : 2016. 3. 2.

○ 주택건설사업계획승인(강원도) : 2016. 12. 16.

○ 공사착공                    : 2017. 5. 31.

□ 향후계획

○ 입주자 모집                 : 2019. 3.

○ 공사 준공                   : 2019. 8.

□ 사업변경 내역

○ 총사업시 증가 : 실시설계에 따른 사업량 증가

구분	계	국비	도비	군비	기금
당초	18,300	4,469	3,277	4,596	5,958
변경	20,500	4,469	3,277	12,754	-

사업명

고한읍 소1-21호(고토일) 도로확포장

담당자

도시과 유수근(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소한 군계획시설 확장을 통한 보행자 교통사고 예방 및 원할한 교통 소통으로 주민불편 해소 및 정주여건 개선.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년~2018년

○ 위 치 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 151-25번지 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 L=757m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 백3,697만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	3,697	1,897	1,800
국 비
시 도 비
폐기금	3,697	1,897	1,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계, 보상, 지장물철거 : 2016. 12. 31.

○ 잔여지 보상 : 2017. 12. 31.

○ 공사 착공 : 2018. 05. 25.

□ 향후계획

○ 공사 준공 및 개통 : 2019. 09. 30.

사업명

정선 군립병원 기능보강 사업

담당자

보건소 김철기(☎560-2060)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안정적인 의료환경 구축을 통하여 지역주민 건강증진에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2021

○ 위 치 : 강원도 정선군 사북읍 지정천로 727

○ 규 모 : 병원신축 및 기능보강, 장비보강, 부설주차장 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,924백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	32,924	8,353	11,321	2,950	10,300
국 비	2,000	1,419	581
시 도 비	30,600	6,610	10,740	2,950	10,300
시군구비	0
지 방 채	0
민간자본
기 타	324	324

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 69%)

○ 군립병원 리모델링 및 장례식장 증축공사 : ‘17. 6. 28. ~ ‘18. 12. 20.(준공)

○ 군립병원 부설주차장 신축공사 : ‘18. 5. 15. ~ ‘19. 9. 10.(예정)

□ 향후계획

○ 부설주차장 신축공사 준공 예정 : ‘19. 9. 10.

○ 병원 부지정비 및 기숙사 신축 : 2019년 ~ 2020년

○ ‘19년도 제3차 지방재정 투자사업 심사의뢰 (군립병원 신축) : ‘19. 8.

○ 정선군립병원 운영을 위한 정선의료재단 설립 : ‘19. 11.

○ 군립병원 신축 : 2020년 ~ 2021년

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비		비 고
	당 초	변 경
계	23,000	32,924
군립병원 기능보강	23,000	29,224	- 리모델링 공사 타절 준공:‘19.12.20. 군립병원 신축 예정 : 2020년~2021년
부설주차장 신축	-	3,700	- 부설주차장 설계변경 (외관디자인 개선 및 현장 여건 반영)