109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 정선군에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
도로기반 지하 시설물 전산화 확산사업(1단계)	2,400	0	200	500	1,700	2025	2021	20
고한 복합문화 센터 건립	14,207	351	1,822	12,034	0	2022	2021	60
아리아리 이음 플랫폼 조성	11,265	2,540	2,540	6,115	70	2023	2019	20
정선군가족센터건립	8,500	3,166	1,918	3,416	0	2023	2019	20
공립치매전담형요양시설 신축	7,428	159	182	7,087	0	2022	2019	35
장사시설 설치사업	2,377	0	0	0	2,377	2023	2021	5
사북읍 탄광문화의 거리 조성사업	3,000	779	509	800	912	2023	2019	70
사북 풍요로운 빛의 도시	2,300	0	1,000	1,300	0	2022	2020	5
야생화마을 광차 체험코스 조성사업	18,100	0	1,500	3,000	13,600	2024	2021	15
사북 별빛광장 조성사업	17,000	0	800	2,500	13,700	2024	2021	15
야생화마을 골목길 정원박람회	1,500	480	220	200	600	계속	2021	100
정선아리랑마을 조성사업	12,000	0	200	720	11,080	2024	2020	10
정선문화원 증축	3,000	0	10	1,870	1,120	2023	2020	30
수마노탑 국보 문화유산 보존 및 관광 자원화사업	100	0	100	0	0	2021	2021	100
칠현사 이전 건립사업	684	0	221	463	0	2023	2021	30
정선 문화예술 회관 리모델링	4871	,2,585	2,286	0	0	2021	2018	100
정선아리랑 강원도 무형문화재 제1호 지정 50주년 기념행사	100	0	100	0	0	2021	2021	100
지역문화국제교류 지원 사업	120	0	120	0	0	2021	2021	100
정선아리랑제 행사	1,220	1,557	177	1,268	1,280	계속	2021	70
아리랑의 세계화 2022 정선아리랑	100	0	0	100	0	2022	2021	20
제76회 전국육상 경기선수권 대회	198	198	198	198	200	계속	2021	100%
회장배 제20회 전국중고육상경기선수권 대회	198	198	51	198	200	계속	2021	25%
정선군민의 날 기념 군민체육대회	125	125	0	125	130	계속	2021	0%
올림픽유산 명소화 사업	4,110	0	2,520	1,590	0	2024	2021	40
정선군 생활폐기물 매립시설 설치사업	10,916	20	20	647	10,249	2024	2020	5
정선군 생활폐기물 소각시설 설치사업	18,324	0	0	1,000	17,324	2024	2020	5
정선군 목재문화 체험장 조성	6,188	1,481	4,707	0	0	2021	2017	100
고한읍 고한8리·20리 주차타워 조성사업	5,500	167	701	4,632	0	2022	2019	30
고한읍 고한12리 주차타워 조성사업	7,200	0	0	1,400	5,800	2023	2021	5
군도7호(사북~직전) 도로개설공사	18,000	12,128	2,777	3,095	0	2022	2017	95%
군도6호(가수리) 상습침수도로개선	4,600	1,807	1,173	1,620	0	2022	2018	80%
임계면 다목적 복합 광장 인도교 설치	3,000	2,129	871	0	0	2021	2019	100%
정선읍 신도로망 구축사업	49,500	1,260	3,446	7,000	37,794	2026	2019	5%
사북 도시재생 뉴딜사업	11,290	7,769	2,797	724	0	2022	2018	90
고한 고토일 군계획시설 개설	3,500	50	0	50	3,400	2024	2020	0
고한 상갈래 군계획시설 개설	3,500	1,000	1,158	1,342	0	2022	2020	50
군도7호(사북~직전) 접속도로 개설	4,900	0	1,654	3,246	0	2022	2020	50
남면 철도연립 매입	4,200	0	0	4,200	0	2023	2021	30
정선군립병원 병동신축사업	14,000	0	336	8,064	5,600	2023	2020	3

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도로기반 지하시설물 전산화 확산사업(1단계)

담당자

민원과 정의진(☎ 560-2183)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018년 이전 설치된 도로 및 지하시설물(상·하수도)에 대하여 측량, 조·탐사를 통해 정확한 위치 및 속성정보(설치일자, 관경, 관재질 등)를 전산화하여 효율적인 시설물 관리 및 각종 안전사고를 사전에 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 9. ~ 2025. 12. (5차년 사업)

○ 위 치 : 신동읍, 화암면, 남면 일원

○ 규 모 : 도로 및 상·하수 시설물 314.5km DB구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,400		200	500	1,700
국 비
시 도 비
시군구비	2,400		200	500	1,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 1차사업(2021년) 완료 / 화암면 시가지 일원

○ 2차사업(2022년) 진행 중

- 남면 시가지 및 화암면 잔여지역 / 도로 및 상·하수 시설물 62.4km DB구축

- 현재 시설물 측량, 조·탐사 완료 후 DB작업 진행 중

□ 향후계획

○ 3차(2023년)사업 추진(남면 잔여지역)

○ 2025년 이후 북부권(여량·북평·임계면) 확산사업 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초(투자심사) : 사업비 2,529백만원 / 3차년사업

○ 변경 : 사업비 2,400백만원 / 5차년사업

사업명

고한 복합문화센터 건립

담당자

여성청소년과 장은영(☎560-2943)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 문화 활동 진흥과 주차난 해소를 위해 생활문화센터, 주차장을 포함한 복합문화센터를 건립하고, 시가지와 주거단지 사이의 주민 이동 편의성을 향상시키기 위해 보행교를 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2022년(‘20.설계 / ’21~22.시공)

○ 위 치 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 274-13

○ 규 모 : 신축 1동(지상 7층) / A=4,840.11㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,207백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,207	351	1,822	12,034	-
국 비	2,323	96	477	1,750
시 도 비	284	0	61	223
시군구비	10,600	255	604	9,741
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	1,000	0	680	320

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 기본 및 실시설계용역 실시         : ‘20. 05.~’20. 12.

○ 2021년 제1차 강원도 투자심사 실시 : ‘21. 02.

○ 신축공사 착공                     : ’21. 08.

□ 향후계획

○ 신축공사 준공 : ‘22. 11.

○ 센터 개관     : ’23. 01.

□ 사업변경 내역

구 분	당초(2019년)	변경(2021년)	비고
사업규모	A=3,300㎡(지상6층)	A=4,840.11㎡(지상7층)

사업명

정선군 가족센터 건립

담당자

여성청소년과 이소연(☎560-2316)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 중심의 보편적 가족서비스 제공에 대해 주민들의 욕구를 충족시키고,       주변 주거지 밀집으로 인한 골목길 불법주차 등 심각한 주차문제 해결

□ 사업개요

○ 기 간 :  2021. 12. ~ 2023. 6.

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 봉양리 54-7

○ 규 모 : A=1,800㎡(지상2층), 주거지주차장 2,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,500	500	2,666	1,918	3,416
국 비	2,700	0	900	713	1,087
시 도 비	990	0	329.8	236.5	423.7
시군구비	4,810	500	1,436.2	968.5	1,905.3
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본계획 수립: 2019. 7.

○ 대행사업 협약체결(강원도개발공사): 2020. 3.

○ 설계 경제성 검토(VE)완료: 2021. 3.

○ 부지정리(기존건물철거) 및 본공사 착공: 2021. 12. ~ 2022. 3.

□ 향후계획

○ 정선군가족센터 건립공사 추진 : 2021. 12. ~ 2023. 6.

□ 사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2020~2022	2020~2023

사업명

아리아리 이음 플랫폼 조성

담당자

여성청소년과 전봄이(☎560-2186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 관내 운영 중인 도서관이(공립 1개소, 교육도서관 1개소) 건립된 지 20년이 경과되어 시설 노후와 협소한 공간구조로 이용자들의 정보욕구 및 도서관 이용 수요 증가로 도서관 시설 확충이 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3년)

○ 위 치 : 정선군 정선읍 봉양리 54-7

○ 규 모 : 복합건물 1동(A=2,900㎡) - 지하1층, 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,279 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,265	-	2,540	2,540	6,185
국 비	3,856	-	1,270	1,270	1,316
시 도 비	1,150.5	-	0	762	388.5
시군구비	6,258.5	-	1,270	508	4,480.5
지 방 채			0	0
민간자본			0	0
기 타			0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 기본계획 수립: 2019. 7.

○ 대행사업 협약체결(강원도개발공사): 2020. 3.

○ 설계 경제성 검토(VE)완료: 2021. 3.

○ 부지정리(기존건물철거) 및 본공사 착공: 2021. 12. ~ 2022. 3.

□ 향후계획

○ 군립도서관 건립공사 추진 : 2021. 12. ~ 2023. 6.

○ 군립도서관 운영 관련 세부사항 검토 : 2022년 중

- 운영방법 : 직영 또는 민간위탁 등

- 개관 시 필요도서 및 집기류 ‧ 인테리어비용 등 추가 발생 비용 내역 추계

□ 사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2020~2022	2020~2023

사업명

공립 치매전담형 요양시설 신축

담당자

복지과 이명아(☎560-2975)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급속한 고령화로 인한 치매인구 증가로 치매관리 전담시설 확충 필요

○ 부양가족의 부담을 경감하고 국가가 함께하는 돌봄 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. 11. ~ 2022. 12. 31.

○ 위 치 : 정선군 정선읍 신월리 896-4 외 5필지

○ 규 모 : 요양시설 신축 1동 (정원 57명, 연면적 1,882㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,428백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,428	159	182	7,087
국 비	2,710	159	182	2,369
시 도 비	677			677
시군구비	4,041			4,041
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 공사착공 : 21. 11월 (현재 철근콘크리트 공사 추진 중)

□ 향후계획

○ 운영위탁법인 선정             : ′22. 11월

○ 요양시설 운영집기 및 비품구입 : ′22. 12월

○ 종사인력확보, 요양원 개원      : ′23년 상반기

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	비 고
사업규모	연면적1,682㎡	연면적1,882㎡	1,2인실 요양실 증설
총사업비	58억원	75억원
사업기간	2020~2021	2020~2022

사업명

장사시설 신축

담당자

복지과 이명아(☎560-2975)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화장장과 봉안시설의 이원화 운영으로 주민 불편 발생

○ 분산된 장사시설의 효율적 관리 운영을 위하여 장사시설 일원화 운영 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2023 (2년)

○ 위 치 : 여량면 남곡리(정선하늘공원 부지 내)

○ 규 모 : 화장시설 신축 1동 (화장로 2기)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,377백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					2,377
국 비	2,377				1,664
시 도 비	1,664				143
시군구비	143				570
지 방 채	570
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 화장시설 이전 신축 타당성 조사 완료 : ′21. 2월

○ 자연장지 조성사업 국비 신청         : ′22. 3월

□ 향후계획

○ 공공건축 심의위원회 심의, 주민설명회 개최 : ′22. 8월

○ 기본 및 실시설계 용역                     : ′22. 8월

○ 공사착공                                  : ′23년 상반기

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

사북읍 탄광문화의 거리 조성사업

담당자

사북읍 전승범(☎560-2722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사북지역의 도시재생사업, 빛의 거리 조성사업과 연계하여 탄광문화를 기반으로 하는 명소화된 문화거리 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1월 ~ 2023. 12월 (4년)

○ 위 치 : 정선군 사북읍 일원

○ 규 모 : 6개 사업

- 파랑새 마을길 조성사업 / 범바위 청소년 문화거리 조성 사업

- 사북고등학교 앞 공지 개선 사업 / 파랑새 문화휴식 복합정원 조성 사업

- 소금강로 가로경관 개선 사업 / 사북 지하보도 현대화 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	779	509	800	912
국 비
시 도 비	2,100	545	356	560	638
시군구비	900	234	153	240	274
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 범바위 청소년 문화거리 및 사북고등학교 앞 공지 개선사업 : ‘22. 6월 ~ 11월

□ 향후계획

○ 파랑새 문화휴식 복합정원 조성, 소금강로 가로경관 개선, 사북 지하보도 현대화사업 : ’22년(실시설계용역) ~ ‘23년(착·준공)

사업명

사북 풍요로운 빛의 도시

담당자

전략산업과 김제일(☎560-2006)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유‧무형의 “빛”을 활용하여 시가지를 관광자원화 함으로서 관광객 유인을 통한 지역경제를 활성화하고 650거리 및 지장천변을 중심으로 기존 지역자원에 예술이 있는 빛을 더하여 새로운 관광자원으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1월 ~ 2022. 12월 (2년)

○ 위 치 : 정선군 사북읍 사북리(사북1교 ~ 사음1교)

○ 규 모 : 경관데크로드 L=300m, 특화조명 설치 1식, 인공폭포 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,300	0	1,000	1,300
국 비
시 도 비	1,610	0	700	910
시군구비	690	0	300	390
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계용역 착수                             : ‘21. 2월 ~

○ 지방하천(지장천)수리수문 분석용역 착수 및 준공 : ‘21. 7월 ~ 9월

○ 실시설계용역 준공                              : ‘22. 6월

○ 지장천 경관 데크로드 조성사업 착공             : ‘22. 7월 ~

□ 향후계획

○ 지장천 경관데크로드 조성사업 준공 : ’22. 12월

○ 시설 운영                         : ’23. 1월 ~

사업명

야생화마을 광차체험코스 조성사업

담당자

전략산업과 김제일(☎560-2006)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 관광자원(삼탄아트마인, 폐운탄길)과 연계한 폐광지역만의 차별화된 관광상품 개발로 강원랜드 방문객을 고한읍 시가지로 유입시켜 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1월 ~ 2024. 12월 (4년)

○ 위 치 : 정선군 고한리 일원(고한역 ~ 삼탄아트마인)

○ 규 모 : 광차체험코스(L=3.6km, A=36,000㎡) 및 부대시설 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,100	0	1,500	3,000	13,600
국 비
시 도 비	12,670	0	1,050	2,100	9,520
시군구비	5,430	0	450	900	4,080
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 부지사용협의 : 한국철도공사(′21. 1월), 한국광해광업공단(′21. 3월)

○ 편입부지 정밀안전진단용역        : ′21.  6월

○ 투자심사(강원도) 완료             : ′21.  5월

○ 대행사업 협약체결(강원도개발공사) : ′21. 12월

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역             : ′22. 1월 ~ ′23.  5월

○ 사업착공 및 준공                 : ′23. 6월 ~ ′24. 12월

○ 시설 관리운영(사업자 선정)       : ′25. 1월 ~

사업명

사북 별빛광장 조성사업

담당자

전략산업과 김제일(☎560-2006)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사북역 일원을 특색있는 별빛광장(주차장, 공원 등)으로 조성하여 차별화된 도시경관을 연출함으로써 강원랜드 방문객의 시가지 유도

○ 사북 별빛공원, 문화의 거리 등 지역 경관개선 추진과 연계한 새로운 도시 랜드마크 형성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1월 ~ 2024. 12월 (4년)

○ 위 치 : 정선군 사북리 산150-15(사북역 인근) 일원

○ 규 모 : 별빛 광장조성 1식(A=7,000㎡)

- 주차장 : A=2,534㎡(지하1층/지상2층, 154면)

- 공원(별빛광장) : A=1,878㎡(조경, 경관조명, 조형물 등)

- 부대공사 : 회전교차로 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	17,000	0	800	2,500	13,700
국 비
시 도 비	11,900	0	560	1,750	9,590
시군구비	5,100	0	240	750	4,110
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 사업대상지 사용협의            : ′21. 1월

- 한국철도공사(사북역사 이전협의), 국가철도공단(철도부지 사용협의)

○ 투자심사 등 사전 행정절차 이행 : ′21. 3월 ~ 5월

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역      : ′21. 11월 ~ ′22.  9월

○ 사업착공 및 준공          : ′22.  9월 ~ ′24. 12월

○ 시설 관리운영(사업자 선정) : ′25.  1월 ~

사업명

야생화마을 골목길 정원박람회

담당자

전략산업과 정의성(☎560-2350)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 대표 축제인『함백산 야생화 축제』와 연계하여 고한의 문화자원과 시장 자원을 적극적으로 발굴·활용하고 문화콘텐츠 산업 분야의 새로운 분야를 개척하여 정선관광의 매력을 다원화하여 지역민의 자긍심 고취와 관광객의 재방문을 유도하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 4월 ~ 9월 (6개월)

○ 위 치 : 정선군 고한읍 일원

○ 규 모 : 골목길 정원 박람회 개최 1식

- 골목형 정원조성(화단형, 수직형, 행거형 등) 1식

- 오프닝 이벤트, 정원 버스킹, 인비테이션 가든 페스티벌 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,500	480	220	200	600
국 비
시 도 비	1,050	336	154	140	420
시군구비	450	144	66	60	180
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019년부터 매년 야생화마을 골목길 정원박람회 개최중

□ 향후계획

○ ‘22년도 골목길 정원박람회 평가보고서 작성 및 평가보고회 : ’22. 10월중

○ ‘23년도 골목길 정원박람회 기획 구상 및 사업계획서 제출  : ’22. 3월중

사업명

정선 아리랑 마을 조성 사업

담당자

문화관광과 장선웅(☎560-2569)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정선군 대표 콘텐츠인 5일장과 아리랑을 테마로 레트로한 마을여행 콘텐츠 조성을 통한 지역관광 활성화.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 봉양리 일원

○ 규 모

- 핵심 사업 (아리랑마을 구성, 투어코스 및 브랜드 개발 및 마케팅)

- 관리운영 사업 (DMO 구축 및 관광 비즈니스 육성)

- 인프라 개선 사업(레트로 간판 정비 및 야간 골목길 조명 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,000	200	720	3,300	7,780
국 비	6,000	100	360	1,650	3,890
시 도 비	1,800	30	108	495	1,167
시군구비	4,200	70	252	1,155	2,723
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 문체부 계획공모형 지역관광 개발사업 공모 선정 및 컨설팅 : ‘20. 3월 ~ 9월

○ 정선 아리랑마을 조성사업 기본계획 수립        : ’20. 10월 ~ 21. 12월

□ 향후계획

○ 골목길 루트화 및 관광앵커시설 조성            : ‘22. 1월 ~ 12월

○ 핵심·관리운영·인프라개선 연차별 사업 추진     : ’23년 ~ ‘24년

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 문체부 공모 사업 예산 변경

- 당초 : 19,800백만원 → 12,000백만원 (감 7,800백만원)

사업명

정선문화원 증축

담당자

문화관광과 남창순(☎560-2549)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘83년 설립된 문화원은 현재 회원수 530여 명에 연평균 11개의 프로그램을       운영중에 있으나, 운영공간이 매우 협소한 실정

○ 이에, 노후화된 지방문화원 이전 신축으로 지역문화 창달과 문화예술 활       성화를 도모하고자 증축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2023

○ 위 치 : 정선읍 봉양리 318-3 외 1필지

○ 규 모 : 정선문화원 증축 1동(지상 3층, 연면적 : 786.29㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000		10	1,870	1,120
국 비
시 도 비	1,200		4	748	448
시군구비	1,800		6	1,122	672
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 지방재정투자심사 완료                           : ‘20. 8월

○ 증축부지 최종확보                               : ‘21. 8월

○ 공공건축심의위원회 개최(원안 의결)               : ‘21. 8월

○ 기본 및 실시설계                                : ‘21. 8월∼ ‘22. 4월

○ 강원도 계약심사 의뢰                            : ‘22. 5월

○ 착공                                            : ‘22. 7월

□ 향후계획

○ 준공                                            : ‘23. 5월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업위치 및 사업규모 변경

구 분	당 초	변 경 후	사업기간	비고
사업규모	900㎡	786.29㎡	2021∼2022
사업위치	봉양리261외1필지	봉양리 318-3 외 1필지	2021∼2023

사업명

수마노탑 국보 문화유산 보존 및 관광자원화 사업

담당자

문화관광과 김주희(☎560-2564)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정암사 수마노탑 국보 승격을 기념하여 함백산 정암사의 역사적‧문화적 가치제고

○ 정암사 일대를 휴식과 명상을 통한 ‘고원 문화 휴양지’의 중심으로 관광자원화 하는 발판을 마련함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 10. ~ 12.

○ 위 치 : 정선군 고한읍 고한리 정암사 일원

○ 규 모 : 트래킹 대회 1회, 포에라마 공연 1회, 뮤직웹드라마 제작 2편

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	100		95
국 비
시 도 비	35		33
시군구비	65		62
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업추진 계획 수립  : 2021. 9.

○ 보조금 교부 : 2021. 9. 28

○ 정암사 자장율사 트래킹 대회 개최 : 2021. 10. 8. ~ 10. 17.

○ 포에라마 공연(수마노탑에 이는 바람) : 2021. 11. 4.

○ 뮤직웹드라마 제작 및 홍보 : 2021. 10. ~ 12.

○ 보조금 정산 완료 : 2022. 2.

□ 향후계획

○ 해당없음(도비보조 시 추진)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

칠현사 이전 건립 사업

담당자

문화관광과 김영원(☎560-2562)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강원도 무형문화재 제1호인 정선아리랑의 근원설화에 등장하는 칠현의        애국충절을 기리기 위한 사당이 있는 곳으로 그동안 칠현의 얼을 기리는       역사공원을 조성하여 관리해 왔으나 정선아리랑제 칠현제례 행사 시

부지 협소 및 국지도 59호선 확포장 사업에 부지가 일부 편입됨에 따라       이전건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 4월 ~ 2023년 12월

○ 위 치 : 강원도 정선군 남면 낙동리 103번지 일원

○ 규 모 : 토목공사 1식, 건축공사 1식, 전기공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 684백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	684	-	221	463	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	684	-	221	463	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 부지매입 및 지장물 철거           : ‘19. 5월 ~ ’21. 11월

○ 기본 및 실시설계                  : ‘20. 4월 ~ ’21. 12월

○ 토목공사 추진 계획 수립           : ‘22. 2월

○ 토목공사 착공                     : ’22. 4월 ~

□ 향후계획

○ 토목 공사 준공

○ 건축공사비 23년도 본예산 반영 및 착공 예정

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	1,300,091,000	1,306,244,000	증 6,153,000
도 급 액	917,531,000	933,830,000	증 16,299,000
관 급 액	382,560,000	372,414,000	감 10,146,000

사업명

정선 문화예술회관 리모델링

담당자

문화관광과 김영원(☎560-2562)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1993년 준공이후 3층 공연장은 필요시 마다 공연장비를 확충하여 운영        중 이나 노후로 인하여 전면 교체 요구

○ 2016년 시설물 정밀안전 진단 결과“C”등급으로 건물의 안전성 확보 및

품격있는 소공연장 기능 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 19년 8월 ~ 2021년 12월

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 봉양3길 17

○ 규 모 : 건축공사 1식, 전기공사 1식, 기계공사 1식, 무대기계장치 설치 1식, 무대 조명 장치 설치 1식, 무대음향 및 영상 장치 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,871백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,871	2,585	2,286	-	-
국 비	999	999	-	-	-
시 도 비	973	45	928	-	-
시군구비	2,899	1,541	1,358	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계                          : ‘19. 8월

○ 리모델링 공사(건축, 기계, 전기 등) 착공     : ‘21. 1월

○ 리모델링 공사 준공                        : ’21. 12월

□ 향후계획

○ 해당 사항 없음

□ 사업변경 내역

1) 건축,음향

(단위 : 원)
구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비	1,059,457,614	1,319,959,624	증 260,502,010
도급액	957,497,990	1,218,000,000	증 260,502,010
관급자재액	101,959,624	101,959,624	-

(단위 : 원)
구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비	1,271,959,624	1,310,859,624	증 38,900,000
도급액	1,170,000,000	1,208,900,000	증 38,900,000
관급자재액	101,959,624	101,959,624	-

2)전기공사

(단위 : 원)
구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비	69,410,080	146,661,272	증 77,251,192
도급액	64,459,500	140,946,692	증 76,487,192
관급자재액	4,950,580	5,714,580	증 764,000

사업명

정선아리랑 강원도 무형문화재 제1호 지정 50주년 기념행사

담당자

문화관광과 신남이(☎560-2138)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정선아리랑의 강원도 무형문화재 제1호 지정 50주년을 맞이하여 대한민국 무형문화유산의 중심으로써 전통공연예술의 전승과 발전에 기여하고 아리랑의 도시 정선군의 무형문화의 도시로서 이미지 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 9. ~ 2021. 12. (행사일시 : 2021. 11. 16.)

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 애산로 51 아리랑센터

○ 규 모 : 50주년 기념행사 1회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	100	-	100	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	30	-	30	-	-
시군구비	70	-	70	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업추진 계획 수립  : 2021. 9. ~ 10.

○ 홍보물 제작 및 홍보 : 2021. 11. 3. ~ 11. 16.

○ 50주년 기념 공연    : 2021. 11. 16.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

지역문화국제교류 지원사업

담당자

문화관광과 신남이(☎560-2138)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우호 도시와 문화교류를 통한 국제교류 문화콘텐츠 개발 및 양국의 공통된 삶을 기반으로 한 지역 고유문화자원인 아리랑의 국제시장 진출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 9. ~ 12.

○ 위 치 : 강원 정선군 및 카자흐스탄 카탈라군 온라인 플랫폼

○ 규 모 : 온라인 문화 전시, 아리랑로드 영화 온라인 송출, 정선 및 카타흐스탄 예술단 영상공연 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	120	-	120	-	-
국 비	87	-	87	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	33	-	33	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업 기획 및 프로그램 계획                       : 2021. 6.

○ 사업 착수 및 프로그램 확정                       : 2021. 7. ~ 10.

○ 온라인 송출 프로그램 최종 점검 및 홍보           : 2021. 11.

○ 전시, 영화, 공연 송충 및 해외 대면 프로그램 진행  : 2021. 12.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

정선아리랑제 행사

담당자

문화관광과 신남이(☎560-2138)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유네스코 인류무형문화유산, 강원도 무형문화재 제1호인 정선아리랑의 역사와 문화를 이해하고 보존과 계승·발전의 중추적 역할 및 정선군 문화정체성을 브랜딩하고 아리랑을 통해 세계인이 함께 즐기는 글로벌 문화관광축제로서 한민족 정체성 확립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 12. (행사기간 : 2021. 10. 14. ~ 10. 17.)

○ 위 치 : 정선군 공설운동장 및 아리랑센터 일원

○ 규 모 : 6개 부문 33개 행사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,220백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,725	1,557	177	1,268	1,280
국 비	60	109	-	30	30
시 도 비	308	178	-	154	154
시군구비	2,357	1,270	177	1,084	1,096
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 축제 기본 계획 수립                              : 2021. 3. ~ 4.

○ 축제 대행사 선정 및 각종 계약 수립               : 2021. 5.

○ 축제 종합운영계획 수립                           : 2021. 6.

○ 축제 사전 준비, 축제 참가자 설명회, 홍보물 제작   : 2021. 8. ~ 9.

○ 제46회 정선아리랑제 취소 결정                    : 2021. 10.

□ 향후계획

○ 2022년 제47회 정선아리랑제 개최                  : 2022. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 코로나19 확산으로 인한 행사 취소

사업명

아리랑의 세계화 2022 정선아리랑

- 유네스코 인류무형문화유산 등재 10주년 기념행사 추진

담당자

문화관광과 신남이(☎560-2138)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아리랑의 유네스코 인류무형문화유산 등재 10주년을 맞이하여 대한민국 무형문화유산의 중심으로써 전통공연예술의 전승과 발전에 기여하고 아리랑의 도시 정선군의 무형문화의 도시로서의 이미지를 강화하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 12. (행사기간 : 12월 예정)

○ 위 치 : 정선군 정선읍 애산로 51 아리랑센터

○ 규 모 : 자료집 발간, 특별 기획전, 기념행사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	100	-	-	100	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	100	-	-	100	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 행사 기본 계획 수립                   : 2022. 4. ~ 6.

□ 향후계획

○ 관계자 회의 및 행사 세부 계획 확정    : 2022. 7. ~ 9.

○ 홍보물 제작 및 공연 홍보              : 2022. 10. ~ 11.

○ 행사 추진                             : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

제76회 전국육상경기선수권 대회

담당자

문화관광과 최형준(☎560-2547)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국 육상이 세계정상을 이룰 수 있는 체육 입국으로서, 국위선양에 이바지함과 동시에 정선 지역경기 활성화에 도움

○ 제75회 전국육상경기선수권 대회를 통한 한국 육상 발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.06.18. ~ 2021.07.23. (행사일시 : 2021.06.25.~06.28.)

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 애산로 60, 정선종합경기장

○ 규 모 : 전국 육상선수 2,500여명 참석

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 198백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	198	198	198	198	200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	198	198	198	198	200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업추진 계획 수립     : 2021.05.

○ 보조금 사업 교부신청   : 2021.06.

○ 대회 추진              : 2021.06.

○ 보조금 사업 정산       : 2021.08.

□ 향후계획

○ 계속 사업으로 사업추진시 원활한 대회 추진과 보조금 사업 검수ˑ정산

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

회장배 제20회 전국중고육상경기선수권 대회

담당자

문화관광과 최형준(☎560-2547)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국 육상이 세계정상을 이룰 수 있는 체육 입국으로서, 국위선양에 이바지함과 동시에 정선 지역경기 활성화에 도움

○ 회장배 제20회 전국육상경기선수권 대회를 통한 한국 육상 발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.06.18. ~ 2021.07.23. (행사일시 : 2021.07.16.~07.19.)

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 애산로 60, 정선종합경기장

○ 규 모 : 전국 육상선수 2,300여명 참석

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 198백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	198	198	51	198	200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	198	198	51	198	200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 사업추진 계획 수립                : 2021.06.

○ 보조금 사업 교부신청              : 2021.07.

○ 대회 추진(코로나로 인한 대회 취소) : 2021.07.

○ 보조금 사업 정산                  : 2021.08.

□ 향후계획

○ 계속 사업으로 사업추진시 원활한 대회 추진과 보조금 사업 검수ˑ정산

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

정선군민의 날 기념 군민체육대회

담당자

문화관광과 최형준(☎560-2547)

□ 사업목적 및 필요성

○ 6월 1일 군민의 날을 맞이하여 체육행사를 통한 군민의 화합과 결속을 다지고 이를 바탕으로 희망찬 아침, 평온한 저녁, 행복한 정선을 만드는데 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.05.01. ~ 2021.06.30. (행사일시 : 코로나로 인한 대회 취소)

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 애산로 60, 정선종합경기장

○ 규 모 : 코로나19 방역수칙 강화로 대회 취소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 125백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	125	125	0	125	130
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	125	125	0	125	130
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 코로나19 방역강화로 인한 대회 취소

□ 향후계획

○ 계속 사업으로 사업추진시 원활한 대회 추진과 보조금 사업 검수ˑ정산

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

올림픽유산 명소화 사업

담당자

문화관광과 강민성(☎560-2054)

□ 사업목적 및 필요성

○ 올림픽 유산인 가리왕산 케이블카(곤돌라)의 3년간 한시적 운영이 결정       됨에 따라, 가리왕산 케이블카 운영에 필요한 시설물(상부·하부 탑승장,       데크 등)을 설치 및 운영하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 4월 ~ 2024년 12월

○ 위 치 : 강원도 정선군 북평면 숙암리 산400-42 일원

○ 규 모

세부사업	당초사업비 (백만원)	변경사업비 (백만원)	사업량	주요 내용	비고
계	6,000	4,110
기본 및 실시설계용역	1,000	380	1식	기본계획 수립 및 타당성 조사, 군관리계획 변경 용역 등
상부 데크로드 설치공사	2,000	1,110	2,400㎡	생태학습장, 생태탐방로드 조성	착공 5.2.
상부 탑승장 증설공사	1,635	1,800	지상 2층 650㎡	주민 대피시설 및 전망대, 무방류 내부순환식 화장실	착공 4.15.
가리왕산 케이블카 전시공간 및 매표소 리모델링 공사	1,000	0		신규사업으로 전환 - 정선 알파인경기장 보수사업
하부 탑승장 증설공사	300	755	지상 1층 326㎡	눈·비 가림 기능 보강	착공 4.15.
국유림 사용 임차료	65	65		국유림 사용 임차료 65백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,110백만원(2022년 명시이월)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,110	-	2,520	1,590	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,110	-	2,520	1,590	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 정선알파인경기장 곤돌라 3년 한시운영결정    : 2021. 06. 11.

○ 국유림 사용 허가 등 인허가 협의             : 2021. 06. ~

○ 환경영향평가 변경협의 승인(원주지방환경청)   : 2021. 09. 29.

○ 보전산지 지정(산림청 숙암리 산400-42번지)    : 2021. 12. 17.

○ 군관리계획(변경)협의 승인(동부지방산림청)    : 2021. 12. 24.

○ 정선 알파인경기장 행정재산 사용허가(강원도)  : 2021. 12. 29.

○ 시설물 위수탁협약(정선군시설관리공단)　　　  : 2022. 01. 01.

○ 군관리계획(변경)결정                         : 2022. 01. 14.

○ 개발행위 허가(산지일시사용허가 및 신고)      : 2022. 03. 24.

○ 국유림 사용허가(예고 및 허가서 정본교부)     : 2022. 04. 07.

○ 주요시설 공사 착공 및 추진                  : 2022. 04. ~

※ 공사를 완료하고, 시험운전(한국교통안전공단 승인)후 개장 예정

□ 향후계획

○ 2022년 하반기 중 케이블카 운영(2024년까지)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 올림픽유산 명소화 사업

구 분	당 초(투자심사)	변경 후	증 감	비 고
총 사업비	6,000백만원	4,110백만원	△1,890백만원

※ 올림픽유산 명소화 사업 예산 중 1,890백만원을 정선알파인경기장 시설보수 사업으로 별도 편성

사업명

정선군 생활폐기물 매립시설 설치사업

담당자

환경과 박충인(☎560-2359)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군 생활폐기물 처리시설의 용량 부족 및 노후화로 인한 장기적이고       안정적인 처리를 위한 매립시설 현대화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024(4년)

○ 위 치 : 선정 진행중

○ 규 모 : 매립시설 95,513㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,916백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,916	20	20	647	10,249
국 비	3,275	6	6	194	3,075
시 도 비	2,292	4	4	136	2,152
시군구비	5,349	10	10	317	5,022
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 타당성 및 기본계획 연구용역 : `19. 11월

○ 생활폐기물 처리시설 설치사업 입지 선정 공모 1~3차 : `19. 11월 ~ `20, 8월

○ 생활폐기물 처리시설 입지 타당성 용역 : `21. 5월 ~ `21. 7월

○ 생활폐기물 처리시설 설치사업 입지 선정 공모 4차   : `22. 2월 ~ `22. 3월

○ 입지선정 공모 신청서 검토 및 부적합 통보          : `22. 5월

□ 향후계획

○ 입지선정 : `22. 8월 ~9월

○ 총사업비 재원 협의 및 각종 행정절차 이행 : `22. 9월 ~ `23. 6월

○ 공사 진행 및 시운전                      : `23. 7월 ~ `24. 12월

사업명

정선군 생활폐기물 소각시설 설치사업

담당자

환경과 박충인(☎560-2359)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군 생활폐기물 처리시설의 용량 부족 및 노후화로 인한 장기적이고       안정적인 처리를 위한 소각시설 현대화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024(4년)

○ 위 치 : 선정 진행중

○ 규 모 : 소각 36톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,324백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,324	0	0	1,000	17,324
국 비	5,497	0	0	300	5,197
시 도 비	3,848	0	0	210	3,638
시군구비	8,979	0	0	490	8,489
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 타당성 및 기본계획 연구용역 : `19. 11월

○ 생활폐기물 처리시설 설치사업 입지 선정 공모 1~3차 : `19. 11월 ~ `20, 8월

○ 생활폐기물 처리시설 입지 타당성 용역 : `21. 5월 ~ `21. 7월

○ 생활폐기물 처리시설 설치사업 입지 선정 공모 4차   : `22. 2월 ~ `22. 3월

○ 입지선정 공모 신청서 검토 및 부적합 통보          : `22. 5월

□ 향후계획

○ 입지선정 : `22. 8월 ~9월

○ 총사업비 재원 협의 및 각종 행정절차 이행 : `22. 9월 ~ `23. 6월

○ 공사 진행 및 시운전                      : `23. 7월 ~ `24. 12월

사업명

정선군 목재문화체험장 조성

담당자

산림과 신경환(☎560-2252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목재 문화 체험·학습을 통해 목재에 대한 우수성을 홍보하여 목재 이용의       잠재 수요를 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ∼ 2021 (4년)

○ 위 치 : 정선군 정선읍 광하리 16번지 일원(모평문화공원 내)

○ 규 모 : A=25,025㎡ (연면적 A=1,410㎡, 지하 1층 지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,188백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,188	1,481	4,707
국 비	1,800	859	941
시 도 비	2,600	183	2,417
시군구비	1,788	439	1,349
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○「목재문화체험장 관리 및 운영 조례」제정: 2021. 10. 25.

○ 목재문화체험장 조성사업 완료: 2021. 12. 22.

□ 향후계획

○ 목재문화체험장 운영 : 연중 상시/목재교육전문가 배치 및 프로그램 운영

○ 목재문화체험장 위탁운영: 위수탁 계약체결(정선군 ↔ 시설관리공단)

□ 사업변경 내역

○ 강원도 투자심사결과(당초)/사업완료(변경)

- 총사업비: (당초) 5,500백만원 ⇨ (변경) 6,188백만원

- 사업기간: (당초) 2018년~2020년 ⇨ (변경) 2018년 ~2021년

사업명

고한읍 고한8리 20리 주차타워 조성사업

담당자

안전과 문진희(☎560-2512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고한읍 고한8리 20리 인구 밀집지역의 주차타워 조성으로 주차난 해소

및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

○ 위 치 : 정선군 고한읍 고한리 63-40

○ 규 모 : 연면적 2,948.44㎡(지상3층), 건축면적 1,474.22㎡

철근콘크리트조, 주차대수 136대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,500	167	701	4,632
국 비	2,000	61	255	1,684
시 도 비	1,050	32	134	884
시군구비	2,450	74	312	2,064
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 생활SOC 수요 조사 제출                        : ‘19. 02월

○ 주차타워 조성 타당성 조사 용역                 : ‘19. 07월

○ 지방재정 투자 심사                             : ‘19. 11월

○ 주차타워 조성부지 지반조사 용역                : ‘19. 12월

○ 기본 및 실시설계용역                           : ‘21. 04월

○ 일상감사 및 계약심사                           : ‘21. 08월

○ 공사 착공                                      : ’21. 10월

□ 향후계획

○ 공사 준공                                      : ’22. 12월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

고한읍 고한12리 주차타워 조성사업

담당자

안전과 문진희(☎560-2512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고한읍 고한12리 인구 밀집지역의 주차타워 조성으로 주차난 해소

및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2023년(2년)

○ 위 치 : 정선군 고한읍 고한리 120-5번지 일원

○ 규 모 : 연면적6,972㎡(지상3층), 건축면적 2,991㎡

철근콘크리트조, 주차대수 200대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,200	0	0	1,400	5,800
국 비	700			700
시 도 비	3,980			210	3,770
시군구비	2,520			490	2,030
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 주차타워 조성 타당성 조사 용역                 : ‘20. 06월

○ 지방재정 투자 심사(도)                          : ‘21. 03월

○ 주차타워 조성부지 지반조사 용역                : ‘21. 11월

○ 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 도 계약심사   : ‘22. 05월

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역 제안 공모                 : ’22. 08월

○ 공사 입찰공고 및 계약 체결                     : ’23. 03월

○ 공사 착공                                      : ’23. 04월

○ 공사 준공                                      : ’23. 12월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

군도7호(사북~직전) 도로개설

담당자

건설과 전찬우(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 접근도로 개선으로 지역발전 및 경기 활성화 견인, 주거형지구단위계획 구역 개발촉진으로 균형발전 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2022년

○ 위 치 : 강원도 정선군 사북읍 사북리 348번지 ~ 직전리 521-1번지 일원

○ 규 모 : 도로 L=1.73km(터널 L=314m) B=8.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,000	12,128	2,777	3,095	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	18,000	12,128	2,777	3,095	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 기본 및 실시설계	: 17년 ~ 18년

○ 사업착공	: 19. 5월

○ 터널굴착 및 라이닝 완료	: 21. 12월

□ 향후계획

○ 도로 보조기층 포설	: 22. 7월

○ 도로 안전시설 등 부대시설 공사	: 22. 8월

○ 사업준공	: 22. 9월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 동절기 공사중지, 강우일수, 관급자재(철근 등) 수급지연, 터널굴착공법 변경에 따른 공사기간 변경(당초 준공 : 22. 7월 → 변경 22. 9월)

○ 사업추진 중 공사 및 건설사업관리 용역 변경사항 발생에 따른 공사금액 변경(당초 : 16,000백만원 → 변경 18,000백만원)

사업명

군도6호(가수리) 상습침수도로 개선

담당자

건설과 전찬우(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매년 집중호우시 침수로 인한 상습 교통두절 및 고립구역 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 가수리 193번지 일원

○ 규 모 : 교량 1개소 L=90m, 접속도로 L=280m B=8.0m ~ 9.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,600	1,807	1,173	1,620	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	150	150	-	-	-
시군구비	4,450	1,657	1,173	1,620	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 실시설계	: 19. 11월

○ 사업착공	: 20. 3월

○ 거더거치 완료	: 22. 5월

□ 향후계획

○ 거더슬라브 타설	: 22. 7월

○ 접속도로 도로 추진	: 22. 8월

○ 사업준공	: 22. 9월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 동절기 공사중지, 강우일수, 관급자재(철근 등) 수급지연 등에 따른 공사기간 변경(당초 준공 : 22. 6월 → 변경 22. 9월)

○ 사업추진 중 공사 추진사항 변경 발생에 따른 공사금액 변경

(당초 : 4,000백만원 → 변경 4,600백만원)

사업명

임계면 다목적 복합광장 인도교 설치

담당자

건설과 전찬우(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 임계면 시가지와 장찬성(송계산성)의 접근성 개선으로 탐방객 유입에 따른 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2021년

○ 위 치 : 강원도 정선군 임계면 송계리 786-6번지 일원

○ 규 모 : 인도교 L=100m B=4.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	2,129	871	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	200	200	-	-	-
시군구비	2,800	1,929	871	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계	: 19. 12월

○ 사업착공	: 20. 1월

○ 거더거치 완료	: 20. 10월

○ 사업준공	: 21. 5월

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업추진 중 공사 추진사항 변경 발생에 따른 공사금액 변경

(당초 : 2,500백만원 → 변경 3,000백만원)

사업명

정선읍 신도로망 구축사업

담당자

건설과 전찬우(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정선읍 행정·사업 중심지와 문화관광 중심지와의 접근성 향상을 통한 지역 균형발전.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2025년

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 봉양리 114-4번지 ~ 535-8애산리 번지 일원

○ 규 모 : 도로 L=684m(교량 L=475m), 접속도로 207m, B=14~14.8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	49,500	1,260	3,446	7,000	37,794
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	49,500	1,260	3,446	7,000	37,794
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본 및 실시설계	: 21. 10년

○ 사업착공	: 21. 12월

□ 향후계획

○ 교대, 교각 지하 기초 추진	: 22년 ~ 23년

○ 교대, 교각 지상부 추진	: 23년

○ 교량 상부공 추진	: 24년 ~25년

○ 접속도로 추진 및 사업준공	: 25. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

사북 도시재생 뉴딜사업

담당자

도시과 김종범(☎560-2955)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공동이용시설과 생활편의시설 공급 등 생활 밀착형 주거환경 개선을 통한       도심 활성화 및 주민공동체 회복 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

○ 위 치 : 정선군 사북읍 사북리 313-7 일원(사북7·10리 / 49.534㎡)

○ 규 모 : 3개 분야 9개 세부사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,290백만원(국비 4,500 도비 450 군비 6,190 자부담 150)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,290	7,769	2,797	724	-
국 비	4,500	3,650	850	-	-
시 도 비	450	420	-	30	-
시군구비	6,190	3,699	1,797	694	-
지 방 채
민간자본
기 타	150	-	150	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 도시재생 뉴딜 공모사업 최종 선정	: 2018.  8월

○ 실행계획 승인(국토교통부)	: 2019.  9월

○ 실시설계용역 완료	: 2020.  6월

○ 강원도 계약심사 의뢰	: 2020.  7월

○ 시설공사 계약 및 발주(강원도개발공사)	: 2020.  8월

○ 시설공사 착공	: 2020. 10월

○ 실행계획 변경	: 2021. 10월

○ 시설공사 준공	: 2021. 12월

○ 커뮤니티센터 관리이관(사북읍) 및 운영	: 2022.  3월

□ 향후계획

○ 집수리 및 S/W 사업 마무리	: 2022. 12월

- 창업육성 컨설팅, 마을협동조합 시범 운영 등

□ 사업변경 내역

변경 내역	당초	변경	변 경 사 유
사업기간 변경 (1년 연장)	2019년~2021년	2019년~2022년	세부사업(집수리) 추가수요 및 SW사업 추진을 위한 기간 연장

사업명

고한 소1-21호(고토일) 군계획시설 개설

담당자

도시과 이정혁(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고한14리 고토일 일원 도로 확포장을 통한 주민통행불편 해소와 도시기반       시설 확충으로 주민 정주여건 개선 및 지역균형발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년

○ 위 치 : 고한읍 고한리 169-1번지 ~ 산 55-7번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=700m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,500	50	-	50	3,400
국 비
시 도 비
시군구비	3,500	50	-	50	3,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : - %)

○ 사전검토용역	: 2019. 8월 ~ 10월

○ 주민설명회	: 2020. 2월

○ 보상협의 주민의견 수렴	: 2020. 10월 ~ 2021. 6월

○ 실시설계용역 착수	: 2021. 10월

□ 향후계획

○ 감정평가 및 손실보상 협의	: 2023. 1월 ~ 7월

○ 계약심사 및 공사발주	: 2023. 8월

○ 공사추진	: 2023. 9월 ~ 2024. 6월

사업명

고한 소3-11호(상갈래) 군계획시설 개설

담당자

도시과 이정혁(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고한읍 상갈래 일원 도시계획시설(도로) 미개설로 인한 주민생활불편이       지속되고, 주택 밀집지역 화재 발생시 소방차 진입이 어려움에 따라 도로       개설을 통하여 주민의 생명과 재산을 보호하고 주민정주여건을 개선하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 고한읍 고한리 274-18번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=250m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,500	1,000	1,158	1,342	-
국 비
시 도 비
시군구비	3,500	1,000	1,158	1,342	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 실시설계용역 추진	: 2019. 1월 ~ 11월

○ 주민설명회 개최	: 2019. 8월

○ 감정평가	: 2019. 11월

○ 보상협의	: 2020. 1월 ~

○ 석면조사 및 지정폐기물철거	: 2021. 8월 ~ 12월

□ 향후계획

○ 보상협의 및 지장물 철거공사 완료	: 2022. 3월 ~ 8월

○ 본공사(도로개설) 추진	: 2022. 9월 ~ 12월

사업명

군도7호(사북~직전) 접속도로 개설

담당자

도시과 이정혁(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사북 ~ 직전간 군도7호 개통예정에 따른 사북중심시가지 유입의 차량증가가       예상됨에 따라, 시가지 진입로 확포장을 통한 접근성을 향상시키고 보다       안전하고 편리한 교통인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 사북읍 사북리 307-1번지 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=140m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,900	-	1,654	3,246	-
국 비
시 도 비
시군구비	4,900	-	1,654	3,246	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 실시설계용역	: 2020. 10월 ~ 2021. 8월

○ 감정평가	: 2021. 2월

○ 보상협의	: 2021. 2월 ~ 12월

○ 공사착공	: 2021. 12월

□ 향후계획

○ 공사추진	: 2022. 3월 ~ 12월

사업명

남면 철도연립 부지(건물) 매입

담당자

도시과 김호섭(☎560-2472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 남면 철도연립이 주변 경관 및 주거환경을 저해, 주민생활 불편 해소 및 쾌적한 환경 조성 차원에서 철도연립 매입 및 철거

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년

○ 위 치 : 남면 무릉리 614-2번지 일원

○ 규 모 : 아파트 1동(40세대/4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,200	-	-	4,200	-
국 비
시 도 비
시군구비
지 방 채	4,200	-	-	4,200	-
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 철거 요청 (남면 번영회 ⇨ 철도공사)	: 2018. 12월

○ 철도공사 면담 (1~4차)	: 2021.2~5월

○ 철도연립 매입 공문 발송(정선군⇨대전·충청본부)	: 2021.  4월

○ 한국철도공사에 시행계획 고시문 제출	: 2022.  2월

○ 대상토지 및 건물 매입 감정평가 용역	: 2022.  3월

○ 토지(9필지/3,405㎡) 및 건물 보상(3,495백만원) 협의	: 2022.  6월

□ 향후계획

○ 건축물철거 설계용역 발주	: 2022. 11월

사업명

정선군립병원 병동 증축공사

담당자

보건소 오민영(☎560-2274)

□ 사업목적 및 필요성

○ 열악한 의료취약지역의 거점의료기관으로 역할수행 및 지역주민 의료

욕구 충종을 통해 지역건강 수준 향상을 위한 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023

○ 위 치 : 사북읍 지장천로 727

○ 규 모 : 본관동 증축(A=3,392.83㎡/지하1층~지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	14,000		336	8,064	5,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 군립병원 및 부속시설 신축 설계용역 착수

○ 사전행정절차(강원도기술심의) 및 설계용역 완료

□ 향후계획

○ 일상감사 및 계약심사

○ 정선군립병원 증축공사 계약 및 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.